АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-11185/2023

г. Ярославль

23 апреля 2024 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Коншиной А.Д.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Занимонцем В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью "Русстройком" (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

к муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города  Ярославля при расчете новой цены муниципального контракта от 24.07.2021 № 175-21 на  выполнение работ по организации строительства общеобразовательной организации на  1100 учащихся 

<

...> учитывать  значения показателей ФИО1, ФИО2, Цнмцк с учетом индекса-дефлятора Ккор - 1,2513;  

об обязании заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от  24.07.2021 № 175-21 на выполнение работ по организации строительства  общеобразовательной организации на 1100 учащихся 

<

...> с применением коэффициента корректировки цены контракта (Ккор)  значением 1,2513,  

Третье лицо: государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр  конкурентной политики и мониторинга» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  Государственное автономное учреждение Ярославской области «Яргосстройэкспертиза»,  

Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Муниципальное казенное учреждение "Агентство по строительству" города  Ярославля при расчете новой цены муниципального контракта от 24.07.2021 № 175-21 на  выполнение работ по организации строительства общеобразовательной организации на 1100  учащихся 

<

...> учитывать следующие  значения показателей ФИО1, ФИО2, Цнмцк с учетом индекса-дефлятора, Ккор: ФИО1 -  1 061 006 134,15 руб., ФИО2 - 793 616,007 тыс.руб., Цнмцк с учетом индекса-дефлятора845 788,33 тыс. руб., Ккор-1,2513.  

Урегулировать разногласия между обществом с ограниченной ответственностью  "Русстройком" и муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству"  города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при заключении  дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 24.07.2021 № 175-21 на  выполнение работ по организации строительства общеобразовательной организации на 1100  

учащихся 

<

...> с учетом удорожания цены  контракта с применением коэффициента корректировки цены контракта  (Ккор),учитывающего рост стоимости работ, вызванный существенным возрастанием  стоимости строительных ресурсов, который невозможно было предвидеть при заключении  контракта значением 1,2513 на следующих условиях:  

«1. В соответствии с положениями п. 1 ст.450 Гражданского кодекса Российской  Федерации, ч.65.1. ст.112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в  некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2021 г. № 500/пр «О  внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого  являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства,  утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N841/пp», п.16.1. муниципального контракта от  24.07.2021 г. № 175-21 на выполнение работ по организации строительства  общеобразовательной организации на 1100 учащихся 

<

...> (далее по тексту - Контракт) Стороны приняли решение изменить цену  контракта в связи с возникновением независящих от Сторон контракта обстоятельств,  влекущих невозможность его исполнения, а именно существенным увеличением цен на  строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении  контракта, а также с учетом дополнительного соглашения от 05.12.2022 № 9 к Контракту,  дополнительного соглашения от 21.02.2023 № 10 к Контракту, дополнительного соглашения  от 01.06.2023 № 11 к Контракту, дополнительного соглашения от 24.07.2023 № 12 к  Контракту, дополнительного соглашения от 01.11.2023 № 13 к Контракту, дополнительного  соглашения от 02.11.2023 № 14 к Контракту.  

2. С учетом пункта 1 настоящего дополнительного соглашения Стороны договорились,  что сумма увеличения цены вышеуказанного контракта составила 227 060 553 (Двести  двадцать семь миллионов шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 46 копеек с НДС  20%, в том числе в связи с удорожанием (с применением коэффициента корректировки цены  Контракта (Ккор) 1,2513) на сумму 209 571 058 (Двести девять миллионов пятьсот семьдесят  одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 88 копеек с НДС 20%. Расчет новой цены контракта  представлен в Приложение № 1 к настоящему соглашению и является его неотъемлемой  частью.  

3. С учетом пункта 1 настоящего дополнительного соглашения Стороны договорились  изложить пункт 6.1. раздела 6. «Цена контракта и порядок оплаты» контракта в новой  редакции:  

«6.1. Цена контракта установлена в соответствии с результатом электронного конкурса на  выполнение работ по организации строительства общеобразовательной организации на 1100  учащихся 

<

...> (Протокол №  0171200001921000819 от 18.06.2021г.), принимая во внимание положения дополнительного  соглашения к настоящему Контракту, и составляет 1 061 006 134 (Один миллиард  шестьдесят один миллион шесть тысяч сто тридцать четыре) рубля 15 копеек с НДС 20%.»  

4. Изменение существенных условий муниципального контракта от 24.07.2021 г.   № 175-21 осуществляется с соблюдением положений ст.95 и ст.96 Федерального закона от  05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

5. С учетом пункта 1 настоящего дополнительного соглашения Стороны договорились  изложить Приложение № 7 «Перечень видов и объемов работ по строительству, из числа  видов работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570,  которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за  исключением дочерних обществ Подрядчика, к исполнению своих обязательств по  

муниципальному контракту» в новой редакции (Приложение № 2 к дополнительному  соглашению).  

6. Подписанием настоящего дополнительного соглашения к контракту Стороны  отмечают, что данное изменение цены контракта не приведет к увеличению цены контракта  более чем на 30 % (тридцать процентов).  

7. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 8 «Смета контракта» к  контракту в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему дополнительному  соглашению).  

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента вступления в  законную силу итогового судебного акта по делу № А82-11185/2023.  

9. С момента вступления в силу другие положения контракта от 24.07.2021 г. № 175-21  действуют в части, не противоречащей настоящему дополнительному соглашению.  

10. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта  от 24.07.2021 г. № 175-21. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим  дополнительным соглашением, Стороны руководствуются вышеуказанным муниципальным  контрактом.  

11. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

Приложение № 1 - Расчет новой цены контракта. 

Приложение № 2 - Перечень видов и объемов работ по строительству, из числа видов  работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570, которые  Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением  дочерних обществ Подрядчика, к исполнению своих обязательств по муниципальному  контракту.  

Приложение № 3 - Смета контракта.» 

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Агентство по строительству"  города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Русстройком" (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  12 000 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на  бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,   через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья А.Д. Коншина