16_1218080  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Мурманск Дело № А42-2976/2018 «27» февраля 2019 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области 

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Мурманскпромстрой» в срок до 30 мая 2019 года  устранить выявленные недостатки выполненной работы по государственному контракту   № 5 от 16.08.2016, а именно: произвести следующие работы в жилом доме № 34 по ул.  Пронина в г. Кандалакша:  

- в квартире № 5 - закрепить наружные откосы окна в большой комнате; 

- в квартире № 7 - провести косметический ремонт потолка (площадь 6,3 кв.м.) в  коридоре, качественно произвести затирку швов напольной плитки в ванной (площадь 3,6  кв.м.);  

- в квартире № 18 – устранить в помещении кухни с левой стороны окна зазор между  откосом окна и стеной, выровнять полы на кухне и во всех комнатах;  

- в квартире № 30 – произвести регулировку окна на лоджии; 

- в квартире № 38 – произвести в маленькой комнате и на кухне демонтаж оконных  откосов, устранить причины продувания и установить новые откосы;  

- в квартире № 39 – устранить причину течи кровли над помещением туалета,  выполнить косметический ремонт потолка (площадь 2 кв.м.) и стен в туалете (площадь 13  кв.м.);  

- в квартире № 40 – устранить причину протечки в левом верхнем углу на кухне,  сделать косметический ремонт на кухне (стена площадью 19 кв.м., потолок 9,3 кв.м.);  

- в квартире № 42 – произвести заделку трещины под окном на кухне и последующую  покраску стены (площадь 19 кв.м.);  

- в квартире № 47 – произвести замену нижнего замка входной двери, заделать  трещины на стене (площадь 19 кв.м.) и на потолке (площадь 8,5 кв.м.) на кухне с  последующей покраской, отрегулировать дверь в санузле;  

- в квартире № 51 – произвести регулировку окна в комнате, заделать трещины слева  и справа от окна на кухне с последующей покраской (площадь 19 кв.м.);  

- в квартире № 60 – произвести косметический ремонт потолка в туалете (площадь 2  кв.м.), косметический ремонт стен (площадь 17 кв.м.) и потолка (площадь 2.6 кв.м.) в  ванной, косметический ремонт на кухне (стена площадью 26 кв.м., потолок площадь 8.1  кв.м.);  

- в квартире № 62 – произвести регулировку окна на лоджии; 

- в квартире № 77 – устранить причину протечки на стенах в ванной в районе  вентиляции и на стене смежной с общим коридором и произвести косметический ремонт  (площадь 20 кв.м.);  

- в квартире № 79 – устранить причину протечки кровли, выполнить косметический  ремонт в туалете (потолок - площадь 2 кв.м., стена - площадь 13 кв.м.), выполнить  косметический ремонт на потолке (площадь 8 кв.м.) в кухне;  

- в квартире № 80 – устранить следы протечки, сделать косметический ремонт в  прихожей на потолке (площадь 4,8 кв.м.), сделать косметический ремонт в ванной (стена - площадь 20 кв.м., потолок - площадь 3,7 кв.м.).  

Взыскать с акционерного общества «Мурманскпромстрой» в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении месяца со дня  принятия.  

Кассационная жалоба может быть подана в течение двух месяцев с момента  вступления в силу решения суда.  

Судья Е.С. Камалова