АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Дело № А27-8234/2023

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

12 октября 2023 года                                                                                       Город Кемерово                                                                                  

Резолютивная часть решения объявлена 5 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Рудопроходческое управление», Кемеровская область - Кузбасс, р-н Новокузнецкий, с. Костенково, ОГРН 

<

***> 

к обществу с ограниченной ответственностью «Разрез «Березовский», Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Прокопьевский, п. Калачево, ОГРН 

<

***> 

о взыскании 17 223,81 руб. неустойки (с учетом ходатайства от 5.10.2023, принятого судом к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ) 

от ответчика – представитель по доверенности от 30.11.2021 ФИО2

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Рудопроходческое управление» обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Разрез «Березовский» о взыскании 17 223,81 руб. неустойки.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком сроков оплаты выполненных работ в рамках договора №146/22 от 1.06.2022.

Представитель ответчика иск оспорил, представив контррасчет на сумму 8472,29 рублей.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства,  суд установил следующее.

1.06.2022 г. между ООО «Разрез «Березовский» (заказчик) и ООО «Рудопроходческое управление» (подрядчик) заключен договор подряда от. № 146/22.

В соответствии с условиями указанного договора ООО «РПО» обязуется выполнить своими силами из материалов, предоставленных ООО «Разрез «Березовский» работы по объекту: «Устройство периметрального ограждения комплекса антитеррористической защищенности ТЭК «Разрез «Березовский».

За период с 1.06.2022 г. по 10.02.2023 г. ООО «Рудопроходческое управление» выполнило работы на общую сумму 5 024 410,06 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы КС- 2 от 30.09.2022 г. №1 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 г. №1 на сумму 818 458,80 рублей, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 31.10.2022 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2022 г. № 2 на сумму 1 020 022,80 рублей, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.11.2022 г. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2022 г. № 3 на сумму 1 306 828, 80 рублей, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 27.12.2022 №4 на сумму 611 847,60 руб., актом о приемке выполненных работ от 30.12.2022 г. № 1 на сумму 459 465 руб., 60 коп. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.12.2022 г. № 4 на сумму 1 071 313 руб. 20 коп., актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 6.02.2023 №5 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 06.02.2023 г. № 5 на сумму 606 340 руб., 08 коп., актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.02.2023 г. №1 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 10.02.2023 №6 на сумму 201 446,40 рублей.

В соответствии с условиями договора подряда оплата за фактически выполненные работы производится в размере 80% от стоимости выполненных работ в течение 60 календарных дней после подписания справки по форме М29, КС-2, КС-3 и выставления счета-фактуры. Оставшаяся сумма 20% (отложенные платежи) оплачиваются в течение 30 календарных дней после выполнения подрядчиком всех работ, предусмотренных договором подряда (пункт 4.2 договора от 1.06.2022).

В соответствии с п. 12.7 договора подряда Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплату договорной неустойки за пользование чужими денежными средствами в размере 0,02% в день от суммы просроченной по договору задолженности.

ООО «Разрез «Березовский» оплатило выполненные работы, что подтверждается платежными поручениями от 31.10.2022 г. № 12600 на сумму 654 767 руб., 04 коп., от 22.12.2022 г. № 14981 на сумму 946 971 руб., 65 коп. от 31.01.2023 г. № 1057 на сумму 1 071 313 руб., 20 коп., от 16.05.2023 № 5710 на сумму 604 633,96 рублей, от 5.05.2023 №5060 на сумму 1 744 571,71 рублей, соглашением о проведении зачета от 24.04.2023 на сумму 2152,52 рублей.

Сумма неустойки по отложенным платежам по актам №1 от 30.09.2022, №2 от 31.10.2022, №3 от 30.11.2022, №4 от 27.12.2022 и №1 от 30.12.2022 (справка КС-3 от 30.12.2022 №4), а также по основной сумме (80% от акта) по актам №4 от 27.12.2022 и №1 от 30.12.2022 по состоянию на 3.04.2023 по расчету истца составила 17 223 руб., 81 коп.

Поскольку обязательства по оплате ООО «Разрез «Березовский» своевременно не исполнены, ООО «Рудопроходческое управление» после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истец предъявляет требования о взыскании суммы неустойки в размере 17 223 руб., 81 коп.:

С 30.11.2022 по 3.04.2023 на сумму 163 691,76 рублей по акту №1 от 30.09.2022

С 30.12.2022 по 3.04.2023 на сумму 204 004,56 рублей по акту №2 от 31.10.2022

С 30.01.2023 по 3.04.2023 на сумму 261 365,76 рублей по акту №3 от 30.11.2022

С 1.03.2023 по 3.04.2023 на сумму 914 509,63 рублей по акту №4 от 27.12.2022 и №1 от 30.12.2022 (справка КС-3 от 30.12.2022 №4)

Проверив расчет неустойки, суд полагает, что истцом не учтены положения пункта 4.2 договора в части оплаты отложенных платежей, положения статьи 193 ГК РФ, в связи с чем  суд производит расчет суммы неустойки следующим образом:

С 14.03.2023 по 3.04.2023 на сумму 163 691,76 рублей по акту №1 от 30.09.2022

С 14.03.2023 по 3.04.2023 на сумму 204 004,56 рублей по акту №2 от 31.10.2022

С 14.03.2023 по 3.04.2023 на сумму 261 365,76 рублей по акту №3 от 30.11.2022

С 1.03.2023 по 3.04.2023 на сумму 700 246,99 рублей по акту №4 от 27.12.2022 и №1 от 30.12.2022 (справка КС-3 от 30.12.2022 №4)

С 14.03.2023 по 3.04.2023 на сумму 214 262,64 рублей по акту №4 от 27.12.2022 и №1 от 30.12.2022 (справка КС-3 от 30.12.2022 №4).

С учетом изложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению, в размере 8303,65 рублей по расчету суда.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрез «Березовский», ОГРН 

<

***> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рудопроходческое управление», ОГРН 

<

***>, 8 303,65 рублей неустойки. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

 

Судья                                                                       К.В. Козина