51_12847350 

Арбитражный суд Московской области 

 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-42115/22

13 сентября 2022 года

г.Москва

  Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,  

при ведении протокола секретарем А. Н. Руш рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-42115/22 по исковому заявлению 

ООО "ВТМ дорпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФКУ  "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о внесении  изменений в Государственный контракт от 25.11.2019г. № 132/19-ОИ-ПИР,  

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.  

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

Внести следующие изменения в Государственный контракт от 25.11.2019 № 132/19- 

ОИ-ПИР: 

1. Пункт 4.3 Контракта, изложить в следующей редакции:  

«4.3. Доведение лимитов бюджетных обязательств на выполняемые Подрядчиком  

работы по годам осуществляется в следующем порядке: - 2019 г. - 9 900 000,00 руб. с учетом НДС; - 2020 г. - 118 800 000,00 руб. с учетом НДС; - 2021 г. - 00,00 руб. с учетом НДС; - 2022 г. - 00,00 руб. с учетом НДС; - 2023 г. - 213 894 846,00 руб. с учетом НДС». 

2. Пункт 6.1. Контракта, изложить в следующей редакции:  «6.1. Сроки выполнения работ по Контракту:  

- начало работ по Контракту: «05» декабря 2019 года; 

- окончание работ по Контракту: «13» июня 2023 года.».  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов