АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-10793/2024

г.Чита

25 марта 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН  

1077536011937, ИНН 

<

***>) в срок до 31.08.2025 устранить выявленные  

недостатки работ по муниципальному контракту № 3ЭА-19 (реестровый номер  

контракта 3752401247919000003) от 03.06.2019 в частности: - провести работы по подготовке основания и укладке тротуарной плитки; 

- переустановить бордюрный камень в соответствии с требованиями типовой  

технологической карты; 

- провести переварку сварных швов для баннеров на сцене в соответствии с  

требованиями СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных  

конструкций; - провести работы по переустройству бетонного пола сцены; - провести работы по переустройству стелы «Триколор»; - провести замену 7 светильников. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН  

1077536011937, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  

пошлину в размере 50000 руб. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  

арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия через  

Арбитражный суд Забайкальского края. 

Судья М.И. Обухова