ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб-сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№09АП-57769/2023

Дело № А40-131659/23

г. Москва

10 октября 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Семёновой А. Б., рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Белстрой" на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2023 по делу № А40-131659/23, принятое в порядке упрощенного производства, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПСК Энергомонтаж" (107497, 

<

...>, комната 24;27;28, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.09.2017, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Белстрой" (129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, Звёздный б-р, д. 21, стр. 1, помещ./эт 1/4, ком./офис 32В/6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2014, ИНН: 

<

***>) о взыскании 760 000,00 руб., 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Энергомонтаж" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Белстрой" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по оплате работ по договору № 15-С от 06.10.2021 в размере 760 000 руб.

Решением от 11.08.2023 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит суд решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-131659/23-67-1075 отменить и принять по данному делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «ПСК Энергомонтаж» о взыскании с ООО «Белстрой» задолженности по договору от 06.10.2021 № 15-С в размере 760 000 рублей.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Отказывая в принятии к рассмотрению письменных пояснений к апелляционной жалобе, поданных через канцелярию апелляционного суда 13.09.2023 в 16:13, апелляционный суд учитывает, что применительно к ч. 1-3 статьи 229 АПК РФ, ст. 192, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) срок на подачу мотивированной апелляционной жалобы с учетом даты публикации решения (13.08.2023) истёк 01.09.2023. Следовательно, пояснения поданы по истечении срока на апелляционное обжалование. Кроме того, апелляционный суд учитывает, что доводы о нарушении сроков выполнения работ не исключают обязанности оплатить принятые работы, а со встречным требованием о взыскании неустойки или заявлением о проведении зачета в порядке ст. 410 ГК РФ ответчик в суд первой инстанции не обращался.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, установил следующее.

Как следует из материалов дела, 06.10.2021 между ООО «Белстрой» (далее - заказчик) и ООО «ПСК Энергомонтаж» (далее - подрядчик, исполнитель) заключен договор № 15-С на выполнение работ по монтажу тепловых пунктов АБК в части ТМ, теплоизоляция трубопроводов, ЭОМ, АТМ, и узел учета теплоэнергии и технологии футбольного поля в части ТМ, ЭОМ, АТМ, и узел учета теплоэнергии со сдачей в ПАО «МОЭК» для объекта: Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2 (государственное бюджетное учреждение ФСО «Юность Москвы» Москомспорта) по адресу: ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2, (государственное бюджетное учреждение ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) (далее - договор).

На основании п. 2.1 договора общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании протокола стоимости работ, согласованного между заказчиком и исполнителем, составляет 2 700 000 руб. рублей, в т.ч. НДС (20%) 450 000 руб. Согласно п. 2.2 договора оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. При этом заказчик производит оплату аванса по договору в размере 900 000 руб., в т.ч. НДС (20%) 150 000 руб., в течение 5 банковских дней с момента подписания договора. Окончательный расчет заказчик производит за выполненные работы по договору согласно представленным актам о приемке выполненных работ. (Форма № КС-2), и справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в двух экз., счету, счету-фактуре.

Согласно доводам иска ООО «ПСК Энергомонтаж» надлежащим образом выполнило работы и сдало их результат заказчику, что подтверждается подписанными заказчиком и подрядчиком актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 2 700 000 руб., в том числе: актом о приемке выполненных работ № 1 от 08.11.2021 по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.11.2021 по форме КС-3 на сумму 1 440 000 руб.; актом о приемке выполненных работ № 2 от 14.12.2021 по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 14.12.2021 по форме КС-3 на сумму 500 000 руб.; актом о приемке выполненных работ № 3 от 11.04.2022 по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 11.04.2022 по форме КС-3 на сумму 460 000 руб.; актом о приемке выполненных работ № 4 от 30.11.2022 по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.11.2022 по форме КС-3 на сумму 300 000 руб..

Заказчик перечислил на расчетный счет подрядчика денежные средства в размере 1 940 000 руб., а именно: 900 000 руб. в качестве аванса на выполнение работ по договору на основании платежного поручения № 44 от 06.10.2021; 540 000 руб. в качестве аванса на выполнение работ по договору на основании платежного поручения № 253 от 19.11.2021; 500 000 руб. в качестве оплаты выполненных работ по договору на основании платежного поручения № 171 от 24.12.2021.

Таким образом, размер основного долга заказчика за оплату фактически выполненных работ составил 760 000 рублей, из расчета: 2 700 000 руб. - 1 940 000 руб.

07.04.2023 ООО «ПСК Энергомонтаж» обратилось к ООО «Белстрой» с претензией исх. № 05/04/2023 от 07.04.2023, в которой потребовало оплатить задолженность по Договору в размере 760 000 руб. в срок до 14.04.2023. В соответствии с п. 4.2.3 договора ООО «Белстрой» обязано рассматривать все документы, переданные ООО «ПСК Энергомонтаж», в течении 7 дней со дня их получения. Претензия ООО «ПСК Энергомонтаж» исх. № 05/04/2023 от 07.04.2023 получена ООО «Белстрой» 17.04.2023, однако требование подрядчика об оплате выполненных работ добровольно не исполнено.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции руководствовался ст. 309, 310, 702, 740, 746, 753 ГК РФ, а также учел отсутствие мотивированных возражений со стороны ответчика.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчиком определение суда о принятии искового заявления ООО «ПСК Энергомонтаж» к производству получено не было, опровергается материалами дела. Согласно почтовому реестру суда (л.д. 39) определение направлено ответчику 19.06.2023 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, Звёздный б-р, д. 21, стр. 1, пом./эт. 1/4, ком./офис 32В/6, который является юридическим адресом ответчика согласно сведениям ЕГРЮЛ. Как следует из отчета об отслеживании отправления с официального сайта Почты России (л.д. 40), отправление (РПО 14579184815944) получено ответчиком 10.07.2023.

Таким образом, с 10.07.2023 ответчик извещен о судебном процессе, при этом процессуальным правом на предъявление мотивированного отзыва на исковое заявление в срок до 01.08.2023 общество не воспользовалось, с процессуальными ходатайствами не обратилось. При таких обстоятельствах, оснований для отмены судебного акта не усматривается.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу                                  части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2023 по делу № А40-131659/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

Судья                                                 А. Б. Семёнова