АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

30 января 2025 года

Дело № А33-27008/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 января 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено 30 января 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бахрамовой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Емельяновская районная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании пени,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаенко О.А.,

установил:

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Емельяновская районная больница" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СИБПРОМСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании пени в размере 244 460,63 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств предусмотренных контрактом № Ф.2023.2726 от 31.03.2023.

Определением от 09.09.2024 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 31.10.2024 суд перешел к рассмотрению иска по общим правилам искового заявления.

Лица, участвующие в деле,  в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

31.03.2023 между краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Емельяновская районная больница» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой» (подрядчик) заключен контракт № Ф.2023.2726 на выполнение капитального ремонта здания Элитовской врачебной амбулатории КГБУЗ «Емельяновская РБ», расположенной по адресу: 

<

...>.

В соответствии с пунктом 1.1 подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по капитальному ремонту здания Элитовской врачебной амбулатории КГБУЗ «Емельяновская РБ», расположенной по адресу: 

<

...>, в соответствии с условиями контракта, в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к контракту), и техническим заданием (приложение № 2 к контракту, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

На основании пункта 2.1 цена контракта составляет 12 062 202,21 руб., в том числе НДС 20% составляет 2 010 367,04 руб.

В силу пункта 3.2 срок выполнения работ по контракту: начало – с момента заключения контракта; окончание – 01.10.2023.

Пунктом 11.4 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пеней.

Дополнительным соглашением от 18.08.2023 стороны предусмотрели изменение сроков выполнение работ: начало – с момента заключения контракта, окончание – 15.11.2023.

Сторонами без замечаний подписаны акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.11.2023 на сумму 12 062 202,21 руб., а также справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.11.2023 на сумму 12 062 202,20 руб.

Заказчик, ссылаясь на просрочку сроков выполнения работ, начислил пеню в сумме 244 460,63 руб. за период с 15.11.2023 по 22.12.2023.

В адрес подрядчика направлены претензии от 22.12.2023 № 682, от 02.05.2024 № 209 об оплате неустойки. Претензии оставлены без удовлетворения.

Ссылаясь на вышеизложенные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон возникли из муниципального контракта, являющегося по своей правовой природе договором подряда, и соответственно подлежит урегулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) в соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Частью 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ определено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В части 8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Пунктом 11.4 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пеней.

Обращаясь с требованием о взыскании с подрядчика 244 460,63 руб. неустойки, заказчик ссылался на допущенную подрядчиком просрочку выполнения работ.

Пунктом 3.2 контракта (в редакции дополнительного соглашения от 18.08.2023) установлены сроки начала и завершения выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.11.2023.

Актом о приемке выполненных работ на сумму 12 062 202,21 руб. № 1 от 23.11.2023, подтверждается, что работы сданы подрядчиком и приняты заказчиком 22.12.2023.

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности заказчиком факта просрочки подрядчиком срока исполнения обязательств по контракту, следовательно, обоснованности требования о взыскании неустойки.

Заказчиком представлен следующий расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств в период с 15.11.2023 по 22.12.2023:

12 062 202,21 (стоимость выполненных работ) х 38 дней (период с 15.11.2023 по 22.12.2023) х 1/300 (размер пени) х 16% (ставка ЦБ РФ) =  244 460,63 руб.

Проверив представленный заказчиком расчет неустойки, суд признал его неверным и несоответствующим фактическим обстоятельствам дела.

Срок окончания выполнения работ 15.11.2024.

Соответственно, просрочка в исполнении обязательства началась с 16.11.2024, с указанной даты правомерно начисление пени.

Таким образом, сумма пени за просрочку исполнения обязательств по контракту составила 238 027,46 руб., из расчета:

12 062 202,21 (стоимость выполненных работ) х 37 дней (период с 16.11.2023 по 22.12.2023) х 1/300 (размер пени) х 16% (ставка ЦБ РФ) =  238 027,46 руб.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в части требования о взыскании 238 027,46 руб. неустойки. Основания для удовлетворения искового заявления в остальной части отсутствуют.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Государственная пошлина за рассмотрение иска на сумму 244 460,63 руб. составляет 7 889 руб. Истцом при обращении в суд с исковым заявлением по платежному поручению № 003639 от 08.07.2024 на сумму 7 889 руб. уплачена государственная пошлина. Учитывая результат рассмотрения настоящего спора – частичное удовлетворение исковых требований на 97,37 %, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 681,52 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СИБПРОМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Емельяновская районная больница" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 238 027,46 руб. неустойки, 7 681,52 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.А. Бахрамова