АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-13430/2023

г. Архангельск

03 июня 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 03 июня 2024 года

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Волкова И.Н.

при ведении протокола секретарём судебного заседания Лысенко А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: Россия 163001, г.Архангельск, Архангельская область, ул.Суворова, дом 1)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Северо-западные районы" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> адрес: Россия 187342, г.Кировск, Ленинградская область, ул.Краснофлотская, дом 20, пом.17)

о взыскании 1 759 628 руб. 22 коп. (с учетом уточнения),

без участия в заседании представителей сторон,

установил:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич" (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Северо-западные районы" (далее – ответчик) о взыскании 50 000 руб., из них 40 000 руб. части неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по контракту № 0124200000622007738 от 02.02.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений реанимации ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е.Волосевич» по адресу: 163001, 

<

...> руб. части штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, в соответствии с ходатайством от 31.05.2024 заявил отказ от иска в части требования о взыскании неотработанного аванса в сумме 17 596 282 руб.; просил взыскать с ООО "Северо-западные районы" в пользу ГБУЗ Архангельской области "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич" 1 759 628 руб. 22 коп. штрафа, а также 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Уточнение исковых требований принято судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Истец просил рассмотреть дело без участия своего представителя.

Ответчик  отзыв на иск не представил.

Дело рассмотрено в соответствии с частью 3, 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как видно из материалов дела, по результатам электронного аукциона  между   ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» (далее - заказчик, учреждение) и ООО «Северо-западные районы» (далее - общество, подрядчик) заключен контракт от 02.02.2023 №0124200000622007738 (далее - контракт), согласно которому подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений реанимации ГБУЗ АО «ПГКБ» по адресу: 

<

...>. Срок выполнения установлен с даты заключения контракта в течение 180 календарных дней, т.е. до 03.06.2023.

Цена контракта определена в размере 35 192 564,34 рубля без НДС, является твердой. Источником финансирования являются средства бюджета Архангельской области (пункты 3.1 -3.4 контракта).

Пункт 4.1 контракта предусматривает авансовый платеж в размере 50 % от стоимости выполнения работ, предусмотренной контрактом, который перечислен подрядчику 26.04.2023 платежным поручением № 640517 в размере 17 596 282 руб. 

Как указал истец,  аванс подрядчиком не был отработан.

Поскольку спорный контракт не был исполнен подрядчиком, 05.06.2023 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта ввиду существенного нарушения исполнения обязательств подрядчиком.

В свою очередь заказчик (учреждение) для выполнения работ по неисполненному контракту от 02.02.2023 заключило замещающую сделку на выполнение работ по капитальному ремонту помещений реанимации ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич» по адресу: 

<

...>, с ООО «М-Сервис» от 25.08.2023 №25-08-2023.

Решением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-12399/2023 от 22.04.2024г. по иску Прокуратуры Архангельской области суд взыскал с ответчика в пользу ГБУЗ Архангельской области "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич" 12 935 015 руб. 20 коп. в возврат уплаченного аванса по спорному контракту ; также суд взыскал с ответчика в доход бюджета Архангельской области 9 378 398 руб. 13 коп. в возмещение убытков. Решение суда вступило в законную силу.

В соответствии с п. 7.7. контракта  штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение  подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки  исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в размере 1 759 628 руб. 22 коп.

В настоящем  деле  истец просит суд взыскать с ответчика  1 759 628 руб. 22 коп. штрафа за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту.

Указанные обстоятельства явились основанием  для обращения истца в суд с настоящим иском

Суд с требованиями истца согласен.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

В силу ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Подрядные строительные работы (статья 740 ГК РФ), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (ч. 1 ст. 763 ГК РФ).

К отношениям сторон, возникшим из государственного контракта, подлежат применению также положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Как следует из материалов дела к предусмотренному контрактом сроку, работы подрядчиком не выполнены.

В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление в иных формах.

Ввиду ненадлежащего исполнения условий контракта, заключенного между ГБУЗ АО «ПГКБ» и ООО «Северо-западные районы», он расторгнут.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статьей 71 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Поскольку материалами дела подтверждается и ответчиком не опровергнут факт невыполнения своих обязательств по контракту, требование истца о взыскании штрафа является обоснованным.

На основании части 3 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина по делу относится на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Отказ истца от иска в части требования о взыскании неотработанного аванса в сумме 17 596 282 руб. принять. Производство по делу в этой части прекратить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северо-западные районы" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич" (ИНН 

<

***>) 1 759 628 руб. 22 коп. штрафа, а также 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северо-западные районы" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  28 596 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

 

Судья

 

И.Н. Волков