АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-13483/2022

г. Тюмень

09 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения изготовлена 25 августа 2022 года. 

Мотивированное решение изготовлено 09 сентября 2022 года.

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Запсибгидропром» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 116 324, 17 рублей,

установил:

Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» (далее – истец, ГКУ ТО «УКС») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Запсибгидропром»  (далее – ответчик, ООО «ИТЦ «Запсибгидропром» о взыскании неустойки в размере 65 675 рублей, штрафа в размере 15 000 рублей. 

 Требования истца со ссылкой на статьи 309, 330, 708, 760, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств в рамках исполнения государственного контракта № 0167200003421003601-27/21 от 24.08.2021. 

На основании пункта 5 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства, на что было указано в определении суда о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства от 30.06.2022.

Ответчик иск не признал, отзыв не представил, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещен надлежащим образом, что подтверждается вернувшимся в суд конвертом с почтовым уведомлением по истечению срока хранения  № 62505272195633.

Истец также извещен о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что почтовым уведомлением № 62505272195626.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 226, 227, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

Решением от 25.08.2022, вынесенным в порядке ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в виде резолютивной части, исковые требования  удовлетворены в полном объеме.

02.09.2022 в суд поступило заявление ответчика об изготовлении мотивированного решения.

Учитывая соблюдение истцом установленного ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока на подачу соответствующего заявления, суд считает его подлежащим удовлетворению. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела 24.08.2021 между ГКУ ТО «УКС» (государственный заказчик) и ООО «ИТЦ «Запсибгидропром» (подрядчик) был заключен государственный контракт № 0167200003421003601-27/21 на выполнение проектных и изыскательских работ (далее - контракт), согласно которому государственный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации по объекту: «Строительство дополнительного комплекса ГБЗУ ТО «Областная больница № 19 в п. Винзили, Тюменского района»

Начало работ: с даты заключения Контракта.

Срок окончания работ: 7 месяцев с даты заключения Контракта (24.03.2022).

Согласно пункту 4.1. Контракта цена Контракта составляет 3 950 000,00 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3.14. Контракта для организации проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в том числе в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, Подрядчик обязан в течение 4 месяцев со дня заключения Контракта (до 24.12.2021) предоставить Государственному заказчику проектную документацию и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, на бумажном носителе в 1 экземпляре и один экземпляр на электронном носителе (графическую часть в формате PDF, сметную документацию в форматах xml, pdf, Excel) по накладной, оформленной в соответствии с Приложением №2 к Контракту.

Устранить замечания Государственного заказчика к предоставленным проектной документации и документу, содержащему результаты инженерных изысканий, направленные в порядке, предусмотренном п. 3.1.5. Контракта, в срок, не превышающий 10 дней с момента получения указанных замечаний.

По состоянию на 21.06.2022 проектная документация для организации проведения государственной экспертизы Ответчиком не предоставлена.

В соответствии с пунктом 6.5.1. Контракта за каждый факт неисполнения ил ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Истец, руководствуясь пунктом 6.5.1. Контракта, начислил Подрядчику штраф в размере 5000 рублей за ненадлежащее исполнение обязанности по предоставлению Государственному заказчику проектной документации.

Согласно      пункту     5.2.      Контракта            Подрядчик     обязан      предоставить

Государственному заказчику документацию и акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 3.3.15. контракта.

Государственный заказчик в течение 10 дней со дня получения документов, предусмотренных п. 3.3.15. контракта, рассматривает указанные документы, подписывает акт сдачи-приемки или направляет мотивированный отказ от приемки документации и подписания акта сдачи-приемки.

При наличии замечаний к представленным документам Государственный заказчик направляет Подрядчику в указанный выше срок перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Срок устранения замечаний, направленных в порядке, предусмотренном настоящим  пунктом,  не  может превышать  5 дней  с момента  получения  замечаний Подрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

Датой   выполнения  работ  считается  дата   подписания  Сторонами  акта  сдачи приемки выполненных работ.

Истец поясняет, что по состоянию на 21.06.2022 проектная документация, акт сдачи-приемки работ Ответчиком не предоставлены.

В соответствии с пунктом 6.4. Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Истец произвел начисление неустойки в размере 111 324 рубля 17 копеек, за период с 25.03.2022 по 21.06.2022 (89 дней просрочки), исходя из расчета  3 950 000 х 9, 5/300Х 89 и штрафа за нарушение условий контракта в размере 5 000 рублей.

06.04.2022 государственный заказчик направил в адрес подрядчика претензию с требованием об оплате неустойки и штрафа. 

Ответчик заявленные требования оставил без удовлетворения, 

ГКУ ТО «УКС», ссылаясь на нарушение ООО «ИТЦ «Запсибгидропром»  обязательств по контракту, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Рассматриваемые отношения сторон регулируются соответствующими нормами главы 37 ГК РФ. 

На основании статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Положениями пункта 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Согласно статьям 309, 310, 312, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, надлежащему лицу, в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. 

Истец просит взыскать неустойку и штраф в сумме 116 324,17 рублей в связи с нарушением ответчиком обязательств по контракту. 

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Из буквального толкования статей 329, 330 ГК РФ следует, что при установлении ответственности в виде начисления неустойки за нарушение гражданско-правового обязательства, сторона должна представить относимые, допустимые доказательства, позволяющие установить состав гражданского правонарушения. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; 

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Согласно статье 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности, непредоставление проектной документации и разрешения на производство земляных работ, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Кодекса).

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

В силу части 2 статьи 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Согласно части 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд приходит к выводу о том, что ответчиком не доказано отсутствие его вины в нарушении срока при выполнении работ. Ответчик не представил доказательств того, что причиной неисполнения обязательств послужили действия (бездействия) заказчика. Ответчик доказательств своей невиновности суду не представил, в связи с чем основания для освобождения его от установленной ответственности отсутствуют.

Суд, принимая во внимание положения указанных норм права, в совокупности с установленными обстоятельствами, считает, что заявленные исковые требования обоснованы. Ответчик не принял все возможные и зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств по контракту, что является основанием для привлечения его к ответственности.

Учитывая, что материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком обязательство по контракту, суд считает, что требование истца о взыскании неустойки и штрафа заявлено правомерно. Проверив расчет неустойки и штрафа, представленный истцом, который ответчиком не оспорен, суд считает его верным. 

Принимая во внимание изложенные и нормы и обстоятельства, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Инженерно-технический центр «Запсибгидропром» в пользу Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» 111 324 рубля 17 копеек пени, 5 000 рублей штрафа по государственному контракту от  24.08.2021 № 0167200003421003601-27/21.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Инженерно-технический центр «Запсибгидропром» 4 490 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Выдать исполнительные листы.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

 

 Судья

 

Шанаурина Ю.В.