РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-129088/24-126-1006

г. Москва

20 декабря 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2024 года

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Антоновским, 

рассматривает в судебном заседании дело 

по иску ООО "ДРСУ-4" (ИНН 

<

***>) 

к ПАО "МОСТОТРЕСТ" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 3 688 655 079,96 руб. 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 09.09.2024 

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 13.12.2023

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ДРСУ-4" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику ПАО "МОСТОТРЕСТ" о взыскании денежных средств в размере 3 688 655 079 руб. 96 коп. по договорам № 04/04-ТМ/19 от 04.04.2019; № МО-114-01-0084/2019 от 03.04.2019; №5007-19/СБВК0-02 от 02.02.2019г.; № 5007/19/Фес-01 от 19.04.2019; № 01/12-ТМ/19-1 от 01.12.2019; № МО-41-33-0076/2019 от 01.04.2019; № МО-4-ПЮ-0062/2018 от 30.07.2018; № 5007/18/1.2 КТ-02 от 01.03.2018г.; № 5007/18/БАД-03 от 04.03.2018; № 5007/18/ФД-60 от 12.07.2018; № МО-114-01-0225/2018 от 18.06.2018; № МО-41-33-0055/2018 от 10.04.2018; № 5007/17/ЗСЗХ-14 от 17.02.2017г.; № МО-41-33-0088/2017 от 19.05.2017г.; № МО41-33-0180/2017 от 18.09.2017г.; № 5007-СБВ/мСС-31 от 20.11.2017г.; № 02/05-ТМ/17 от 02.05.2017г; № 5007/17/2СЗХ/2.1.3-1 от 01.09.2017г.; № 5007/16/9СЗХ-5 от 01.04.2016г.; № 5007/16/7СЗХ-08 от 01.04.2016г.; № 5007/16/2СЗХ/2.1.1-29 от 04.07.2016г.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, представил отзыв.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которого просит взыскать задолженность, с учетом представленного ответчиком отзыва, в размере 16 167 817 руб. 53 коп. из них: задолженность по договору субподряда №04/04-ТМ/19 от 04.04.2019 в размере 169 902,95 руб., задолженность по договору субподряда №МО-4-ПТО-0062/2018 от 30.07.2018 в размере 93 152,62 руб., задолженность по договору субподряда № 02/05-ТМ/17 от 02.05.2017 в размере 159 816,06 руб., задолженность по договору субподряда №5007/17/2СЗХ/2.1.3-1 от 01.09.2017 в размере 15 744 945,90 руб., учитывая что на момент рассмотрения исковых требований задолженность по другим договорам отсутствует.

Ходатайство истца судом рассмотрено и принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Истец поддержал уточненные исковые требования.

Ответчик не представил возражений относительно уточненной суммы иска.

Выслушав представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда Московской области от 28.08.2023 по делу №А41-79353/22 ООО «ДРСУ-4» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО3 - член Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

В соответствии с п. 1 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, с даты утверждения конкурсного управляющего, конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника. 

В ходе анализа дебиторской задолженности Истца было установлено наличие задолженности ПАО "МОСТОТРЕСТ" перед ООО "ДРСУ-4", возникшие на основании следующего. 

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № 04/04-ТМ/19 от 04.04.2019 (далее - Договор-1), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы на Объекте.

Согласно п. 2.1. Договора (в редакции дополнительного соглашения №2) общая стоимость работ по Договору составила 6 796 118,24 руб.

Согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №2 от 30.09.2019 Субподрядчиком выполнены работы общей стоимостью б 796 118,24 руб. Согласно Акту на оказание услуг генподряда от 30.09.2019 сторонами произведен взаимозачет в сумме 339 805.91 руб., в связи с чем к оплате за выполненные работы подлежит 6 456 312, 33 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № МО-114-01-0084/2019 от 03.04.2019 (далее Договор-2), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы на Объекте.

Согласно п. 2.1. Договора-2 общая стоимость работ по Договору составила 7 911 223,56 руб.

Согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №2 от 30.09.2019 Субподрядчиком выполнены работы общей стоимостью 6 235 31 1,49 руб. Согласно Актам на оказание услуг генподряда от 31.08.2019 и 30.09.2019 сторонами произведен взаимозачет в сумме 622 987,66 руб., в связи с чем к оплате за выполненные работы подлежит 5 651 323,83 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007-19/СБВК0-02 от 02.02.2019г. (далее Договор-3), согласно которому Подрядчик обязался выполнить земляные и дорожные работы при строительстве объекта, а Генподрядчик - принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком соответствии с требованиями Договора (пункт 2.1. Договора).

Стоимость работ, порученных Подрядчику, составила 111 187 758, 33 руб.

Согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №8 от 17.12.2021 Субподрядчиком выполнены работы общей стоимостью 1 11 187 758, 33 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/19/Фес-01 от 19.04.2019 (далее - Договор-4), согласно которому Подрядчик обязался выполнить работы по устройству конструкции дорожной одежды экопарковки при строительстве объекта «Участок автодороги Москва-Санкт- Петербург (Северная рокада) на участке транспортной развязки на пересечении с улицей Фестивальной по адресу: Северный административный округ г.Москвы», а Подрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 2.1. Договора-4 стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, определяется на основании Ведомости объемов и стоимости работ и составляет 2 313 280,88 руб.

Согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 31.05.2019 Субподрядчиком выполнены работы общей стоимостью 2 313 280,88 руб. Согласно акту об оказанных услугах генподряда сторонами произведен зачёт в сумме 115 664,04 руб., в связи с чем к оплате за выполненные работы подлежит 2 197 616,84руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № 01/12-ТМ/19-1 от 01.12.2019 (далее - Договор-5), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы при строительстве объекта капитального строительства. «Строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово», а Подрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 2.1. Договора стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком, составляет 295 627,92 руб. Дополнительным Соглашением №1 к Договору согласовали, что общая стоимость порученных Субподрядчику работ составляет 692 519,04 руб.

Согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №2 от 31.01.2020 Субподрядчиком выполнены работы общей стоимостью 692 519,04 руб. Согласно акту об оказанных услугах генподряда сторонами произведен зачёт в сумме 34 625, 96 руб., в связи с чем к оплате за выполненные работы подлежит 657 893,08 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда №МО-41-33-0076/2019 от 01.04.2019 (далее Договор-6), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы при строительстве объекта капитального строительства: «Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка (1 этап). 1.7. этап: «Путепроводы № 3, № 4, а Подрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 3.1. Договора стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком, составляет 8 804 829,38 руб

Согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №2 от 15.12.2019г. Субподрядчиком выполнены работы на сумму 5 052 552,62 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор подряда №МО-4-ПТО-0062/2018 от 30.07.2018 (далее - Договор-7), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы по подготовке поверхности и укладке асфальтобетона на объекте «Строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово» с необходимыми для функционирования подъездными дорогами, а Подрядчик- принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 2.1. Договора стоимость выполняемых по Договору работ определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №1) и является фиксированной на все время действия Договора.

Так, согласно Протоколу согласования договорной цены к Договору подряда стоимость работ составила 3 726 104,88 руб.

ООО «ДРСУ-4» свои обязательства по договору выполнило в полном объеме сумму 3 726 104.88 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/18/1.2 КТ-02 от 01.03.2018г. (далее - Договор-8), согласно которому Подрядчик обязался выполнить работы по устройству дорожной одежды при строительстве объекта капитального строительства: «Строительство тоннеля по- Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово» с необходимыми для функционирования подъездными дорогами, а Генподрядчик- принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 3.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения №16) стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, составляет 901 010 052,41 руб.

Согласно актам о приемке выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №14 от 31.07.2020, подписанными Генподрядчиком и Подрядчиком, общая стоимость выполненных Подрядчиком работ составила 901 010 052,41 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/18/БАД-03 от 04.03.2018 (далее - Договор-9), согласно которому Подрядчик обязался выполнить подрядные работы по устройству дорожной одежды, земляные работы при строительстве на объекте, капитального строительства: «Строительство разворотной эстакады от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе», а Генподрядчик обязался принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 3.1. Договора стоимость работ, поручаемых Подрядчику определяется на основании ведомости объемов и стоимости работ и составляет 481 534 805,94 руб. (в редакции дополнительного соглашения №10 от 14.01.2020).

Согласно акту от 03.02.2020 об окончательной приемки работ по договору подряда 5007/18/БАД-03 от 04.03.2018 Подрядчиком в полном объеме и надлежащим oбpaзoм выполнены все работы по договору. Стоимость выполненных Подрядчиком работ составила 481 534 805,94 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/18/ФД-60 от 12.07.2018 (далее - Договор-10), согласно которому Подрядчик обязался выполнить подрядные работы по устройству асфальтобетонного покрытия эстакад на объекте: «Участок автодороги Москва- Санкт- Петербург (Северная рокада). Участок от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе», а Генподрядчик обязался принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 3.1. Договора стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется на основании ведомости объемов и стоимости работ 74 381 252,80 руб. (в редакции дополнительного соглашения №2 от 30.01.2020).

Согласно акту о приемке выполненных работ (КС-2) №3 от 10.12.2018 стоимость выполненных Подрядчиком работ с начала проведения работ составила 74 381 252.80 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда №МО-114-01-0225/2018 от 18.06.2018 (далее - Договор-11), согласно которому Субподрядчик обязался в соответствии с приложением №1 к Договору выполнить работы на объекте: «Участок автодороги Москва- Санкт-Петербург (Северная рокада). Участок от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе», а Подрядчик обязался принять результат выполненных работ и обеспечить их оплату в соответствии с условиями Договора.

Согласно пункту 2.1. Договора стоимость работ, поручаемых Субподрядчике, составляет 4 579 158,63 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 25.06.2018 стоимость выполненных Субподрядчиком работ составила 4 579 158,63 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда №МО-41-33-0055/2018 от 10.04.2018 (далее Договор-12). согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы на объекте капитального строительства: «Сокольническая линия метрополитена от станции метро «Саларьево» до станции метро «Столбово», а Подрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 3.1. Договора стоимость работ, поручаемых Субподрядчику, составляет 37 258 351,98 руб. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.05.2018).

Субподрядчик работы по Договору-12 выполнил в полном объеме.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор подряда №5007/17/ЗСЗХ-14 от 17.02.2017г. (далее - Договор-13), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить комплекс работ по устройству дорог при строительстве объекта, а Подрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора (пункт 2.1. Договора).

Стоимость работ, порученных Подрядчиком по Договору, составляет 866 070 714,12 руб.

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат №20 от 30.06.2020г., стоимость выполненных Субподрядчиком работ составила 866 070 714,12 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда №М0-41 -33-0088/2017 от 19.05.2017г. (далее Договор-14), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы при строительстве объекта капитального, а Подрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора (пункты 2.1, 2.4 Договора).

Стоимость работ, порученных Субподрядчику, составила 55 450 648,92 руб. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат №13 от 25.07.2019г., стоимость выполненных Субподрядчиком работ составила 54 9421 383,82 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда №МО41-33-0180/2017 от 18.09.2017г. (далее - Договор-15), согласно которому Субподрядчик обязался выполнить работы при строительстве объекта капитального, а Подрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора (пункты 2.1, 24. Договора)

Стоимость работ, порученных Субподрядчику, составила 12 963 789.84 руб. Согласно Справке о стоимости выполненных работ №2 от 14.06.2019г. стоимость, выполненных Субподрядчиком, работ составила 12 791 038,08 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007-СБВ/мСС-31 от 20.11.2017г. (далее Договор-16), согласно которому Подрядчик обязался выполнить комплекс работ по устройству дорожной одежды, строительству дождевой канализации, подпорных стен, сносу зданий, ограждений территории при строительстве объекта, а Генподрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора (пункт 2. 1. Договора).

Стоимость работ, порученных Подрядчику, составила 31 205 895,48 руб.

Согласно Справке о стоимости выполненных работ №4 от 13.07.2019г., стоимость работ, выполненных Подрядчиком, составила 31 205 895,48 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №02/05-ТМ/17 от 02.05.2017г. (далее - Договор-17), согласно которому Подрядчик обязался выполнить земляные работы и работы по подготовке основания под плиту тоннеля ПК354-ПК369 при строительстве объекта. (п. 1 Договора).

Общая стоимость работ порученных Подрядчику работ по договору составила 35 382 736,09 руб. (п. 2 Дополнительного соглашения №8).

Согласно Справке о стоимости выполненных работ №10 от 30.11.2018г., стоимость работ, выполненных Подрядчиком, составила 35 382 736,09 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/17/2С3Х/2.1.3-1 от 01.09.2017г. (далее - Договор-18), согласно которому Подрядчик обязался выполнить комплекс работ по устройству дорожной одежды, строительству дождевой канализации при строительстве объекта, а Генподрядчик принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиям Договора (пункт 2.1. Договора).

Общая стоимость работ, выполненных подрядчиком по Договору, составляет 804 219 424, 18 руб., что подтверждается Актом об окончательной приемке работ от 31.08.2021г.

Согласно Акту сверки от 17.11.2021 г. задолженность Генподрядчик перед Подрядчик составляет 20 105 485, 61 руб.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/16/9СЗХ-5 от 01.04.2016г. (далее - Договор-19), согласно которому Подрядчик обязался выполнить работы по устройству временных объездных дорог при строительстве объекта, а Генподрядчик - принять и оплатить работы выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно пункту 3.1. Договора (в редакции дополнительного соглашения №6) стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, составляет 103 587 463,46 руб.

Подрядчиком обязательства по Договору выполнены в полном объеме.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/16/7СЗХ-08 от 01,04.2016г. (далее - Договор-20), согласно которому Подрядчик обязался выполнить устройство дорожной одежды и дождевой канализации при строительстве при строительстве объекта, а Генподрядчик - принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора (пункт 2.1. Договора).

Общая стоимость работ по договору, с учетом всех дополнительных соглашений к нему, составляет 205 638 051,99 руб. (п. 1 дополнительного соглашения №18).

Подрядчиком обязательства по Договору выполнены в полном объеме.

Между ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Генподрядчик) и ООО «ДРСУ-4» (Подрядчик) заключен Договор подряда №5007/16/2СЗХ/2.1.1 -29 от 04.07.2016г. (далее - Договор-21), согласно которому Подрядчик обязался выполнить комплекс работ по устройству дорожной одежды, строительству дождевой канализации, подпорных стен, сносу зданий, ограждений территории при строительстве объекта, а Генподрядчик - принять и оплатить работы выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора (пункт 2. 1. Договора).

Стоимость работ, порученных Подрядчику, составила 230 759 127, 64 руб. (в редакции Дополнительного соглашения №10)

Общая стоимость работ, выполненных подрядчиком по Договору, составляет 230 759 127, 64 руб., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ №15 от 25.06.2020г., а также Дополнительным соглашением №11).

Ответчиком обязательства по оплате в полном объеме не исполнены, в связи с чем у ответчика перед истцом образовалась задолженность, с учетом уточненных требований в сумме 16 167 817 руб. 53 коп., которую истец просит взыскать с ответчика в судебном порядке. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьями 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Ответчиком не представлены суду доказательства своевременной оплаты выполненных по договору работ, в связи с чем, требование истца о взыскании задолженности в размере 16 167 817 руб. 53 коп., признано судом подлежащим удовлетворению.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

С учетом предоставленной истцу отсрочки уплаты госпошлины, в соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 103 839 руб. 

На основании ст.ст. 2, 307, 309, 310, 702, 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 4, 41, 49, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ПАО "МОСТОТРЕСТ" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "ДРСУ-4" (ИНН 

<

***>) 16 167 817 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать) руб. 53 коп. задолженности. 

Взыскать с ПАО "МОСТОТРЕСТ" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 103 839 (сто три тысячи восемьсот тридцать девять) руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков