АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-7169/2019

г. Белгород

30 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2019 года. Полный текст решения изготовлен 30 октября 2019 года.

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АО "ДИРЕКЦИЯ ЮЗР" (ИНН 3123157617, ОГРН 1073123016416) к ООО "РАЗВИТИЕ-М" (ИНН 4632218023, ОГРН 1164632058590)

о взыскании 9 013 руб. 42 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2, доверенность №34/2019 от 08.10.2019;  

от ответчика: ФИО3, доверенность от 14.10.2019,

УСТАНОВИЛ:

АО "ДИРЕКЦИЯ ЮЗР" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО "РАЗВИТИЕ-М" о взыскании неустойки по договору подряда №13/2018 от 25.01.2018 г. в размере 9 013 руб. 42 коп.

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика в ходе судебного заседания в удовлетворении заявленных исковых требований просил отказать в полном объеме. 

Исследовав материалы дела, оценив в силу статей 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 25.01.2018 г. между АО "ДИРЕКЦИЯ ЮЗР" (Заказчик) и ООО "РАЗВИТИЕ-М" (Подрядчик) заключен договор подряда № 13/2018 (далее – Договор), в соответствии с условиями которого, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по внутренней отделке (штукатурные работы) на объекте Заказчика: «МКР «Новая Жизнь» (поз. 8, блок-секция № 2) (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненный надлежащим образом результат Работ.

Пунктом 5.1. Договора стороны согласовали стоимость работ в размере 1 609 540 руб., НДС не предусмотрен.

Оплата работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обними сторонами акта приемки-передачи выполненных работ (п.5.3. Договора).

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

Объем работ по Договору устанавливается на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Подписывая Договор, Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ (п.1.4. Договора). 

В разделе 2 Договора стороны согласовали сроки выполнения указанных работ: начало выполнения – 30 января 2018 г., окончание – 05 марта 2018 г.

В соответствии с п. 4.1. Договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата Работ к сдаче выполнения Работ путем направления Заказчику двух экземпляров Акта выполненных работ, подписанных со своей Стороны.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, обязан осмотреть и принять выполненные Работы путем подписания Акта выполненных работ, и вернуть один экземпляр Подрядчику, либо при наличии недостатков представить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

Сдача-приемка выполненных работ оформляются актом, подписываемым уполномоченными представителями сторон. Необоснованное уклонение одной из сторон от участия в процессе сдачи-приемки выполненных работ, а равно необоснованный отказ от подписания акта, дает право второй стороне составить и подписать односторонний акт и сделать в нем соответствующую отметку.

Подрядчиком работы были выполнены, что подтверждается актом о приемке  выполненных работ от 30.04.2018 г., а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (т.1, л.д. 58 – 60).

Общая сумма выполненных по договору работ составила 1 549 260 руб.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ, ответчик работы предусмотренные условиями Договора выполнил 30.04.2018 г., что свидетельствует о нарушении с его стороны срока окончания выполнения работ.

Пунктом 6.3. Договора предусмотрено, что за нарушение ответчиком сроков выполнения работ, истец вправе предъявить неустойку в размере 0,01% от стоимости Работ по договору за каждый календарный день просрочки.

В рамках досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика 22.10.2018 г. была направлена претензия с исх. № 686 с требованиями погасить имеющиеся задолженности. К указанной претензии в качестве приложения истец направил заявление о зачете взаимных требований. С требованиями, указанными в претензии и с заявление о зачете взаимных требований ответчик был не согласен. Таким образом, ответчик в добровольном порядке требования истца не исполнил.

Ненадлежащее исполнение ответчиком своих договорных обязательств послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно п.1 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 702, пункту 1 статьи 711 ГК РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

Из материалов дела следует, что ответчик обязательства по исполнению работ, выполнил с нарушением установленного Договором срока. 

При этом в ходе судебного заседания представители сторон пояснили суду, что обязательства по Договору исполнены полностью, стоимость работ составляет 1 549 260 руб. Так же пояснили, что зачет ввиду недостижения согласия между сторонами произведен не был. 

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 6.3. Договора предусмотрено, что за нарушение ответчиком сроков выполнения работ, истец вправе предъявить неустойку в размере 0,01% от стоимости Работ по договору за каждый календарный день просрочки.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № 13/2018 от 25.01.2018 г. за период с 06.03.2018 г. по 30.04.2018 г. в размере 9 013 руб. 42 коп.

Гражданское законодательство предусматривает ответственность лица, не исполнившего либо ненадлежащим образом исполнившего свои обязательства. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п.1 ст. 330 ГКРФ).

Размер неустойки может устанавливаться сторонами обязательства, как в твердой сумме неисполненного обязательства, так и в процентах к сумме  неисполненного обязательства, при этом соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

При решении вопроса о взыскании неустойки, суд обязан исследовать соразмерность подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). В силу положений ст. 330 ГК РФ неустойка носит компенсационный характер и она должна быть соразмерна последствиям нарушения обязательств.

На основании п.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №81 от 22 декабря 2011 года, исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Ответчик не заявил ходатайства об уменьшении размера неустойки, ввиду несоразмерности, расчет неустойки не оспорил, контр-расчет не представил. 

Суд учитывает, что в соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны предусмотрели размер неустойки в договоре. Доказательств несоразмерности предъявленного к взысканию размера неустойки последствиям неисполнения обязательства суду не представлено. 

Оснований к снижению договорной неустойки, предусмотренных ст.333 ГК РФ суд не находит, в отсутствие ходатайства ответчика, уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, а также с принципом состязательности (статья 9 АПК РФ).

Судом проверен расчет неустойки, произведенный истцом, при этом судом установлено, что истцом допущена  ошибка при его расчете.

Истец при расчете суммы неустойки исходил из суммы долга в размере 1 609 540 руб., на основании чего заявлено требование о взыскании неустойки в размере 9 013 руб. 42 коп. (1 609 540 х 0,01% х 56 = 9 013,42 руб.).

Между тем, как следует из представленного акта о приемке  выполненных работ от 30.04.2018 г., а также справки о стоимости выполненных работ и затрат, общая сумма выполненных по договору работ составила 1 549 260 руб., стороны пояснили, что общая стоимость работ по Договору составляет именно данную сумму, указанную в справке о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.04.2018 г., в связи с чем суд приходит к выводу, что при расчете неустойки необходимо исходить из общей стоимости работ 1 549 260 руб., а  размер неустойки составляет 8 675 руб. 86 коп. (1 549 260 х 0,01% х 56 = 8 675,86 руб.).

На основании изложенного, с ответчика полежит взысканию неустойка за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № 13/2018 от 25.01.2018 г. за период с 06.03.2018 г. по 30.04.2018 г. в размере 8 675 руб. 86 коп.

Сторонам в определениях суда разъяснены положения части 2 статьи 268 АПК РФ о том, что дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

В соответствии со статьей 110 Кодекса судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

Исковые требования АО "ДИРЕКЦИЯ ЮЗР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "РАЗВИТИЕ-М" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу АО "ДИРЕКЦИЯ ЮЗР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № 13/2018 от 25.01.2018 г. за период с 06.03.2018 г. по 30.04.2018 г. в размере 8 675 руб. 86 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 925 руб., всего 10 600 руб. 86 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

А.В. Петряев