АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-13317/2020

г. Новосибирск

26 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2020 года.

Решение изготовлено в полном объёме 26 октября 2020 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи        Исаковой С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного бюджетного учреждения Здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная  клиническая больница» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Протон» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, о взыскании  7 536 руб. 02 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО1, доверенность от 03.08.2020, паспорт,

ответчика: не явился, извещён,

установил:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная  клиническая больница» (далее по тексту - истец) обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Протон» (далее по тексту - ответчик), с учётом уточнения исковых требований по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ), принятого судом, о взыскании штрафа в размере 7 536 руб. 02 коп.

Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, возражал против удовлетворения исковых требований истца по доводам, изложенным в отзыве, в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещён надлежащим образом.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика по имеющимся материалам дела.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований, при этом, исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, 17.12.2018 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключён контракт №ГК 1473/18 АЭФ (далее по тексту – контракт), предметом которого является выполнение подрядных работ по капитальному ремонту: установка (замена) оконных и дверных блоков в помещениях ГБУЗ НСО «ГНОКБ».

Цена контракта: 251 200 руб. 50 коп. (пункт 2.1 контракта).

Срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Истцом предъявлены исковые требования о взыскании с ответчика штрафа в сумме 7 536 руб. 02 коп., начисленного в порядке пункта 7.5 контракта.

Согласно пункту 7.5 контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательства, начисляется штраф в размере 7 536 руб. 02 коп.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд руководствовался статьёй 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Начисление истцом штрафа по правилам пункта 7.5 контракта не обосновано и не доказано наличие каких-либо обстоятельств для его начисления.

При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в иске отказать.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

         Судья                                                                                        С.А. Исакова