ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А08-10799/2018

г. Воронеж

21 апреля 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2021 года

Постановление в полном объеме изготовлено  21 апреля 2021 года

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                  Афониной Н.П.,

судей                                                                                     Письменного С.И.,

ФИО1,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2,

 

при участии: 

от областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области»: ФИО3 - представитель по доверенности № 255-11/1021/1 от 01.03.2021; 

от общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела; 

от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от индивидуального предпринимателя ФИО4: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от  общества с ограниченной ответственностью «БСО»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством использования систем веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание) апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА», областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» на решение Арбитражного суда Белгородской области от 21.10.2020 по делу № А08-10799/2018 по иску областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью СК «МЕГА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 911 663 руб. 35 коп., и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА» к областному государственному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Белгородской области» о взыскании 326 506 руб. 65 коп., третьи лица: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, ИП ФИО4, общество с ограниченной ответственностью «БСО», 

 

УСТАНОВИЛ:

Областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области» (далее - ОГБУ «УКС Белгородской области», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью СК «МЕГА» (далее - ООО СК «МЕГА», ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 17с/252 от 21.09.2017 в сумме 1 638 568 руб. 59 коп.. и штрафа в размере 273 094 руб. 76 коп.

Определением суда от 24.01.2019 к совместному рассмотрению с первоначальными исковыми требованиями принят встречный иск ООО СК «МЕГА» к ОГБУ «УКС Белгородской области» о взыскании задолженности за фактически выполненные работы по договору № 17 с/252 от 21.09.2017 в размере 326 506 руб. 65 коп.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее – Фонд, третье лицо 1), общество с ограниченной ответственностью «БСО» (далее – ООО «БСО», третье лицо 2), индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее – ИП ФИО4, третье лицо 3).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 21.10.2020 по делу № А08-10799/2018 в удовлетворении первоначальных и встречных исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, истец обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование своего несогласия с обжалуемым судебным актом заявитель ссылается на отсутствие доказательств выполнения и сдачи работ субподрядчиком. Заявитель полагает, что работы, отраженные в акте осмотра от 21.07.2018 имеют существенные недостатки, что исключает возможность их принятия и оплаты. 

Также, ссылается на наличие правовых оснований по одностороннему отказу от исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 17с/252 от 21.09.2017.

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ответчик обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование своего несогласия с обжалуемым судебным актом заявитель ссылается на злоупотребление правом со стороны истца, не организовавшего  сдачу-приемку выполненных работ. 

Заявитель полагает, что материалами дела подтверждается факт выполнения субподрядчиком работ и их потребительская ценность для подрядчика. 

Кроме того, ссылается на несправедливое договорное условие, в соответствии с которым оплата аванса поставлена в зависимость от факта выполнения работ субподрядчиком.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции представители ответчика и третьих лиц не явились.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие не явившихся  участников процесса, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

В связи с наличием доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156, 266 АПК РФ в их отсутствие.

От ОГБУ «УКС Белгородской области» поступил отзыв на апелляционную жалобу ответчика и письменные пояснения.

От ООО СК «МЕГА» поступили письменные пояснения в виде таблицы.

В соответствии со ст.ст. 159, 262, 266, 268 АПК РФ суд отказал в удовлетворении ходатайства ОГБУ «УКС Белгородской области» о приобщении к материалам дела копий листов проекта № 04-2018-АС.

В рассматриваемом случае представленные дополнительные доказательства не являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции.

При этом невозможность представления доказательства в суд первой инстанции не подтверждена, доказательства уважительности причин непредставления данных документов суду первой инстанции ответчиком не представлены.

Учитывая изложенное, исходя из фактических обстоятельств дела, правовых оснований для приобщения дополнительных доказательств у суда апелляционной инстанции не имелось.

От ООО СК «МЕГА» поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с необходимостью представления дополнительных пояснений по выполненным работам, которые отражены в актах и других документах ОГБУ «УКС Белгородской области».

На основании ст. ст. 158, 184, 266, 268 АПК РФ, суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, на основании следующего.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

По смыслу указанных норм, отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда. 

Апелляционный суд считает, что достаточных, достоверных и допустимых доказательств того, что заявитель был объективно лишен возможности представить дополнительные пояснения в установленный законом срок ко дню судебного заседания не представлено.

Право на судебную защиту признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации. При этом участники процесса должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия (часть 2 статьи 41 АПК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения заявленного ходатайства об отложении судебного разбирательства не имелось.

В заседании суда представитель ОГБУ «УКС Белгородской области» доводы жалобы поддержал, просил их удовлетворить, жалобу ООО СК «МЕГА» просил оставить без удовлетворения.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения представителя стороны, исследовав в совокупности материалы дела, суд апелляционной инстанции полагает обоснованным удовлетворить апелляционную жалобу ОГБУ «УКС Белгородской области»,  а апелляционную жалобу ООО СК «МЕГА» оставить без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 21.09.2017 между ОГБУ «УКС Белгородской области» (подрядчик) и ООО СК «МЕГА» (субподрядчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 17с/252, согласно условиям которого, субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> соответствии с планом реализации в 2016-2018 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 01.02.2016 № 25-пп «Об утверждении плана реализации в 2016-2018 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2015-2044 годы», протоколом общего собрания собственников, с технической и сметной документацией (п. 1.1).

В соответствии с п.1.2. договора (в редакции дополнительного соглашения №1 от 18.04.2018), с учетом Графика производства работ (приложение № 3), общая стоимость работ по договору составляет 10 901 932 руб. 60 коп., в том числе: I этап - 5461895,30 руб., II этап - 5440037,30 руб.

Пунктом 3.2 договора, в редакции дополнительного соглашения №1 от 18.04.2018, установлено, что оплата выполненных работ осуществляется поэтапно:

-аванс за I этап выполнения работ в размере 30% от стоимости работ I этапа, выдается в течение 28 календарных дней, исчисляемых со дня получения подрядчиком аванса от Технического заказчика - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области;

-аванс за II этап выполнения работ в размере 30% от стоимости работ II этапа выдается в течение 14 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем сдачи работ по I этапу выполнения работ.

Оплата фактически выполненных работ осуществляется по видам работ в течение 28 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем предоставления в адрес Технического заказчика следующих документов: актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заявки на финансирование видов работ, актов приемной комиссии по приемке выполненных работ, протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении акта приемной комиссии по приемке выполненных работ, эксплуатационного паспорта на объект, указанный в п.11.1. договора.

В силу пункта 4.1. договора, в редакции дополнительного соглашения, работы по проведению капитального ремонта выполняются в II этапа, в соответствии с Графиком производства работ.

Согласно Графику производства работ в перечень работ по I этапу входит: ремонт кровли, ремонт инженерных систем - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение, срок выполнения - 31.05.2018. В перечень работ по II этапу входит: ремонт фасада, утепление фасада, ремонт подвальных помещений, установка коллективных ПУ и УУ, установка пандусов, ремонт или замена лифтового оборудования, срок выполнения работ - 31.08.2018.

Допуск к выполнению работ по II этапу осуществляется после полной сдачи работ по I этапу (п.4.2. договора в редакции дополнительного соглашения).

Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

Впоследствии, подписав дополнительное соглашение № 17с/272 от 02.07.2018, стороны исключили из графика производства работ работы по второму этапу полностью, оставив только работы по первому этапу на общую сумму 5 461 895, 30 руб., срок окончания работ установлен сторонами 15.07.2018.

Обязанности субподрядчика при выполнении работ регламентированы разделом 5 договора.

В силу требований договора субподрядчик обязался:

- приступить к выполнению работ не позднее сроков, указанных в п.4.1 Договора, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Подрядчику (п. 6.1.1);

- выполнить работы в полном объеме, качественно и в соответствии с условиями, определенными настоящим Договором в строгом соответствии с нормами действующего законодательства и нормативными актами Российской Федерации (п. 6.1.4);

- выполнить фотофиксацию Объекта по видам работ (до начала выполнения и после окончания выполнения работ) и передать ее подрядчику при приемке работ (6.1.27);

- с момента подписания настоящего Договора еженедельно, предоставлять подрядчику на адрес электронной почты информацию об объёмах выполненных работ по настоящему Договору в процентном соотношении и с приложением фотоматериалов (п. 6.1.31);

В соответствии с п.7.1. договора до сдачи работ субподрядчик передает подрядчику всю исполнительную и техническую документацию.

Представитель субподрядчика самостоятельно определяет готовность объекта к приемке в эксплуатацию и уведомляет подрядчика о выполнении работ и необходимости принятия их по акту приемки выполненных работ (п.7.2. договора).

Согласно п.7.3. договора подрядчик осуществляет приемку выполненных субподрядчиком работ в течение 5 - ти рабочих дней с даты поступления уведомления о готовности к сдаче и передачи всей исполнительной и технической документации от субподрядчика.

Подрядчик, осуществляя приемку выполненных капитальным ремонтом работ, в силу п.7.4. договора, проверяет состав и полноту технической документации, качество и соответствие выполненных ремонтно-строительных работ проектно-сметной документации, стандартам, нормам и правилам производства.

Во исполнение условий указанного договора подрядчик перечислил на счет субподрядчика аванс в размере 1 638 568, 59 руб., что подтверждается платежным поручением № 141261 от 19.04.2018.

15.06.2018 и 05.07.2018 Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (заказчиком), комиссионно в составе представителей подрядчика и субподрядчика, произведен контроль выполнения работ по капитальному ремонту объекта, в ходе которого составлены акты осмотра, установившие наличие недостатков выполненных работ необходимость их устранения до 25.06.2018 (по акту от 15.06.2018) и по 10.07.2018 (по акту от 05.07.2018).

Согласно данным актам работы в соответствии с условиями договора не выполнены работы по ремонту инженерных сетей (I этап), работы по ремонту кровли не завершены, не ведутся работы по ремонту фасада, утеплению фасада, установке ПУ и УУ, цементно-песчаная стяжка выравнивающая выполняется по существующему кровельному покрытию, уклон цементно-песчаной стяжки не соответствует проекту, толщина стяжки составляет 15-30 мм, что не соответствует нормативам, цементно-песчаная стяжка не имеет температурно-усадочных швов.

При вышеуказанных осмотрах присутствовал представитель ООО СК «МЕГА» ФИО5

Поскольку в срок, установленный в графике производства работ к договору (с учетом дополнительного соглашения от 18.04.2018), работы завершены не были, УКС отказался в одностороннем порядке от исполнения договора,  потребовав вернуть уплаченную сумму аванса, а также уплатить, начисленную согласно п. 9.3.9 договора, сумму штрафа в размере 273 094 руб. 76 коп.

Согласно п. 6.1.33 договора, в  случае расторжении Договора субподрядчик обязан передать подрядчику незавершенный работами объект (в том числе исполнительную документацию на выполненный объем работ) по акту приема-передачи в сроки, согласованные сторонами.

18.07.2018 субподрядчик просил подрядчика предоставить уполномоченного сотрудника ОГБУ «УКС Белгородской области» для комиссионного актирования выполненных объемов работ и материалов, использованных при производстве работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

В ответ на указанное письмо ОГБУ «УКС Белгородской области» (письмо от 19.07.2018 №24-2583) подготовлен график проверок объемов и качества выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных ломов, в соответствии с содержанием которого, датой проведения проверки спорного объекта выступала – 21.07.2018 (11 ч. 00 мин).

Актом осмотра от 21.07.2018, составленным комиссией, состоящей из представителей Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, ОГБУ «УКС Белгородской области» ООО «МЕГА», к приемке предъявлены следующие объемы работ:

-демонтаж кровельного покрытия – 495 кв.м.; 

-демонтаж цементно-песчаной стяжки – 495 кв.м.; 

-устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек армированных; 

-демонтаж ливневых воронок – 6 шт.

При проверке качества выполненных работ установлены следующие недостатки:

- выравнивающая стяжка выполнена без армирования; 

- стяжка выполнена по существующему кровельному покрытию; 

- не соблюден уклон кровли; 

-толщина цементно-песчаной стяжки составляет 15-30 мм, что не соответствует нормам (толщина стяжки должна быть не менее 40 мм); 

-стяжка не имеет температурно-усадочных швов.

Данный акт подписан всеми лицами, принимавшими участие в осмотре объекта без замечаний и возражений.

   Субподрядчик, в ответ на уведомление подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, ссылаясь на отсутствие вины в допущенной просрочке выполнения работ, ввиду получения проектной документации несвоевременно 04.05.2018, и уклонения подрядчика от приемки выполненных работ, полагал неправомерным односторонний отказ подрядчика от исполнения договора.

Неисполнение требований по возврату суммы неотработанного аванса, начисленного штрафа, явилось основанием для обращения ОГБУ «УКС Белгородской области» с исковыми требованиями.

В свою очередь, ссылаясь на то, что работы по спорному договору были выполнены субподрядчиком на общую сумму 1 965 075, 24 руб., что подтверждено составленными в одностороннем порядке актом о приемке выполненных работ № 1 от 21.07.2018 и справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.07.2018 (направленных письмом от 26.10.2018) актом на передачу материалов, товарными накладными, счетами, платежными поручениями за период 2018 год, ООО СК «МЕГА» обратилось со встречными исковыми требованиями о взыскании стоимости фактически выполненных работ.

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из спорного договора, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда.

В соответствии со ст. 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, гак и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 2 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, допускается в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 10.1 договора подрядчику предоставлено право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в частности, при нарушении и не соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ.

Применительно к отношениям сторон, возникающим из договоров подряда, основания для отказа заказчика в одностороннем порядке от исполнения договора определены в статье 715 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Для того чтобы отказаться от договора в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его обязанностей, заказчик должен провести проверку работ и доказать, что при данном темпе выполнения работы будут нарушены сроки ее выполнения. (Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2015 N 305-ЭС14-8022 по делу N А40-55724/2012).

Из материалов дела следует, что первоначально срок выполнения работ установлен сторонами с 21.09.2017 по 30.09.2018.

Дополнительным соглашением №1 от 18.04.2018 срок установлен с 01.03.2018 по 31.08.2018.

По накладной от 04.05.2018 Фондом была передана проектная документация на спорный объект.

Письмом от 07.05.2018 субподрядчик уведомил подрядчика о просрочке предоставления Фондом проектной документации и необходимости продления срока завершения первого этапа работ.

Вместе с тем, не передача заказчиком проектной документации является обстоятельством, которое препятствует выполнению работ, в том случае, если подрядчик в силу ст. 719 ГК РФ приостанавливал выполнение работ.

Статьей 719 ГК РФ закреплено право подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статьи 328 ГК РФ).

В материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о приостановлении субподрядчиком работ в связи с необходимостью представления истцом, либо заказчиком (Фондом) проектной документации в порядке, предусмотренном ст. 719 ГК РФ.

Ответчик не приостановил исполнение договора, не отказался от него, а на свой страх и риск продолжил работу, в отсутствии необходимой документации.

Дополнительным соглашением от 02.07.2018, стороны согласовали срок выполнения работ с 01.03.2018 по 15.07.2018, то есть датой окончания срока выполняемых работ, исходя из несвоевременности получения проектной документации по первому этапу работ, сторонами определена дата – 15.07.2018.

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное (п. 2 ст. 452 ГК РФ).

Правовая природа дополнительного соглашения, с учетом его толкования (ст. 431 ГК РФ) и хронологии выполняемых работ, была направлена на корректировку графика выполнения работ, с учетом обстоятельств, препятствующих их выполнению.

 Учитывая изложенные обстоятельства, просрочка кредитора (п. 3 ст. 405 ГК РФ) в предоставлении необходимых условий выполнения работ (проектной документации) к спорным отношениям сторон не применима и не продлевает срок окончания работ – волеизъявление сторон на изменение срока выполнения работ отражено в дополнительном соглашении от 02.07.2018, субподрядчик, полагая необоснованными указанные в нем сроки, имел право его не заключать, а, следовательно, являясь профессиональным участником подрядных отношений, осознавал риск указания даты окончания работ - 15.07.2018.

Данные факты не позволяют суду апелляционной инстанции согласиться с выводом суда первой инстанции о продлении срока выполнения работ по 17.09.2018.

Комиссионными актами Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 15.06.2018 и 05.07.2018, а также составленного сторонами 21.07.2020 акта осмотра объекта подтверждается невыполнение работ в установленные сроки.

Данные акты подписаны со стороны ООО СК «МЕГА» главным инженером подрядной организации ФИО5 и директором ФИО6.

В силу специального регулирования должник не вправе требовать нотариально удостоверенной доверенности, в частности, от законного представителя (статьи 26, 28 ГК РФ) и в случае, если полномочия явствуют из обстановки, в которой действует представитель (пункт 1 статьи 182 ГК РФ).

Согласно статье 402 ГК РФ действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Действия работников юридического лица по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали. 

Создавая или допуская создание обстановки, свидетельствующей о наличии полномочий у такого представителя действовать от имени юридического лица, последнее сознательно входит в гражданский оборот в лице такого представителя, поэтому не вправе ссылаться на отсутствие у него полномочий, так как обстановка как основание представительства не только заменяет собой письменное уполномочие (доверенность), но и возможна в отсутствии каких-либо надлежащим образом оформленных правоотношений между представителем и представляемым. 

Из правовой позиции, сформированной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.07.2012 N 3170/12 и N 3172/12, следует, что при отсутствии доказательств иного наличие полномочий представителя стороны, подписавшего юридически значимый для правоотношения документ, на представление интересов этой стороны в правоотношении, предполагается.

Ответчик в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представил доказательств прекращения трудовых и (или) гражданско-правовых отношений с ФИО5 в спорный период.

Поскольку к 15.07.2018 работы выполнены субподрядчиком не были, подрядчик имел правовые основания к одностороннему отказу от исполнения договора, ввиду нарушения сроков их выполнения, то есть, в соответствии с п. 10.1 договора.

Сам по себе факт невыполнения работ в установленные договором сроки, субподрядчиком не оспаривается.

Исходя из содержания п. 10.1 договора, сторонами предусмотрены различные по содержанию основания к одностороннему отказу субподрядчика при нарушении сроков выполнения работ: 

- задержка Субподрядчиком срока завершения выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.2. статьи 4 настоящего Договора по его вине более чем на 10 календарных дней;

-        нарушение и не соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ.

Поскольку первоначально положения договора предусматривали поэтапное выполнение работ, что следует из п. 3.2 договора, графика производства работ, а впоследствии, стороны исключили выполнение работ по 2 этапу, у подрядчика имелись основания к одностороннему отказу как при несоблюдении конечного срока выполнения работ, при условии просрочки в 10 календарных дней, так и при просрочки выполнения работ отдельного этапа, в данном случае 1 этапа работ.

 Согласно правовой позиции, сформированной в п. 43 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Согласовывая изменения в части сроков выполнения работ дополнительным соглашением от 02.07.2018, стороны пунктом 6 данного соглашения, оставили без изменения содержания иных положений договора, не урегулированных дополнительным соглашением.

Указанное, подтверждает сохранение за субподрядчиком права выбора  средств одностороннего отказа от исполнения договора (п. 10.1), а, следовательно, последний, имея прерогативу выбора основания отказа от исполнения договора, был правомочен отказаться в одностороннем порядке, ввиду нарушения и не соблюдения сроков выполнения работ субподрядчиком, предусмотренных графиком производства работ.

Включая в текст договора основания отказа, отличные от положений ГК РФ, субподрядчик, осуществляя предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, должен был осознавать правомочие подрядчика по реализации права на односторонний отказ, в связи с нарушением сроков выполнения работ.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о толковании основания одностороннего отказа в уведомлении подрядчика от 18.07.2018, как задержки Субподрядчиком срока завершения выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.2. статьи 4 настоящего Договора по его вине более чем на 10 календарных дней.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение условий договорного обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой стороны. Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или условиями сделки, либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Платежным поручением № 141261 от 19.04.2018 подрядчиком перечислена 1 638 568, 59 руб. сумма аванса. Воспользовавшись правом одностороннего отказа 18.07.2018, подрядчик требовал вернуть неосвоенную сумму аванса.

В соответствии с правовой позицией, отраженной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.09.2008 № 5103/08, односторонний отказ влечет прекращение договорных отношений между сторонами договора подряда независимо от указанного основания отказа.

В соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 453 ГК РФ по общему правилу стороны расторгнутого договора не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Согласно абзацу 2 этого же пункта в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Пунктом 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49), предусмотрено, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Таким образом, заказчик вправе требовать возврата неотработанного аванса в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленного аванса.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми   актами   или   сделкой   оснований   приобрело  или   сберегло   имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

Исходя из анализа вышеназванных норм права, а также разъяснений Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 г. №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», следует, что для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие следующих условий: приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, и отсутствие правовых оснований к его приобретению, сбережению. То есть приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

Обращаясь с настоящим иском в суд, истец в соответствии со ст. 65 АПК РФ обязан доказать наличие тех обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Возражая по существу требования, предъявляя встречный иск, субподрядчик указывает на выполнение работ на общую сумму 1 965 075, 24 руб., злоупотребление правом со стороны истца, не организовавшем сдачу-приемку выполненных работ, уклоняющемся от их приемки.

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 ГК РФ по договору подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Из положений статей 702, 711, 740, 746 ГК РФ следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ является совокупность следующих обстоятельств - надлежащее выполнение работ и передача их результата заказчику.

Таким образом, закон связывает возникновение обязательственного правоотношения по оплате работ с фактом их выполнения.

В подтверждение выполненных надлежащим образом работ ответчиком представлены составленные в одностороннем порядке акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 №1 от 21.07.2018, справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 21.07.2018,  направленные в адрес подрядчика письмом от 26.10.2018  (т.1л.д.99).

Согласно положениям пункта 4 статьи 753 ГК РФ при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

Указанная норма предусматривает возможность составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ, защищая интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (абзац 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ).

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Исходя из смысла указанной нормы, именно заказчик должен представить доказательства обоснованного отказа от подписания актов выполненных работ.

По смыслу правовой позиции, изложенной в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", подрядчик должен представить доказательства извещения заказчика о завершении работ по договору и вызова его для участия в приемке результата работ.

В ином случае, подрядчик не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ.

В ходе произведенного осмотра и фиксации выполненных работ 21.07.2018, комиссионно в составе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, ОГБУ «УКС Белгородской области», директора СК «МЕГА»  был составлен акт осмотра с работ.

Из которого следует, что  к приемке предъявлены работы: демонтаж кровельного покрытия – 495 кв.м.; 

-демонтаж цементно-песчаной стяжки – 495 кв.м.; 

-устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек армированных; 

-демонтаж ливневых воронок – 6 шт.

Стороны в суде апелляционной инстанции пояснили, что работы в виде демонтажа ливневых воронок – 6 шт. не заявлены субподрядчиком  как выполненные.

В акте отражено, что при проверке качества выполненных работ установлены следующие недостатки:

- выравнивающая стяжка выполнена без армирования; 

- стяжка выполнена по существующему кровельному покрытию; 

- не соблюден уклон кровли; 

-толщина цементно-песчаной стяжки составляет 15-30 мм, что не соответствует нормам (толщина стяжки должна быть не менее 40 мм); 

-стяжка не имеет температурно-усадочных швов.

По смыслу ст.ст. 721, 723, 724 ГК РФ заказчик должен представить доказательства недостатков выполненных работ, на подрядчика, в свою очередь, возлагается бремя доказывания факта выполнения работ надлежащего качества.

Сравнительный анализ данных актов позволяет установить, что недостатки работ в виде выравнивания стяжки без армирования; несоответствия толщины цементно-песчаной стяжки (толщина стяжки должна быть не менее 40 мм); отсутствие в стяжке температурно-усадочных швов на устранение которых указывалось в актах от 15.06.2018 и 05.07.2018, устранены не были, то есть работы, которые предъявлены к приемке 21.07.2018 нельзя признать выполненные качественно.

Согласно п. 6 ст. 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Суд полагает, что нарушение требований к качеству выполняемых работ, неоднократно проявляемых, и не устранимых субподрядчиком, позволяет сформулировать вывод о существенности данных нарушений и отсутствие потребительской ценности работ в указанной части.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020 по делу № А08-10798/2018, оставленным без изменения Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.2021. 

 В связи с чем, при изложенных обстоятельствах, акт осмотра от 21.07.2018 нельзя признать правопорождающим актом, подтверждающим факт сдачи качественно выполненных работ, подлежащих оплате.

В связи с существенным характером выявленных недостатков выполненных субподрядчиком работ, непригодностью результатов работ для их использования, подрядчиком был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 17с/299 от 13.07.2018 с ООО «БСО», с учетом дополнительного соглашения к нему от 28.09.2018, согласно которому ООО «БСО» демонтировало результат всех работ Общества на объекте и выполнило все спорные работы в полном объеме, что подтверждается представленными в материалы дела актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и платежными поручениями, подтверждающими факт оплаты Управлением выполненных ООО «БСО» работ.

В силу п.8.4. договора, если субподрядчик не обеспечивает устранение выявленных недостатков и дефектов подрядчик вправе привлечь для выполнения работ по их устранению третьих лиц.

Поскольку недостатки выявленных работ неоднократно не были устранены субподрядчиком (акты от 15.06.2018 и 05.07.2018 с указанием срока устранения недостатков), реализация подрядчиком права на привлечение третьих лиц для выполнения спорных работ правомерна.

Доводы ООО СК «МЕГА» о том, что ему не было предоставлено время для устранения выявленных недостатков выполненных работ являются необоснованными, противоречащими актам от 15.06.2018 и 05.07.2018, а также положениям ст.723 ГК РФ, которые предоставляют право выбора способа устранения недостатков именно заказчику (в настоящем споре подрядчику).

Более того, после 18.07.2018 договорные отношения сторон прекратились, ввиду одностороннего отказа от исполнения договора подрядчиком.

Субподрядчик ссылается на акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 №1 от 21.07.2018, справку о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 21.07.2018,  направленные в адрес подрядчика письмом от 26.10.2018.

Вместе с тем, направление данных актов спустя три месяца после получения уведомления о расторжении договора и осмотра объекта нельзя признать своевременным.

Правовая позиция недопустимости направления одностороннего акта выполненных работ после расторжения договора изложена в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 03.11.2020 по делу №А08-9190/2018, Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.2021 по делу № А08-10798/2018.

В соответствии с п. 5 ст.720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

В рассматриваемом случае, при наличии спора о качестве выполненных подрядчиком работ, сторонами не были предприняты меры к проведению экспертизы объема и качества выполненных на объекте работ, к привлечению независимых специалистов с той же целью.

В силу пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 в случае если ходатайство об экспертизе не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В силу правовой позиции, отраженной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.07.2015 № 305-ЭС15-3990, акты выполненных работ, хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств. 

В обоснование своих требований, ответчик ссылается на акт передачи материалов, товарные накладные, счета, платежные поручения за период 2018 год, подтверждающие, по его мнению, выполнение работ.

По общему правилу, предусмотренному ст. 704 ГК РФ работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором подряда. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (пункт 2 статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, представленный акт на передачу материалов, подписанный в одностороннем порядке субподрядчиком, не является надлежащим доказательством приемки подрядчиком спорных материалов.

Доказательства приобретения и доставки на объект строительных материалов также не являются безусловными сведениями о факте их использования на объекте во исполнения спорного договора, а также того, что остаток материалов остался на объекте и был принят подрядчиком. Основным видом деятельности субподрядчика является выполнение строительных работ, ООО СК «МЕГА» в спорный период выполняло работы на нескольких объектах по договорам, заключенным с ОГБУ «УКС Белгородской области», в связи с чем, данный материал мог быть вывезен с объекта, использован на других объектах, а также ООО СК «МЕГА»  имело возможность распорядиться им по своему усмотрению. Доказательств невозможности вывоза материала после окончания работ субподрядчиком в материалы дела не представлено.

Кроме того, условиями заключенного сторонами договора подряда предусмотрено выполнение работ с использованием материала подрядчика, а не поставка материала подрядчиком и его приобретение заказчиком.

Доводы субподрядчика о  выполнении кровельных работ ИП ФИО4 на основании договора № 8/05 от 01.05.2018 правомерно отклонены судом первой инстанции.

Из материалов дела усматривается, что между ООО «СК «МЕГА» и ИП ФИО4 был заключен договор № 8/05 от 01.05.2018, согласно условиям которого, ИП ФИО4 приняла на себя обязательства по выполнению кровельных работ (наплавляемая кровля) на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>.

ООО «СК «МЕГА» приняло выполненные ИП ФИО4 работы по указанному договору на общую сумму 982 387, 98 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 13.07.2018 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 13.07.2018.

Оплату выполненных ИП ФИО4 работ ООО «СК «МЕГА» произвело в части в сумме 100 000, 00 руб.

В соответствии с п.1 ст.706 ГК РФ если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 

В силу п.3 указанной статьи генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. 

Из содержания указанных норм следует, что принятие генеральным подрядчиком работ у субподрядчика не является безусловным основанием для принятия указанных работ заказчиком. При этом, заказчик вправе предъявлять генеральному подрядчику возражения относительно объема, качества выполненных работ, независимо от того, предъявлялись ли такие требования генеральным подрядчиком к субподрядчику.

В рамках настоящего спора судом установлен факт нарушения сторонами порядка сдачи-приемки работ, невозможность определения на момент рассмотрения дела ни факта выполнения работ, ни объема выполненных работ, ни их качества. 

При изложенных обстоятельствах, факт принятия работ ООО «СК «МЕГА» от ИП ФИО4 в отсутствие иных доказательств не может являться бесспорным доказательством факта выполнения данных работ, их объема и стоимости.

Иных относимых и допустимых доказательств фактически оказанного результата работ, представившего потребительскую ценность для подрядчика материалы дела не содержат.

В соответствии с условиями договора субподрядчик обязался еженедельно, предоставлять подрядчику на адрес электронной почты информацию об объёмах выполненных работ по настоящему Договору в процентном соотношении и с приложением фотоматериалов (п. 6.1.31).

Указанных сведений, которые содержат расшифровку объекта фотофиксации, подписи уполномоченных лиц, материалы дела не содержат (ст. 9, 65 АПК РФ).

Представленные доказательства подготовительных работ не позволяют установить факт выполнения работ надлежащего качества (согласно условиям договора) и их сдачу подрядчику.

Предметом подрядных отношений выступает именно результат работ, подлежащий оплате.

Поскольку материалами дела не подтверждается сдача-приемка выполненных работ субподрядчиком, сведений о надлежащем качестве результата работ и их потребительской ценности для подрядчика не представлено, сумма неотработанного аванса, как неосновательное обогащение подлежит взысканию с субподрядчика в пользу подрядчика. Правовых оснований для взыскания стоимости фактически выполненных работ суд не усматривает.

Ввиду нарушения сроков выполнения работ, истцом применимы меры гражданско-правовой ответственности, в виде начисленной суммы штрафа в размере 273 094 руб. 76 коп.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с п. 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с пунктом 9.3.9 договора, в случае досрочного расторжения договора, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением субподрядчиком условий договора, субподрядчик уплачивает подрядчику штраф в размере 5% от стоимости невыполненных по договору работ.

Поскольку досрочное расторжение договора произошло ввиду неисполнения обязательства субподрядчиком, применение мер ответственности, производных от основного обязательства, обоснованно.

Суд апелляционной инстанции проверил представленный расчет неустойки, признал его арифметически правильным, соответствующим положениям действующего законодательства и требованиям договора, с учетом отсутствия в материалах дела доказательств фактической сдачи работ.

Ответчиком контррасчет произведенного истцом расчета неустойки не представлено.

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

ООО СК «МЕГА» ходатайство о снижении неустойки, равно как и доказательства ее несоразмерности, суду не предъявило.

С учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», оснований для уменьшения размера неустойки в порядке положений статьи 333 ГК РФ судом не усматривается.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 307-ЭС19-14101 по делу N А56-64034/2018 возражение должника об обоснованности начисления неустойки, равно как и ее размера, само по себе не является предусмотренным статьей 333 Гражданского кодекса заявлением об уменьшении неустойки.

Более того, должнику недостаточно заявить об уменьшении неустойки, он должен доказать наличие оснований для ее снижения.

Иной подход позволяет недобросовестному должнику, нарушившему условия согласованных с контрагентом обязательств, в том числе об избранных ими мерах ответственности и способах урегулирования спора, извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

На основании вышеизложенного, основываясь на имеющихся в материалах дела доказательств в их достаточности для разрешения настоящих требований, оцененных судом в порядке ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает законным и обоснованным удовлетворить первоначальные исковые требования в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказать.

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом изложенного, результатов рассмотрения дела, пропорционального распределения государственной пошлины, с ООО СК «МЕГА» в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина за подачу встречного иска в размере 9 530  руб.; государственная пошлина за подачу первоначального иска в сумме 32 117 руб.; государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» в сумме 3 000 руб.; государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА»  в сумме 3 000 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 268, частью 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА» оставить без удовлетворения.

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 21.10.2020 по делу № А08-10799/2018 отменить в части отказа в удовлетворения первоначальных исковых требований государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 17с/252 от 21.09.2017 в сумме 1 638 568 руб. 59 коп., штрафа в размере 273 094 руб. 76 коп., распределения судебных расходов.

Первоначальный иск государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по договору № 17с/252 от 21.09.2017 в сумме 1 638 568 руб. 59 коп., штраф в размере 273 094 руб. 76 коп.

В части отказа в удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) решение оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу встречного иска в размере 9 530  руб.; государственную пошлину за подачу первоначального иска в сумме 32 117 руб.; государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» в сумме 3 000 руб.; государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью СК «МЕГА»  в сумме 3 000 руб. 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Председательствующий судья                                                        Н.П. Афонина 

 

Судьи                                                                                     С.И. Письменный

 

                                                                                      ФИО1