АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: 

<

***> 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-7642/2024

г. Барнаул

16 сентября 2025 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Хворова А.В., при ведении протокола секретарем Гулькиной Е.А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь», г. Красноярск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании заключить договор технологического присоединения на условиях заявки от 13.11.2023,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Лесное промышленно-экспортное предприятие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участии: 

от истца - ФИО1, представитель по доверенности № 7 от 09.01.2024, диплом ААЭП № 631 от 26.06.2009; ФИО2, представитель по доверенности № 10 от 10.02.2023, диплом;  

от ответчика - ФИО3, представитель по доверенности от 12.09.2025, диплом.  

Руководствуясь статьями 27, 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л 

Обязать заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» (далее - Сетевая организация) и акционерным обществом «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее - Заявитель) на следующих условиях:  

 1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя (далее — технологическое присоединение) линии электропередачи 10 кВ, расположенной по адресу: Алтайский  

край, г. Бийск, воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Чемровская» до комплектной трансформаторной подстанции 471 с комплектной ТП № 471 и воздушные линии напряжением 0,4 кВ от ТП № 471 и ведомственной ТП ХПП линейное сооружение № 16. со следующими характеристиками:  

- максимальная мощность 250 кВт, общая мощность с учетом существующей 1650 кВт;  

- категория надежности третья; - класс напряжения в точках присоединения 10кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 1400 кВт,  

 в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства).  

Заявитель обязуется оплатить расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.  

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее - ТУ) (приложение 1 к настоящему Договору).  

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет не более 1года с даты заключения договора.  

 1.4. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая организация - до границ участка Заявителя.  

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная в документах о технологическом присоединении к электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть.  

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами  

 граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.  

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.1.6 и 2.3.8 настоящего Договора.  

1.5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению (этапа при поэтапном вводе) Стороны составляют, Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости).  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Сетевая организация обязуется: 

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору.  

2.1.2. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от ТУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовать частичное отступление от ТУ.  

2.1.3. В течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ принять участие в проверке выполнения Заявителем ТУ.  

2.1.4. В согласованный Сторонами срок принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора.  

2.1.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя с соблюдением срока, установленного пунктом 1.3 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении “включено").  

2.1.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления оригинал Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации.  

2.1.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя 2 (двух) подписанных экземпляров проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони рассмотреть, подписать и направить 1 (один) экземпляр акта Заявителю.  

В случае несогласия Сетевой организации с представленным Заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони, такой проект акта подписывается Сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если Акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан Сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях Сетевой организации.  

2.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения направить письмо в адрес  

Заявителя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы  

(заверенные копии первичных учетных документов: договоры, платежные документы,  

акты и т.д.). 2.2. Сетевая организация имеет право: 2.2.1 Проверять ход выполнения Заявителем ТУ. 

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.  

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.  

2.2.4. При невыполнении заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения при письменном обращении Заявителя продлить срок действия ТУ.  

2.2.5. В случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации. Фактическое присоединение осуществляется только после их устранения Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую организацию) в пределах срока действия настоящего договора:  

- несоблюдение установленных правил технологического присоединения; 

- несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, ТУ и (или) требованиям нормативно-технической документации;  

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) ТУ;  

- невыполнение Заявителем обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора;  

- нарушение сроков платы за технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.2.6. Обратиться в суд с иском о расторжении Договора в случае нарушения Заявителем установленного пунктом 1.3. срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.  

2.3. Заявитель обязуется: 2.3.1. Принять к исполнению утвержденные ТУ. 

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по  

настоящему договору. 

2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса  

 Сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своихобязательств по настоящему договору.  

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по ТУ (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления уведомления о выполнении ТУ) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям ТУ.  

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в ТУ, направить в адрес Сетевой организации уведомление об исполнении ТУ со стороны Заявителя способом, подтверждающим отправку и получение уведомления, представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).  

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения ТУ Заявителем.  

2.3.7. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.  

2.3.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения, подписать представленные Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости), либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в  

 Сетевую организацию. 

2.3.9. Обеспечить соответствие технических характеристик, присоединяемых  

энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) требованиям  

регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов, 

2.3.10. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством  

Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации,  

обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в  

ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими  

приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии. 

2.3.11. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору и не  

позднее момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов  

электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой  

организации известить Сетевую организацию об отказе от исполнения настоящего  

договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного  

уведомления, не позднее 30 (тридцати) дней до планируемой даты расторжения договора.  

2.3.12. Направить в адрес Сетевой организации уведомление о подтверждении  

оплаты понесенных Сетевой организацией расходов либо, при наличии возражений  

направить мотивированный отказ от возмещения в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Сетевой организации о возмещении понесенных расходов.  

2.3.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с пунктом 2.1.8. настоящего договора, возместить Сетевой организацие понесенные расходы или направить мотивированный отказ от возмещения.  

2.3.14. Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.  

2.4.Заявитель имеет право: 

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от ТУ, обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.  

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору до момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в соответствии с пунктом 2.3.14 настоящего Договора.  

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем договоре, с учетом условий, указанных в 2.4.2.  

3. Размер платы по Договору и порядок оплаты 

3.1. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 529 от 28.11.2022 г., и составляет 17356 (Семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 54 коп., в том числе НДС 20% в сумме 2892 (Две тысячи восемьсот девяносто два) руб. 76 коп..  

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:  

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 1735 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) руб. 65 коп., в том числе НДС 20% в сумме 289 (Двести восемьдесят девять) руб. 28 коп. вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;  

 - 30% платы за технологическое присоединение в размере 5206 (Пять тысяч двести шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС 20% в сумме 867 (Восемьсот шестьдесят семь) руб. 83 коп. вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;  

 - 20% платы за технологическое присоединение в размере 3471 (Три тысячи четыреста семьдесят один) руб. 31 коп., в том числе НДС 20% в сумме 578 (Пятьсот семьдесят восемь) руб. 55 коп. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;  

 - 30% платы за технологическое присоединение в размере 5206 (Пять тысяч двести шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС 20% в сумме 867 (Восемьсот шестьдесят семь) руб. 83 коп. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;  

 - 10% платы за технологическое присоединение в размере 1735 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) руб. 65 коп., в том числе НДС 20% в сумме 289 (Двести восемьдесят девять) руб. 28 коп. вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.  

3.3. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

3.4. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.  

3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию Сетевой организации по решению суда.  

4.3. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.  

4.5. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.  

 4.6. В случае неурегулирования Сторонами условий по оплате понесенных Сетевой организацией расходов, возмещение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Разрешение споров 

 5.1. Стороны устанавливают, что все споры и разногласия, возникающие по поводу заключения, исполнения, изменения или прекращения настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров. Возможные претензии по договору должны быть рассмотрены Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их получения.  

 5.2. Если согласие не будет достигнуто, Стороны передают спор на разрешение в 

Арбитражный суд Алтайского края. 

6. Заключительные положения 

 6.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя не может превышать величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.  

В случае если величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, предусмотренная заявкой и настоящим Договором, превышает величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на объект капитального строительства на момент подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения, Сетевая организация указывает в нем величину максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя в соответствии с проектной документацией на объект капитального строительства. В данном случае Сетевой организацией вносятся соответствующие изменения в настоящий Договор и ТУ посредством заключения дополнительного соглашения к Договору и подготовки изменений в ТУ (в части уменьшения максимальной мощности).  

6.2. Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони, мотивированные отказы от их подписания, а также уведомление об отказе от технологического присоединения и Акт понесенных расходов направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.  

6.3. Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены по факсу с последующим обязательным  

направлением указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.  

6.4. Настоящий договор вступает в силу с даты получения Сетевой организацией подписанного с обеих Сторон экземпляра договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.  

6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

6.7. Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о технологическом присоединении и фактического приема (подачи) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).  

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.9. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменениях реквизитов, организационно-правовой формы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.  

 7. Перечень приложений к Договору  

Приложение: Технические условия. 

8. Местонахождения, реквизиты и подписи Сторон 

Сетевая организация: ПАО «Россети Сибирь» Юр. адрес: 660021, г. Красноярск, ул. 

Бограда, 144-A Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»  

Факт. адрес: 656002, 

<

...>, ИНН 

<

***> Получатель платежа ПАО «Россети Сибирь» Банк получателя: Красноярское отделение № 8646 Сбербанка России Р/сч.: 40702810831000011698 Корр.сч 30101810800000000627 

БИК 040407627  

Заявитель: АО «СК Алтайкрайэнерго»  

Юр. адрес: 656002, 

<

...> Факт. адрес: 656002, 

<

...> ИНН/КПП 

<

***>/222401001 

Р/с 

<

***> Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанка России г. Барнаул  

К/с 30101810200000000604 БИК: 040173604  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям 

 (для физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 670 кВт и менее 5000 кВт)  

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: линия электропередачи  

10 кВ 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых  

осуществляетсятехнологическое присоединение энергопринимающих устройств  

заявителя: линия электропередачи 10 кВ, расположенная по адресу: Алтайский край, г.  

Бийск, воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Чемровская» до комплектной  

трансформаторной подстанции 471 с комплектной ТП № 471 и воздушные линии  

напряжением 0,4 кВ от ТП № 471 и ведомственной ТП ХПП линейное сооружение №  

16. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:  

250 кВт, общая мощность с учетом существующей 

1650 кВт. 

3.а. Ранее присоединенная мощность по объекту 1400 кВт. 4. Категория надежности: III (третья). 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.  

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024 г.  

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств покаждой точке присоединения: Iточкаприсоединения:контактные соединения ВЛ-10 кВ Л-66-7к проходным изоляторам ячейки 18 ПС № 66«Чемровская» 35/10 кВ,максимальная мощность 1650 кВт.  

8. Основной источник питания: ПС № 66 «Чемровская» 35/10 кВ, яч. 18. 9. Резервный источник питания: отсутствует. 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Организационные мероприятия: 

 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение. 

10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя. 

10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.  

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с Действующим законодательством.  

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Требования по проектированию внешней схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО «Россети Сибирь»: разработать проектную Документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87.  

11.2. Требования по проектированию и установке устройств: 11.2.1. Защиты и автоматики: определить проектом; 

11.2.2. Противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления: определить проектом;  

11.2.3. Регулирования реактивной мощности: определить проектом необходимость установкиустройств компенсации реактивной мощности для поддержания tg в точках присоединённая к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь»«Алтайэнерго» не выше 0,4.  

11.2.4. Телемеханике, связи: определить проектом; 

11.2.5. Учета электрической энергии: для 1 точки присоединения по существующей схеме в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.052012 № 442).  

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: определить проектом. При работе от ДГУ предусмотреть блокировки, исключающие подачу напряжения во внешнюю электрическую сеть.  

11.4. Требования к оформлению проекта электроснабжения: проект электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической Документации.  

11.5. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и органом федерального государственного энергетического надзора: согласовать проектную Документацию со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.  

Дополнительные сведения: 

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах  

 электрических сетей, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» без предварительного согласования;  

 Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.  

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» 50 000 руб. расходов за подачу кассационной жалобы.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.В. Хворов