г. Владимир                                                      

«15» сентября 2022 года                                                  Дело № А43-52606/2018

 

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Назаровой Н.А.,

судей  Новиковой Л.П., Тарасовой Т.И.,  

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Вареник Г.И., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мяском» и общества с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 01.06.2021 по делу № А43-52606/2018, принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мяском» (ОГРН 1125222000485, ИНН 5222070537) к обществу с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» (ОГРН 1115256004687, ИНН 5256103702) о взыскании стоимости устранения недостатков и неосновательного обогащения и по иску общества с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» к обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мяском» о взыскании стоимости выполненных работ по договору и неустойки,

 

при участии:

от заявителя (подрядчика) - общества с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» – генерального директора Терехина В.В. на основании протокола от 07.04.2020 № 11, Назарова Д.А. по доверенности от 04.08.2021 № 1 сроком действия до 31.12.2022 (диплом ВСБ 0801248 от 24.06.2004, паспорт);

общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мяском» явку полномочного представителя не обеспечило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, 

 

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мяском» (далее – ООО «Агрофирма Мяском») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» (далее – ООО «АвтоДорСтрой») о взыскании стоимости устранения недостатков некачественно выполненных работ 43 772 197 руб. и взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости оплаченных, но не выполненных работ в сумме 2 956 478 руб. 87 коп. по договорам подряда от 01.06.2015 №13/2015, от 07.12.2015 № 35/2015, от 07.12.2015 № 35-1/2015 (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования основаны на статьях 721, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы некачественным выполнением работ.

ООО «АвтоДорСтрой» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ООО «Агрофирма Мяском» о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда от 01.06.2015 № 13/2015.

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 709 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неисполнением ООО «Агрофирма Мяском» обязанности по оплате фактически выполненных и принятых работ.

Поскольку иски взаимосвязаны по представленным доказательствам и предмету доказывания, суд объединил дела в одно производство для совместного рассмотрения.

Решением от 01.06.2021 Арбитражный суд Нижегородской области в удовлетворении требований ООО «Агрофирма Мяском» отказал. Взыскал с ООО «Агрофирма Мяском» в пользу ООО «АвтоДорСтрой» 40 000 руб. расходов на проведение экспертизы.

Исковые требования ООО «АвтоДорСтрой» о взыскании неустойки удовлетворил частично. Взыскал с ООО «Агрофирма Мяском» в пользу ООО «АвтоДорСтрой» 18 351 575 руб. 35 коп. задолженности за выполненные работы по договору подряда от 01.06.2015 № 13/2915, 13 428 747 руб. 50 коп. договорной неустойки, 196 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Агрофирма Мяском» обратилось  в Первый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований ООО «Агрофирма Мяском».

ООО «АвтоДорСтрой» также не согласившись с принятым судебным актом и обратилось  в Первый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить в части снижения заявленной ответчиком к взысканию с истца договорной неустойки до определенной суммы без дальнейшего начисления и принять по делу новый судебный акт.

Указанные жалобы приняты Первым арбитражным апелляционным судом к производству и назначены к рассмотрению.

13.09.2022 от ООО «Агрофирма Мяском» поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного ООО «Агрофирма Мяском», в лице директора ФИО1, и ООО «АвтоДорСтрой», в лице представителя ФИО2, действующим по доверенности от 10.01.2022 сроком действия до 31.12.2023, по условиям которого:

1. ООО «Агрофирма Мяском» признает задолженность перед ООО «АвтоДорСтрой» следующую задолженность по договору подряда от 01.06.2015 № 13/2015:

1.1. Задолженность в размере 18 351 575 руб., установленную решением Арбитражного суда Нижегородской области от 01.06.2021 по делу № А4-52606/2018, и договорную неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ за период с 02.10.2017 и до даты заключения Соглашения в общей сумме 3 138 661 руб. 98 коп. Сумма неустойки определена на основании соглашения сторон с учетом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2 Задолженность по оплате следующих дополнительных расходов ответчика:

- по договору подряда от 01.06.2015 № 13/2015 в размере 1 382 103 руб. 74 коп. в связи с изменением типа дорожных покрытий (изменение типа дорожной одежды);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в размере 5 140 906 руб. в связи с выполнением работ по зданиям № 06 и № 07 по ГП (увеличение объема кровельного покрытия, сэндвич-панелей, земляных работ, устройства цокольных панелей);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в размере 2 135 135 руб. 66 коп. в связи с выполнением работ по устройству тентового покрытия (увеличение площади тентового покрытия на 2 049,10 кв.м. не предусмотренное сметой документацией);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в связи с выполнением работ по устройству тентового покрытия в размере 1 983 686 руб. 20 коп. (в пределах объемов предусмотренных сметной документацией);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в размере 1 436 620 руб. 50 коп. в связи с удорожанием оборудования при производстве работ по зданиям № 06 и № 07 по ГП;

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35-1/2015 в связи с выполнением работ по отоплению и вентиляции (установка штор, приводов, автоматики) в размере 536 009 руб. 10 коп.

Итого: 30 966 036 руб. 50 коп. (сумма основного долга) и 3 138 661 руб. 98 коп. (сумма договорной неустойки).

2. ООО «АвтоДорСтрой» признает заявленные ООО «Агрофирма Мяском» к взысканию с ответчика суммы неосновательного обогащения в виде оплаченных непредвиденных затрат по договорам подряда от 01.06.2015 № 13/2015, от 07.12.2015 № 35/2015, от 07.12.2015 № 35-1/2015 в общей сумме 2 715 929 руб. 18 коп.

По соглашению сторон, вышеуказанная сумма непредвиденных затрат зачитывается ответчиком в счет оплаты суммы основного долга истца, указанной в пункте 1 Соглашения

3. По соглашению сторон, ООО «АвтоДорСтрой» зачитывает в счет оплаты суммы основного долга, указанной в пункте 1 Соглашения, переплату ООО «Агрофирма Мяском» по договорам подряда от 07.12.2015 № 35/2015 и от 07.12.2015 № 35-1/2015 в общей сумме 9 308 122 руб. 91 коп.

4. ООО «АвтоДорСтрой» признает задолженность перед ООО «Агрофирма Мяском» по уплате расходов по устранению недостатков работ, вы полненных ответчиком, по устройству отмостки, пандусов и цокольных панелей зданий № 06 и № 07 по ГП в общей сумме 1 926 811 руб. 15 коп. Сумма определена на основании заключения по дополнительной судебной экспертизе в рамках рассмотрения дела № А43-52606/2018 Первым арбитражным апелляционным судом.

По соглашению сторон, вышеуказанная сумма расходов зачитывается ответчиком в счет оплаты суммы основного долга истца, указанной в пункте 1 Соглашения.

5. С учетом зачетов, указанных в пунктах 2 - 4 Соглашения, задолженность ООО «Агрофирма Мяском» перед ООО «АвтоДорСтрой» составляет 17 015 173 руб. 26 коп. (сумма основного долга) и 3 138 661 руб. 98 коп. (сумма договорной неустойки). Общая сумма задолженности истца перед ООО «АвтоДорСтрой» составляет 20 153 835 руб. 24 коп.

6. ООО «Агрофирма Мяском» оплачивает ООО «АвтоДорСтрой» задолженность, указанную в пункте 5 Соглашения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета, в следующие сроки:

- 2 000 000 руб. (сумма основного долга) - в течение 30 календарных дней с даты утверждения Соглашения арбитражным судом;

- 15 015 173 руб. 26 коп. (сумма основного долга) в срок до 20.12.2022; 

- 1 138 661 руб. 98 коп. (договорная неустойка) - в срок до 28.02.2023;

- 1 000 000 руб. (договорная неустойка) - в срок до 31.03.2023;

- 1 000 000 руб. (договорная неустойка) - в срок до 30.04.2023.

7. ООО «Агрофирма Мяском» вправе полностью или частично досрочно оплатить задолженность, указанную в пункте 5 Соглашения.

8. ООО «АвтоДорСтрой» обязуется в срок до 15.05.2023 выполнить следующие работы на объекте «МТФ на 1200 фуражных коров в с. Красная Лука, Лысковского района, Нижегородской области» (устранение недостатков):

8.1. Ремонт дорожного покрытия на выезде с территории объекта путем производства следующих работ.

- фрезеровка асфальтобетонного покрытия площадью ориентировочно 10 кв.м.;

-устройство асфальтобетонного покрытия средней толщины 4 см. на данном участке;

- проливка спаек нефтебитумной смесью;

- в случае, если при фрезеровке покрытия на данном участке выяснится, что разрушен нижний слой покрытия, то он будет восстановлен.

8.2. Ремонт дорожного покрытия около въезда в здание № 01 по ГП путем производства следующих работ:

- фрезеровка асфальтобетонного покрытия площадью ориентировочно 40 кв.м.;

- устройство асфальтобетонного покрытия средней толщины 4 см. на данном участке;

- проливка спаек нефтебитумной смесью;

- в случае, если при фрезеровке покрытия на данном участке выяснится, что разрушен нижний слой покрытия, то он будет восстановлен.

8.3. Ремонт дорожного покрытия около сенажных траншей путем производства следующих работ:

- фрезеровка асфальтобетонного покрытия площадью ориентировочно 20 кв.м.;

- устройство асфальтобетонного покрытия средней толщины 4 см. на данном участке;

- проливка спаек нефтебитумной смесью;

- в случае, если при фрезеровке покрытия на данном участке выяснится, что разрушен нижний слой покрытия, то он будет восстановлен.

8.4. Ремонт дорожного покрытия около сеносушилки путем производства следующих работ:

- рытьё котлована под кольца;

- монтаж двух колец 1 -1,5 м.;

- монтаж крышки;

- монтаж решётки ливневки.

8.5. Ремонт дорожного покрытия между сеносушилками путем производства следующих работ:

- монтаж ливневых лотков ориентировочно 10 м.п.

8.6. Проливка трещин дорожного покрытия нефтебитумной смесью ориентировочно 200 м.п.

9. После выполнения работ, указанных в пункте 8 Соглашения, стороны подписывают акт о приемке выполненных работ.

10. Стороны договорились, что расходы ООО «АвтоДорСтрой», понесённые им на оплату услуг представителя (юридических услуг) по делу № А43-52606/2018 в размере 300 000 руб. ООО «Агрофирма Мяском» оплачивает в порядке, определенном в пункте 6 Соглашения, в срок до 20.12.2022. После оплаты данных расходов все расчеты сторон по судебным расходам считаются исполненными в полном объеме. Расходы ООО «Агрофирма Мяском», понесённые им на оплату услуг представителей (юридических услуг) по делу № А43-52606/2018 ООО «АвтоДорСтрой» не возмещаются.

11. С момента выполнения сторонами обязательств, предусмотренных пунктами 6, 8, 10 Соглашения, взаимные обязательства сторон считаются исполненными в полном объеме.

12. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

13. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

14. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

15. Стороны обязуются воздерживаться от распространения в дальнейшем в отношении друг друга в любой форме недостоверной информации и сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию.

16. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что настоящее мировое соглашение подписывается лицами, обладающими всеми необходимыми полномочиями на его подписание и определение всех существенных условий.

17. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и иных реквизитов, указанных в мировом соглашении, а также о любых обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на исполнение настоящего мирового соглашения.

 Представители ООО «АвтоДорСтрой» поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения, представили его оригинал.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

В соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Согласно статье 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело.

Первый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев подписанное сторонами мировое соглашение, пришел к выводу о возможности его утверждения, так как оно не противоречит закону, иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В связи с утверждением мирового соглашения решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае  прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.

При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

На основании указанной нормы права подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина: ООО «Агрофирма Мяском»  в сумме 100 243 руб., ООО «АвтоДорСтрой» в сумме 101 500 руб.

Руководствуясь статьями 49, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 176, 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного Нижегородской области от 01.06.2021 по делу                                   № А43-52606/2018 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мяском» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), по условиям которого:

1. ООО «Агрофирма Мяском» признает задолженность перед ООО «АвтоДорСтрой» следующую задолженность по договору подряда от 01.06.2015 № 13/2015:

1.1. Задолженность в размере 18 351 575 руб., установленную решением Арбитражного суда Нижегородской области от 01.06.2021 по делу № А4-52606/2018, и договорную неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ за период с 02.10.2017 и до даты заключения Соглашения в общей сумме 3 138 661 руб. 98 коп. Сумма неустойки определена на основании соглашения сторон с учетом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2 Задолженность по оплате следующих дополнительных расходов ответчика:

- по договору подряда от 01.06.2015 № 13/2015 в размере 1 382 103 руб. 74 коп. в связи с изменением типа дорожных покрытий (изменение типа дорожной одежды);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в размере 5 140 906 руб. в связи с выполнением работ по зданиям № 06 и № 07 по ГП (увеличение объема кровельного покрытия, сэндвич-панелей, земляных работ, устройства цокольных панелей);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в размере 2 135 135 руб. 66 коп. в связи с выполнением работ по устройству тентового покрытия (увеличение площади тентового покрытия на 2 049,10 кв.м. не предусмотренное сметой документацией);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в связи с выполнением работ по устройству тентового покрытия в размере 1 983 686 руб. 20 коп. (в пределах объемов предусмотренных сметной документацией);

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35/2015 в размере 1 436 620 руб. 50 коп. в связи с удорожанием оборудования при производстве работ по зданиям № 06 и № 07 по ГП;

- по договору подряда от 07.12.2015 № 35-1/2015 в связи с выполнением работ по отоплению и вентиляции (установка штор, приводов, автоматики) в размере 536 009 руб. 10 коп.

Итого: 30 966 036 руб. 50 коп. (сумма основного долга) и 3 138 661 руб. 98 коп. (сумма договорной неустойки).

2. ООО «АвтоДорСтрой» признает заявленные ООО «Агрофирма Мяском» к взысканию с ответчика суммы неосновательного обогащения в виде оплаченных непредвиденных затрат по договорам подряда от 01.06.2015 № 13/2015, от 07.12.2015 № 35/2015, от 07.12.2015 № 35-1/2015 в общей сумме 2 715 929 руб. 18 коп.

По соглашению сторон, вышеуказанная сумма непредвиденных затрат зачитывается ответчиком в счет оплаты суммы основного долга истца, указанной в пункте 1 Соглашения

5. По соглашению сторон, ООО «АвтоДорСтрой» зачитывает в счет оплаты суммы основного долга, указанной в пункте 1 Соглашения, переплату ООО «Агрофирма Мяском» по договорам подряда от 07.12.2015 № 35/2015 и от 07.12.2015 № 35-1/2015 в общей сумме 9 308 122 руб. 91 коп.

6. ООО «АвтоДорСтрой» признает задолженность перед ООО «Агрофирма Мяском» по уплате расходов по устранению недостатков работ, вы полненных ответчиком, по устройству отмостки, пандусов и цокольных панелей зданий № 06 и № 07 по ГП в общей сумме 1 926 811 руб. 15 коп. Сумма определена на основании заключения по дополнительной судебной экспертизе в рамках рассмотрения дела № А43-52606/2018 Первым арбитражным апелляционным судом.

По соглашению сторон, вышеуказанная сумма расходов зачитывается ответчиком в счет оплаты суммы основного долга истца, указанной в пункте 1 Соглашения.

7. С учетом зачетов, указанных в пунктах 2 - 4 Соглашения, задолженность ООО «Агрофирма Мяском» перед ООО «АвтоДорСтрой» составляет 17 015 173 руб. 26 коп. (сумма основного долга) и 3 138 661 руб. 98 коп. (сумма договорной неустойки). Общая сумма задолженности истца перед ООО «АвтоДорСтрой» составляет 20 153 835 руб. 24 коп.

8. ООО «Агрофирма Мяском» оплачивает ООО «АвтоДорСтрой» задолженность, указанную в пункте 5 Соглашения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета, в следующие сроки:

- 2 000 000 руб. (сумма основного долга) - в течение 30 календарных дней с даты утверждения Соглашения арбитражным судом;

- 15 015 173 руб. 26 коп. (сумма основного долга) в срок до 20.12.2022; 

- 1 138 661 руб. 98 коп. (договорная неустойка) - в срок до 28.02.2023;

- 1 000 000 руб. (договорная неустойка) - в срок до 31.03.2023;

- 1 000 000 руб. (договорная неустойка) - в срок до 30.04.2023.

9. ООО «Агрофирма Мяском» вправе полностью или частично досрочно оплатить задолженность, указанную в пункте 5 Соглашения.

10. ООО «АвтоДорСтрой» обязуется в срок до 15.05.2023 выполнить следующие работы на объекте «МТФ на 1200 фуражных коров в с. Красная Лука, Лысковского района, Нижегородской области» (устранение недостатков):

8.1. Ремонт дорожного покрытия на выезде с территории объекта путем производства следующих работ.

- фрезеровка асфальтобетонного покрытия площадью ориентировочно 10 кв.м.;

-устройство асфальтобетонного покрытия средней толщины 4 см. на данном участке;

- проливка спаек нефтебитумной смесью;

- в случае, если при фрезеровке покрытия на данном участке выяснится, что разрушен нижний слой покрытия, то он будет восстановлен.

8.2. Ремонт дорожного покрытия около въезда в здание № 01 по ГП путем производства следующих работ:

- фрезеровка асфальтобетонного покрытия площадью ориентировочно 40 кв.м.;

- устройство асфальтобетонного покрытия средней толщины 4 см. на данном участке;

- проливка спаек нефтебитумной смесью;

- в случае, если при фрезеровке покрытия на данном участке выяснится, что разрушен нижний слой покрытия, то он будет восстановлен.

8.3. Ремонт дорожного покрытия около сенажных траншей путем производства следующих работ:

- фрезеровка асфальтобетонного покрытия площадью ориентировочно 20 кв.м.;

- устройство асфальтобетонного покрытия средней толщины 4 см. на данном участке;

- проливка спаек нефтебитумной смесью;

- в случае, если при фрезеровке покрытия на данном участке выяснится, что разрушен нижний слой покрытия, то он будет восстановлен.

8.4. Ремонт дорожного покрытия около сеносушилки путем производства следующих работ:

- рытьё котлована под кольца;

- монтаж двух колец 1 -1,5 м.;

- монтаж крышки;

- монтаж решётки ливневки.

8.5. Ремонт дорожного покрытия между сеносушилками путем производства следующих работ:

- монтаж ливневых лотков ориентировочно 10 м.п.

8.6. Проливка трещин дорожного покрытия нефтебитумной смесью ориентировочно 200 м.п.

9. После выполнения работ, указанных в пункте 8 Соглашения, стороны подписывают акт о приемке выполненных работ.

10. Стороны договорились, что расходы ООО «АвтоДорСтрой», понесённые им на оплату услуг представителя (юридических услуг) по делу № А43-52606/2018 в размере 300 000 руб. ООО «Агрофирма Мяском» оплачивает в порядке, определенном в пункте 6 Соглашения, в срок до 20.12.2022. После оплаты данных расходов все расчеты сторон по судебным расходам считаются исполненными в полном объеме. Расходы ООО «Агрофирма Мяском», понесённые им на оплату услуг представителей (юридических услуг) по делу № А43-52606/2018 ООО «АвтоДорСтрой» не возмещаются.

11. С момента выполнения сторонами обязательств, предусмотренных пунктами 6, 8, 10 Соглашения, взаимные обязательства сторон считаются исполненными в полном объеме.

12. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

13. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

14. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

15. Стороны обязуются воздерживаться от распространения в дальнейшем в отношении друг друга в любой форме недостоверной информации и сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию.

16. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что настоящее мировое соглашение подписывается лицами, обладающими всеми необходимыми полномочиями на его подписание и определение всех существенных условий.

17. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и иных реквизитов, указанных в мировом соглашении, а также о любых обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на исполнение настоящего мирового соглашения.

Производство по делу прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мяском» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 98 743 (девяносто восемь тысяч семьсот сорок три) руб., уплаченную по платежному поручению от 20.18.2018 № 3214 за рассмотрение иска; 1500 (одна тысяча пятьсот) руб., уплаченную по платежному поручению от 29.06.2021 № 1244 за рассмотрение апелляционной жалобы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 100 000 (сто тысяч) руб., уплаченную по платежному поручению от 13.12.2018 № 2089 за рассмотрение иска; 1500 (одна тысяча пятьсот) руб., уплаченную по платежному поручению от 07.07.2021 № 1157 за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление

 вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий  судья    

ФИО3

 

Судьи

ФИО4

 

ФИО5