АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

03 ноября 2022 года

Дело № А33-16559/2022

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена «27» октября 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено «03» ноября 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Заблоцкой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Проектное предприятие «Инженерно-энергетические технологии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Проектное предприятие "Инженерно-энергетические технологии"» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) иском к муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска (далее – ответчик) о взыскании 1 132 663 рублей 17 копеек неустойки. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.07.2022 возбуждено производство по делу.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились. Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

Согласно статьям 123, 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле.

03.08.2022 от ответчика через информационную систему «Мой арбитр» поступили возражения на исковое заявление, согласно которым:

- в период действия моратория, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» предъявляемая истцом ко взысканию сумма неустойки не подлежит начислению. 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году» установлено, что до 01.01.2023 начисление и уплата пени в случае просрочки исполнения обязательства по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов по договорам, заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении, осуществляются в порядке, предусмотренном указанным законодательством Российской Федерации, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27.02.2022. Поскольку договор № 2019.53622 от 06.03.2019 поставки и монтажа индивидуальных тепловых пунктов в муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения города Сосновоборска между истцом и ответчиком заключался в целях исполнения муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями города Сосновоборска мероприятий, установленных законодательством Российской Федерации об энергосбережении, о чем говорится в названии договора, при расчете неустойки подлежит применению ключевая ставка Банка России, действовавшая на 27.02.2022 – 9,5%. Расчёт пени должен выглядеть следующим образом: 2 121 886,8 руб. (сумма долга) х 913 (количество дней просрочки за период с 01.10.20219 по 31.03.2022) х 1/300 х 9,5% (ключевая ставка ЦБРФ на 27.02.2022) = 61 3472,84 рублей.

28.08.2022 от истца через информационную систему «Мой арбитр» поступили возражения на отзыв, согласно которым:

- при проведении расчета в тексте искового заявления истцом была допущена опечатка. Срок начинает течь с 20.08.2019. Расчет пени выполнен исходя из того, что срок начинает течь с 20.08.2019. Согласно п.2.7. договора от 06.03.2019 №2019.53622 расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком документов о приемке работ (раздел 5 договора) и предоставлении подрядчиком счета-фактуры (счета). Акты о приемке выполненных работ были получены ответчиком 19.08.2019. Таким образом, установленный п. 2.7. договора от 06.03.2019 №2019.53622 начинает течь с 20.08.2019. Следовательно, 20.08.2019 + 5 рабочих дней согласно пункту 5.2 договора + 10 рабочих дней согласно пункту 5.4 договора + 15 рабочих дней на оплату согласно пункту 7.2 договора, в связи с чем, последним днем оплаты заказчиком работ по договору является 30.09.2019. Таким образом, начальной датой периода начисления неустойки будет являться 01.10.2019.

- отношения сторон, вытекающие из договора от 06.03.2019 № 2019.53622, не подпадают под регулирование норм, определенных в Постановлении Правительства РФ от 26.03.2022 № 474, поскольку договор предусматривал поставку, монтаж и пуско-наладку индивидуальных тепловых пунктов, а не приборов учета.

26.10.2022 от истца посредством системы «Мой Арбитр» поступило заявление об уточнении требований, согласно которому истец просил взыскать 1 130 258 рублей 36 копеек неустойки.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Принимая во внимание, что заявление истца об изменении размера исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, на основании статьи 49 АПК РФ, заявление принято судом.

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.

06.03.2019 между муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью Проектное предприятие «Инженерно-энергетические технологии» (подрядчик) заключен договор №2019.53622, по условиям которого подрядчик, по заданию заказчика, обязуется выполнить работы по поставке, монтажу, пуско-наладке индивидуальных тепловых пунктов, в соответствии с техническим заданием (приложение№№1.1-1.7) и проектной документацией (приложение №№ 2.1-2.7), на объектах заказчика, указанных в приложении № 3 и передать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Работа выполняется иждивением подрядчика, включая доставку оборудования, материалов, механизмов, комплектующих, их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ. В рамках выполнения работ по настоящему договору, подрядчик, своими силами и за свой счет, осуществляет регулярную уборку и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения подрядчиком работ (пункт 1.2 договора).

Согласно пункту 1.3. договора этапы работ и сроки их завершения определены в приложении №4, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ несет подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

Цена договора определена протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме №ПРВЧЗ А2 565754 (лот 1) от 18.02.2019 составляет 6 183 076, 33 руб. (пункт 2.1 договора).

Пунктом 2.5. договора предусмотрено, что в ходе исполнения договора стороны вправе изменить количество предусмотренных договором работ, в случае их потребности, на выполнение которых заключен договор и увеличить цену договора на стоимость дополнительных работ. При уменьшении предусмотренного договором количество работ, стороны договора обязаны уменьшить цену договора на стоимость невыполненных работ, на выполнение которых заключен договор.

Согласно пункту 2.7. договора расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком документов о приемке работ (раздел 5 договора) и предоставлении подрядчиком счета-фактуры (счета). Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 договора.

Пунктом 4.1.1. договора предусмотрено, что заказчик обязуется обеспечить приемку представленных подрядчиком результатов работ по договору в течение 10 рабочих дней с момента предъявления подрядчиком выполненных работ к сдаче, или предоставить мотивированный отказ в приемке работ. Сообщить подрядчику в течение 10 рабочих дней по обнаружению об отступлениях от условий договора и иных недостатках в работе, выполненной подрядчиком, которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее принятия (пункт 4.1.2.).

Согласно пункту 4.2.5. договора при обнаружении в ходе производства работ, не учтенных в техническом задании, проектной и сметной документации работ, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ - письменно уведомить об этом заказчика для решения вопроса о составлении технической и сметной документации на дополнительные работы и дополнительного соглашения к договору.

В соответствии с пунктом 5.2. договора, по завершении работ подрядчик письменно уведомляет заказчика о необходимости приемки результата выполненных работ и передает заказчику: исполнительную документацию; акты «О приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), «Акт приемки-сдачи  отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3). 

Уведомление о необходимости приемки результата выполненных работ и документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть вручены заказчику не менее чем за 5 рабочих дней до начала приемки результата работ.

В состав исполнительной документации (подписанной и заверенной печатью подрядчика), передаваемой подрядчиком заказчику, входят:  исполнительные схемы, планы, профили, разрезы, схемы сварных стыков, акты ультразвукового контроля сварных швов, акты неразрушающего контроля сварных швов, акты замеров сопротивления изоляции и т.п.; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (при наличии таких работ);  заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих качество использованных подрядчиком материалов (паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов); документы, подтверждающие допуск подрядчика (субподрядчика) к выполняемым видам работ; накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование, журналы производства работ, и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами (при необходимости, определяемой Заказчиком). Состав исполнительной документации может уточняться заказчиком. Уточненный перечень исполнительной документации направляется заказчиком подрядчику в письменном виде.

Из пункта 5.4. договора следует, что сдача-приемка результата работ осуществляется заказчиком после получения от подрядчика уведомления о готовности к приемке-сдаче результата работ и документов, предусмотренных пунктом 5.2. договора, в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за истечением срока, предусмотренного пунктом 5.2. договора.

В случае если во время приемки результата работ заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты выполненных работ, а также недостатки в представленной исполнительной документации, заказчик направляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием выявленных недостатков.

Стороны составляют акт с перечислением недостатков и замечаний результатов работ и (или) исполнительной документации, подлежащих устранению. Представители подрядчика, участвующие в сдаче-приемке результата работ обязаны подписать акт о выявленных заказчиком недостатках и дефектах результата работ и исполнительной документации.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с заказчиком. Срок устранения недостатков, дефектов не может превышать 10 календарных дней.

Приемка результата работ после устранения недостатков, дефектов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2-5.4. настоящего договора.

В силу пункта 7.2. договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Приложением № 3 к договору сторонами согласованы следующие объекты: МАДОУ ДСКН №1 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №3 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска,  МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска,  МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска,  МАДОУ ДСКН №8 г.  Сосновоборска.

Платежным поручением от 28.04.2022 № 902 ответчиком произведена оплата в сумме 2 121 886 рублей 80 копеек.

Претензией от 23.05.2022 № 65 ответчику предложено оплатить пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 1 132 663 рубля 17 копеек в течение 7 календарных дней со дня получения претензии.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя обязательств , истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Заключенный между сторонами договор от 06.03.2019 № 2019.53622 по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регламентируются положениями главой 37 ГК РФ.

В силу пункт 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Как следует из иска, истец обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока оплаты стоимости дополнительных работ.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.03.2022 по делу № А33-19004/2020с муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска  в пользу общества с ограниченной ответственностью проектное предприятие «Инженерно-энергетические технологии» взыскано 2 121 886,8 руб. задолженности по оплате работ по договору от 06.03.2019 № 2019.53622.

Платежным поручением от 28.04.2022 № 902 ответчиком произведена оплата в сумме 2 121 886 рублей 80 копеек.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На сумму задолженности в соответствии с пунктом 7.2. договора за несвоевременную оплату выполненных работ истец начислил неустойку в сумме 1 130 258 рублей 36 копеек за период с 01.10.2019 по 27.04.2022.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» на основании пункта 1 статьи 9.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с 01.04.2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

С учетом пункта 1 статьи 9.1., статьи 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 7 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1., абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. 

Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. После опубликования заявления об отказе лица от применения в отношении его моратория действие моратория не распространяется на такое лицо, в отношении его самого и его кредиторов ограничения прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, не применяются.

Доказательств того, что ответчик воспользовался правом на отказ от применения в отношении него моратория, не представлено, единый федеральный реестр сведений о банкротстве информации об отказе от применения моратория в отношении ответчика не содержит.

Таким образом, неустойка может быть взыскана с ответчика за период с 01.10.2019 по 31.03.2022 (включительно), в удовлетворении требований в остальной части следует отказать, поскольку указанное требование предъявлено истцом в период действия моратория, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497.

При указанных обстоятельствах требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере – 1 097 793 рубля 50 копеек. 

Доводы ответчика о наличии оснований для применения к спорным правоотношениям положений Постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году» отклоняются судом как основанные на неверном применении норм действующего регулирования.

Предметом спорного договора являлась поставка индивидуальных тепловых пунктов.

Индивидуальный тепловой пункт - комплекс устройств для присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети, преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки для одного здания, строения или сооружения (абзац 10 пункта 3 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»).

В силу абзаца 6 пункта 2 Правил № 354 под прибором учета понимается средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или домовладении при наличии технической возможности и используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилом доме (части жилого дома) или домовладении.

Таким образом, понятия индивидуальный тепловой пункт и прибор учета не являются тождественными, обратного ответчиком не доказано.

В абзаце 2 части 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью проектное предприятие «Инженерно-энергетические технологии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 097 793 рубля 50 копеек неустойки, а также 23 605 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью проектное предприятие «Инженерно-энергетические технологии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 24 рубля государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 22.06.2022 № 554.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

А.В. Заблоцкая