Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-24364/2018

20 июля 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  20 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "АСКРИН" (адрес:  Россия 197374, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/Ф/17Н КАБИНЕТ №5, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ПУЛЬСАР" (адрес:  Россия 198255, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР А, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 316 221 руб. 50 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 04.07.18.

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.03.18. 

 

установил:

ООО "АСКРИН" предъявило иск о взыскании с ООО "ПУЛЬСАР" 316 221 руб. 50 коп. авансового платежа по договору №0-25-2811/17-А от 28.11.17.

Ответчик иск отклонил.

По ходатайству ответчика определением от 04.05.18 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

Между ООО «Аскрин» (далее – Истец, Заказчик) и ООО «Пульсар» заключен договор №0-25-2811/17-А от 28.11.2017 г.

В соответствии с указанным договором подрядчик – ответчик обязался по заданию заказчика – истца выполнить работы в течение 19 (девятнадцати) календарных дней с момента перечисления Заказчиком аванса в размере 70% от цены договора, что составляет 316 221 (триста шестнадцать тысяч двести двадцать один) рубль 50 коп. 

1 декабря 2017 г. заказчик перечислил аванс в полном объеме, что подтверждается платежным поручением №4316 от 01.12.2017 г. 

Таким образом срок выполнения работ окончился 19.12.2017 года, результат выполнения работ не был представлен Заказчику. 

Срок действия договора истек 31.12.17 (п.6.2)

Претензией от 12.01.18 исх. №2 заказчик отказался от договора и потребовал возврата авансового платежа.

До настоящего времени денежные средства ответчиком не возвращены.

Возражения ответчика, не могут быть приняты во внимание, так как сообщение о готовности передать работы было направлено истцу после истечения срока действия договора, когда истец утратил интерес к результату работ.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПУЛЬСАР" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АСКРИН" 316 221 руб. 50 коп. авансового платежа и 9 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.