АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, 

<

...>

Тел/факс 

<

***>, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-372/2025

г. Астрахань

06 июня 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2025 года

 Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Аюповой А.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кулиной А.А.

 рассмотрел в судебном заседании в режиме - онлайн исковое заявление Администрации муниципального образования "Город Ахтубинск" (ОГРН 

<

***>, 300114330201 

 к Обществу с ограниченной ответственностью "Простор" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

 о взыскании неиспользованной суммы авансового платежа по муниципальным контрактам в общей сумме 2.924.760,53 руб.,

 при участии:

 от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 30.01.2025, №4, (участие в онлайн);

 от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 11.09.2024.

Администрация муниципального образования "Город Ахтубинск" обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Простор" о взыскании неиспользованной суммы авансового платежа по муниципальным контрактам в общей сумме 3.363.561,81 руб.

В предварительном судебном заседании, в виду частичного погашения задолженности, представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в порядке статьи 49 АПК РФ, и просил суд считать их следующими:

Взыскать с ООО "Простор" в пользу Администрации муниципального образования "Город Ахтубинск" неиспользованную сумму авансового платежа по муниципальным контрактам в общей сумме 2.924.760,53 руб..

Возражений не последовало.

Судом заявленные уточнения приняты. 

В предварительном судебном заседании судом был поставлен вопрос о переходе из стадии предварительного судебного заседания в стадию судебного разбирательства.

Возражений не последовало.

Суд в порядке пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с согласия представителей сторон завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание по настоящему делу.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования, с учетом уточнений, просил суд удовлетворить иск в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании, с учетом уточнений заявленных требований, признал задолженность в полном объеме.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в период с 05.09.2024 г. по 19.09.2024 г. между администрацией муниципального образования «Город Ахтубинск» (далее Заказчик) и ООО «Простор» (далее Подрядчик) были заключены следующие муниципальные контракты (далее - МК) на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (дорожные знаки, разметка, ИДИ) на территории г. Ахтубинска Астраханской области (не являющиеся объектами капитальных вложений):

МК от 05.09.2024 г. № 24 

Контракт на выполнение работ по обустройству 4 пешеходных переходов (знаки, разметка), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Анатолия ФИО7 и пер. Ломоносова, перекресток ул. Волгоградская и ул. Финогенова, перекресток ул. Волгоградская и ул. Ермака, ул. Чкалова, д. 7 (МКУДО «РДХШ № 4 им. П.И. Котова») сроком исполнения до 17.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 599 822,88 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 96743 авансовый платеж в размере 179 946,86 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10595/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г. № 25 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН), расположенного по адресу: 

<

...> (МБДОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район») сроком исполнения до 17.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 405 777,58 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796740 авансовый платеж в размере 121 733,27 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10594/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены.

МК от 05.09.2024 г. № 26 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка, ИДН), расположенных по адресу: 

<

...> (МБДОУ «Детский сад Комбинированного вида № 4 МО «Ахтубинский район»), перекресток ул. Буденного и ул. Стогова ^сроком исполнения до 17.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 561 301,40 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 27.09.2024 г. № 821839 авансовый платеж в размере 168 390,42 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10593/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г. № 27 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДИ), расположенного по адресу: 

<

...> (МБДОУ «Детский сад Комбинированного вида № 3 МО «Ахтубинский район) сроком исполнения до 16.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 575 280,12 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796735 авансовый платеж в размере 172 584,04 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10592/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г. № 28 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН), расположенного по адресу: 

<

...> (МБДОУ «Детский сад Комбинированного вида № 3 МО «Ахтубинский район) сроком исполнения до 16.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 504 182,60 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796739 авансовый платеж в размере 151 254,78 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10591/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г. № 29 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Жуковского и ул. Циолковского, перекресток ул. Жуковского и ул. Нестерова сроком исполнения до 19.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 586 509,39 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796736 авансовый платеж в размере 175 952,82 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10590/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г. № 30 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДИ), расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Заводская и ул. Карла Маркса сроком исполнения до 20.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 545 897,42 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796737 авансовый платеж в размере 163 769,23 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10589/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г, № 31 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН), расположенного по адресу: 

<

...> (МБДОУ «СОШ № 1 МО «Ахтубинский район») сроком исполнения до 23.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 457 070,49 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796741 авансовый платеж в размере 137 121,15 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10588/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г. № 32 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, тротуар), расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Заводская, ул. Мира и ул. Красный Дон сроком исполнения до 22.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 477 105,56 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796738 авансовый платеж в размере 143 131,67 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10587/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 05.09.2024 г. № 33 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН), расположенного по адресу: 

<

...> (МДОУ «Детский сад № 11 МО «Ахтубинский район») сроком исполнения до 25.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 551 377,31 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 17.09.2024 г. № 796744 авансовый платеж в размере 165 413,19 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10586/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 12.09.2024 г. № 34 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка, тротуар), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Заводская и ул. Свердлова; перекресток ул. Анатолия ФИО7 и ул. Куйбышева сроком исполнения до 24.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 337 812,25 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 26.09.2024 г. № 817539 авансовый платеж в размере 101 343,68 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10585/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 12.09.2024 г. № 35 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН), расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Андреева (ул. Андреева, 1,2) сроком исполнения до 28.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 557 635,31 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. Платежным поручением от 26.09.2024 г. № 817538 авансовый платеж в размере 167 290,59 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10585/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 12.09.2024 г. № 36 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН, тротуар), расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Астраханская и ул. Чернышевского сроком исполнения до 28.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 510 417,75 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 26.09.2024 г. № 817537 авансовый платеж в размере 153 125,33 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10585/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 12.09.2024 г. № 37 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка, тротуар), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Астраханская и ул. Дзержинского; перекресток ул. Астраханская и ул. С. Лазо; перекресток ул. Астраханская и ул. Терешковой; ул. Астраханская 25А (в районе магазина «Колесо») сроком исполнения до 23.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 574 856,25 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 26.09.2024 г. № 817536 авансовый платеж в размере 172 456,88 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10585/12 «О возврате Неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 12.09.2024 г. № 38 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН, тротуар), расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Астраханская и ул. Грекова (ул. Дарвина) сроком исполнения до 25.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 503 713,39 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 26.09.2024 г. № 817535 авансовый платеж в размере 151 114,02 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10585/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 19.09.2024 г. № 39 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (знаки, разметка, ИДН, тротуар), расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток улиц Шоссе Авиаторов и Днепровская (ГБОУ АО «АКШИ им. П.О.Сухого») сроком исполнения до 29.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 594 939,95 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных .работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 02.10.2024 г. № 831466 авансовый платеж в размере 178 481,99 руб. оплачен Подрядчику. Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 19.09.2024 г. № 40 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ФИО3, Волгоградская (остановка Зерноток), ЕрмакаПролетарская, Волгоградская-Ермака, ФИО4 (ГИБДД) сроком исполнения до 01.12.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 433 673,36 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 02.10.2024 г. № 831472 авансовый платеж в размере 130 102,00 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 19.09.2024 г. № 41 

Контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. ФИО4 и ул. Добролюбова; ул. Иванова (район Центрального парка культуры и отдыха); перекресток ул. Добролюбова и ул. Ленина; перекресток ул. Финогенова и ул. Лычкина сроком исполнения до 29.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 535 572,20 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 02.10.2024 г. № 831467 авансовый платеж в размере 160 671,66 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 19.09.2024 г. № 42 

Контракт на выполнение работ обустройству (организации) пешеходных переходов (знаки, разметка, ИДИ), расположенных по адресу: 

<

...> (МБДОУ "СОШ № 4 МО "Ахтубинский район") сроком исполнения до 28.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 500 712,64 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 02.10.2024 г. № 831470 авансовый платеж в размере 150 213,79 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 19.09.2024 г. № 43 

Контракт на выполнение работ обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Сталя ФИО5 и ул. Щербакова (ул. Щербакова, д.9), Госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (ул. Жуковского, 22), перекресток Адмирала ФИО6 и ул. Ленина, ул. Шоссе Авиаторов (1 КПП), Заводская-Тельмана сроком исполнения до 01.12.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 455 139,22 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 02.10.2024 г. № 831469 авансовый платеж в размере 136 541,77 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 19.09.2024 г. № 44 

Контракт на выполнение работ обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка, ИДН), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, перекресток ул. Жуковского и пер. Строителей, перекресток ул. Ленина и ул. Можайского (Судебный участок) сроком исполнения до 27.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 551 396,27 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 02.10.2024 г. № 831468 авансовый платеж в размере 165 418,88 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

МК от 19.09.2024 г. № 45 

Контракт на выполнение работ обустройству пешеходных переходов (знаки, разметка), расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, Волгоградская-Петра ФИО7, ул. ФИО7 (остановка лицей), Саратовская-Волгоградская, Донская-Волгоградская, Чкалова-Волгоградская сроком исполнения до 30.11.2024 г. (п. 14.1. Контракта). 

В соответствии с п. 2.2. Контракта цена Контракта составляет 391 679,28 руб. (НДС не облагается). Расчет цены Контракта указан в приложении № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

В силу п.п. 2.8., 2.9. Контракта оплата выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс, в размере 30 % от цены Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Последующие расчеты с Подрядчиком производятся на основании предоставленных документов о приемке в следующем порядке: 

- оставшиеся 70% от цены Контракта оплачиваются по факту выполненных работ, указанных в документе о приемке, перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документа о приемке. 

Платежным поручением от 02.10.2024 г. № 831471 авансовый платеж в размере 117 503,78 руб. оплачен Подрядчику. 

Подрядные работы Подрядчиком не выполнены полностью. 

Решением Заказчика от 13.12.2024 г. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Подрядчика направлена Претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12 «О возврате неиспользованной суммы аванса в размере 30%». 

Однако, Претензия осталась без удовлетворения, денежные средства Заказчику не возвращены. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлялись Претензии с требованием вернуть неиспользованную часть авансовых платежей: претензия от 27.11.2024 г. № 10595/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10594/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10593/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10592/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10591/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10590/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10589/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10588/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10587/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10586/12; претензия от 27.11.2024 г. № 10585/12; - претензия от 27.11.2024 г. № 10583/12. 

Неисполнение требований, указанных в направленных Претензиях явилось основанием для подачи настоящего искового заявления в суд.

В соответствии с ч.9 ст.95 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», разделом 16 Контракта и на основании п.1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В связи с неисполнением условий муниципальных контрактов вступили в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контрактов.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения 3 договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении"). 

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

В рамках настоящего спора, истец реализовал свое право на возврат суммы предварительной оплаты.

Истец в судебном заседании уточнил исковые требования, в связи с частичной оплатой ответчиком, просил суд взыскать сумму оставшейся задолженности в размере 2.924.760,53 руб..

В судебном заседании представитель ответчика признал исковые требования, с учетом уточнений истца. 

Признание ответчиком исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Кроме того, представитель ответчика просил суд при распределении судебных расходов взыскать с ответчика 30% от суммы оплаченной государственной пошлины.

В силу статьи 110 АПК Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

 В силу абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, 

На основании изложенного, судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению судом с учетом признания ответчиком иска.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Простор" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации муниципального образования "Город Ахтубинск" (ОГРН 

<

***>, 300114330201 неиспользованную сумму авансового платежа по муниципальным контрактам в общем размере 2 924 760 руб. 53 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Простор" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 33 823 руб. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья

А.Н. Аюпова