Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-6477/2024

г. Благовещенск

11 сентября 2024 года

изготовлено в полном объеме

 

11 сентября 2024 года                  объявлена резолютивная часть

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи И.А. Москаленко,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление управления записи актов гражданского состояния Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Амурдом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обязать устранить недостатки работ по контракту;

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания А.А. Шутовой,

при участии в заседании: от истца - ФИО1 по доверенности,

установил:

управление записи актов гражданского состояния Амурской области (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АМУРДОМ» (далее – ответчик) об обязании устранить недостатки работ по государственному контракту от 25.07.2023 № 1239, заменить поврежденные плиты керамические, расположенные на центральной части крыльца здания в количестве 30 шт., произвести замену поврежденной стеклянной части двери, расположенной на центральном входе в здание, произвести ремонт фасада здания в местах обнаружения повреждений.

Требования обоснованы не исполнением обязанности по устранению недостатков работ в рамках гарантийных обязательств по государственному контракту. Претензия оставлена подрядчиком без удовлетворения.

Определением от 20.08.2024 назначено судебное разбирательство.

Представитель истца в заседании уточнил исковые требования, просил обязать ответчика в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки работ по государственному контракту на выполнение работ от 25.07.2023 № 1239, а именно: на фасаде здания отдела ЗАГС в г. Тында Амурской области, расположенного по адресу: г. Тында Амурской области, ул. Красная Пресня, 53, заменить стекла центральной входной двери толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 кв.м объемом 2,075 кв.м; ремонт фасада - колонны площадью 5,5 кв.м, арки площадью 81,57 кв.м, выход вентиляции площадью 21,2 кв.м; замена покрытий из плит керамогранитных размером 30x30 см объемом 3,06 кв.м. На удовлетворении требований с учетом их уточнений настаивал, представил дополнительные доказательства (копии локального сметного расчета № 12 на ремонт фасадной части здания отдела ЗАГС в 

<

...> ведомости объемов работ на ремонт фасадной части здания отдела ЗАГС в 

<

...> технического паспорта на здание отдела ЗАГС в г. Тында, фотографии центрального входа отдела ЗАГС в г. Тында управления). Требования заявлены в рамках гарантийных обязательств, гарантийный срок составляет 5 лет. Согласно контракту ответчик обязан в течение 10 дней после направления жалобы устранить недостатки. По состоянию на день заседания исполнителем требования заказчика по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Уточненные требования в порядке ст. 49 АПК РФ приняты судом к рассмотрению.

Представитель ответчика в заседание не явился, истребованные доказательства не представил, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом. Ходатайство ответчика об онлайн ознакомлении с делом от 01.08.2024 судом удовлетворено.

Представленные истцом доказательства судом исследованы и приобщены к делу.

Дело рассмотрено судом в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца и исследовав представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

В порядке Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между управлением ЗАГС Амурской области (заказчик) и ООО «Амурдом» (подрядчик) на основании протокола подведения итогов определения подрядчика заключен государственный контракт от 25.07.2023 № 1239 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания отдела ЗАГС по г. Тында Амурской области в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) (приложение № 1) и сдать их результат заказчику (п. 1.1).

Виды (содержание) и объем работ, составляющих предмет настоящего контракта, наименование и характеристики материалов, используемых при выполнении работ (далее материалы), определяются в локальном сметном расчете (Приложении № 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Все работы, выполняемые в рамках настоящего контракта ввиду сезонности их выполнения, большой социальной значимостью для заказчика выполняются в строгом сроками, установленными контрактом. Срок выполнения работ являются существенными условиями контракта (п. 1.2).

Место исполнения работ - 

<

...> (п. 1.3).

Цена контракта с учетом дополнительного соглашения от 19.12.2023 составляет 5648049,36 рублей, НСД не облагается (п. 2.1).

Подрядчик обязан обеспечить безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока (п. 4.1.6).

В соответствии с п. 5.11 контракта гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 лет с даты подписания сторонами документа о приемке.

В течение гарантийного срока подрядчик обязан устранять своими силами и за свой счет все неисправности, недостатки, дефекты в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования заказчика. Гарантийный срок продлевается до тех пор, пока подрядчик не устранит все недостатки и дефекты, что должно быть подтверждено актом об их устранении (п. 5.12 контракта).

При не урегулировании сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области (п. 9.5).

Ответчик направил истцу счет на оплату от 14.09.2023 № 37 на сумму 5648049,36 рублей.

Сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат от 14.09.2023 № 1, в соответствии с которой, КС-2 № 1 демонтажные работы 80251,33 рублей, КС-2 № 2 монтажные работы 5233970,08 рублей, КС-2 № 3 корректировочные работы 333827,95 рублей.

Акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 5648049,36 рублей подписан сторонами 18.09.2023 (гарантийный срок истекает 18.09.2028).

Платежным поручением от 18.09.2023 № 917 истец оплатил ответчику 5648049,36 рублей (с указанием основания платежа – выполнение работ по кап. ремонту фасада здания, акт о приемке от 18.09.2023, без НДС).

В апреле 2024 года заказчиком выявлены повреждения плит в количестве 25 штук в центральной части крыльца, а также трещина на стекле на центральной двери здания (служебная записка от 04.04.2024), о чем в адрес подрядчика направлены письма (исх. от 09.04.2024 № 03-22/534, от 26.04.2024 № 03-22/613).

Подрядчик к проведению ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств по контракту не приступил. На момент обращения истца в суд количество плит составило 30 штук.

В мае 2024 года заказчиком обнаружены трещины на окрашенных участках фасада здания, отхождение на колоннах штукатурки вместе с краской, в связи с выявленными фактами в адрес подрядчика направлена претензия от 30.05.2024 исх. № 03-22/761.

20.08.2024 истцом составлена служебная записка о неустранении появившихся повреждений, в рамках гарантийного срока.

Неисполнение требований истца ответчиком явилось основанием для обращения в арбитражный суд.

На момент рассмотрения дела в суде, истец уточнил исковые требования, просил обязать ответчика в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки работ по государственному контракту на выполнение работ от 25.07.2023 № 1239, а именно: на фасаде здания отдела ЗАГС в г. Тында Амурской области, расположенного по адресу: г. Тында Амурской области, ул. Красная Пресня, 53, заменить стекла центральной входной двери толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 кв.м объемом 2,075 кв.м; ремонт фасада - колонны площадью 5,5 кв.м, арки площадью 81,57 кв.м, выход вентиляции площадью 21,2 кв.м; замена покрытий из плит керамогранитных размером 30x30 см объемом 3,06 кв.м.

Суд считает уточненные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (статья 704 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда: риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку (статья 705 ГК РФ).

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (статья 711 ГК РФ).

С учетом ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (ч. 1, 2 ст. 716 ГК РФ).

В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы (ч. 2 ст. 718 ГК РФ).

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться (статья 720 ГК РФ).

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (статья 721 ГК РФ).

В соответствии со статьей 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Статьей 723 ГК РФ определено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397) (ч. 1).

Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475) (ч. 4, 5 ст. 723 ГК РФ).

Статьей 724 ГК РФ предусмотрено, что если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре (статья 726 ГК РФ).

В силу статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Согласно ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В статье 766 ГК РФ закреплено, что государственный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. В случае, если государственный контракт заключается по результатам торгов или запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для государственных нужд, условия государственного контракта определяются в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса котировок цен на работы.

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (ст. 768 ГК РФ).

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

В части 2 статьи 755 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении (часть 3,4 статьи 755 ГК РФ).

Под гарантийным сроком в договорах подряда понимается период времени, в течение которого подрядчик гарантирует стабильность показателей качества результата произведенных работ в процессе его использования по назначению при условии соблюдения заказчиком установленных правил использования. Содержание гарантийного обязательства включает право заказчика требовать от подрядчика обеспечения надлежащего качества результата выполненных работ и корреспондирующую ему обязанность подрядчика обеспечивать его с момента приемки и до окончания действия гарантийного срока.

Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в длящиеся. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по выполнению работ.

Норма вышеуказанной статьи предусматривает обязанность подрядчика устранить недостатки в выполненных им работах, обнаруженных заказчиком в пределах гарантийного срока. При этом бремя доказывания того обстоятельства, что недостатки возникли не по вине подрядчика, а вследствие неправильной эксплуатации результата работ заказчиком, возлагается на подрядчика.

Согласно материалам дела, гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 лет с даты подписания сторонами документа о приемке (п. 5.11 контракта) и, в течение гарантийного срока подрядчик обязан устранять своими силами и за свой счет все неисправности, недостатки, дефекты в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования заказчика. Гарантийный срок продлевается до тех пор, пока подрядчик не устранит все недостатки и дефекты, что должно быть подтверждено актом об их устранении (п. 5.12).

Ответчик направил истцу счет на оплату от 14.09.2023 № 37 на сумму 5648049,36 рублей.

Сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат от 14.09.2023 № 1, в соответствии с которой, КС-2 № 1 демонтажные работы 80251,33 рублей, КС-2 № 2 монтажные работы 5233970,08 рублей, КС-2 № 3 корректировочные работы 333827,95 рублей.

Акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 5648049,36 рублей подписан сторонами 18.09.2023. Платежным поручением от 18.09.2023 № 917 истец оплатил ответчику 5648049,36 рублей (с указанием основания платежа – выполнение работ по кап. ремонту фасада здания, акт о приемке от 18.09.2023, без НДС).

В апреле 2024 года заказчиком выявлены повреждения плит в количестве 25 штук в центральной части крыльца, а также трещина на стекле на центральной двери здания (служебная записка от 04.04.2024), о чем в адрес подрядчика направлены письма (исх. от 09.04.2024 № 03-22/534, от 26.04.2024 № 03-22/613).

Подрядчик к проведению ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств по контракту не приступил. На момент обращения истца в суд количество плит составило 30 штук.

В мае 2024 года заказчиком обнаружены трещины на окрашенных участках фасада здания, отхождение на колоннах штукатурки вместе с краской, в связи с выявленными фактами в адрес подрядчика направлена претензия от 30.05.2024 исх. № 03-22/761.

20.08.2024 истцом составлена служебная записка о неустранении появившихся повреждений, в рамках гарантийного срока.

Неисполнение требований истца ответчиком явилось основанием для обращения в арбитражный суд.

Таким образом, поскольку установленные повреждения ответчиком не устранены, акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 5648049,36 рублей подписан сторонами 18.09.2023 (гарантийный срок с учетом п. 5.11 контракта истекает 18.09.2028), постольку истец обоснованно, в рамках заключённого контракта обратился в суд с настоящим иском.

Статьей 307 ГК РФ предусмотрено право кредитора требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается в силу положений статьи 310 ГК РФ.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, в случае непредставления доказательств, суд рассматривает дело по имеющимся в деле согласно статье 156 АПК РФ.

На день рассмотрения дела ответчик обязательства по устранению повреждений в рамках гарантийных обязательств по спорному контракту не исполнил, возражений по иску не представил, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом.

Истцом в обоснование уточненных требований представлены копии: локального сметного расчета № 12 на ремонт фасадной части здания отдела ЗАГС в 

<

...> ведомости объемов работ на ремонт фасадной части здания отдела ЗАГС в 

<

...> технического паспорта на здание отдела ЗАГС в г. Тында, фотографии центрального входа отдела ЗАГС в г. Тында управления.

Судом согласно ведомости установлено, что объемы работ на ремонт фасадной части здания отдела ЗАГС в 

<

...> составляют: установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100 кв.м – 0,75, смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 100 кв.м – 0,02075, очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов/площади:колонны-5,5м2, арки-81(57м2;выход вентиляции-21,2м2/ 100 кв.м – 1,0827, шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 100 кв.м – 1,0827, окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 100 кв.м – 1,0827, разборка покрытий полов: из керамогранитных плит 100 кв.м – 0,0306, устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 кв.м – 0,0306, устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см 100 кв.м – 0,0306.

Учитывая, что ответчиком не представлены доказательства устранения выявленных повреждений в рамках гарантийных обязательств спорного контракта, документально не опровергнут факт отсутствия повреждений, уточненные требования истца являются законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению.

По условиям статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

С учетом изложенного, а также объема работ, следует определить срок выполнения  в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина по делу в силу пункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 6000 рублей.

Поскольку требования удовлетворены судом в полном размере, а истец от уплаты госпошлины в силу ст. 333.37 НК РФ освобождён, постольку 6000 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

требования удовлетворить. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Амурдом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки работ по государственному контракту на выполнение работ от 25.07.2023 № 1239, а именно: на фасаде здания отдела ЗАГС в г.Тында Амурской области, расположенного по адресу: г.Тында Амурской области, ул. Красная Пресня, 53, заменить стекла центральной входной двери толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 кв.метра объемом 2,075 кв.метров; ремонт фасада - колонны площадью 5,5 кв.метров, арки площадью 81,57 кв.метров, выход вентиляции площадью 21,2 кв.метров; замена покрытий из плит керамогранитных размером 30x30 см объемом 3,06 кв.метров.

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «АМУРДОМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                          И.А. Москаленко