Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-13488/2023

г. Хабаровск

05 декабря 2023 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 29.11.2023.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого,   при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ГЭС-Монтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 14 816 445 руб. 67 коп. (с учетом уточнения)

при участии в судебном заседании:

от истца (онлайн): ФИО2, представитель по доверенность                             от 19.01.2023 № 81-23;

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Монтаж» (далее – ООО «ГЭС-Монтаж») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (далее – ООО «СК «Монолит») о взыскании задолженности по контракту от 09.08.2021 № 58/21/КМЧ в размере 2 025 598 руб., неустойки в размере 1 719 628 руб. 42 коп., начисленной за период с 28.09.2021                      по 18.07.2023, задолженности по контракту от 23.08.2021 № 59/21/КМЧ                 в размере 7 699 753 руб. 20 коп., неустойки в размере 4 619 851 руб. 92 коп., начисленной за период с 26.11.2021 по 18.07.2023, задолженности по контракту от 13.07.2021 № 362/КМЧ в размере 1 647 757 руб. 60 коп., неустойки в размере 1 342 153 руб. 86 коп., начисленной за период с 12.08.2021 по 18.07.2023. Также истец просил продолжить начисление неустоек по названным контрактам               с 19.07.2023 по день фактической оплаты указанных задолженностей в размере 0,1% от суммы неисполненных ООО «СК Монолит» обязательств.

До вынесения итогового судебного акта по настоящему спору истцом неоднократно уточнялись исковые требования, в окончательном виде (ходатайство от 28.11.2023) истец просил взыскать с ответчика задолженность за выполненные работы по контракту от 13.07.2021 № 362/КМЧ в размере              1 562 757 руб. 60 коп., пени за нарушение срока оплаты за периоды с 13.08.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 23.11.2023 в общем размере 1 085 201 руб.               56 коп., пени начиная с 24.11.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате указанной задолженности из расчета 0,1%                         от 1 562 757 руб. 60 коп., задолженность за выполненные работы по контракту от 23.08.2021 № 59/21/КМЧ в размере 7 699 753 руб. 20 коп., пени за нарушение срока оплаты за период с 18.07.2023 по 23.11.2023 в размере 968 970 руб.             38 коп., пени начиная с 24.11.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате указанной задолженности из расчета 0,1%                            от 7 699 753 руб. 20 коп., задолженность за выполненные работы по контракту от 09.08.2021 № 58/21/КМЧ в размере 2 025 598 руб., пени за нарушение срока оплаты за периоды с 05.10.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 23.11.2023                       в общем размере 1 474 164 руб. 93 коп., пени начиная с 24.11.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате указанной задолженности из расчета 0,1% от 2 025 598 руб. за каждый день просрочки.

Уточнения заявленных требований по иску судом принимались с учетом положений статьи 49 АПК РФ.

Ответчик, извещен надлежащим образом о рассмотрении настоящего спора в порядке статей 121-123 АПК РФ, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил.

В день судебного заседания (15.11.2023) от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства с указанием на невозможность явки его представителя в судебное заседание по уважительной причине, а также в целях предоставления сторонам времени для разрешения возникшего спора примирением путем заключения мирового соглашения. Дополнительно ответчик ходатайствовал о снижении размера пени по правилам статьи 333 ГК РФ.

В судебном заседании истец возражал против отложения судебного разбирательства, указал на невозможность мирного разрешения спора.

Рассмотрев заявленное ходатайство с учетом мнения представителя истца, суд не выявил достаточных правовых оснований для его удовлетворения, в том числе по причине отсутствия в приложении к нему каких-либо документов, безусловно подтверждающих обстоятельства, изложенные в поданном ходатайстве, в связи с чем, руководствуясь положениями статей 158, 159 АПК РФ отказал в его удовлетворении.

Вместе с тем суд, дважды (15.11.2023 и 24.11.2023) в порядке статьи 163 АПК РФ объявлял перерывы в судебном заседании, предоставив ответчику достаточный период времени для уточнения своей правовой позиции по спору, которым последний не воспользовался по неизвестной суду причине.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «СК «Монолит» (заказчик) и ООО «ГЭС-Монтаж» (подрядчик) заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ от 13.07.2021 № 362/КМЧ (далее – контракт № 362/КМЧ), от 09.08.2021 № 58/21/КМЧ (далее – контракт № 58/21/КМЧ), от 23.08.2021 № 59/21/КМЧ (далее – контракт № 59/21/КМЧ).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта № 362/КМЧ подрядчик, обязуется собственными и (или) привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего контракта комплекс работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием (приложение № 1), в сроки, указанные в контракте, своевременно сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Согласно пункту 2.1 контракта № 362/КМЧ цена контракта составляет            15 040 647 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 20% - 2 506 774 руб. 60 коп., и определяется согласно локальному сметному расчету (приложение № 2). 

Исходя из положений пункта 2.4 контракта № 362/КМЧ расчеты по контракту производятся в следующем порядке: авансовый платеж в размере            5 000 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 833 333 руб. 33 коп., заказчик выплачивает в течение 3 рабочих дней с даты получения счета на оплату; оплата                                 5 000 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 833 333 руб. 33 коп., до 12.08.2021;                       оплата 5 040 647 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 20% - 840 107 руб. 93 коп.                         до 05.12.2021.

В силу пункта 3.1 контракта № 362/КМЧ дата начала выполнения работ - в течение 2 рабочих дней с даты поступления аванса. Дата окончания выполнения работ - в течение 2 месяцев с даты начала работ.

На основании положений пунктов 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 контракта                     № 362/КМЧ заказчик обязан обеспечивать финансирование работ по контракту в соответствии с условиями контракта; сообщать в письменной форме подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 рабочих дней после обнаружения таких недостатков; принять выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным настоящим контрактом, и оплатить их на указанных в контракте условиях.

В соответствии с пунктом 9.1 контракта № 362/КМЧ сдача-приемка выполненных работ производится до 25 числа ежемесячно за отчетный месяц (текущий месяц).

Согласно пункту 9.2 контракта № 362/КМЧ сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Подрядчик представляет заказчику первичные учетные документы (формы           КС-6а, КС-2, КС-3), а также исполнительную документацию (если применимо) на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом (пункт 9.3 контракта № 362/КМЧ).

Пунктом 9.4 контракта № 362/КМЧ предусмотрено, что заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения документов (пункты 9.2 9.3) рассматривает их и направляет подрядчику подписанный со своей стороны                1 (один) экземпляр акта о приемке или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний, при этом заказчик вправе указать сроки устранения недостатков и замечаний.

На основании положений пункта 10.1 контракта № 362/КМЧ в случае просрочки исполнения одной стороной обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения этой стороной обязательств, предусмотренных контрактом, другая стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).                           Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения стороной обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 0,1%                         за каждый день просрочки от стоимости неисполненного в срок обязательства (пункт 10.2 контракта № 362/КМЧ). 

При этом общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение одной из сторон обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункт 10.3 контракта № 362/КМЧ).

Во исполнение условий названной сделки подрядчиком в период                       с 13.07.2021 по 22.09.2021 выполнены и заказчиком приняты в полном объеме работы по контракту без замечаний на сумму 15 040 647 руб. 60 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 22.09.2021 № 1 (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 22.09.2021 № 1 (КС-3)                 и журналом учета выполненных работ от 22.09.2021 (КС-6а). 

Заказчиком принятые работы оплачены частично, что подтверждается перечислением денежных средств подрядчику по платежными поручениями             от 07.09.2021 № 2083, от 15.09.2021 № 2091, от 24.09.2021 № 2101, от 01.10.2021 № 2117, от 10.11.2021 № 3089, от 16.11.2021 № 3098, от 03.12.2021 № 3355,               от 14.12.2021 № 3622 всего на общую сумму 13 477 890 руб.

Таким образом, на момент рассмотрения настоящего спора заказчиком подрядчику не оплачены выполненные и принятые работы по контракту                    № 362/КМЧ в размере 1 562 757 руб. 60 коп.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта № 59/21/КМЧ подрядчик, обязуется собственными и (или) привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего контракта комплекс строительно-монтажных работ по разработке грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы на объекте: «Логистический комплекс (Камчатка)»                в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием (приложение № 1), в сроки, указанные в контракте, своевременно сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Согласно пункту 2.1 контракта № 59/21/КМЧ цена контракта составляет    7 699 753 руб. 20 коп., в т.ч. НДС 20%, и определяется согласно локальному сметному расчету (приложение № 2). Цена единиц работ (услуг), в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в проектно-сметной документации.

Исходя из положений пункта 2.4 контракта № 59/21/КМЧ расчеты по контракту производятся в следующем порядке: авансовый платеж в размере 5 000 000 руб., в т.ч. НДС 20%, заказчик выплачивает в течение 3 рабочих дней с даты получения счета на оплату; оплата в размере 2 699 753 руб. 20 коп.,                    в т.ч. НДС 20%, заказчик выплачивает в течение 10 календарных дней с даты получения счета на оплату.

В силу пункта 3.1 контракта № 59/21/КМЧ дата начала выполнения работ - в течение 2 рабочих дней с даты поступления аванса. Дата окончания выполнения работ - в течение 3 месяцев с даты начала работ.

На основании положений пунктов 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 контракта                      № 59/21/КМЧ заказчик обязан обеспечивать финансирование работ по контракту в соответствии с условиями контракта; сообщать в письменной форме подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 рабочих дней после обнаружения таких недостатков; принять выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным настоящим контрактом, и оплатить их на указанных в контракте условиях.

В соответствии с пунктом 9.1 контракта № 59/21/КМЧ сдача-приемка выполненных работ производится до 25 числа ежемесячно за отчетный месяц (текущий месяц).

Согласно пункту 9.2 контракта № 59/21/КМЧ сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Подрядчик представляет заказчику первичные учетные документы (формы КС-6а, КС-2, КС-3), а также исполнительную документацию (если применимо) на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом (пункт 9.3 контракта № 59/21/КМЧ).

Пунктом 9.4 контракта № 59/21/КМЧ предусмотрено, что заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения документов (пункты 9.2-9.3) рассматривает их и направляет подрядчику подписанный со своей стороны               1 (один) экземпляр акта о приемке или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний, при этом заказчик вправе указать сроки устранения недостатков и замечаний. 

На основании положений пункта 10.1 контракта № 59/21/КМЧ в случае просрочки исполнения одной стороной обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения этой стороной обязательств, предусмотренных контрактом, другая стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).                             Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения стороной обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 0,1%                        за каждый день просрочки от стоимости неисполненного в срок обязательства (пункт 10.2 контракта № 59/21/КМЧ). 

При этом общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение одной из сторон обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункт 10.3 контракта № 59/21/КМЧ). 

Во исполнение условий названной сделки подрядчиком в период                       с 23.08.2021 по 18.11.2021 выполнены и заказчиком приняты в полном объеме работы по контракту без замечаний на сумму 7 699 753 руб. 20 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 18.11.2021 № 1 (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат  от 18.11.2021 № 1 (КС-3), журналом учета выполненных работ (КС-6а). Однако, в нарушение условий контракта заказчиком принятые работы не оплачены.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта № 58/21/КМЧ подрядчик, обязуется собственными и (или) привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего контракта комплекс строительно-монтажных работ по расчистке и углублению периметральной водоотводной канавы по северной и западной границе объекта: «Логистический комплекс (Камчатка)» с проектной и рабочей документацией, техническим заданием (приложение № 1), в сроки, указанные в контракте, своевременно сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Согласно пункту 2.1 контракта № 58/21/КМЧ цена контракта составляет 5 525 598 руб., в т.ч. НДС 20%, и определяется согласно локальному сметному расчету (приложение № 2). Цена единиц работ (услуг), в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в проектно-сметной документации.

Исходя из положений пункта 2.4 контракта № 58/21/КМЧ расчеты по контракту производятся в следующем порядке: авансовый платеж в размере                 3 000 000 руб., в т.ч. НДС 20%, заказчик выплачивает в течение 3 рабочих дней с даты получения счета на оплату; оплата в размере 1 000 000 руб., в т.ч. НДС 20%, до 05.10.2021; оплата в размере 1 525 598 руб., в т.ч. НДС 20%,                        до 05.12.2021.

В силу пункта 3.1 контракта № 58/21/КМЧ дата начала выполнения работ - в течение 2 рабочих дней с даты поступления аванса. Дата окончания выполнения работ - в течение 2 месяцев с даты начала работ.

На основании положений пунктов 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4. контракта                      № 58/21/КМЧ заказчик обязан обеспечивать финансирование работ по контракту в соответствии с условиями контракта; сообщать в письменной форме подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 рабочих дней после обнаружения таких недостатков; принять выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным настоящим контрактом, и оплатить их на указанных в контракте условиях.

В соответствии с пунктом 9.1 контракта № 58/21/КМЧ сдача-приемка выполненных работ производится до 25 числа ежемесячно за отчетный месяц (текущий месяц). 

Согласно пункту 9.2 контракта № 58/21/КМЧ сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Подрядчик представляет заказчику первичные учетные документы (формы КС-6а, КС-2, КС-3), а также исполнительную документацию (если применимо) на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом (пункт 9.3 контракта № 58/21/КМЧ).

Пунктом 9.4 контракта № 58/21/КМЧ предусмотрено, что заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения документов (пункты 9.2-9.3) рассматривает их и направляет подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о приемке или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний, при этом заказчик вправе указать сроки устранения недостатков и замечаний. 

На основании положений пункта 10.1 контракта № 58/21/КМЧ в случае просрочки исполнения одной стороной обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения этой стороной обязательств, предусмотренных контрактом, другая стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).                                 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения стороной обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 0,1%                          за каждый день просрочки от стоимости неисполненного в срок обязательства (пункт 10.2 контракта № 58/21/КМЧ). 

Во исполнение условий названной сделки подрядчиком в период                         с 09.08.2021 по 22.09.2021 выполнены и заказчиком приняты в полном объеме работы по контракту без замечаний на сумму 5 525 598 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 22.09.2021 № 1 (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат  от 22.09.2021 № 1 (КС-3), журналом учета выполненных работ (КС-6а). 

Заказчиком выполненные работы оплачены частично, что подтверждается перечислением денежных средств подрядчику по платежным поручениям                  от 30.12.2021 № 3991, от 22.04.2022 № 217 на общую сумму 3 500 000 руб. Таким образом, заказчиком не оплачены работы на общую сумму 2 025 598 руб.

Истцом в адрес ответчика направлялись счета на оплату образовавшейся задолженности, а впоследствии досудебные претензии с требованиями об ее оплате, которые остались без удовлетворения.

Невозможность урегулировать возникшие между сторонами спора разногласия послужила причиной обращения истца в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.                         По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу положений пункта 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае факт выполнения истцом принятых на себя обязательств в рамках заключенных с ответчиком контрактов № 362/КМЧ, № 58/21/КМЧ,             № 59/21/КМЧ подтверждается материалами настоящего дела.

Указанные обстоятельства ответчик по существу не отрицал, о фальсификации представленных истцом доказательств в установленном законом порядке не заявил, иным образом их содержание, а равно факт выполнения работ в полном объеме, соответствующих условиям контрактов не оспорил, доказательств какого-либо встречного предоставления, включая подтверждающих оплату выполненных работ в полном объеме в материалы дела не представил.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, а также учитывая отсутствие в деле доказательств добровольной оплаты ответчиком выполненных для него и принятых работ, суд приходит к выводу о правомерности требований ООО «ГЭС-Монтаж» о взыскании с                                ООО «СК «Монолит» основного долга по контракту № 362/КМЧ в размере              1 562 757 руб. 60 коп., по контракту № 59/21/КМЧ в размере 7 699 753 руб.                20 коп., по контракту № 58/21/КМЧ в размере 2 025 598 руб., в связи с чем, их удовлетворяет в заявленном размере.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ и пени по день фактического исполнения обязательств по погашения образовавшейся задолженности. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). 

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки (пункт 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ                           от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7)).

Учитывая установленный судом выше факт просрочки исполнения ответчиком обязательства по своевременной и полной оплате выполненных и принятых им работ, суд полагает, что в данном случае имеются достаточные правовые основания для привлечения ООО «СК «Монолит» к договорной ответственности (пункт 10.2 контрактов № 362/КМЧ, № 59/21/КМЧ,                          № 58/21/КМЧ) в виде начисления пени на сумму просроченной задолженности.

Проверив расчет пени, произведенный истцом, суд признает его верным, соответствующим условиям заключенных между сторонами контрактов, в связи с чем констатирует правомерность соответствующих требований о взыскании неустоек. Контррасчет ответчиком не представлен.

Заявленное ответчиком ходатайство о снижении размера пени в порядке, предусмотренном статьей 333 ГК РФ, судом отклоняется как необоснованное, ввиду непредставления ООО «СК «Монолит» относимых, допустимых и достоверных доказательств, безусловно подтверждающих несоразмерность предъявленной неустойки последствиям нарушения обязательства, что согласуется с разъяснениями, содержащимися в пункте 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7. 

Само по себе заявленное ответчиком ходатайство о необходимости применения статьи 333 ГК РФ в отсутствие в материалах дела соответствующих доказательств, не может быть удовлетворено судом произвольно, поскольку иной подход к этому вопросу нарушил бы баланс имущественный интересов сторон.

При изложенных обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика пени подлежит удовлетворению в заявленном им размере.

Поскольку до настоящего момента ответчиком не представлены доказательства погашения образовавшейся задолженности, также подлежит удовлетворению и требование истца о взыскании с него пени начиная                    с 24.11.2023 по день фактической оплаты основного долга, исходя из ставки для начисления неустойки 0,1% от не оплаченной суммы долга за каждый день просрочки по каждому из спорных контрактов.

Расходы истца по оплате государственной пошлины по иску возлагаются на ответчика с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела и положений статьи 110 АПК РФ.

Излишне оплаченная истцом государственная пошлина по иску подлежит возвращению последнему применительно к положениям статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)                                       в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГЭС-Монтаж»                             (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность за выполненные работы по контракту от 13.07.2021 № 362/КМЧ в размере 1 562 757 руб.              60 коп., пени за нарушение срока оплаты за периоды с 13.08.2021                        по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 23.11.2023 в общем размере 1 085 201 руб.            56 коп., пени начиная с 24.11.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате указанной задолженности из расчета 0,1%                       от 1 562 757 руб. 60 коп., задолженность за выполненные работы по контракту от 23.08.2021 № 59/21/КМЧ в размере 7 699 753 руб. 20 коп., пени за нарушение срока оплаты за период с 18.07.2023 по 23.11.2023 в размере 968 970 руб.                   38 коп., пени начиная с 24.11.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате указанной задолженности из расчета 0,1% от 7 699 753 руб. 20 коп., задолженность за выполненные работы по контракту от 09.08.2021 № 58/21/КМЧ в размере 2 025 598 руб., пени за нарушение срока оплаты за периоды с 05.10.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 23.11.2023 в общем размере 1 474 164 руб. 93 коп., пени начиная с 24.11.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате указанной задолженности из расчета 0,1% от 2 025 598 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 97 082 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью                           «ГЭС-Монтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению от 15.08.2023 № 5931, в размере 21 192 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                          К.А. Полегкий