Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-81591/2023

25 февраля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  25 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коноваленко Я.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (197349, Россия, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ озеро Долгое, Гаккелевская ул, д. 21, литера а, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Быстроежка" (192241, 

<

...> литер а, помещение 2-н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств, 

при участии от истца ФИО2 (доверенность от 16.03.2023),

установил:

публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" обратилось                              в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском                          к обществу с ограниченной ответственностью "Быстроежка" о взыскании 4 403 руб.                 91 коп. неустойки, исчисленной за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору от 31.10.2017 № ОД-СПБ-29271-17/40953-Э-17 (далее – Договор), а также о расторжении Договора.

Ответчиком отзыв не представлен.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования. 

Представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в заседание не явился, ввиду чего дело рассмотрено в его отсутствие по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Судом установлено, что между публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» (правопредшественник истца, сетевая организация)                 и ответчиком (заявитель) заключен Договор, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) - вводное распределительное устройство в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство. реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 5 кВт; категория надежности - третья;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединяемых энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора (пункт 1 Договора).

Обязанности сторон закреплены 2 разделом Договора.

В соответствии с пунктами 10 и 11 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 290-р и составляет 4 826 руб. 20 коп., в томчисле НДС 18% - 736 руб. 20 коп.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем вследующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение в сумме 482 руб. 62 коп., в том числе НДС 18%, вносятся в течение 15 дней со дня заключения Договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в сумме 1 447 руб. 86 коп., в том числе НДС 18%. вносятся в течение 60 дней со дня заключения Договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в сумме 965 руб. 24 коп., в том числе НДС 18%. вносятся в течение 180 дней со дня заключения Договора:

- 30 % платы за технологическое присоединение в сумме 1 447 руб. 86 коп., в том числе НДС 18%. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в сумме 482 руб. 62 коп., в том числе НДС 18%. вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

Истец, указывая на неисполнение заказчиком технических условий по Договору,  обратился к последнему с претензией, оставленной которой без ответа послужило оснований для  обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

Частью 1 статьи 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней)признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должникобязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Подпунктом «в» пункта 16 Правил № 861 пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Согласно пункту 16 (6) Правил №861 срок осуществлениямероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническимиусловиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств -мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителемпри наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения техническихусловий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающегоустройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведенияпроверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платыза технологическое присоединение.

Доказательства выполнения ответчиком со своей стороны обязательств, предусмотренных Договором и техническими условиями, суду не представлены.

Расчет неустойки проверен судом и признан соответствующим условиям заключенного сторонами Договора и нормам действующего законодательства. 

Истец, ссылаясь на нарушение условий Договора со стороны заказчика, просит расторгнуть Договор.

В пункте 2 статьи 450 ГК РФ установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с пунктом 16(5) Правил № 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Таким образом, договор об осуществлении технологического присоединения может быть расторгнут по инициативе сетевой организации в связи с нарушением условий договора со стороны заказчика.

Сведения о продлении сторонами срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению суду не представлены.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что                                           в установленный Договором срок заказчик не выполнил со своей стороны мероприятия по технологическому присоединению.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о существенном нарушении заявителем условий Договора.

При таких обстоятельствах, требования истца о расторжении Договора и                         о взыскании неустойки в общей сумме 4 403 руб. 91 коп. являются обоснованными.

В соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. Излишне уплаченная сумма государственной пошлины в размере 3 руб. подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Расторгнуть договор от 31.10.2017 № ОД-СПБ-29271-17/40953-Э-17, заключенный между публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго»      и обществом с ограниченной ответственностью "Быстроежка".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Быстроежка" (ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго" 4 403 руб. 91 коп. неустойки, 8 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Возвратить публичному акционерному обществу "Россети Ленэнерго" из федерального бюджета  3 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                           Коноваленко Я.А.