АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-11770/2024

г. Ярославль

03 марта 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена  04 февраля 2025 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Коншиной А.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Безбородовой А.Г.,

рассмотрев в судебном заседании с применением системы Веб-конференции исковое заявление акционерного общества «Группа компаний "ЕКС" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Монолит"" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о взыскании 22 851 823,45 руб.,

при участии:

от истца – ФИО1 – (онлайн) представитель по доверенности от 28.08.2024, диплом, от ответчика – не явились,

установил:

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Монолит" о взыскании 22 851 823,45 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ, письменный отзыв на иск не направил, возражений не заявил, в связи с чем, несет риск наступления последствий совершений или несовершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9  АПК РФ.

В порядке ст. 156 АПК РФ судебное разбирательство проводится без участия ответчика.       Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

17.07.2023 между АО «ГК «ЕКС» /Генподрядчик/ и ООО «ГК Монолит» /Подрядчик/  заключен договор подряда № 17-07-М.

В соответствии с п. 2.1 Договора Ответчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Генерального подрядчика по настоящему Договору) комплекс строительно-монтажных работ по объекту: "Вынос сетей водопровода по объекту: "Строительство проектируемого проезда № 6602, до начала строительства в зонах 4.1, 9.1, 6.1, 5.1, 6.2, района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4, зона 27" (Восточный административный округ) (ППТ по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы)", а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях.

В соответствии с п. 3.1 Договора его цена составляет 2 986 200 (Два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

Стоимость работ определяется из фактически выполненного объема Работ на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3, и не может превышать стоимость, указанную в абз. 1 пункта Договора.

Согласованная договорная цена является предварительной (определена ориентировочно) и может корректироваться в процессе строительства по фактически выполненным работам. Окончательная договорная цена будет определяться на основании стоимости строительства в соответствии с фактически выполненными объемами работ и утвержденной в «Мосгосэкспертизе» проектно-сметной документацией с учетом договорного коэффициента – 0,7.

В соответствии с п. 5.1 Договора окончание работ – 14 августа 2023 года.

Пунктом 4.1 Договора предусмотрена возможность выплаты аванс в размере до 30% от цены Договора, что составляет 895 850 (Восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в течение 10(десяти) банковских дней с момента предоставления счета Подрядчиком.

В рамках Договора Истец перечислил в пользу Подрядчика денежные средства в общем размере 895 860 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 48916 от 28.07.2023; № 101018 от 07.08.2023.

Ответчик работы по Договору не выполнил, результат работ Истцу не сдал.

В соответствии с п. 17.3.1 Договора Истец имеет право на односторонний внесудебный отказ от Договора, если станет очевидно, что Работы (этапы Работ) не будут выполнены в срок, а равно в случае установления Генеральным подрядчиком фактов просрочки выполнения какого-либо этапа работ, установленного п.5.1 Договора, Приложением № 3 к Договору на срок более 7 календарных дней.

В соответствии с п. 17.4. Договора в случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 Договора, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком уведомления или истечение 1 календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Подрядчика.

Истец направил в адрес Ответчика письмо от 15.04.2024 № 01-А-11685 с требованиями представить документы, подтверждающие выполнение работ. При этом, в письме установлено, что в случае непредставления Ответчиком запрошенных документов в течение 10 рабочих дней с момента получения письма, Договор считается расторгнутым.

Согласно отчету об отслеживании, указанное письмо прибыло в место вручения 23.04.2024, 24.05.2024 возвращено отправителю.

В соответствии с п. 17.4.2 Договора Подрядчик обязан возвратить неотработанный аванс в течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора.

Истец указал, что поскольку договор расторгнут в установленном законом порядке, у Ответчика отсутствуют основания для удержания перечисленной суммы, в связи с чем заявленная сумма в размере 895 860 руб. подлежит взысканию с Ответчика в качестве неосновательного обогащения.

09.08.2023 между  АО «ГК «ЕКС» /Генподрядчик/ и ООО «ГК Монолит» /Подрядчик/ заключен договор подряда № 09-08/2023- ГМ.

В соответствии с п. 2.1 Договора Ответчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Генерального подрядчика по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Приложение № 1 к настоящему Договору (далее – Работы) на объекте: «Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "МЖК "Лучи". Многоквартирные дома с подземной автостоянкой корпус 15" по адресу: 

<

...>», а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях.

В соответствии с п. 3.1 Договора его цена составляет 4 376 971,42 руб.

Стоимость работ определяется из фактически выполненного объема Работ на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3, и не может превышать стоимость, указанную в абз. 1 пункта Договора.

Согласованная договорная цена является предварительной (определена ориентировочно) и может корректироваться в процессе строительства по фактически выполненным работам. Окончательная договорная цена будет определяться на основании стоимости строительства в соответствии с фактически выполненными объемами работ и утвержденной в «Мосгосэкспертизе» проектно-сметной документацией с учетом договорного коэффициента – 0,7.

В соответствии с п. 5.1 Договора  окончание работ – 30 сентября 2023 года.

В рамках Договора Истец перечислил в пользу Подрядчика денежные средства в общем размере 1 313 091 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 105459 от 17.08.2023, № 106330 от 22.08.2023.

Ответчик работы по Договору не выполнил, результат работ Истцу не сдал.

В соответствии с п. 17.3.1. Договора Истец имеет право на односторонний внесудебный отказ от Договора, если станет очевидно, что Работы (этапы Работ) не будут выполнены в срок, а равно в случае установления Генеральным подрядчиком фактов просрочки выполнения какого-либо этапа работ, установленного п.5.1 Договора, Приложением № 3 к Договору на срок более 7 календарных дней.

В соответствии с п. 17.4 Договора в случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 Договора, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком уведомления или истечение 1 календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Подрядчика.

Истец направил в адрес Ответчика письмо от 25.12.2023№ 01-А-40392 с требованиями представить документы, подтверждающие выполнение работ. При этом, в письме установлено, что в случае непредставления Ответчиком запрошенных документов в течение 10 рабочих дней с момента получения письма, Договор считается расторгнутым.

Согласно отчету об отслеживании, указанное письмо прибыло в место вручения 06.01.2024, 27.01.2024 было возвращено отправителю.

Учитывая изложенные обстоятельства, Договор-2 считается расторгнутым с 28.01.2024 (день возврата уведомления отправителю).

В соответствии с п. 17.4.2 Договора Подрядчик обязан возвратить неотработанный аванс в течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора.

Поскольку договор расторгнут в установленном законом порядке, у Ответчика отсутствуют основания для удержания перечисленной суммы, в связи с чем заявленная сумма в размере 1 313 091 руб. подлежит взысканию с Ответчика.

02.05.2023 между АО «ГК «ЕКС» /Генподрядчик/ и ООО «ГК Монолит» /Подрядчик/ заключен договор подряда № 02-05-ГК-М.

В соответствии с п. 2.1 Договора Ответчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Истца своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Генерального подрядчика по настоящему Договору) комплекс строительно-монтажных работ по объекту: "Вынос сетей водопровода для производства работ по объекту: "Реконструкция участка тепловой сети от камеры 2408 до ЦТП № 20-06-0624/006 "по адресу: 

<

...> вл.26", а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях.

В соответствии с п. 3.1 Договора цена договора составляет 3 333 476 (Три миллиона триста тридцать три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 60 копеек.

Стоимость работ определяется из фактически выполненного объема Работ на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3, и не может превышать стоимость, указанную в абз. 1 пункта Договора.

Согласованная договорная цена является предварительной (определена ориентировочно) и может корректироваться в процессе строительства по фактически выполненным работам. Окончательная договорная цена будет определяться на основании стоимости строительства в соответствии с фактически выполненными объемами работ и утвержденной в «Мосгосэкспертизе» проектно-сметной документацией с учетом договорного коэффициента – 0,7.

В соответствии с п. 5.1 Договора окончание работ – 01 августа 2023 года.

В рамках Договора Истец перечислил в пользу Подрядчика денежные средства в общем размере 1 000 042,98 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 23604 от 15.05.2023; № 32240 от 07.06.2023.

Ответчик работы по Договору не выполнил, результат работ Истцу не сдал.

В соответствии с п. 17.3.1 Договора Истец имеет право на односторонний внесудебный отказ от Договора, если станет очевидно, что Работы (этапы Работ) не будут выполнены в срок, а равно в случае установления Генеральным подрядчиком фактов просрочки выполнения какого-либо этапа работ, установленного п.5.1 Договора, Приложением № 3 к Договору на срок более 7 календарных дней.

В соответствии с п. 17.4 Договора в случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 Договора, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком уведомления или истечение 1 календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Подрядчика.

Истец направил в адрес Ответчика письмо от 25.12.2023 № 01-А-40393 с требованиями представить документы, подтверждающие выполнение работ. При этом, в письме установлено, что в случае непредставления Ответчиком запрошенных документов в течение 10 рабочих дней с момента получения письма, Договор считается расторгнутым.

Согласно отчету об отслеживании, указанное письмо прибыло в место вручения 06.01.2024, 27.01.2024 было возвращено отправителю.

Учитывая изложенные обстоятельства, Договор считается расторгнутым с 28.01.2024 года (день возврата уведомления отправителю).

В соответствии с п. 17.4.2 Договора Подрядчик обязан возвратить неотработанный аванс в течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора.

Поскольку договор расторгнут в установленном законом порядке, у Ответчика отсутствуют основания для удержания перечисленной суммы, в связи с чем заявленная сумма в размере 1 000 042, 98 руб. подлежит взысканию с Ответчика.

29.05.2023 между акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» и обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Монолит» заключен договор подряда № 29-05-ГК-М.

В соответствии с п. 2.1 Договора Ответчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Генерального подрядчика по настоящему Договору) комплекс строительно-монтажных работ по объекту: "Вынос сетей водопровода по объекту: "Ледовая арена НИУ МГСУ" по адресу: 

<

...>", а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях.

В соответствии с п. 3.1 Договора его цена составляет 10 006 307 (Десять миллионов шесть тысяч триста семь) рублей 98 копеек.

Стоимость работ определяется из фактически выполненного объема Работ на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3, и не может превышать стоимость, указанную в абз. 1 пункта Договора.

Согласованная договорная цена является предварительной (определена ориентировочно) и может корректироваться в процессе строительства по фактически выполненным работам. Окончательная договорная цена будет определяться на основании стоимости строительства в соответствии с фактически выполненными объемами работ и утвержденной в «Мосгосэкспертизе» проектно-сметной документацией с учетом договорного коэффициента – 0,7.

В соответствии с п. 5.1. Договора окончание работ – 01 августа 2023 года.

В соответствии с п. 4.1 Договора установлено, что Генеральный подрядчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены Договора.

В случае авансирования Работ Генеральным подрядчиком, выплата аванса осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после представления Генеральному подрядчику счета на оплату аванса.

В рамках Договора Истец перечислил в пользу Подрядчика денежные средства в общем размере 3 001 892,39 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 37619 от 23.06.2023; № 39407 от 28.06.2023; -№ 45945 от 19.07.2023; № 46111 от 20.07.2023; № 34487 от 14.06.2023.

В соответствии с п. 4.2. Договора, в случае если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в установленные настоящим Договором сроки (согласно п. 5.1.1. Договора, допустив просрочку более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней, Подрядчик обязан возвратить Генеральному подрядчику 100% суммы аванса.

Ответчик работы по Договору не выполнил, результат работ Истцу не передал.

В соответствии с п. 17.3.1 Договора Истец имеет право на односторонний внесудебный отказ от Договора, если станет очевидно, что Работы (этапы Работ) не будут выполнены в срок, а равно в случае установления Генеральным подрядчиком фактов просрочки выполнения какого-либо этапа работ, установленного п.5.1 Договора, Приложением № 3 к Договору на срок более 7 календарных дней.

В соответствии с п. 17.4 Договора в случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 Договора, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком уведомления или истечение 1 календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Подрядчика

Истец направил в адрес Ответчика письмо от 15.04.2024 № 01-А-11681 с требованиями представить документы, подтверждающие выполнение работ. При этом, в письме установлено, что в случае непредставления Ответчиком запрошенных документов в течение 10 рабочих дней с момента получения письма, Договор считается расторгнутым.

Согласно отчету об отслеживании, указанное письмо прибыло в место вручения 23.04.2024, 24.05.2024 было возвращено отправителю.

Учитывая изложенные обстоятельства, Договор считается расторгнутым с 25.05.2024 (день возврата уведомления отправителю).

В соответствии с п. 17.4.2 Договора Подрядчик обязан возвратить неотработанный аванс в течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора.

Поскольку договор расторгнут в установленном законом порядке, у Ответчика отсутствуют основания для удержания перечисленной суммы, в связи с чем заявленная сумма в размере 3 001 892,39 руб. подлежит взысканию с Ответчика.

03.07.2023 между акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» /Генеральный подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Монолит» /Подрядчик/ заключен договор подряда № ЗИЛ-01.

В соответствии с п. 2.1 Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Генерального подрядчика по настоящему Договору) комплекс работ, определенный в Приложение № 1 к настоящему Договору (далее – Работы) на объекте: «Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 1. Корпуса 1, 2, 3, 4, 11", расположенный по адресу: 

<

...>", а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях

В  соответствии с п. 3.1 Договора цена договора составляет 17 291 567 (Семнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 44 копейки.

Стоимость работ определяется из фактически выполненного объема Работ на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3, и не может превышать стоимость, указанную в абз. 1 пункта Договора.

Согласованная договорная цена является предварительной (определена ориентировочно) и может корректироваться в процессе строительства по фактически выполненным работам. Окончательная договорная цена будет определяться на основании стоимости строительства в соответствии с фактически выполненными объемами работ и утвержденной в «Мосгосэкспертизе» проектно-сметной документацией с учетом договорного коэффициента – 0,7.

В соответствии с п. 5.1. Договора окончание работ – 30 сентября 2023 года.

В рамках Договора Истец перечислил в пользу Подрядчика денежные средства в общем размере 7 000 000руб., что подтверждается платежными поручениями: № 103128 от 10.08.2023; № 103336 от 11.08.2023, № 2818 от 14.08.2023.

Ответчик работы не выполнил, результат работ истцу не сдал.

В соответствии с п. 17.3.1 Договора Истец имеет право на односторонний внесудебный отказ от Договора, если станет очевидно, что Работы (этапы Работ) не будут выполнены в срок, а равно в случае установления Генеральным подрядчиком фактов просрочки выполнения какого-либо этапа работ, установленного п.5.1 Договора, Приложением № 3 к Договору на срок более 7 календарных дней.

В соответствии с п. 17.4 Договора в случае отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 17.3 Договора, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком уведомления или истечение 1 календарного дня с момента прибытия уведомления в адрес почтового отделения Подрядчика.

Истец направил в адрес Ответчика письмо от 15.04.2024 № 01-А-11684 с требованиями представить документы, подтверждающие выполнение работ. При этом, в письме установлено, что в случае непредставления Ответчиком запрошенных документов в течение 10 рабочих дней с момента получения письма, Договор считается расторгнутым.

Согласно отчету об отслеживании, указанное письмо прибыло в место вручения 23.04.2024, 24.05.2023 было возвращено отправителю.

Учитывая изложенные обстоятельства, Договор считается расторгнутым с 25.05.2024 (день возврата уведомления отправителю).

При этом согласно п. 17.4.2 Договора Подрядчик обязан возвратить неотработанный аванс в течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора. Поскольку договор расторгнут в установленном законом порядке, у Ответчика отсутствуют основания для удержания перечисленной суммы, в связи с чем заявленная сумма в размере 7 000 000руб. подлежит взысканию с Ответчика.

Указывая на неисполнение ответчиком обязанности по возврату денежных средств, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно ст.715 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

В нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик не представил доказательств, подтверждающих сдачу результата работ установленный договором срок.

Нарушение сроков выполнения работ при отсутствии доказательств сдачи результат работ является существенным нарушением условий договора подряда.

При таких обстоятельствах, односторонний отказ заказчика от исполнения договора является правомерным.

В соответствии с п. 1 информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» сторона вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

В силу ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Факт перечисления денежных средств ответчику подтверждается материалами дела:  платежными поручениями.

Возражения ответчиком не заявлены, отзыв на иск ответчик не направил.

Доказательств выполнения работ на сумму полученного аванса, возврата денежных средств либо представления иного встречного исполнения, ответчиком суду не представлено.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, они подлежат удовлетворению в части взыскания неотработанного аванса в размере  13 210 886,37 руб.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 19 708,92 руб. по условиям Договора подряда № 17-07-М от 17 июля 2023 года за период с 04.06.2024 по 25.06.2024, 183 832,74 руб. по условиям Договора подряда № 09-08/2023-ГМ от 09 августа 2023 года за период с 07.02.2024 по 25.06.2024, 140 006,02 руб. по условиям Договора подряда № 02-05-ГК-М от 02 мая 2023 года за период с 07.08.2024 по 25.06.2024, 66 041,63 руб. по условиям Договора подряда  №29-05-ГК-М от 29 мая 2023 года за период с 04.06.2024 по 25.06.2024, 154 000,00 руб. по условиям Договора подряда № ЗИЛ-01 от 03 июля 2023 года за период с 04.06.2024 по 25.06.2024. Всего 563 589,31 руб.

Согласно п.1 ст.330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет судом проверен.

Основания для применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда отсутствуют.

В указанном истцом размере штраф подлежит взысканию с ответчика.

Истец просит взыскать пени в размере  1 179 549,00 руб. по Договору подряда № 17-07-М от 17 июля 2023 года за период с 14.08.23 по 31.10.2023, 2 013 406,85 руб. по Договору подряда № 09-08/2023-ГМ от 09 августа 2023 года за период с 01.10.2023 по 31.12.2023, 1 516 731,85руб.  по Договору подряда № 02-05-ГК-М от 02 мая 2023 года за период с 02.08.2023 по 31.10.2023, 1 601 009,28 руб. по Договору подряда № 29-05-ГК-М от 29 мая 2023 года за период с 02.08.2023 по 02.09.2023, -2 766 650,79 руб.  по Договору подряда № ЗИЛ-01 от 03 июля 2023 года за период с 01.10.2023 по 01.11.2023. Всего 9 077 347,77 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.        Позицию относительно начисления пеней ответчик не выразил, возражений не заявил.

Расчет истца судом проверен, признан обоснованным.

Оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

В заявленном размере сумма пени подлежит взысканию с ответчика.

Требование о продолжении начисления штрафа на сумму основного долга с 25.06.2024 по день фактической оплаты долга в размере 0,1 %  от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, подлежит удовлетворению.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по оплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Монолит"" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу акционерного общества «Группа компаний "ЕКС" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 13 210 886,37 руб. основного долга, 563 589,31 руб. штрафа, 9 077 347,77 руб. пени, 137 259 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.

Продолжить начисление штрафа на сумму основного долга с 25.06.2024 по день фактической оплаты долга в размере 0,1 %  от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

А.Д. Коншина