Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-15694/2024

21 августа 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  19 августа 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  21 августа 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составесудьи  Дороховой Н.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «АВК Групп» (191144, 

<

...>, литер А, пом 2-Н офис 207-211, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.06.2016, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-сервис» (603000, Россия, 

<

...>, помещ. 6А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.06.2008, ИНН: 

<

***>)

третьи лица: 

- муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (603000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 05.09.2002, ИНН: 

<

***>) 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» (603005, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2003, ИНН: 

<

***>)

о взыскании, 

 

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 15.04.2024

от ответчика, третьих лиц: не явились, извещены,  

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АВК Групп» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-сервис» о взыскании 22 231 487 рублей 53 копеек неосновательного обогащения.

В судебном заседании ответчик представил отзыв на иск, в котором заявил следующие ходатайства:

- о привлечении муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН: 

<

***>) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора;

- об истребовании у муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН: 

<

***>) сведений о юридических лицах (субподрядчиках), фактически выполняющих работы по контракту № 0132300007520000882 от 17.12.2020 на выполнение работ по объекту «Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: 

<

...> (литер А, А1)»;

- о привлечении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» (ИНН: 

<

***>) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Суд ходатайство удовлетворил. 

В материалы дела поступил отзыв на иск от Администрации, где даны следующие пояснения.  

17.12.2020      года между муниципальным казенным учреждением «Главное управление но капитальному строительству города Нижнего Новгорода» и обществом с ограниченной ответственностью «АПК Групп» был заключен муниципальный контракт № 0132300007520000882 на выполнение работ по объекту «Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: 

<

...> (Литер A. Al)».

Сроки выполнения работ, согласно п.3.1 Контракта: с даты заключения муниципального контракта до 20.12.2021 г.

14.12.2021      года МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» уведомило ООО «АВК Групп» о своем решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта №0132300007520000882 от 17.12.2020 года.

29.12.2021      года данное решение было отозвано (письмо исх. № 1-14-6257).

28.02.2022      года МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» повторно уведомило ООО «АВК Групп» о своем решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта №0132300007520000882 от 17.12.2020 года.

28.02.2022 года данное решение было размешено на сайте Госзакупок, направлено в адрес ООО «АВК Групп» по электронной почте и с помощью экспресс-почты курьерской службой.

Согласно накладной 1520-80564 адресат отказался от вручения решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 02.03.2022 года в 16 часов 49 минут.

Датой надлежащего уведомления ООО «АВК Групп» об одностороннем отказе от исполнения Контракта является 15.03.2022 года.

На 15.03.2022 года за ООО «АВК ГРУПП» числилась задолженность в пользу МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» в размере Н) 843 086 (Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьдесят шесть) рублей 37 копеек (необработанный аванс), что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 года по 15.03.2022 года и штраф в размере 100 000 (Сто тысяч рублей) 00 копеек (претензия исх. № 1-14-5661 от 30.11.2021 г.

Кроме того, поскольку срок выполнения работ закончился 20.12.2021 года. ООО «АВК ГРУПП» следует оплатить неустойку за период с 21.12.2021 года по 17.03.2022 года в сумме 1 221 040 (Один миллион двести двадцать одна тысяча сорок) рублей 82 коп.

17.03.2022 года в адрес ООО «АВК ГРУПП» была направлена претензия исх. № 1-14-830 с требованием о возврате задолженности, уплате штрафа и неустойки.

Претензия была отправлена по электронной почте и с помощью экспресс-почты курьерской службой. Получена адресатом 22.03.2022 года. Ответа на претензию не поступило.

После возбуждения уголовного дела в отношении ФИО3 и ФИО4 в результате внутренних проверок были составлены «минусовые акты» на фактически невыполненные работы на сумму 36 654 856 рублей 76 копеек.

В соответствии с Банковской гарантией № 50512 от 17.12.2020 года (далее -Гарантия), выданной Обществом с ограниченной ответственностью Эс-Би-Лй Банк («ГАРАНТ»), муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» направило Требование от 23.03.2022 года о выплате денежной суммы (письмо исх. № 1-14-913), в котором требовал к течение 3 дней перечислить сумму банковской гарантии.

На 11.04.2022 года Банком выплата по Требованию не была произведена.

06.10.2022 года Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение по делу № А40-85245/22-162-616 по иску муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» к обществу с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк (Эс-Би-Ай Банк ООО) о взыскании денежных средств в размере 10 571 715 рублей 00 копеек.

Согласно указанного решения исковые требования были удовлетворены в полном объеме, а именно:

1. Взыскана с ответчика общества с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк (Эс-Би-Лй Банк ООО) в пользу муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (задолженность по Гарантии в сумме 10 395 ООО (Десять миллионов триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Взыскана с ответчика общества с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк (Эс-Би-Ай Банк ООО) в пользу муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» неустойка за просрочку исполнения денежного обязательства в размере 176 715 (Сто семьдесят шесть тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.

В последующем выплата по Гарантии в сумме 10 395 000 (Десять миллионов триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек произведена ООО Эс-Би-Ай Банк в полном объеме.

19.04.2022      года МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к ООО «АВК Групп» о возвратенеосновательного обогащения и неустойки (дело № А43-10982/2022). В рамкахрассмотрения дела судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Согласно заключению экспертизы стоимость качественно выполненных работ ООО «АВК Групп» по муниципальному контракту № 0132300007520000882 от 17.12.2020 года на выполнение работ по объекту «Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: 

<

...> (Литер А, Al)» составляет 63 473 015 (Шестьдесят три миллиона четыреста семьдесят три тысячи пятнадцать) рублей 41 коп.

На момент предъявления иска взаиморасчеты между Сторонами были произведены следующим образом:

В соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 25.12.2021 г. окончательная цена Контракта составила 135 016 280 рублей 87 копеек.

Заказчиком выплачен аванс платежным поручением № 3138 от 25.12.2020 в сумме 40 920 000,00 руб. и платежным поручением № 19000826 от 21.05.202 1г. в сумме 20 460 000,00 руб.

На 29.12.2021 года ООО «АВК Групп» по актам по форме КС-2, КС-3 выполнило работ на сумму 124 171 770 рублей 87 коп.

На момент расторжения Контракта взаиморасчеты между Сторонами произведены в следующем порядке: Генподрядчиком выполнено Работ на сумму 124 171 770 рубля 87 коп.. Заказчиком оплачено Работ на сумму 135 014 857 рублей 24 копейки.

Таким образом, и данный факт подтверждается экспертным заключением, после расторжения Контракта задолженность ООО «АВК Групп» перед МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» составляла 71 541 841 (Семьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 83 копейки. С учетом произведенной выплаты по банковской гарантии задолженность ООО «АВК Групп» перед истцом составила 61 146 841 (шестьдесят один миллион сто сорок шесть тысяч восемьсот сорок один рубль) 83 копейки.

06.03.2023 года Арбитражным судом Нижегородской области было вынесеноопределение о принятии мер по обеспечению иска по делу № А43-10982/2022 но искумуниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальномустроительству города Нижнего Новгорода» к ООО «АВК-Групп» о взысканиинеосновательного обогащения, штрафа и неустойки.

Суд определил: принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ООО «АВК Групп» (ИНН 

<

***>/ОГР11 

<

***>, адрес: 191144 

<

...>, пом. 2-Н офис 207-211) и находящееся у него иди других лиц. в пределах 48 777 774 рубля 34 копейки.

07.03.2023 года исполнительный лист направлен в ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

24.04.2023 года Арбитражным судом Нижегородской области было вынесено решение делу № А43-10982/2022, согласно которому взыскано с ООО «АВК-Групп» 61 146 841 (шестьдесят один миллион сто сорок шесть тысяч восемьсот сорок один рубль) 83 копейки неосновательного обогащения, 1 178 935 рублей 97 копеек неустойки.

14.07.2023 года исполнительный лист ФС № 039383358 отправлен в ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

В настоящее время в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело № А56-46509/2023 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Эй-Би-Ай Банк», адрес: 125315. г. Москва. Ленинградский пр., д. 72, корп. 3. ОГРН 

<

***>. ИНН 

<

***>. о признании общества с ограниченной ответственностью «АВК Групп», адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24, лит. А, пом. 2-Н. оф. 207-211, ОГРН 

<

***>. ИНН 

<

***>, несостоятельным (банкротом).

Поскольку у должника ООО «АВК-Групп» числилось неисполненное обязательство по решению Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-10982/2022, данное требование было заявлено МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» и включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Все документы, связанные с исполнением муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: г. 11. Новгород, ул. Пискунова, д. 39 (Литер А.)» были изъяты у МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» сотрудниками СУ СК по Нижегородской области в связи с расследованием уголовных дел в отношении бывшего генерального директора ФИО3 и бывшего начальника отдела капитального ремонта и реставрации ФИО5 по факту получения ими взятки от должностных лиц из числа ООО «АВК-Групп».

По информации, поступавшей в период исполнения Контракта от ООО «АВК-Групп», субподрядчиками, фактически выполнявшими работы на Объекте являлись:

-   ООО «АВАН» (ИНН 

<

***>/ОГРН 

<

***>):

- ООО «Альфа-сервис» (ИНН 

<

***>/ОГРН 

<

***>).

Решение суда по делу № А43-10982/2022 с учетом проведенной экспертизы показывает, что порученный истцом ООО «Альфа-сервис» объем работ по договорам субподряда (отделочные работы внутренних помещений и устройство инженерных сетей, устройство полов, устройство инженерных систем (отопления), устройство архитектурно-художественного освещения) не был выполнен. Таким образом, оснований для удержания взыскиваемой суммы у ответчика не имеется. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-сервис» (603000, Россия, 

<

...>, помещ. 6А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.06.2008, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АВК Групп» (191144, 

<

...>, литер А, пом 2-Н офис 207-211, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.06.2016, ИНН: 

<

***>) 22 231 487 рублей 53 копеек неосновательного обогащения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-сервис» (603000, Россия, 

<

...>, помещ. 6А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.06.2008, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 134 157 рублей госпошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Дорохова Н.Н.