АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции 

(резолютивная часть) 

«

Дело № А38-10018/2019

г. Йошкар-Ола

29» октября 2020 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Фурзиковой Е.Г. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску товарищества собственников недвижимости «Димитрова-75»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компа- ния «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ и взыскании расходов на оплату услуг  эксперта  

с участием представителей: от истца – председатель ФИО2, выписка из ЕГРЮЛ (после перерыва), 

от ответчика – не явился, извещен по правилам статьи 123 АПК РФ,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная ком- пания «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех меся- цев со дня вступления решения арбитражного суда в законную силу устранить не- достатки работ, допущенные при строительстве жилого дома № 75 по ул. Димитрова г. Йошкар-Олы:  

- выполнить пропиливание горизонтальных деформационных швов (общая  толщина 30 мм) в лицевой кладке кирпича во всех уровнях перекрытий (на этаж  80,6 м, на всю высоту дома 725,4 м);  

- заполнить горизонтальные деформационные швы упругими прокладками из  пенополиэтилена марки Вилатерм-СМ диаметром 30(40), с последующим заделы- ванием герметизирующей нетвердеющей мастикой (725,4 м);  

- пропилить штробы (длиной 2 м) в швах кирпичной кладки через 6 рядов  

кирпича на всю высоту наружных углов (5 углов) дома (на этаж 25 штроб, на всю  

высоту дома 225 штроб); - очистить штробы от пыли; - заполнить штробы цементным раствором (450 м); 

- уложить в штробы с раствором анкеры (Г-образная арматура периодическо- 

го профиля длиной 2 м, диаметром 6 мм, массой 0,222 кг 1 м); - окончательно заделать штробы раствором (450 м); 

- заменить разрушенные кирпичи лицевой кладки (главный фасад:  

0,026х85=2,21 кв.м, дворовой фасад: 0,026х8=0,21 кв.м, торцевой фасад со сторо- 

ны ул. Транспортной: 0,026х40=1,024 кв.м, торцевой фасад со стороны ул. Димитрова: 0,026х24=0,624 кв.м);  

- заделать трещины более 0,4 мм в лицевой кладке кирпичом (9 м);  - заделать трещины до 0,4 мм в лицевой кладке раствором (124 м).  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу товари- щества собственников недвижимости «Димитрова-75» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) убытки в сумме 10 000 руб. и расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 8000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Е.Г. Фурзикова