АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-24810/24

г. Уфа

25 марта 2025 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола помощником судьи Ибрагимовой А.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

 Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ВентСервис" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

об обязании безвозмездно в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по Муниципальному контракту № 61 от 01.06.2022 г., устранить недостатки работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенск, расположенного по адресу: 453431, Республика Башкортостан, 

<

...> (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований от 04.02.2025)  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ВсптСервис» безвозмездно в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по Муниципальному контракту № 61 от 01.06.2022 г., устранить недостатки работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенск, расположенного по адресу: 453431, Республика Башкортостан, 

<

...>, а именно произвести следующие виды работ:  

 № 

Наименование работ 

Единица измерения  

Количество 

Кровля в осях г-е; 1-6 

1 

Разборка покрытии кровель из рулонных материалов 2слоя.  

м2 

880,36  

2 

Разборка покрытии кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя. 

п.м. 

282,64  

3 

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 54мм  

м3 

47,53944  

4 

Демонтаж теплоизоляции (экструзии толщиной 50мм).  

м3 

44,018  

5 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.  

м2 

880,36  

Устройство кровли техиониколь стандарт 

6 

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм. 

м2 

880,36  

7 

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер. 

м2 

880,36  

8 

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.  

м2 

880,36  

9 

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100 мм  

м2 

880,36  

10  

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).  

м2 

880,36  

11  

Нарезка деформационных швов в стяжке. 

п.м. 

400 

12  

Нанесения гидроизоляции (Праймпрование поверхности Праймер Техиониколь)  

м2 

880,36  

13  

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя: 1 слой - Унифлекс ВЕНТ И  

2 слой - Технооласт ПЛАМЯ СТОП 

м2 

880,36  

14  

Устройство кровельных воронок 

шт. 

4 

15  

Устройство аэраторов диаметром 1 10мм. 

шт. 

9 

16  

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.  

м2 

84,792  

17  

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм  

п.м. 

282,64  

18  

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)  

м.п. 

131,78  

Кровля в осях а-в; 1-6 

19  

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 2слоя.  

м2 

860,9  

20  

Разборка покрытий кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.  

п.м. 

303,16  

21  

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 102мм  

м3 

87,81 18  

22  

Демонтаж теплоизоляции (экструзии толщиной 50мм).  

м3 

43,045  

23  

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.  

м2 

860,9  

Устройство кровли техиониколь стандарт  

24  

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм. 

м2 

860,9  

25  

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер. 

м2 

860,9  

26  

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.  

м2 

860,9  

27  

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100мм  

м2 

860,9  

28  

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).  

м2 

860,9  

29  

нарезка деформационных швов в стяжке. 

п.м 

400 

30  

Нанесения гидроизоляции (Праймирование поверхности Праймер Технониколь)  

м2 

860,9  

31  

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя:1 слой - Унифлекс BEНT П 2 слой - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП  

м2 

860,9  

32  

Устройство кровельных воронок 

шт. 

4 

33  

Устройство аэраторов диаметром 110мм. 

шт. 

9 

34  

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.  

м2 

90,948  

35  

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм  

п.м. 

303,16  

36  

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)  

м.п. 

152,3  

Кровля в осях в-г; 2-5 

37  

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 2слоя.  

м2 

525,57  

38  

Разборка покрытий кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.  

п.м. 

126,48  

39  

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 50мм  

м3 

26,2785  

40  

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.  

м2 

525,57  

Устройство кровли технониколь стандарт  

41  

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм. 

м2 

525,57  

42  

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер. 

м2 

525,57  

43  

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.  

м2 

525,57  

44  

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100 мм  

м2 

525,57  

45  

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).  

м2 

525,57  

46  

Нарезка деформационных швов в стяжке. 

п.м. 

249 

47  

Нанесения гидроизоляции (Праймирование поверхности Праймер Технониколь)  

м2 

525,57  

48  

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя: 1 слой - Унифлекс ВЕНТ П  

2слой - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 

м2 

525,57  

49  

Устройство кровельных воронок 

шт. 

4 

50  

Устройство аэраторов диаметром 110мм. 

шт. 

6 

51  

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.  

м2 

37,944  

52  

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм  

п.м. 

126,48  

53  

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)  

м.п. 

25,58  

Зенитные фонари 

54  

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)  

м.п. 

25,58  

55  

Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 20 м2  

м2 

73,5185  

56  

Остекление зенитных фонарей двухкамерными стеклопакетами. 

м2 

147,037  

Отделка 1 этаж 

57  

Очистка стен и потолков металлическими щетками. 

м2 

22,66  

58  

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.  

м2 

22,66  

59  

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм. 

м2 

22,66  

60  

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.  

м2 

22,66  

61  

Демонтаж керамической плитки со стен 

м2 

57,24  

62  

Очистка стен металлическими щетками от масляных красок.  

м2 

57,24  

63  

Нанесение на стены бетоноконтакт. 

м2 

57,24  

64  

Выравнивание штукатурки стен до 10мм. 

м2 

57,24  

65  

Облицовка стен керамической плиткой. 

м2 

57,24  

Отделка 2 этаж 

66  

Очистка стен и потолков металлическими щетками. 

м2 

581,3  

67  

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.  

м2 

581,3  

68  

Сборка лесов высотой 8,5м горизонтальной проекции. 

м2 

558 

69  

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм. 

м2 

581,3  

70  

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.  

м2 

581,3  

71  

Демонтаж керамической плитки со стен 

м2 

33,66  

72  

Очистка стен металлическими щетками от масляных красок.  

м2 

33,66  

73  

Нанесение на стены бетоноконтакт. 

м2 

33,66  

74  

Выравнивание штукатурки стен до 10мм. 

м2 

33,66  

75  

Облицовка стен керамической плиткой. 

м2 

33,66  

Отделка 3 этаж 

76  

Очистка стен и потолков металлическими щетками. 

м2 

159.5  

77  

Обработка степ и потолков антигрибковыми составами.  

м2 

159,5  

78  

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм. 

м2 

159,5  

79  

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.  

м2 

159,5  

80  

Демонтаж керамической плитки со стен 

м2 

75,6 

81  

Очистка степ металлическими щетками от масляных красок.  

м2 

75,6 

82  

Нанесение па стены бетоноконтакт. 

м2 

75,6 

83  

Выравнивание штукатурки стен до 10мм. 

м2 

75,6 

84  

Облицовка стен керамической плиткой. 

м2 

75,6 

Отделка 4 этаж 

85  

Очистка стен и потолков металлическими щетками. 

м2 

180,3  

86  

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.  

м2 

180,3  

87  

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм. 

м2 

180,3  

88  

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.  

м2 

180,3  

Лестничные клетки 

89  

Демонтаж керамогранита. 

м2 

273,6  

90  

Демонтаж стяжек бетонных толщиной 30мм. 

м2 

273,6  

91  

Очистка лестничных маршей от масляных красок. 

м2 

273,6  

92  

Обработка лестничных маршей бетоноконтакт. 

м2 

273,6  

93  

Устройство стяжек бетонных толщиной 30мм. 

м2 

273,6  

94  

Укладка керамогранита 300*300мм 

м2 

273,6  

Актовый зал 

95  

Демонтаж ламината. 

м2 

184,5  

96  

Демонтаж плинтусов пластиковых 

м.п. 

54,8 

97  

Устройство выравнивающих стяжек толщиной 40мм 

м2 

184.5  

98  

Устройство наливных полов до 5 мм. 

м2 

184,5  

99  

Устройство напольного покрытия из кварц винила 

м2 

184,5  

100  

Устройство пластиковых плинтусов 

м.п. 

54,8 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВентСервис" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) сумму государственной пошлины в доход федерального бюджета в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист в доход федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.Р. Юсеева