АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-4863/2021

г. Архангельск

30 июля 2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2021 года  

Полный текст решения изготовлен 30 июля 2021 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Бутусовой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» (ОГРН 

<

***>; адрес: 150003, 

<

...>)

к ответчику - акционерному обществу «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН 

<

***>; адрес: 163069, 

<

...>)

о взыскании 4 920 458 руб. 85 коп.

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 (доверенность от 31.12.2020),

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к акционерному обществу «Архангельская областная энергетическая компания» (далее – ответчик)                        о взыскании 4 920 458 руб. 85 коп., в том числе 4 567 515 руб. 30 коп. долга                               за выполненные по договорам № 235-01/19 от 31.07.2019, № 236-01/19 от 31.07.2019,                      № 266-01/19 от 12.08.2019, № 278-01/19 от 20.08.2019, № 310-01/19 от 05.09.2019,                           № 311-01/19 от 05.09.2019, № 340-01/19 от 27.09.2019, № 348-01/19 от 04.10.2019,                          № 353-01/19 от 14.10.2019, № 412-01/19 от 17.12.2019 работы, 352 943 руб. 55 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.10.2019 по 11.05.2021.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, отзыв на иск                    не представил, о времени и месте судебного заседания в порядке части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) извещен надлежащим образом.

Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав доказательства по делу, заслушав пояснения представителя истца, суд установил следующие фактические обстоятельства.

I) 31 июля 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 235-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, из материалов заказчика с использованием своих инструментов и механизмов, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по монтажу чешуйчатой колосниковой цепной решетки механической топки ТЧЗМ-2-2,7/5,6 на объекте «Котел № 5 КЕ-25-14С, зав.№1986, инв.№ 00712 на котельной «Центральная», г.Няндома, производственная база птицефабрики «Няндомское», строение 1, Архангельская область, согласно Техническому заданию (приложение №1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 235-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 50 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 235-01/19 3.1 общая стоимость работ составляет           490 593 руб. 53 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2)  и включает все  издержки подрядчика, связанные с исполнением договора. 

Предусмотренные договором № 235-01/19 работы выполнены истцом на сумму 484 029 руб. 64 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

II) 31 июля 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 236-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, из материалов заказчика с использованием своих инструментов и механизмов, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по монтажу чешуйчатой колосниковой цепной решетки механической топки ТЧЗМ-2-2,7/5,6 на объекте «Котел № 1 КЕ-25-14С, зав.№976, рег.№ 00708 на котельной «Центральная», г.Няндома, производственная база птицефабрики «Няндомское», строение 1, Архангельская область, согласно Техническому заданию (приложение №1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 236-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 50 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 236-01/19 общая стоимость работ составляет               490 593 руб. 53 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2)  и включает все  издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 236-01/19 работы выполнены истцом на сумму  475 629 руб. 64 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

III) 12 августа 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 266-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по ремонту кирпичной дымовой трубы котельной «РИК», расположенной по адресу: 

<

...>, Архангельская область, согласно Техническому заданию (Приложение № 1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 266-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 20 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 266-01/19 общая стоимость работ составляет               697 173 руб. 19 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все  издержки подрядчика, связанные с исполнением договора/

Предусмотренные договором № 266-01/19 работы выполнены истцом на сумму  328  383 руб. 12 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

IV) 20 августа 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 278-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по ремонту кирпичной дымовой трубы котельной «Квартальная», расположенной по адресу: 

<

...>, Архангельская область, согласно Техническому заданию (Приложение № 1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 278-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 20 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 278-01/19 общая стоимость работ составляет               698 156 руб. 15 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 278-01/19 работы выполнены истцом на сумму  287 092 руб. 06 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

V) 05 сентября 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 310-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по ремонту металлических конструкций дымовой трубы котельной «Центральная», расположенной по адресу: г.Няндома, производственная база птицефабрики «Няндомское», строение 1, Архангельская область, согласно Техническому заданию (Приложение № 1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 310-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 30 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 310-01/19 общая стоимость работ составляет               699 406 руб. 40 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 310-01/19 работы выполнены истцом на сумму  657 773 руб. 54 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

VI) 05 сентября 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 311-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по ремонту кирпичной кладки дымовой трубы котельной «Центральная», расположенной по адресу: г.Няндома, производственная база птицефабрики «Няндомское», строение 1, Архангельская область, согласно Техническому заданию (Приложение № 1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 311-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 30 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 311-01/19 общая стоимость работ составляет               698 888 руб. 09 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 311-01/19 работы выполнены истцом на сумму  261 334 руб. 78 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

VII)  27 сентября 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 340-01/19, согласно которому подрядчик на свой риск обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по замене четырех легкосбрасываемых оконных блоков стены по оси «А» на объекте «Котельная по адресу: 

<

...>», согласно Техническому заданию (Приложение № 1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 340-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 7 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 340-01/19 общая стоимость работ составляет               699 999 руб. 98 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 340-01/19 работы выполнены истцом на сумму  699 657 руб. 79 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.10.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

VIII)  04 октября 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 348-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по ремонту светопрозрачных ограждающих конструкций бойлерной, согласно Техническому заданию (Приложение № 1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 348-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 10 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 348-01/19 общая стоимость работ составляет               698 490 руб. 80 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 348-01/19 работы выполнены истцом на сумму  654 623 руб. 36 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.10.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

IX)  14 октября 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 353-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по замене оконных блоков стен по оси «1» и оси «Г» на объекте «Котельная по адресу: 

<

...>»,  согласно Техническому заданию (Приложение № 1), сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 5.1 договора № 353-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 7 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.1 договора № 353-01/19 общая стоимость работ составляет               699 999 руб. 98 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 353-01/19 работы выполнены истцом на сумму  699 763 руб. 37 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.10.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

X) 17 декабря 2019 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 412-01/19, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика, с использованием своих материалов, инструментов и оборудования, своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков изготовить металлическую дымовую трубу по объекту: котельная, с.Юрома Лешуконского района Архангельской области,  согласно Техническому заданию (Приложение № 1) к договору, сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок выполнения работ указан в пункте 3.1 договора № 412-01/19: начало работ – с момента заключения договора, окончание – 20 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно пункту 2.1 договора № 412-01/19 общая стоимость работ составляет               679 299 руб. 60 коп., в том числе НДС 20%, определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и включает все издержки подрядчика, связанные с исполнением договора.

Предусмотренные договором № 412-01/19 работы выполнены истцом на сумму  679 299 руб. 60 коп., о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2019. Согласно данным документам, подписанным ответчиком без разногласий, работы по договору выполнены истцом в полном объеме, ответчик претензий по объему и качеству работ не имеет. 

Таким образом, всего  стоимость работ, выполненных по указанным выше договорам, составила  4 576 315 руб. 30 коп. 

Пунктами 4.1.2 договоров № 266-01/19 от 12.08.2019, № 278-01/19 от 20.08.2019,  № 310-01/19 от 05.09.2019, № 311-01/19 от 05.09.2019, № 340-01/19 от 27.09.2019,             № 348-01/19 от 04.10.2019, № 353-01/19 от 14.10.2019, пунктом 2.6.2 договора № 412-01/19 от 17.12.2019 стороны согласовали условие о том, что окончательный расчет производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 календарных дней после выполнения подрядчиком всего объема работ по объекту на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).  

Договоры № 235-01/19 от 31.07.2019, № 236-01/19 от 31.07.2019 не содержат положений, определяющих срок оплаты выполненных работ. В связи с этим выполненные по данным договорам работы подлежат оплате в разумный срок в порядке статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно представленным истцом сведениям на основании уведомления истца о прекращении взаимных обязательств зачетом от 29.01.2021 на сумму 8 800 руб. было прекращено денежное обязательство ответчика по оплате работ по договору № 235-01/19 от 31.07.2019. Соответственно долг по договору № 235-01/19 от 31.07.2019 составил по расчету истца 475 229 руб. 64 коп. (484 029, 64 руб. – 8800,00 руб.). По остальным договорам оплата работ ответчиком не производилась, задолженность по ним составляет полную стоимость выполненных работ согласно подписанным актам приемки. 

По расчету истца, общий размер задолженности по оплате работ по всем договорам (№ 235-01/19 от 31.07.2019, № 236-01/19 от 31.07.2019, № 266-01/19 от 12.08.2019, № 278-01/19 от 20.08.2019,  № 310-01/19 от 05.09.2019, № 311-01/19 от 05.09.2019, № 340-01/19 от 27.09.2019, № 348-01/19 от 04.10.2019, № 353-01/19 от 14.10.2019) составляет 4 567 515 руб. 30 коп. 

Поскольку досудебная претензия № 581/2021 от 23.03.2021 (направлена по почте 24.03.2021)  об оплате задолженности в размере 4 567 515 руб. 30 коп. оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании части 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда                                    не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Факт выполнения истцом работ по договору и их стоимость подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается. Задолженность по оплате работ по расчету истца оставляет 4 567 515 руб. 30 коп., в том числе: 

по договору № 235-01/19 от 31.07.2019– 475 229 руб. 64 коп., 

по договору № 236-01/19 от 31.07.2019– 475 629 руб. 64 коп., 

по договору  № 266-01/19 от 12.08.2019– 328  383 руб. 12 коп., 

по договору  № 278-01/19 от 20.08.2019 – 287 092 руб. 06 коп., 

по договору  № 310-01/19 от 05.09.2019 – 657 773 руб. 54 коп. 

по договору  № 311-01/19 от 05.09.2019 – 261 334 руб. 78 коп., 

по договору  № 340-01/19 от 27.09.2019 – 481 762 руб. 99 коп., 

по договору № 348-01/19 от 04.10.2019 – 437 934 руб. 96 коп., 

по договору № 353-01/19 от 14.10.2019 – 483 074 руб. 97 коп., 

по договору № 412-01/19 от 17.12.2019 – 679 299 руб. 60 коп.

Доказательств оплаты задолженности в указанном размере ответчиком                               не представлено. Окончательный срок оплаты работ в соответствии со статьей 314                       ГК РФ и условиями договоров наступил. Расчет долга подтверждается представленными в дело документами. 

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика 4 567 515 руб. 30 коп. долга. 

В соответствии с пунктами 11.2 договоров № 235-01/19 от 31.07.2019, № 236-01/19 от 31.07.2019, пунктами 11.5 договоров  № 266-01/19 от 12.08.2019, № 278-01/19 от 20.08.2019, № 310-01/19 от 05.09.2019, № 311-01/19 от 05.09.2019, пунктами  11.7 договоров  № 340-01/19 от 27.09.2019, № 348-01/19 от 04.10.2019, № 353-01/19 от 14.10.2019, пунктом 8.3 договора № 412-01/2019 от 17.12.2019 в случае просрочки заказчиком обязательств по оплате выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ, но не более 10 % от суммы задолженности.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Ответчик допустил просрочку оплаты работ, соответственно требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно. Иной размер ответственности заказчика (ответчика) в договоре не установлен. 

По расчету истца проценты составляют 352 943 руб. 55 коп. Проценты начислены на всю сумму долга 4 567 515 руб. 30 коп. за период с 31.10.2019 по 11.05.2021 по ключевым ставка Банка России, действовавшим в период просрочки.

Суд считает необоснованным начисление процентов за весь период просрочки на сумму 4 567 515 руб. 30 коп. без учета периода ее образования.

Как указывалось выше в договорах № 235-01/19 и № 236-01/19 от 31.07.2021 сроки оплаты работ не предусмотрены, соответственно работы подлежали оплате в соответствии со статьей 314 ГК РФ в разумный срок. Работы по данным договорам были приняты по актам приемки 30.09.2019. Соответственно, разумный срок оплаты к 30.10.2019 истек, и истец правомерно на задолженность по данным договорам начислил проценты с 31.10.2019.

По остальным договорам установлен следующий срок платежа: в течение                      30 календарных дней после выполнения подрядчиком всего объема работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).  

Работы по договорам № 266-01/19 от 12.08.2019, № 278-01/19 от 20.08.2019,                    № 310-01/19 от 05.09.2019, № 311-01/19 от 05.09.2019 и № 412-01/19 от 17.12.2019 выполнены 31.12.2019, следовательно, срок оплаты истек 30.01.2020, и проценты подлежат начислению на задолженность по данным договорам с 31.01.2020. 

Работы по договорам № 340-01/19 от 27.09.2019,  № 348-01/19 от 04.10.2019,                  № 353-01/19 от 14.10.2019 были выполнены 31.10.2019, следовательно, срок оплаты с учетом положений статьи 193 ГК РФ истек 02.12.2019 (поскольку последний 30-ый день оплаты приходится на выходной день 30.11.2019), и проценты подлежат начислению на задолженность по данным договорам с 03.12.2019. 

Согласно расчету суда размер процентов за просрочку оплаты выполненных по договорам работ составляет 313 811 руб. 94 коп., в том числе:

- 36 722 руб. 22 коп. за период с 31.10.2019 по 11.05.2021 по договору                                № 235-01/19 от 31.07.2019, 

- 36 753 руб. 11 коп. за период с 31.10.2019 по 11.05.2021 по договору                               № 236-01/19 от 31.07.2019, 

- 20 102 руб. 97 коп. за период с 31.01.2020 по 11.05.2021 по договору                            № 266-01/19 от 12.08.2019, 

-  17 575 руб. 23 коп. за период с 31.01.2020 по 11.05.2021 по договору                            № 278-01/19 от 20.08.2019, 

- 40 267 руб. 65 коп. за период с 31.01.2020 по 11.05.2021 по договору                             № 310-01/19 от 05.09.2019, 

- 15 998 руб. 43 коп. за период с 31.01.2020 по 11.05.2021 по договору                              № 311-01/19 от 05.09.2019, 

- 34 395 руб. 87 коп. за период с 03.12.2019 по 11.05.2021 по договору                               № 340-01/19 от 27.09.2019, 

- 31 266 руб. 73 коп. за период с 03.12.2019 по 11.05.2021 по договору                               № 348-01/19 от 04.10.2019, 

- 34 489 руб. 53 коп. за период с 03.12.2019 по 11.05.2021 по договору                                № 353-01/19 от 14.10.2019, 

- 41 585 руб. 44 коп. за период с 31.01.2020 по 11.05.2021 по договору                                      № 412-01/19 от 17.12.2019.

Таким образом, с ответчика в пользу истца взыскивается 313 811 руб. 94 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а во взыскании остальной части процентов суд отказывает по изложенным выше основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» (ОГРН 

<

***>)  4 567 515 руб. 30 коп. долга,                               313 811 руб. 94 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,                          всего – 4 881 327 руб. 24 коп., а также 47 223 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

          Судья

Н.В. Бутусова.