7/2018-123741(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

18 октября 2018 года Дело № А28-10375/2018  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Вычугжанина Р.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

истца – товарищество собственников жилья "БЕРЕГОВОЕ-2" (ОГРН 

<

***>)  

к ответчику – акционерное общество "КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН 

<

***>)  

о понуждении устранить недостатки, 

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью  "ИНТЕХСЕРВИС-ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>)  

при участии в судебном заседании: истец (представитель) – ФИО2 (доверенность от 31.05.2018), 

ответчик (представитель) – ФИО3 (доверенность от 20.03.2018) (до перерыва)  

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать акционерное общество "КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН 

<

***>) устранить недостатки (дефекты),  обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации многоквартирного дома по  адресу: 

<

...>, в следующие порядке и  сроки:  

 № 

п/п  

Наименование дефекта  

Срок устранения 

недостатков  

9-ти этажная секция  

ТЕХПОДПОЛЬЕ 

1. 

Зацементировать места, где проведена герметизация  противопожарной пеной (вокруг дверных коробок, в  местах прохождения различных трубопроводов и  кабелей через плиты перекрытия)  

В течение 2 месяцев с  момента вступления  решения суда в  законную силу.  

ЭЛЕКРОЩИТОВАЯ  

2. 

Загерметизировать отверстия ввода кабелей через плиту  перекрытия  

В течение 2 месяцев с  момента вступления  решения суда в  

законную силу. 

КРОВЛЯ 

3. 

Провести гидроизоляцию на плитах вентиляционных  шахт, восстановить их поверхность  

Не позднее 31 июля  2019 года  

4. 

Закрыть стыки соединений слоем гидроизоляции на  парапетах кровли и на поверхности шахты машинного  отделения  

Не позднее 31 июля  2019 года  

5. 

Привести ограждения кровли в соответствие  противопожарным нормам и требованиям СНиП  

Не позднее 31 июля  2019 года  

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

6. 

Произвести шпаклевку стен 

В течение 2х месяцев с  момента вступления  решения суда в  законную силу.  

ПРИДОВОМАЯ ТЕРРИТОРИЯ  

7. 

Привести в надлежащее состояние асфальтовое  покрытие придомовой дороги и восстановить систему  отвода ливневых вод, начиная с заезда и вдоль торца 9- ти этажной секции  

Не позднее 31 июля  2019 года  

8. 

Восстановить бордюрный камень тротуаров со стороны  офисной части  

Не позднее 31 июля  2019 года  

7-ми этажная секция  

КРОВЛЯ 

9. 

Установить гидроизоляцию на козырьках  вентиляционных вытяжек  

Не позднее 31 июля  2019 года  

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ  

10. 

Выровнять тротуарные плитки со стороны офисной и  жилой части здания  

Не позднее 31 июля  2019 года  

11. 

Устранить трещины и выбоины на асфальте на  проезжей части вокруг дома  

Не позднее 31 июля  2019 года  

4-х этажная секция 

ТЕХПОДВАЛ 

12. 

Выровнять и закрепить провисшие канализационные  трубы  

В течение 2х месяцев с  момента вступления  решения суда в  законную силу.  

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ 

13. 

Установить доводчик 

В течение 2х месяцев с  момента вступления  решения суда в  законную силу.  

КРОВЛЯ 

14. 

Покрыть парапеты гидроизоляцией 

Не позднее 31 июля  2019 года  

15. 

Крепления ограждений кровли закрепить в  соответствии с требованиями СНиП  

Не позднее 31 июля  2019 года  

16. 

Восстановить кирпичную кладку на вентшахтах  

Не позднее 31 июля  2019 года  

17. 

Восстановить кровельный ковер на вентшахтах 

Не позднее 31 июля  

2019 года 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

18. 

Выровнять тротуарные плитки 

Не позднее 31 июля  2019 года  

19. 

С торца секции ближе к реке во время осадков в  весеннее-осенний период образуются большие лужи,  необходимо устранить отсутствие уклона на дороге в  сторону приемного лотка, а также произвести ремонт  лотка за проезжей частью  

Не позднее 31 июля  2019 года  

20 

Произвести ремонт дороги и сделать уклон для отвода  ливневых вод с торца 3 подъезда  

Не позднее 31 июля  2019 года  

21 

Произвести заделку раствором всех колодцев 

Не позднее 31 июля  2019 года  

Взыскать с акционерного общества "КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН 

<

***>) в пользу товарищество собственников жилья  "БЕРЕГОВОЕ-2" (ОГРН 

<

***>) 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек судебных  расходов на уплату государственной пошлины по делу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный апелляционный суд)  по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  Апелляционная жалоба (в том числе в электронном виде) подается через Арбитражный  суд Кировской области.  

Судья Р.А. Вычугжанин