Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А50-38604/2019

09 января 2021 г.

г. Пермь

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2020 г.

Решение в полном объеме изготовлено 09 января 2021 г.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи    Ажауровой М.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Метатрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третьи лица: публичное акционерное общество «Метафракс»                           (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

о взыскании задолженности, неустойки,

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность от 15.10.2019, паспорт;

от ответчика: ФИО2, доверенность от 19.12.2019, паспорт;

от третьих лиц: не явились,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения искового заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (далее – ООО «Стройразвитие», истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Метатрансстрой» (далее – ООО «Метатрансстрой», ответчик) о взыскании задолженности по договору от 25.01.2019 № 08-24/25 в сумме                                1 281 777 руб. 01 коп., неустойки в сумме 207 961 руб. 31 коп.; по договору от 17.01.2019 № 08-24/15 задолженности в сумме 68 361 руб. 04 коп., неустойки в сумме 13 866 руб. 13 коп.; по договору от 25.01.2019 № 08-24/17 задолженности в сумме 382 409 руб. 44 коп., неустойки в сумме                              30 270 руб. 20 коп.; по договору от 12.09.2018 № 08-24/410 задолженности в сумме 3 264 294 руб. 66 коп., неустойки в сумме 313 951 руб. 25 коп.; кроме того, истцом заявлено требование о взыскании по договору строительного субподряда от 12.09.2018 № 08-24/409, а именно просрочка в выплате аванса в сумме 87 541 руб., просрочка по оплате выполненных работ по актам КС в сумме 17 481 руб., общая сумма неустойки по просроченным платежам на 10.12.2019 в сумме 105 022 руб., сумма задолженности за выполненные работы согласно актов КС-2 от 31.08.2019 в сумме 24 428 руб., сумма задолженности за выполненные работы согласно актов КС-2 от 31.08.2019 в сумме 47 352 руб., общая сумма задолженности вследствие неосновательного уклонения от подписания и оплаты всего 71 780 руб. Итого 176 802 руб. (с учетом уточнения, принятого судом на основании статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)).

Определениями арбитражного суда от 31.12.2019, 03.09.2020, 13.11.2020 на основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены публичное акционерное общество «Метафракс» (далее – ПАО «Метафракс»), общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (далее – ООО «Эверест»), общество с ограниченной ответственностью «Орион» (далее – ООО «Орион»).

До рассмотрения дела по существу истец в соответствии со статьей             49 АПК РФ заявил ходатайство об отказе от исковых требований в части взыскания по договору строительного субподряда от 12.09.2018 № 08-24/409, а именно просрочка в выплате аванса в сумме 87 541 руб., просрочка по оплате выполненных работ по актам КС в сумме 17 481 руб., общая сумма неустойки по просроченным платежам на 10.12.2019 в сумме 105 022 руб., сумма задолженности за выполненные работы согласно актов КС-2 от 31.08.2019 в сумме 24 428 руб., сумма задолженности за выполненные работы согласно актов КС-2 от 31.08.2019 в сумме 47 352 руб., общая сумма задолженности вследствие неосновательного уклонения от подписания и оплаты всего 71 780 руб. Итого 176 802 руб.

Суд считает ходатайство истца подлежащим удовлетворению. При этом суд исходит из следующего:

истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично (часть 2 статьи 49 АПК РФ).

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Отказ истца от части исковых требований не противоречит закону, не нарушает права других лиц. Ходатайство об отказе от иска в части подлежит удовлетворению.

Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом (пункт 4 части 1 статьи 150 АПК РФ).

Представитель истца требования искового заявления поддержал.

Представитель ответчика с требованиями искового заявления не согласен, по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление.                         (т. 3 л. д. 3-9, т. 4 л. д. 76-81))

Указал, что ООО «Стройразвитие» были направлены в адрес ООО «Метатрансстрой» для рассмотрения и подписания акты приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 по договорам строительного субподряда от 12.09.2018 № 08-24/410, от 25.01.2019 № 08-24/17, от 17.01.2018 № 08-24/15, от 12.09.2018 № 08-24/409, от 25.01.2018 №08-24/25. Последняя редакция актов и справок подготовлена субподрядчиком 31.08.2019, после устранения части замечаний генподрядчика по качеству. Однако, в нарушение пунктов 3.4, 4.3.6, 4.4.13, 4.4.15, 4.4.20, 5.2 договоров субподряда, ООО «Стройразвитие» не был передан полный комплект документов, предоставление которых является необходимым условием того, чтобы генподрядчик смог осуществить приемку и оплату работ по договорам. А именно: исполнительная   документация представлена в 2 экземплярах вместо 3: не передан журнал учета выполненных работ формы КС-6а по договорам от 12.09.2018                № 08-24/409, от 12.09.2018 № 08-24/410, от 24.01.2019 № 08-24/25, от 25.01.2019 №08-24/17 дополнительному соглашению от 25.10.2018 № 1 к договору от 12.09.2018 № 08-24/409, дополнительному соглашению от 23.05.2019 № 3 к договору от 25.01.2019 № 08-24/25. В журнале по договору от 17.01.2019 № 08-24/15 отсутствует объем работ, предъявленных по КС-2, КС-3 от 31.08.2019; не переданы документы, подтверждающие объем (количество), качество и стоимость использованных материалов поставки субподрядчика, в отношении работ, указанных КС-2, КС-3 от 31.08.2019; не представлены отчеты об использовании материалов генподрядчика. Кроме того, часть взаимных денежных обязательств сторон прекращена путем совершения зачета. Часть работ по договору субподряда от 25.01.2019                      № 08-24/25, за выполнение которых истцом взыскивается задолженность, в действительности выполнены иным субподрядчиком ООО «Эверест».

Третьи лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили. Представили отзывы на исковое заявление.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ неявка в судебное заседание третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично. При этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, 17.01.2019 между                               ООО «Стройразвитие» (субподрядчик) и ООО «Метатрансстрой» (генподрядчик) заключен договор строительного субподряда № 08-24/15, согласно п.п. 1.1 которого, на основании разрешения на строительства № RU 59-90307000-27-2018 от 27.04.2018 субподрядчик обязуется в установленный договором срок, собственными силами, средствами и материалами, согласно проектной документации шифр 869-18-3-АР выполнить следующие работы: монтаж алюминиевых лоджий на объекте: девятиэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3» ПАО «Метафракс», расположенного по адресу: 

<

...>, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в порядке, определенном договором. Перечень и объем подлежащих выполнению работ по договору и их стоимость, указываются в локальном сметном расчете № (приложение № 1 к договору). (т. 1 л. д. 144-147)

Работы по договору выполняются из материалов субподрядчика. Субподрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и рабочей документацией, утвержденной заказчиком и генподрядчиком в установленном законодательством РФ порядке и допущенной в производство работ. (п.п. 1.2, 1.3 договора)

В соответствии с п. 2.1 договора общий срок выполнения работ: начало работ – 11.02.2019, окончание 30.04.2019.

Согласно п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора стоимость работ, поручаемых генподрядчиком субподрядчику, определяется на основании согласованного сторонами сметного расчета (п. 1.1. договора). Стоимость работ должна предусматривать выполнение всего комплекса работ, затрат на материалы, машины и механизмы, обязательные платежи, налоги и сборы (в том числе утилизационные и экологические), и т.п. в т.ч. не поименованные в ПСД непредвиденные расходы, необходимые для исполнения договора в полном объеме, а так же стоимость материалов приобретаемых субподрядчиком. Стоимость настоящего договора на момент его заключения согласована Сторонами в размере 1 780 000 руб., с учетом НДС по ставке действующей в соответствии с законодательством РФ. В стоимость договора не входят затраты на охрану объекта, работы по временному электроснабжению и освещению территории объекта, работы по временному водоснабжению, расходы на энергоснабжение и коммунальные услуги, которые оплачиваются генподрядчиком отдельно по прямым договорам. Цена настоящего договора определяется на весь срок его действия в объемах, утвержденных сторонами в сметной документации и изменению не подлежит. Изменение цены договора возможно только на основании дополнительного соглашения сторон, в случаях, предусмотренных настоящим договором. Оплата стоимости работ производится генподрядчиком, в течение пятнадцати дней с момента подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика за фактически выполненные и принятые генподрядчиком объемы работ, при условии представления субподрядчиком исполнительной документации, отчета об использовании материалов генподрядчика и/или документов, подтверждающих объем (количество), качество и стоимость использованных материалов поставки субподрядчика. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке (подписанный сторонами) акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнал по форме КС-6а, счет-фактура, предоставленные субподрядчиком. При исполнении настоящего договора генподрядчик имеет право предоставить субподрядчику авансовые платежи на приобретение материалов в размере до 30% от цены договора в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами оригинала договора, предоставления субподрядчиком счета и документов подтверждающих предстоящие затраты. Сумма предоставленного аванса засчитывается при расчетах за фактически выполненные работы в сумме использованных материалов поставки субподрядчика.

Дополнительным соглашением от № 1 к вышеуказанному договору, стороны пришли к соглашению абзац первый п. 3.5 изложить в следующей редакции: «При исполнении настоящего договора генподрядчик имеет право предоставить субподрядчику авансовые платежи на приобретение материалов в размере до 60% от цены договора в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами оригинала договора, предоставления субподрядчиком счета и документов подтверждающих предстоящие затраты.»

25.01.2019 между ООО «Стройразвитие» (субподрядчик) и ООО «Метатрансстрой» (генподрядчик) заключен договор строительного субподряда № 08-24/17, согласно п.п. 1.1 которого, на основании разрешения на строительства № RU 59-90307000-27-2018 от 27.04.2018 субподрядчик обязуется в установленный договором срок, собственными силами, средствами и материалами, согласно проектной документации шифр 869-18-3-АР, КР выполнить следующие работы: устройство кровли на объекте: девятиэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3» ПАО «Метафракс», расположенного по адресу: 

<

...>, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в порядке, определенном договором. Перечень и объем подлежащих выполнению работ по договору и их стоимость, указываются в локальном сметном расчете № 02 (приложение № 1 к договору). (т. 1 л. д. 54-57)

Работы по договору выполняются из материалов субподрядчика. (п.п. 1.2 договора)

В соответствии с п.п 2.1 договора общий срок выполнения работ: начало работ – 15.02.2019, окончание 30.05.2019.

В соответствии с п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора стоимость работ, поручаемых генподрядчиком субподрядчику, определяется на основании согласованного сторонами сметного расчета (п. 1.1 договора). Стоимость работ должна предусматривать выполнение всего комплекса работ, затрат на материалы, машины и механизмы, обязательные платежи, налоги и сборы (в том числе утилизационные и экологические), и т.п. в т.ч. не поименованные в ПСД непредвиденные расходы, необходимые для исполнения договора в полном объеме, а так же стоимость материалов приобретаемых субподрядчиком. Стоимость настоящего договора на момент его заключения согласована сторонами в размере 3 200 000 руб., с учетом НДС по ставке действующей в соответствии с законодательством РФ. В стоимость договора не входят затраты на охрану объекта, работы по временному электроснабжению и освещению территории объекта, работы по временному водоснабжению, расходы на энергоснабжение и коммунальные услуги, которые оплачиваются генподрядчиком отдельно по прямым договорам. Цена настоящего договора определяется на весь срок его действия в объемах, утвержденных сторонами в сметной документации и изменению не подлежит. Изменение цены договора возможно только на основании дополнительного соглашения сторон, в случаях, предусмотренных настоящим договором. Оплата стоимости работ производится генподрядчиком, в течение пятнадцати дней с момента подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика фактически выполненные и принятые генподрядчиком объемы работ, при условии представления субподрядчиком исполнительной документации, отчета об использовании материалов генподрядчика и/или документов, подтверждающих объем (количество), качество и стоимость использованных материалов поставки субподрядчика. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке (подписанный сторонами) акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнал по форме КС-ба, счет-фактура, предоставленные субподрядчиком. При исполнении настоящего договора генподрядчик имеет право предоставить субподрядчику авансовые платежи на приобретение материалов в размере до 100% от стоимости материалов по договору в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами оригинала договора, предоставления субподрядчиком счета и документов подтверждающих предстоящие затраты. Сумма предоставленного аванса засчитывается при расчетах за фактически выполненные работы в сумме использованных материалов поставки субподрядчика.

Согласно п. 9.3 договора в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых генподрядчиком работ, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, а также нарушения генподрядчиком сроков уплаты авансовых платежей, субподрядчик имеет право взыскать с генподрядчика неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы просроченного платежа.

12.09.2018 между ООО «Стройразвитие» (субподрядчик) и ООО «Метатрансстрой» (генподрядчик) заключен договор строительного субподряда № 08-24/409, согласно п.п. 1.1 которого на основании разрешения на строительства № RU 59-90307000-27-2018 от 27.04.2018 субподрядчик обязуется в установленный договором срок, собственными силами, средствами и материалами, согласно проектной документации шифр 869-18-3-ОВ выполнить следующие работы: устройство отопления и вентиляции на объекте: девятиэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3» ПАО «Метафракс», расположенного по адресу: 

<

...>, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в порядке, определенном договором. Перечень и объем подлежащих выполнению работ по договору и их стоимость, указываются в локальном сметном расчете № 06-03-01 (приложение № 1 к договору). (т. 1 л. д. 110 оборот-116)

Работы по договору выполняются из материалов субподрядчика.          (п. 1.2 договора)

В соответствии с п. 2.1 договора общий срок выполнения работ: начало с момента подписания договора и предоставления генподрядчиком аванса, окончание 30.05.2019.

В соответствии с п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора стоимость работ, поручаемых генподрядчиком субподрядчику, определяется на основании согласованного сторонами сметного расчета (п. 1.1 договора). Стоимость работ должна предусматривать выполнение всего комплекса работ, затрат на материалы, машины и механизмы, обязательные платежи, налоги и сборы (в том числе утилизационные и экологические), и т.п. в т.ч. не поименованные в ПСД непредвиденные расходы, необходимые для исполнения договора в полном объеме, а так же стоимость материалов приобретаемых субподрядчиком. Стоимость настоящего договора на момент его заключения согласована сторонами в размере 4 097 391 руб., с учетом НДС 18%. В стоимость договора не входят затраты на охрану объекта, работы по временному электроснабжению и освещению территории объекта, работы по временному водоснабжению, расходы на энергоснабжение и коммунальные услуги, которые оплачиваются генподрядчиком отдельно по прямым договорам. Цена настоящего договора определяется на весь срок его действия в объемах, утвержденных сторонами в сметной документации и изменению не подлежит. Изменение цены договора возможно только на основании дополнительного соглашения сторон, в случаях, предусмотренных настоящим договором. Оплата стоимости работ производится генподрядчиком, в течение пятнадцати дней с момента подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика за фактически выполненные и принятые генподрядчиком объемы работ, при условии представления субподрядчиком исполнительной документации, документов, подтверждающих объем (количество), качество и стоимость использованных материалов поставки субподрядчика. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке (подписанный сторонами) акт приёмки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнал по форме КС-6а, счет-фактура, предоставленные субподрядчиком. При исполнении настоящего договора генподрядчик выплачивает субподрядчику авансовые платежи на приобретение материалов в следующем порядке: 50% от стоимости материалов в течение пяти банковских дней с момента подписания сторонами оригинала договора и предоставления субподрядчиком счета; 50% от стоимости материалов не ранее чем через 30 календарных дней с момента начала выполнения субподрядчиком строительных и/или монтажных работ на объекте и при условии их не приостановления на момент предоставления счета. Сумма предоставленного аванса засчитывается при расчетах за фактически выполненные работы в сумме использованных материалов поставки субподрядчика.

12.09.2018 между ООО «Стройразвитие» (субподрядчик) и ООО «Метатрансстрой» (генподрядчик) заключен договор строительного субподряда № 08-24/410, согласно п.п. 1.1 которого на основании разрешения на строительства № RU 59-90307000-27-2018 от 27.04.2018 субподрядчик обязуется в установленный договором срок, собственными силами, средствами и материалами, согласно проектной документации шифр 869-18-3-ВК выполнить следующие работы: устройство водопровода и канализации на объекте: девятиэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3» ПАО «Метафракс», расположенного по адресу: 

<

...>, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в порядке, определенном договором. Перечень и объем подлежащих выполнению работ по договору и их стоимость, указываются в локальном сметном расчете № 06-03-01 (приложение № 1 к договору). (т. 2 л. д. 100-103)

Работы по договору выполняются из материалов субподрядчика.          (п. 1.2 договора)

В соответствии с п. 2.1 договора общий срок выполнения работ: начало с момента подписания договора и предоставления генподрядчиком аванса, окончание 30.05.2019.

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора стоимость работ, поручаемых генподрядчиком субподрядчику, определяется на основании согласованного сторонами сметного расчета (п. 1.1 договора). Стоимость работ должна предусматривать выполнение всего комплекса работ, затрат на материалы, машины и механизмы, обязательные платежи, налоги и сборы (в том числе утилизационные и экологические), и т.п. в т.ч. не поименованные в ПСД непредвиденные расходы, необходимые для исполнения договора в полном объеме, а так же стоимость материалов приобретаемых субподрядчиком. Стоимость настоящего договора на момент его заключения согласована сторонами в размере 6 431 131 руб., с учетом НДС 18%. В стоимость договора не входят затраты на охрану объекта, работы по временному электроснабжению и освещению территории объекта, работы по временному водоснабжению, расходы на энергоснабжение и коммунальные услуги, которые оплачиваются генподрядчиком отдельно по прямым договорам. Цена настоящего договора определяется на весь срок его действия в объемах, утвержденных сторонами в сметной документации и изменению не подлежит. Изменение цены договора возможно только на основании дополнительного соглашения сторон, в случаях, предусмотренных настоящим договором. Оплата стоимости работ производится генподрядчиком, в течение пятнадцати дней с момента подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика за фактически выполненные и принятые генподрядчиком объемы работ, при условии представления субподрядчиком исполнительной документации, документов, подтверждающих объем (количество), качество и стоимость использованных материалов поставки субподрядчика. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке (подписанный сторонами) акт приёмки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнал по форме КС-6а, счет-фактура, предоставленные субподрядчиком. При исполнении настоящего договора генподрядчик выплачивает субподрядчику авансовые платежи на приобретение материалов в следующем порядке: 50% от стоимости материалов в течение пяти банковских дней с момента подписания сторонами оригинала договора и предоставления субподрядчиком счета; 50% от стоимости материалов не ранее чем через 30 календарных дней с момента начала выполнения субподрядчиком строительных и/или монтажных работ на объекте и при условии их не приостановления на момент предоставления счета. Сумма предоставленного аванса засчитывается при расчетах за фактически выполненные работы в сумме использованных материалов поставки субподрядчика.

25.01.2018 между ООО «Стройразвитие» (субподрядчик) и ООО «Метатрансстрой» (генподрядчик) заключен договор строительного субподряда № 08-24/25, согласно п.п. 1.1 которого на основании разрешения на строительства № RU 59-90307000-27-2018 от 27.04.2018 субподрядчик обязуется в установленный договором срок, собственными силами, средствами и материалами, согласно проектной документации шифр 869-18-3-АР выполнить следующие работы: выполнение комплекса отделочных работ (устройство полов, установка дверей, черновая и чистовая отделка) на объекте: девятиэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3» ПАО «Метафракс», расположенного по адресу: 

<

...>, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в порядке, определенном договором. Перечень и объем подлежащих выполнению работ по договору и их стоимость, указываются в локальном сметном расчете № 02-03-03 (приложение № 1 к договору). (т. 2 л. д. 72-75)

Работы по договору выполняются из материалов субподрядчика.          (п. 1.2 договора)

В соответствии с п. 2.1 договора общий срок выполнения работ: начало работ – 15.02.2019, окончание 30.06.2019.

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 договора стоимость работ, поручаемых генподрядчиком субподрядчику, определяется на основании согласованного сторонами сметного расчета (п. 1.1 договора). Стоимость работ должна предусматривать выполнение всего комплекса работ, затрат на материалы, машины и механизмы, обязательные платежи, налоги и сборы (в том числе утилизационные и экологические), и т.п. в т.ч. не поименованные в ПСД непредвиденные расходы, необходимые для исполнения договора в полном объеме, а так же стоимость материалов приобретаемых субподрядчиком. Стоимость настоящего договора на момент его заключения согласована сторонами в размере 18 361 002 руб., с учетом НДС 18%. В стоимость договора не входят затраты на охрану объекта, работы по временному электроснабжению и освещению территории объекта, работы по временному водоснабжению, расходы на энергоснабжение и коммунальные услуги, которые оплачиваются генподрядчиком отдельно по прямым договорам. Цена настоящего договора определяется на весь срок его действия в объемах, утвержденных сторонами в сметной документации и изменению не подлежит. Изменение цены договора возможно только на основании дополнительного соглашения сторон, в случаях, предусмотренных настоящим договором. Оплата стоимости работ производится генподрядчиком, в течение пятнадцати дней с момента подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика за фактически выполненные и принятые генподрядчиком объемы работ, при условии представления субподрядчиком исполнительной документации, документов, подтверждающих объем (количество), качество и стоимость использованных материалов поставки субподрядчика. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке (подписанный сторонами) акт приёмки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнал по форме КС-6а, счет-фактура, предоставленные субподрядчиком. При исполнении настоящего договора генподрядчик имеет право предоставить субподрядчику авансовые платежи на приобретение материалов в размере до 30% от цены договора в течение пяти банковских дней с момента подписания сторонами оригинала договора, предоставления субподрядчиком счета и документов подтверждающих предстоящие затраты. Сумма предоставленного аванса засчитывается при расчетах за фактически выполненные работы в сумме использованных материалов поставки субподрядчика.

К вышеуказанному договору сторонами согласован ряд дополнительных соглашений.

Так дополнительными соглашениями от 26.04.2019 № 1, стороны пришли к соглашению о том, что при исполнении договора, генподрядчик передает в производство работ по накладной М-15, а субподрядчик принимает и обязуется предоставлять отчеты об использовании, материалы, предусмотренные п. 160 сметного расчета 02-03-03;

дополнительным соглашением от 06.05.2019 № 2, стороны пришли к соглашению п. 3.5. договора изложить в следующей редакции: «При исполнении настоящего договора генподрядчик имеет право предоставить субподрядчику аванс на приобретение материалов в размере до 100% от их сметной стоимости, при предоставлении субподрядчиком документов подтверждающих предстоящие расходы. Сумма предоставленного аванса засчитывается при расчетах за фактически выполненные и принятые генподрядчиком работы, в размере стоимости использованных материалов.»

дополнительным соглашением от 23.05.2019 № 3, стороны установили, что в соответствии с условиями настоящего соглашения субподрядчик обязуется в сроки предусмотренные договором, собственными силами, средствами и материалами, согласно сметного расчета № 1 (приложение № 1 к соглашению) выполнить дополнительные, не предусмотренные договором, работы по установке усиленных подоконных досок на порог лоджий, отделке откосов, установке оконных ручек, на объекте «Девятиэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3» ПАО «Метафракс» 2. Стоимость работ, поручаемых генподрядчиком субподрядчику по настоящему соглашению, определяется на основании сметного расчета № 1, включает в себя стоимость выполнения всех видов работ, с учетом расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей уплачиваемых и взимаемых на территории Российской Федерации, стоимость материалов и работ на момент заключения соглашения составляет 316 245 руб. 44 коп., с учетом НДС 20%. Для приобретения материалов, необходимых для выполнения работ, предусмотренных соглашением, генподрядчик имеет право предоставить субподрядчику аванс в размере до 100% от сметной стоимости материалов. Аванс предоставляется на основании счета субподрядчика и документов подтверждающих предстоящие затраты. Сумма предоставленного аванса засчитывается по мере принятия от субподрядчика фактически выполненных работ в размере стоимости использованных материалов;

дополнительным соглашением от 19.06.2019 № 4, стороны пришли к соглашению об исключении из ранее порученных субподрядчику работ по договору, работ, объем и стоимость которых определена локальным сметным расчетам № 02-03-03. 2. В связи с изменением цены договора, зачет авансов по договору производится в размере 70 % от фактически выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ;

дополнительным соглашением от 19.06.2019 № 5 стороны установили, что в соответствии с условиями настоящего соглашения субподрядчик обязуется в сроки предусмотренные договором, собственными силами и материалами, согласно сметного расчета № 3 (приложение № 1 к соглашению) закупить и поставить материалы, не предусмотренные договором, на объекте «Девятиэтажный многоквартирный жилой дом поз.3» ПАО «Метафракс». 2. Стоимость закупаемых и поставляемых материалов, поручаемых генподрядчиком субподрядчику по настоящему соглашению, определяется на основании сметного расчета № 3, включает в себя стоимость расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей уплачиваемых на территории Российской Федерации. Стоимость на момент заключения соглашения составляет 201 455 руб. 20 коп., с учетом НДС. Для закупка и поставки материалов, предусмотренных соглашением, генподрядчик имеет право предоставить субподрядчику оплату в размере 100% от сметной стоимости;

дополнительным соглашением от 24.06.2019 № 5 стороны пришли к соглашению об исключении из ранее порученных субподрядчику работ по договору, работ, объем и стоимость которых определена локальными сметными расчетами № 02-03-03/1, № 02-03-03/2, № 1. 2. В связи с изменением цены договора, зачет авансов по договору производится в размере 70 % от фактически выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ.

Ссылаясь на неполную оплату выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

К правоотношениям истца и ответчика по спорному требованию подлежат применению нормы глав 30, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товаров через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором (часть 1 статьи 488 ГК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 488 ГК РФ в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

В соответствии со статьей 720 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из материалов дела следует, что субподрядчиком изначально были сформированы следующие документы.

По договору от 17.01.2019 № 08-25/15: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 06.05.2019 № 4 на сумму                367 099 руб. 22 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 06.05.2019 № 4 на сумму 367 099 руб. 22 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.03.2019 № 1 на сумму 593 332 руб. 64 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.03.2019 № 1 на сумму 593 332 руб. 64 коп.; спавка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.03.2019 № 2 на сумму 253 353 руб., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.03.2019 № 2 на сумму 253 353 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.04.2019 № 3 на сумму 481 050 руб., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.04.2019 № 3 на сумму 481 050 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 5 на сумму 85 165 руб. 14 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 5 на сумму 85 165 руб. 14 коп.;

по договору от 25.01.2019 № 08-24/17: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.03.2019 № 1 на сумму 81 616 руб. 67 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.03.2019 № 1 на сумму 81 616 руб. 67 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.04.2019 № 2 на сумму 921 013 руб. 91 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.04.2019 № 2 на сумму 921 013 руб. 91 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.05.2019 № 3 на сумму 630 692 руб. 05 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2019 № 3 на сумму 630 692 руб. 05 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.05.2019 № 4 на сумму 930 191 руб. 33 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2019 № 4 на сумму 930 191 руб. 33 коп.;

по договору от 25.01.2019 № 08-24/25: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 1 на сумму 201 455 руб. 20 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 1 на сумму 201 455 руб. 20 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.03.2019 № 1 на сумму 89 769 руб. 13 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.03.2019 № 1 на сумму 89 769 руб. 13 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.03.2019 № 1 на сумму 89 769 руб. 13 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.03.2019 № 1 на сумму 89 769 руб. 13 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.04.2019 № 2 на сумму 1 307 840 руб. 25 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.04.2019 № 2 на сумму 1 307 840 руб. 25 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 06.05.2019 № 3 на сумму 796 426 руб. 04 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 06.05.2019 № 3 на сумму 796 426 руб. 04 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.05.2019 № 4 на сумму 3 139 812 руб. 10 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2019 № 4 на сумму 3 139 812 руб. 10 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.06.2019 № 5 на сумму 3 153 150 руб. 41 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.06.2019 на сумму 3 153 150 руб. 41 коп.;

по договору от 12.09.2018 № 08-24/409: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.12.2018 № 1 на сумму         1 229 819 руб. 91 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2018 № 1 на сумму 1 229 819 руб. 91 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.01.2019 № 2 на сумму       70 862 руб. 30 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.01.2019 № 2 на сумму 70 862 руб. 30 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.01.2019 № 2 на сумму         1 133 442 руб. 78 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.01.2019 № 2 на сумму 1 133 442 руб. 78 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.12.2018 № 2 на сумму               245 467 руб. 90 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2018 № 1 на сумму 245 467 руб. 90 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.03.2019 № 3 на сумму 924 443 руб., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.03.2019 № 3 на сумму 924 443 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.03.2019 № 3 на сумму 35 658 руб. 18 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.03.2019 № 3 на сумму 35 658 руб. 18 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.05.2019 № 4 на сумму 27 148 руб. 72 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2019 № 4 на сумму 27 148 руб. 72 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 4 на сумму 24 428 руб.05 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 4 на сумму 24 428 руб.05 коп.;

по договору от 12.09.2018 № 08-24/410: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.03.2019 № 1 на сумму                426 256 руб. 73 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.03.2019 № 1 на сумму 426 256 руб. 70 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 2 на сумму 88 254 руб. 82 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 2 на сумму 88 254 руб. 82 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.04.2019 № 1 на сумму 45 648 руб. 12 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.04.2019 № 1 на сумму 45 648 руб. 12 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.06.2019 № 2 на сумму 737 103 руб. 64 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.06.2019 № 2 на сумму 737 103 руб. 64 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.07.2019 № 3 на сумму 1 224 434 руб. 99 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.07.2019 № 3 на сумму 1 224 434 руб. 99 коп.

Как указал истец, 31.07.2019 ООО «МетаТрансСтрой» были направлены для подписания акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры от 30.07.2019 по договорам от 25.01.2019 № 08-24/25 - «Выполнение комплекса отделочных работ», от 17.01.2019 № 08-24/15 - «Монтаж алюминиевых витражей», от 25.01.2019 № 08-24/17 - «Устройство кровли», от 12.09.2018 № 08-24/410 - «Устройство водопровода и канализации» от 12.09.2018 № 08-24/409 - «Устройство отопления и вентиляции».

От подписания указанных актов ООО «МетаТрансСтрой» отказалось, направив в адрес ООО Стройразвите» замечания, от 09.08.2019 Вх № 24/3132 (от 06.08.2019 Исх. № 06.08), согласно которых, ООО «МетаТрансСтрой» отказывается от подписания в связи с непредоставлением ООО Стройразвите» исполнительной документации и журналов по форме КС-6.

ООО Стройразвите» заявленные замечания были устранены, исполнительная документация и журналы по форме КС-6 переданы ООО «МетаТрансСтрой» согласно актов от 12.08.2019, 14.08.2019.

По результатам встречи 20.08.2019 с генподрядчиком были определены окончательные объемы выполненных работ, согласно проверенных журналов по форме КС-6.

ООО Стройразвите» с учетом согласованных 20.08.2019 объемов строительных работ были сформированы акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 на сумму 6 140 765 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура от 31.08.2019 по договору от 25.01.2019 № 08-24/25 («Выполнение комплекса отделочных работ»);

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 85 166 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура от 31.08.2019 по договору от 17.01.2019 № 08-24/15 («Монтаж алюминиевых конструкций» поз.3);

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 на сумму 4 163 191 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура от 31.08.2019 по договору от 12.09.2018 № 08-24/410 «Устройство водопровода и канализации»;

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 на сумму 382 409 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура от 31.08.2019 по договору от 25.01.2019 № 08-24/17 «Устройство кровли»;

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 на сумму 782 536 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура от 31.08.2019 по договору от 12.09.2018 № 08-24/409 «Монтаж отопления и вентиляции»;

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 85 165 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура от 31.08.2019 по договору от 17.01.2019 («Монтаж алюминиевых конструкций» поз.4).

Вместе с тем, истцом представлены в материалы дела следующие акты – по договору от 25.01.2019 № 08-24/25: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 1 на сумму 207 300 руб. 82 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 1 на сумму 207 300 руб. 82 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 1 на сумму 201 455 руб. 20 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 1 на сумму 201 455 руб. 20 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 6 на сумму 5 933 463 руб. 47 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 6 на сумму 5 933 463 руб.; по договору от 12.09.2018 № 08-24/409: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 5 на сумму 782 536 руб. 59 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 5 на сумму 782 536 руб. 59 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 4 на сумму 24 428 руб. 05 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 4 на сумму 24 428 руб. 05 коп.; по договору от 25.01.2019 № 08-24/410: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 4 на сумму 4 043 335 руб. 87 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 4 на сумму 4 043 335 руб. 67 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 1 на сумму 119 856 руб. 94 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 1 на сумму 119 856 руб. 94 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 2 на сумму 88 254 руб. 82 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 2 на сумму 88 254 руб. 82 коп.; по договору от 25.01.2019 № 08-24/15: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 5 на сумму 85 165 руб. 14 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 5 на сумму 85 165 руб. 14 коп.; по договору от 25.01.2019 № 08-24/17: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 5 на сумму 383 409 руб. 44 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 5 на сумму 383 409 руб.40 коп.; по договору от 17.01.2019 № 08-24/23: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 5 на сумму 85 164 руб. 60 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 5 на сумму 85 164 руб. 60 коп.; по договору от 28.09.2018 № 08-24/459: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2019 № 5 на сумму 95 174 руб. 25 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2019 № 5 на сумму 95 174 руб. 26 коп.

Исправленные акты были направлены для подписания генподрядчику почтой с описью вложение 27.08.2019.

Письмом от 06.09.2019 № Исх.06.09./1 в адрес ООО «Стройразвите» направлен отказ ООО «МетаТрансСтрой» от подписания актов выполненных работ от 31.08.2019 в связи с непредоставлением исполнительной документации.

10.09.2019 ООО «Стройразвите» направило в адрес ООО «МетаТрансСтрой» претензию (исх. 10.09.) с требованием погасить задолженность за проведенные строительные работы. Претензия оставлена без ответа.

11.09.2019 (Вх. 24/3548) ООО «Стройразвите» получены замечания от ООО «МетаТрансСтрой» на акты формы КС-2, КС-3 от 31.08.2019, которые были отправлены почтой 27.08.2019.

19.09.2019 (Исх. 17.09.) ООО «Стройразвитие» направило в адрес ООО «МетаТрансСтрой» ответ на письмо с входящим (Вх. 24/3548) с просьбой указать конкретный объем и замечания, которые необходимо устранить.

26.09.2019 (Вх 36/77) получен ответ от ООО «МетаТранСтрой» о назначение встречи для комиссионной приемке объемов подлежащих устранению замечаний.

ООО «Стройразвитие» выразило свое согласие на проведение комиссионной встречи. (Исх 27.09 от 27.09.2019)

По итогам комиссионной встречи от 07.10.2019 без участия                        ООО «Стройразвитие» сформированы акты с замечаниями ООО «МетаТранСтрой» в адрес ООО «Стройразвитие» , в т.ч. актами замечаний в отношении работ, выполненных иными лицами (Вх. № 24/3911 от 08.10.2019)

11.10.2019 в адрес ООО «МетаТранСтрой» ООО «Стройразвитие» (Исх. № 11.10/2, № 11.10/3, № 11.10./4) направлены пояснения к переданным (Вх. № 24/3911 от 08.10.2019) актам. Согласно пояснений работы, в отношении которых были выявлены нарушения и предъявленные ООО «Стройразвитие» либо были ранее приняты и оплачены ООО «МетаТранСтрой», либо по соглашению между сторонами были исключены из состава работ выполняемых ООО «Стройразвитие».

18.10.2019 при проведении совместной комиссии ООО «МетаТранСтрой» и ООО «Стройразвитие» были устранены все замечания ООО «МетаТранСтрой» в адрес ООО «Стройразвитие».

22.10.2019 (исх. 22.10) в адрес ООО «МетаТрансСтрой» было направлено письмо с требованием о подписании актов от 31.08.2019 в связи с тем, что все претензии ООО «МетаТрансСтрой» в адрес ООО «Стройразвитие» сняты.

01.11.2019 (исх.01.11.) в адрес ООО «МетаТрансСтрой» от ООО «Стройразвитие» повторно направлено требование об оплате актов от 31.08.2019.

Письма от 22.10.2019 (исх.22.10), 01.11.209 (исх.01.11.) оставлены ООО «МетаТрансСтрой» без ответа.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается об этом отметка и акт подписывается другой стороной. При этом односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ, и защищает таким образом интересы подрядчика, если заказчик необоснованно уклоняется от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

По смыслу рекомендаций, изложенных в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

При оценке мотивов отказа от подписания актов выполненных работ суду следует исходить из того, что обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от подписания актов о приемке выполненных работ возложена на заказчика.

По смыслу пункта 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Свидетельств того, что результат выполненных работ имел существенные, неустранимые недостатки, исключающие возможность использования результата работ для поименованной в договоре цели, ответчиком не представлено (статья 65 АПК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ). Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В связи с тем, что факт вручения ответчику односторонних актов выполненных работ подтвержден документально, мотивы отказа ответчика от подписания актов признаны необоснованными, судом принимаются данные акты в качестве надлежащего доказательства по делу, и соответственно работы также считаются принятыми заказчиком.

Довод ответчика о невыполнении работ в связи с непредставлением исполнительной документации судом отклоняются.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Акт сдачи-приемки выполненных работ является доказательством выполненных подрядчиком работ и передачи их результата заказчику.

В соответствии со статьями 702, 726 ГК РФ обязанность доказывания невозможности использования результата принятых работ, в отсутствие исполнительной документации, лежит на заказчике. В случае, если заказчик не доказал наличие таковых обстоятельств, отказ в оплате выполненных работ, является неправомерным (в рассматриваемом случае таких доказательств не представлено).

С учетом приведенных норм права, непредставление заказчику исполнительной документации не является безусловным основанием для отказа в оплате выполненных и принятых работ.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 1 статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с п. 9.3 договоров в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых генподрядчиком работ, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, а также нарушения генподрядчиком сроков уплаты авансовых платежей, субподрядчик имеет право взыскать с генподрядчика неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы просроченного платежа.

Форма соглашения о неустойке соблюдена, (статья 331 ГК РФ) размер ее определен.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным.

Вместе с тем, суд находит доводы ответчика относительно невыполнения истцом части работ в отношении натяжных потолков заслуживающими внимания по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2.1 договора от 25.01.2019 № 08-24/25 общий срок выполнения работ: начало работ – 15.02.2019, окончание 30.06.2019.

Пунктом 11.2 договора предусмотрено право каждой из сторон отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора по основаниям, установленным договором и требованиями действующего законодательства.

Согласно пункту 11.3 договора односторонний отказ от исполнения договора со стороны генподрядчика производится, в том числе, когда субподрядчик по своей вине допустил нарушение срока завершения работ по объекту в целом или по этапу, отдельному виду работ, более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящие генподрядчика.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как указал ответчик, неудовлетворительные темпы выполнения практически всех видов отделочных работ подтверждаются протоколами оперативных совещаний по капитальному строительству 9-этажных многоквартирных жилых домов поз.3,4 г. Губаха. в которых принимало участие ООО «Стройразвитие».

С учетом указанных обстоятельств, письмом от 09.04.2019 № 24/1466 ООО «Метатрансстрой» уведомило ООО «Стройразвитие» о намерении отказаться от исполнения договора от 25.01.2019 № 08-24/25 в части отделочных работ, выполняющихся настолько медленно, что очевидна невозможность их окончания в срок, в частности, работ по окраске потолков мест общего пользования, лестниц, машинных помещений, лоджий облицовке пола керамогранитом, установке натяжных потолков, оклейке стен обоями, окраске стен квартир, окраске стен машинных помещений, окраске оконных откосов, внутренних лестниц.

В ответе ООО «Стройразвитие» от 12.04.2019 № 06 подтверждается отставание от графика производства работ по отделочным работам в связи с недостатком квалифицированных рабочих. Указывается, что ООО «Стройразвитие» планирует увеличить количество рабочих и войти в договорной график.

В результате ООО «Метатрансстрой» было принято решение привлечь иного субподрядчика – ООО «Эверест», для выполнения работ по договору от 25.01.2019 № 08-24/25.

Данный факт зафиксирован в протоколе оперативного совещания от 13.06.2019 где указано: ООО «Стройразвитие» - принять к сведению, что отделочные работы во 2 подъезде передаются другой организации, подготовить акт приема-передачи материалов и помещений, дооформить протокол по объемам по отделке поз.3.

Объем работ, не выполненных ООО «Стройразвитие», был зафиксирован в актах, составленных представителями заказчика ПАО «Метафракс», генподрядчика ООО «Метатрансстрой» и субподрядчика ООО «Эверест», где отражено невыполнение, в том числе, устройство натяжных потолков (п. 14 акта).

Как указал ответчик, копия акта была передана представителю ООО «Стройразвитие» лично, а впоследствии также направлена с сопроводительным письмом от 08.10.2019 № 24/3911 по адресам электронной почты, предусмотренным договорами субподряда для переписки; 20.062019 за 10 дней до наступления срока окончания работ по договору (30.06.2019), когда уже было очевидно, что ООО «Стройразвитие» не успеет окончить все предусмотренные договором работы, часть материалов была передана от ООО «Стройразвитие» к ООО «Эверест» для выполнения последним оставшихся работ.

Передача материалов оформлена актами приема-передачи от 20.06.2019.

Далее, к моменту окончания срока выполнения работ по договору - 30.06.2019 оказались также не выполнены работы по установке натяжных потолков. Согласно протоколу оперативного совещания от 13.06.2019 № 60, на дату проведения данного совещания указанные работы еще не были выполнены.

В связи с этим ответчиком также было принято решение об отстранении ООО «Стройразвитие» и привлечении к выполнению данных работ ООО «Эверест».

06.08.2019 между ООО «Метатрансстрой» (генподрядчик) и ООО «Эверест» (субподрядчик) заключен договор строительного субподряда № 08-24/419 на выполнение работ по устройству натяжных потолков на объекте: девятиэтажный многоквартирный дом поз.3 ПАО «Метафракс», расположенный по адресу: 

<

...>.

Из материалов дела следует, что работы выполнены ООО «Эверест» надлежащим образом, приняты и оплачены ООО «Метатрансстрой».

Также истец указал, что ООО «Стройразвитие», как минимум, с момента проведения оперативных совещаний (протоколы от 13.06.2019 № 60, от 27.06.2019 № 62, от 25.07.2019 № 63), в которых принимал участие представитель ООО «Стройразвитие» и где было указано о привлечении вместо ООО «Стройразвитие» на часть невыполненных ими работ ООО «Эверест», было известно о том, что ООО «Метатрансстрой» в одностороннем порядке отказалось от исполнения части договора в связи с допущенными ООО «Стройразвитие» нарушениями; из материалов, возвращенных по актам от 20.06.2019, ООО «Стройразвитие» после возврата работы не выполняло и не могло выполнять. Основания для оспаривания данного факта со стороны ООО «Стройразвитие» отсутствуют, поскольку материалы были переданы иному субподрядчику непосредственно самим ООО «Стройразвитие», подписаны акты приема-передачи. Представитель ООО «Стройразвитие» в судебном заседании 26.08.2020 пояснял, что работы из указанных материалов в действительности не выполнялись ООО «Стройразвитие».

Факт невыполнения ООО «Стройразвитие» работ по устройству натяжных потолков подтверждается следующими доказательствами: вышеуказанными актами, составленными представителями заказчика ПАО «Метафракс», генподрядчика ООО «Метатрансстрой» и субподрядчика ООО «Эверест», и (переданными ООО «Стройразвитие», где зафиксированы не выполненные ООО «Стройразвитие» работы по договору от 25.01.2019   №08-24/25; общим журналом работ по форме КС-6, который велся ООО «Стройразвитие». В нем отсутствуют записи о выполнении работ по устройству натяжных потолков.

Выполнение спорных работ именно ООО «Эверест» и осведомленность об этом ООО «Стройразвитие» подтверждается протоколами оперативных совещаний по капитальному строительству 9-этажных многоквартирных жилых домов поз.3,4 г. Губаха, в которых принимал участие представитель ООО «Стройразвитие». В частности, из протоколов от 27.06.2019 № 62, от 25.07.2019 № 63 следует, что спорные работы выполнялись уже ООО «Эверест», а ООО «Стройразвитие» только завершались начатые им до отстранения работы.

Пунктом 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Кроме того, по смыслу статьи 717 ГК РФ заказчику по договору подряда принадлежит ничем не обусловленное право заявить об одностороннем отказе от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает специальной формы, в которой должен быть выражен отказ от исполнения договора и не устанавливает какого-либо предварительного порядка извещения другой стороны о намерении прекратить договор, а определяет лишь условия возникновения такого права.

Принимая во внимание поименованные нормы, суд расценивает привлечение ООО «Метатрансстрой» к выполнению работ другого подрядчика как отказ ответчика от исполнения договора подряда.

На основании договора строительного субподряда от 25.01.2019 № 08-24/25 ООО «Стройразвитие» должны были быть выполнены на объекте: девятиэтажный многоквартирный дом поз.3 ПАО «Метафракс», расположенный по адресу: 

<

...>, работы по устройству натяжных потолков общей площадью 2 940,30 кв.м, из которой 326,7 кв.м – первый этаж (п. 181 сметы), 2 613,60 кв.м – 2-9 этажи (п. 202 сметы).

Общее количество материала: полотна натяжного потолка Standart лакового белого с бортиком из ПВХ (гарпун), необходимого для монтажа указанных потолков, составляет 3 234,33 кв.м, из которых 359,37 кв.м – первый этаж (п. 186 сметы), 2 874,96 кв.м – 2-9 этажи (п. 207 сметы).

ООО «Стройразвитие» на основании договора № 08-24/25 должно было установить на объекте весь объем натяжных потолков, предусмотренный проектной документацией шифр 869-18-3-АР. Первоначально иные субподрядчики, помимо ООО «Стройразвитие», к выполнению работ по установке натяжных потолков не привлекались.

По акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2019 ООО «Метатрансстрой» от ООО «Стройразвитие» были приняты работы по устройству натяжных потолков на 2-9 этажах площадью 108,90 кв.м  (страница 3, п. 202 акта).

По акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.06.2019 ООО «Метатрансстрой» от ООО «Стройразвитие» были приняты работы по устройству натяжных потолков на 2-9 этажах площадью 250,4 кв.м, для которых было задействовано полотна 287,4 кв.м (страница 10, пункт 202 акта).

Таким образом, по состоянию на 25.06.2019 ООО «Стройразвитие» было установлено 359,3 кв.м натяжных потолков, для которых использовано полотна 287,4 кв.м. Работы выполнены только на 2-9 этажах, на 1 этаже не выполнялись.

Следовательно, оставалось не смонтировано по состоянию на 25.06.2019 – 2 581 кв.м потолков, для которых необходимо 2 946,93 кв.м полотна.

В акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 31.08.2019 на сумму 5 933 463 руб., предъявленный ООО «Стройразвитие», включены следующие работы по установке натяжных потолков:

- 1 этаж: 

установка 326,7 кв.м потолков (страница 6, пункт 181), для которых необходимо 359,37 кв.м полотна (страница 7, пункт 186)

- 2-9 этажи:

установка 2 254,3 кв.м потолков (страница 7, пункт 202), для которых необходимо 2 587,56 кв.м полотна (страница 8, пункт 207).

Всего в данный акт включено работ по установке потолков площадью 2 581 кв.м, для которых необходимо 2 946,93 кв.м полотна.

Таки образом, ООО «Эверест» могло выполнить работы по установке натяжных потолков площадью, не превышающей объемы, указанные в акте КС-2 от 31.08.2019.

В соответствии с договором от 06.08.2019 № 08-24/419 между ООО «Метатрансстрой» и ООО «Эверест» и локальным сметным расчетом                     № 02-03-03 к нему, последним должны были быть выполнены следующие работы по устройству натяжных потолков на объекте: девятиэтажный многоквартирный дом поз.3 ПАО «Метафракс», расположенный по адресу: 

<

...>, общей площадью 1 850,4 кв.м: 1 этаж - установка 326,7 кв.м потолков (страница 1, пункт 17 сметы), для которых необходимо 359,37 кв.м полотна (страница 2, пункт 22 сметы); 2-9 этажи - установка 1 523,7 кв.м (страница 2, пункт 38 сметы), для которых необходимо 1 677,06 кв.м полотна (страница 3, пункт 43 сметы).

В материалах дела имеется счет-фактура от 07.08.2019 № 242 на приобретение ООО «Эверест» у ИП ФИО3, в том числе, полотна натяжного лакового белого площадью 2 036,43 кв.м.

Более того, в материалы дела представлено письмо от 16.10.2020 от изготовителя полотна – ИП ФИО4, выданное в ответ на запрос ООО «Эверест». Согласно данному письму, ИП ФИО3 в августе 2019 было приобретено полотно площадью 2 036,43 кв.м. Полотно изготовлено на основании представленной ИП ФИО3 проектной документации шифр 869-18-3-АР для строительства многоквартирного дома в г. Губаха Пермского края.

Иные работы по устройству натяжных потолков, помимо спорных, ООО «Эверест» на данном объекте не выполнялись. Это можно установить в том числе путем проведения расчета, согласно которому, общая площадь натяжных потолков на объекте составляет 2 940,30 кв.м, ООО «Стройразвитие» ранее выполнено и передано ООО «Метатрансстрой» потолков площадью 359,30 кв.м, то есть площадь потолков, которая могла быть выполнена иным субподрядчиком, в том числе ООО «Эверест», в любом случае не может превышать 2 581 кв.м.

Следовательно, представленные документы о приобретении ООО «Эверест» материалов подтверждают приобретение материалов именно для спорного объема работ.

Работы по установке натяжных потолков выполнены ООО «Эверест» в полном объеме и приняты ООО «Метатрансстрой» по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от 12.08.2019.

При сопоставлении документов очевидно, что работы по установке натяжных потолков, а также необходимые материалы, указанные в акте КС-2 от 31.08.2019, представленном ООО «Стройразвитие», включают в себя работы и материалы, содержащиеся в смете и акте КС-2 от 12.08.2019 по договору с ООО «Эверест».

А именно, ООО «Эверест» вместо ООО «Стройразвитие» полностью выполнены работы по установке потолков на 1 этаже, площадь которых составляет 326,7 кв.м, а также на 2-9 этажах установлено 1 523,7 кв.м из оставшихся 2 254,3 кв.м.

В материалы дела представлен расчет стоимости работ по установке потолков, выполненных ООО «Эверест». Данный расчет составлен на основе локального сметного расчета и акта КС-2 по договору с ООО «Эверест», и полностью им идентичен.

Таким образом, стоимость выполненных ООО «Эверест» работ по натяжным потолкам, составляющая согласно договору от 06.08.2019 № 08-24/419 и локальному сметному расчету № 02-03-03, а также расчету, подготовленному ответчиком для материалов дела, сумму                                      699 791 руб. 40 коп., подлежит исключению из акта КС-2 от 31.08.2019, предъявленного ООО «Стройразвитие».

При этом, сумма акта КС-2 включает в себя как стоимость материалов, так и стоимость работ. Материалы оплачены ранее авансовыми платежами, то есть, их стоимость вычитается из общей суммы акта КС-2, а оставшаяся сумма, представляющая собой стоимость работ, подлежит оплате.

Стоимость материалов в акте КС-2 от 31.08.2019, представленном ООО «Стройразвитие» (также за исключением стоимости потолков, установленных ООО «Эверест»), составляет 4 524 773,61 руб. (общая стоимость материалов: 4 935 619,17 руб. – стоимость материалов по потолкам, фактически выполненным ООО «Эверест»: 410 845,56 руб. = 4 524 773,61 руб.).

Таким образом, ООО «Метатрансстрой» обязано оплатить по акту КС-2 от 31.08.2019 сумму 708 898,46 руб. (общая сумма акта: 5 233 672,10 руб. – материалы, ранее оплаченные авансами: 4 524 773,61 руб. = 708 898,46 руб.).

При этом, ООО «Стройразвитие» получило от ООО «Метатрансстрой» авансы в сумме 410 845,56 руб. на приобретение материалов для натяжных потолков, которые в дальнейшем были установлены ООО «Эверест» вместо ООО «Стройразвитие». То есть, ООО «Стройразвитие» данные авансы не были отработаны и закрыты. Материалы, приобретенные ООО «Стройразвитие» на данные авансы, в натуре также не возвращены.

При таких обстоятельствах, требование о взыскании по договору от 17.01.2019 № 08-24/15 задолженности в сумме 68 361 руб. 04 коп., неустойки в сумме 13 866 руб. 13 коп.; по договору от 25.01.2019 № 08-24/17 задолженности в сумме 382 409 руб. 44 коп., неустойки в сумме 30 270 руб. 20 коп.; по договору от 12.09.2018 № 08-24/410 задолженности в сумме 3 264 294 руб. 66 коп., неустойки в сумме 313 951 руб. 25 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме, по договору от 25.01.2019 № 08-24/25 подлежит удовлетворению частично в сумме 968 898 руб. 46 коп., неустойка подлежит корректировке и составляет 186 290 руб. 06 коп.

Иные доводы сторон противоречат изложенным фактическим обстоятельствам дела и отклоняются судом как несостоятельные.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Поскольку истцом государственная пошлина уплачена в большем размере, чем это предусмотрено статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, излишне уплаченная пошлина в сумме                         1 774 руб.подлежит возврату ему из федерального бюджета (подпункт 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Метатрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в части требований по договору строительного субподряда от 12.09.2018 № 08-24/409, а именно просрочка в выплате аванса в сумме 87 541 руб., просрочка по оплате выполненных работ по актам КС в сумме 17 481 руб., общая сумма неустойки по просроченным платежам на 10.12.2019 в сумме 105 022 руб., сумма задолженности за выполненные работы согласно актов КС-2 от 31.08.2019 в сумме 24 428 руб., сумма задолженности за выполненные работы согласно актов КС-2 от 31.08.2019 в сумме 47 352 руб., общая сумма задолженности вследствие неосновательного уклонения от подписания и оплаты всего 71 780 руб. Итого 176 802 руб.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Метатрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройразвитие»                              (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в сумме                                       5 228 341 руб. 24 коп., в том числе задолженность по договору от 25.01.2019      № 08-24/25 в сумме 968 898 руб. 46 коп., неустойку в сумме                                       186 290 руб. 06 коп.; по договору от 17.01.2019 № 08-24/15 задолженность в сумме 68 361 руб. 04 коп., неустойку в сумме 13 866 руб. 13 коп.; по договору от 25.01.2019 № 08-24/17 задолженность в сумме 382 409 руб. 44 коп., неустойку в сумме 30 270 руб. 20 коп.; по договору от 12.09.2018                                                 № 08-24/410 задолженность в сумме 3 264 294 руб. 66 коп., неустойку в сумме 313 951 руб. 25 коп.; судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 47 758 руб. 08 коп.

В удовлетворении остальной части отказать.

Вернуть из федерального бюджета РФ обществу с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) государственную пошлину в сумме 1 774 руб., уплаченную по платежному поручению от 18.12.2019 № 1244 на сумму 52 588 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья                                                                                  Г.Л. Пономарев