Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А72-2243/2020

26 августа  2020 года

г. Ульяновск

Резолютивная часть решения объявлена 25.08.2020, полный текст решения изготовлен 26.08.2020.

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Т.М.Крамаренко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело 

по иску Акционерного общества «Управление механизации №2», г.Ульяновск

к Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ», г.Ульяновск

о взыскании  стоимости эксплуатации башенного крана,

при участии в заседании представителей:

от истца – до перерыва и после  - ФИО2, доверенность от  06.09.2018, диплом №160-163 от 17.04.2014,  паспорт, свидетельство о заключении брака;

от  ответчика – до перерыва  - ФИО3, доверенность от 08.07.2019, диплом №99 от 23.06.2007, паспорт; после перерыва -  не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Управление механизации №2» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ» о взыскании  3 958 905 руб. 44 коп., составляющих стоимость эксплуатации башенного крана за период октябрь - декабрь 2019 года.

Определением от 14.04.2020 суд назначил дело к судебному разбирательству на 03.06.2020.

Определением от 03.06.2020 судом удовлетворено ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований. Истец просит взыскать с ответчика 2 556 558 руб. 83 коп., составляющих задолженность за период с октября по декабрь 2019 года. 

Определением от 27.07.2020 судебное разбирательство по делу  судом отложено на 18.08.2020.

Протокольным определением от 18.08.2020 судом удовлетворено ходатайство истца об  уменьшении исковых требований до 2 274 392 руб. 13 коп.; принято к рассмотрению ходатайство ответчика о признании исковых требований.

В соответствии со ст.163 АПК РФ в судебном заседании судом объявлен перерыв с 18.08.2020 до  25.08.2020. Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Ульяновской области в сети Интернет.

Судебное заседание продолжено после перерыва 25.08.2020.

Представитель истца настаивает на исковых  требованиях, с учетом уточнения. 

Представитель ответчика  в судебное заседание 25.08.2020 не явился.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими  удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела,  между Обществом  с ограниченной ответственностью «СМУ» (Заказчик) и Акционерным обществом «Управление механизации №2»  (Исполнитель) заключены договоры по предоставлению башенного крана №26 от 10.04.2018, №27 от 10.04.2020,  №64 от 17.07.2018, №39 от 19.09.2017 (л.д. 29 – 44).

Пунктом 1.1 договора №39 от 19.09.2017 предусмотрено, что по заявке Заказчика, Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению 2-х башенных кранов: КБ-405.1А инвентарный номер № 2420 и КБ-408.21 инвентарный номер №2610 (далее - башенные краны) с обслуживающим персоналом в целях выполнения строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных работ на объекте: Многоквартирный жилой дом №2 со встроено-пристроенными помещениями в квартале «Центральный» в Заволжском районе г. Ульяновска, а Заказчик  оплачивает эти услуги.

Исходя из условий договора №26 от 10.04.2018 (пункт 1.1.) по заявке Заказчика, Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению башенного крана КБ-405.1А инвентарный номер №2403 (далее – башенный кран) с обслуживающим персоналом в целях выполнения строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных работ на объекте: Многоквартирный жилой дом №33, 13-й квартал жилого микрорайона "Запад-1", Засвияжский район, г. Ульяновск, а Заказчик оплачивает эти услуги.

В соответствии с п.1.1 договора №27 от 10.04.2018 по заявке Заказчика, Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению   башенного крана КБ-405.1А инвентарный номер №2411 (далее  - башенный кран) с обслуживающим персоналом в целях выполнения строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных работ на объекте: Многоквартирный жилой дом №36, 13-й квартал жилого микрорайона "Запад-1", Засвияжский район, г. Ульяновск, а Заказчик оплачивает эти услуги.

Согласно п.1.1 договора №64 от 17.07.2018 по заявке Заказчика, Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению 2-х башенных кранов КБ-405.1А инвентарные номера № 2424 и №2528 (далее - башенные краны) с обслуживающим персоналом в целях выполнения строительно-монтажных, погрузо-разгрузочных работ на объекте: Многоквартирный жилой дом № 19 с пристроенными помещениями, квартал Центральный, Заволжский район, г.Ульяновск, а Заказчик оплачивает эти услуги.

В соответствии с ч. 1 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора (ч.3 ст.421 ГК РФ).

Исходя из содержания вышеперечисленных договоров, договоры являются смешанными договорами, содержащими элементы договоров аренды транспортного средства с экипажем и возмездного оказания услуг.

Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи), п.1 ст.607 ГК РФ.

В соответствии со ст. 632 ГК РФ по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

В силу ст. 614 ГК  РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки  внесения арендной платы определяются договором аренды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно п. 4.3 договора №39 от 19.09.2017  расчеты с Исполнителем Заказчик производит ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 15 числа месяца следующего  за отчетным. Согласно предъявленных в истекшем месяце счетов-фактур с прилагаемыми к ним документами.

Заказчик  оплачивает дополнительно (пункт 4.5 договора №39 от 19.09.2017 ): 

-  стоимость устройства и разборки 3,0 звена подкрановых путей башенного крана КБ-405.1А (без стоимости  щебня, плит, ограждения и лотков) (Приложение №1 (Локальная смета №1) (п.4.5.1),

- стоимость монтажа башенного крана КБ-405.1А на объекте (Приложение №2 (Локальная смета №2)) (п.4.5.2);

- стоимость демонтажа и перевозки крана КБ-405.1А с объекта  (п.4.5.3);

- стоимость устройства и разборки 4,5 звеньев  подкрановых путей башенного крана КБ-408.21 (без стоимости  щебня, плит, ограждения и лотков)  (Приложение №4) Локальная смета №4)(п.4.5.3),

- стоимость перевозки и монтажа башенного крана КБ-408.21 на объекте (Приложение №5 (Локальная смета №5)) (п.4.5.4);

- стоимость демонтажа и перевозки крана КБ-408.21 с объекта  (Приложение №6 (Локальная смета №6) (п.4.5.5;

- стоимость разрешительных документов на перевозку негабаритного  и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования, на основании бухгалтерских документов, представляемых Исполнителем (п.4.5.6);

- стоимость дополнительных работ и затрат, выявленных в процессе эксплуатации башенных кранов, по фактически выполненным  объемам затрат, по согласованию сторон.

Дополнительными соглашениями от 29.07.2019,  от 21.08.2019 Сторонами внесены изменения в части размера платежей 

Согласно дополнительному соглашению от 21.08.2020, Стороны пришли к соглашению:

1.Изменить п. 4.2.1. договора №39 от 19.09.2017 и изложить его в следующей редакции: «4.2.1. КБ-405.1А без НДС: 1338,00 руб.»

2.Изменить п. 4.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.2. включая НДС: 1605,60 руб.»

3.Изменить п. 4.2.3. Договора и изложить его в следующей редакции:  «4.2.3. КБ-408.21 без НДС:2172,00 руб.»

4.Изменить п. 4.2.4. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.4. включая НДС:2606,40 руб.»

5.Изменить п. 4.1.5. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«4.1.5 Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2420 за один месяц (из расчета 21 рабочий день по 8 машино-часов) составляет 269 740 (Двести шестьдесят девять тысяч семьсот сорок) рубля 80 копеек, включая НДС 20% - 44^956 рублей 80 копеек)».

6.Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-408.21 инв.№2610 за один месяц (из расчета 21 рабочий день по 8 машино-часов) составляет 437 875 (Четыреста тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек, включая НДС 20% -72 979 рублей 20 копеек.

7.Изменить п. 4.1.6. Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.1.6. Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2420 в выходной и (или) праздничный день составляет 25 689 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек, включая НДС 20% - 4 281 рублей 60 копеек»;

8.Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-408.21 инв.№2610 в выходной и (или) праздничный день составляет 41 702 (Сорок одна тысяча  семьсот два) рубля 40 копеек, включая НДС 20% - 6 950 рубля 40 копеек, и оплачивается Заказчиком дополнительно, на основании предъявленного счета, в течение 2 (двух) дней».

Согласно п.4.4 договора №26 от 10.04.2018 расчеты с Исполнителем Заказчик производит ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно предъявленных в истекшем месяце счетов-фактур с прилагаемыми к ним документами.

Заказчик  оплачивает дополнительно (пункт 4.6 договора №26 от 10.04.2018 ): 

-  стоимость устройства и разборки 4 звеньев подкрановых путей башенного крана КБ-405.1А (без стоимости  щебня, плит, ограждения и лотков) (Приложение №1 (Локальная смета №1) (п.4.6.1),

- стоимость перевозки и монтажа башенного крана КБ-405.1А на объекте (Приложение №2 (Локальная смета №2)) (п.4.6.2);

- стоимость демонтажа и перевозки крана КБ-405.1А с объекта  (п.4.6.3);

- стоимость разрешительных документов на перевозку негабаритного  и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования, на основании бухгалтерских документов, представляемых Исполнителем (п.4.6.4);

- стоимость дополнительных работ и затрат, выявленных в процессе эксплуатации башенных кранов, по фактически выполненным  объемам затрат, по согласованию сторон (п.4.6.5)

Дополнительными соглашениями от 29.07.2019,  21.08.2019 Сторонами внесены изменения в договор №26 от 10.04.2018  в части размера платежей. 

Согласно дополнительному соглашению от 21.08.2020, Стороны пришли к соглашению внести нижеследующие изменения в договор № 26 от 10.04.2018г. (далее Договор):

1.Изменить п. 4.2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: 

- «4.2.1. без НДС:1249,33 руб.»

2.Изменить п. 4.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.2. включая НДС: 1499,20 руб.»

3.Изменить п. 4.2.3. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.3. Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2452 за один месяц (из расчета 21 рабочий день по 8 машино-часов) составляет 251 864 (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 93 копеек, включая НДС 20% - 41 977 рублей 49 копеек.

4.Изменить п. 4.2.4. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.4. Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2452'5 в выходной и (или) праздничный день составляет 23 987 (Двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 14 копейку, включая НДС 20% - 3 997 рубль "86 копеек, и оплачивается Заказчиком дополнительно, на основании предъявленного счета, в течение 2 (двух) дней».

Согласно п.4.4 договора №27 от 10.04.2018 расчеты с Исполнителем Заказчик производит ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно предъявленных в истекшем месяце счетов-фактур с прилагаемыми к ним документами.

Заказчик  оплачивает дополнительно (пункт 4.6 договора №27 от 10.04.2018 ): 

-  стоимость устройства и разборки 4 звеньев подкрановых путей башенного крана КБ-405.1А (без стоимости  щебня, плит, ограждения и лотков) (Приложение №1 (Локальная смета №1) (п.4.6.1),

- стоимость перевозки и монтажа башенного крана КБ-405.1А на объекте (Приложение №2 (Локальная смета №2)) (п.4.6.2);

- стоимость демонтажа и перевозки крана КБ-405.1А с объекта  (п.4.6.3);

- стоимость разрешительных документов на перевозку негабаритного  и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования, на основании бухгалтерских документов, представляемых Исполнителем (п.4.6.4);

- стоимость дополнительных работ и затрат, выявленных в процессе эксплуатации башенных кранов, по фактически выполненным  объемам затрат, по согласованию сторон (п.4.6.5)

Дополнительными соглашениями от 29.07.2019,  21.08.2019 Сторонами внесены изменения в договор №27 от 10.04.2018  в части размера платежей. 

Согласно дополнительному соглашению от 21.08.2020, Стороны пришли к соглашению внести нижеследующие изменения в договор № 27 от 10.04.2018г. (далее Договор):

1.Изменить п. 4.2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.1. без НДС: 1249,33 руб.»

2.Изменить п. 4.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.2. включая НДС 20%: 1499,20 руб.»

3.Изменить п. 4.2.3. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.3. Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№ 2411 за один месяц (из расчета 21 рабочий день по 8 машино-часов) составляет 251 864 (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 93 копеек, включая НДС 20% - 41 977 рублей 49 копеек.

4.Изменить п. 4.2.4. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.4. Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№ 2411 в выходной и (или) праздничный день составляет 23 987 (Двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 14 копейку, включая НДС 20% - 3 997 рубль 86 копеек, и оплачивается Заказчиком дополнительно, на основании предъявленного счета в течение 2 (двух) дней».

Согласно п.4.4 договора №64 от  17.07.2020 расчеты с Исполнителем Заказчик производит ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно предъявленных в истекшем месяце счетов-фактур с прилагаемыми к ним документами.

Заказчик  оплачивает дополнительно (пункт 4.6 договора №64 от 17.07.2018 ): 

-  стоимость устройства и разборки 4,0 звеньев подкрановых путей башенного крана КБ-405.1А №1 (без стоимости  щебня, плит, ограждения и лотков) (Приложение №1 (Локальная смета №1) (п.4.6.1),

- стоимость перевозки и монтажа башенного крана КБ-405.1А №1 на объекте (Приложение №2 (Локальная смета №2)) (п.4.6.2);

- стоимость демонтажа и перевозки крана КБ-405.1А №1 с объекта (Приложение №3 (Локальная смета №3) (п.4.6.3),

-  стоимость устройства и разборки 4,0 звеньев подкрановых путей башенного крана КБ-405.1А №2 (без стоимости  щебня, плит, ограждения и лотков) (Приложение №4 (Локальная смета №4) (п.4.6.3),

- стоимость перевозки и монтажа башенного крана КБ-405.1А №2 на объекте (Приложение №5 (Локальная смета №5)) (п.4.6.4);

- стоимость демонтажа и перевозки крана КБ-405.1А №2 с объекта (Приложение №6 (Локальная смета №6) (п.4.6.5),

 - стоимость разрешительных документов на перевозку негабаритного  и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования, на основании бухгалтерских документов, представляемых Исполнителем (п.4.6.6);

- стоимость дополнительных работ и затрат, выявленных в процессе эксплуатации башенных кранов, по фактически выполненным  объемам затрат, по согласованию сторон (п.4.6.7).

Дополнительными соглашениями от 29.07.2019,  21.08.2019 Сторонами внесены изменения в договор №64 от 17.07.2018  в части размера платежей. 

Согласно дополнительному соглашению от 21.08.2019, Стороны пришли к соглашению внести нижеследующие изменения в договор № 64 от 17.07.2018г. (далее Договор):

1.Изменить п. 4.2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.1. без НДС: 1249,33 руб.»

2.Изменить п. 4.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.2. включая НДС 20%: 1499,20 руб.»

3.Изменить п. 4.2.3. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.3. Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2528 за один месяц (из расчета 21 рабочий день по 8 машино-часов) составляет 251 864 (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 93.копеек, включая НДС 20% - 41 977 рублей 49 копеек.

Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2424 за один месяц (из расчета 21 рабочий день по 8 машино-часов) составляет 251 864 (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 93 копеек, включая НДС 20% 41 977 рублей 49 копеек.

4.Изменить п. 4.2.4. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.2.4. Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2528 в выходной и (или) праздничный день составляет 23 987 (Двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 14 копейку, включая НДС 20% - 3 997 рубль 86 копеек,

Стоимость эксплуатации башенного крана КБ-405.1А инв.№2424  в выходной и (или) праздничный день составляет 23 987 (Двадцать три тысячи девятьсот  восемьдесят семь) рублей 14 копейку, включая НДС 20% - 3 997 рубль 86 копеек, и оплачивается Заказчиком дополнительно, на основании предъявленного счета, в течение 2 (двух) дней».

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Во исполнение условий  вышеназванных договоров, истец  предоставил  ответчику в аренду башенные краны   и оказал услуги, предусмотренные  их условиями.

В подтверждение данного факта истец представил в материалы дела подписанные сторонами Акты об оказании услуг, счета-фактуры (л.д. 45 - 83).

Ответчик оказанные услуги оплатил частично.

Указывая, что ответчик не исполнил свои обязательства по  вышеперечисленным договорам  надлежащим образом,  истец обратился с иском о взыскании задолженности в судебном порядке.

В качестве соблюдения досудебного порядка истцом в материалы дела представлены претензии №1191 от 23.12.2019, №26 от 16.01.2020 (л.д. 84-85).

По расчету истца, на момент обращения с исковым заявлением задолженность ответчика за октябрь - декабрь 2019 года  составляла 3 958 905 руб. 44 коп.,  в том числе: по договору №39 от 19.09.2017 – 1 685 174 руб. 79 коп., по договору №26 от 10.04.2018 -  545 707 руб. 01 коп., по договору №27 от 10.04.2018 – 325 707 руб. 01 коп., по договору №64 от 17.07.2018 – 1 402 316 руб. 61 коп..

В настоящее время, в связи с частичной оплатой ответчиком суммы долга, истец  уточнил исковые требования, просит взыскать с ответчика задолженность в размере  2 274 392 руб. 13 коп., в том числе: по договору №39 от 19.09.2017 – 1 685 174 руб. 79 коп., по договору №26 от 10.04.2018 -  263 510 руб. 33 коп., по договору №27 от 10.04.2018 – 325 707 руб. 01 коп.

Ответчиком данные истца подтверждены. Исковые требования ООО «СМУ» признаны  в порядке ст.49 АПК РФ (протокольное определение от 18.08.2020).

С учетом изложенного,  исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 198-ФЗ) при отказе истца от иска, признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Таким образом, с учетом признания ООО "СМУ" исковых требований истцу подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина за подачу иска в размере 29  956 руб. 50 коп. (70%); 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы  истца по государственной пошлине в размере 12 838 руб. 50 коп. (30%) следует возложить на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 167-176  АПК РФ, арбитражный суд 

                                                     Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца об уменьшении исковых требований удовлетворить.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ» в пользу Акционерного общества «Управление механизации № 2»

2 274 392 руб. 13 коп. – основной долг,

12 838 руб. 50 коп. – в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Возвратить Акционерному обществу «Управление механизации № 2» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 29 956 руб. 50 коп., излишне уплаченную по платежному поручению № 209 от 19.02.2020.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст. ст. 257 - 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                                Крамаренко Т.М.