100619_4298931 

 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 03.04.2023 года Дело № А50-29056/21 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Балякиной О.В., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Бады-Сагааном Р.А. рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Новый центр» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 618554, 

<

...>- летия Победы, дом 121, офис 30)  

к ответчику: некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; адрес: 614000, 

<

...> д 11, офис 605),  

об обязании произвести работы, о взыскании судебной неустойки в случае  неисполнения судебного акта;  

третьи лица: 1. общество с ограниченной ответственностью «ДСТ-Строй»  (614060, 

<

...>, литер В, В1, В2, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>),  

2. общество с ограниченной ответственностью «Аудитэнергопроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 620014, 

<

...> строение 25, офис 4.107; конкурсный управляющий -  ФИО1, адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 11),  

3. временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «ДСТ- Строй» ФИО2 (614097, 

<

...>).  

 Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

 2. Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального 0ремонта  общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 614000, 

<

...>  д 11, офис 605) в течение 60 календарных дней с момента вступления решения в  законную силу выполнить следующие работы согласно действующему  законодательству, с учетом действующих строительных норм и правил:  

1) Заменить обрешётку с прозорами на площади 723,88 м2:  2) Произвести смену обрешётки сплошным настилом на площади 301,02м2;  

3) Произвести огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций на площади 1885,82м2; 4) Разобрать и установить подкосы стропильной системы объемом 0,3м3; 

5) Произвести ремонт деревянных элементов конструкций крыши:  

укрепление стропильных ног с расшивкой досками с двух сторон длиной 72 м.пог.;  

6) Заменить все элементы деревянных конструкций на пиломатериал хвойных  пород, соответствующий ГОСТ 8486-86 согласно проекта;  

7) Заменить профилированные листы покрытия слуховых окон общей площадью  28,8м2;  

8) Заменить обшивку слуховых окон из листовой стали общей площадью 21м2;  

9) Произвести замену профилированных листов покрытия кровли на площади  1024,9м2;  

10) Произвести замену ограждения кровли перилами длиной 155 м.пог.; 

11) Произвести замену колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в  количестве 8 шт.;  

12) Заменить листы карнизного свеса на площади 232,5 м2; 13) Заменить настенные желоба длиной 155 м.пог.; 

14) Заменить гидроизоляцию на карнизе из рубероида с приклеиванием на  холодную битумную мастику на площади 77,5 м2;  

15) Заменить конек кровельной сталью оцинкованной толщиной 0,7мм: по дереву  шириной 600мм длиной 35 м.пог.;  

16) Произвести смену мауэрлата горизонтальной проекции из бруса 200*200  длиной 102 пог.м., что составляет площадь 20,4 кв.м.;  

17) Произвести демонтаж утепляющего слоя из шлака объемом 23,25 куб.м.; 18) Произвести засыпку утепляющего слоя из керамзита объемом 23,25 куб.м.; 

19) Уложить диффузную мембрану по карнизному свесу кровли на площади  232,5м2;  

20) Произвести ремонт стропильных ног в соответствии с требованиями СП  70.13330.2012 длиной 72 м.пог.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; адрес: 614000, 

<

...> д 11, офис 605) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Новый центр» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 618554, 

<

...>- летия Победы, дом 121, офис 30) судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый  день просрочки исполнения судебного решения до дня его фактического исполнения.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; адрес: 614000, 

<

...> д 11, офис 605) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Новый центр» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 618554, 

<

...>- летия Победы, дом 121, офис 30) 6 000 руб. в возмещение судебных расходов по  уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья О. В. Балякина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 17.02.2023 9:50:00

 Кому выдана Балякина Ольга Вячеславовна