АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-5405/23

г. Уфа

21 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 18.09.2023

Полный текст решения изготовлен 21.09.2023

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "МеталПромГражданСтрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Технология" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании убытков в размере 1 291 575 руб. 72 коп. (с учетом уточнения)

 

при участии в судебном заседании:

от сторон: явки нет, извещены;

 

Общество с ограниченной ответственностью "МеталПромГражданСтрой" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Технология" о взыскании убытков в размере 3 526 542 руб. 75 коп.

Истец до принятия решения уточнил исковые требования, определив к взысканию убытки в размере 1 291 575 руб. 72 коп.

Судом уточнение исковых требований принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования рассмотрены с учётом уточнения.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом по правилам статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возражений на иск не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом ответчик, исходя из положений статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несет риск не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика по правилам ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представленных материалов дела, между ООО «МПГС» - Субподрядчиком и ООО «Технология» - Субсубподрядчиком заключен договор субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г., в соответствии с которым Субсубподрядчик обязуется выполнить работы по внутренней отделке здания на Объекте. «Пожарное депо в районе НПС внешнего транспорта нефти Ярудейского месторождения», в объеме, предусмотренном условиями настоящего Договора и приложений к нему, на основании утвержденной проектно-сметной / технической документации и сдать результаты выполненных Работ Субподрядчику по Акту о приемке выполненных работ по форме КС*2, а также оказать содействие Субподрядчику в сдаче законченного строительством Объекта Подрядчику и Заказчику и иным членам приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11, выполнить другие Работы, перечисленные в Договоре, и Работы, которые возникнут в период Гарантийного срока, а Субподрядчик обязуется создать Субсубподрядчику необходимые условия для выполнения Работ по Договору, принять их результат и оплатить стоимость выполненных Работ.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора и Приложениями № 2, 3 к настоящему договору, общая стоимость работ составляет 17848881 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 29 копеек, в т.ч. НДС 18% 2722710 (Два миллиона семьсот двадцать две тысячи семьсот десять) рублей 71 копейка, которая включает в себя стоимость материалов.

Так, согласно Приложению № 3 к договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г. стоимость работ составляет 8010720,91 руб., в т.ч. НДС 18%, стоимость материалов с учетом доставки составляет 9838160,38 руб., в т.ч. НДС 18%.

Согласно пункту 3.1.1. Договора субсубподряда стоимость договора, указанная в п. 3.1 является предварительной. Окончательная стоимость определяется по фактически выполненным объемам работ Субсубподрядчика принятым Субподрядчиком согласно Акта выполненных работ по форме КС-2, справок КС-3.

Стороны согласовали в п. 5.1. Договора сроки завершения всех работ по договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г., которые составляют 31 декабря 2018 г., данный срок окончания работ также согласуется с подписанным Сторонами Приложением № 4 к договору субсубподряда № 1 /10/18 от 01.10.2018 г.

25 января 2019 г. Сторонами были согласованы дополнительные работы, заливка полов 2 этажа керамзитобегоном, монолитным бетоном в количестве 15 м\ на объекте «Пожарное депо в районе НПС внешнего транспорта нефти Ярудейского месторождения» на общую стоимость 190000 (Сто девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%, что подтверждается дополнительным соглашением № I к договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г.

Сроки выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению были определены: начало работ-27.01.2019 г., окончание работ-08.02.2019 г.

01 марта 2019 г. Сторонами были согласованы дополнительные работы, устройство полов 1-го и 2-го этажей стяжкой самовыравнивающейся, армирование сеткой сгеклопластиковой, смесью Ml 50 на отметке 0.000 толщиной 30-70 мм в объеме 979,49 кв. м и на отметке 5.25 м толщиной 20-60 мм в объеме 1008 кв. м, в количестве 1987,49 кв. м, на объекте «Пожарное депо в районе НПС внешнего транспорта нефти Ярудейского месторождения» на общую стоимость 750873 (Семьсот пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 72 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается дополнительным соглашением № 2 к договору субсубподряда № 1 /10/18 от 01.10.2018 г.

19 марта 2019 г. Сторонами были согласованы дополнительные работы, монтаж, установка дверей внутренних в количестве 39 шт., на объекте «Пожарное депо в районе НПС внешнего транспорта нефти Ярудейского месторождения» на общую стоимость 60571 (Шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 37 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается дополнительным соглашением № 5 к договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018       г.

24 мая 2019 г. Сторонами были согласованы дополнительные работы на объекте «Пожарное депо в районе НПС внешнего транспорта нефти Ярудейского месторождения» на общую стоимость 854857 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 37 коп., в т.ч. НДС 20%, что подтверждается дополнительным соглашением № 6 к договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г.

ООО «Технология» выполнило работы по договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018       г. на общую сумму в размере 9419220 (Девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать) рублей 45 коп., в т.ч. НДС, что подтверждается следующими актами выполненных работ формы КС-2:

-№ 1 от 15.04.2019 г. на сумму 4515496,70 руб., в т.ч. НДС;

- № 2 от 15.04.2019 г. на сумму 657796,56 руб., в т.ч. НДС;

-№ 3 от 10.07.2019 г. на сумму 1279233,04 руб., в т.ч. НДС;

-№ 4 от 10.07.2019 г. на сумму 903948,77 руб., в т.ч. НДС;

-№ 5 от 01.10.2019 г. на сумму 1403933,64 руб. в т.ч. НДС;

-№6 от 31.12.2019 г. на сумму 658811,74 руб. в т.ч. НДС.

При выполнении работ ООО «Технология» частично использовало материалы поставки ООО «МПГС» переданных ООО «Технология» как давальческое сырье, что подтверждается накладной (форма М-15) № 56 от 26.11.2018 г., а именно смесь сухую Master Flow в количестве 65570,7 кг для осуществления работ по устройству полов на Объекте: «Пожарное депо в районе НПС внешнего транспорта нефти Ярудейского месторождения».

В соответствии с п. 3.2.1. Договора, материалы и оборудование, предоставляемые Субподрядчиком, передаются Субсубподрядчику по накладным по форме М-15 и актам о приеме-передаче оборудования в монтаж и по мере вовлечения их в производство работ, отражаются в актах КС-2, с предоставлением отчёта к актам выполненных работ (КС-2) о вовлечённых в производство работ материалах (Приложение 5.2. к Договору «Отчёт о вовлечении материалов»), а также отчета о расходе основных материалов в строительство по форме М-29 (Приложение № 8 к Договору).

ООО «Технология» израсходовало материал - смесь сухую Master Flow в количестве 15,18 тн, что подтверждается выполненными работами и принятыми Заказчиком согласно актов выполненных работ формы КС-2: № 4 от 10.07.2019, № 5 от 01.10.2019 и № 6 от 31.12.2019 г.

По акту выполненных работ № 4 от 10.07.2019 г.:

- позиция по договору 2.43 количество выполненных работ с использованием сухой смеси Master Flow – 108 кв. м;

- позиция по договору 2.15 – 15 кв. м;

- позиция по договору 2.66 – 25 кв. м;

- позиция по договору 2.74 – 24 кв. м;

- позиция по договору 2.78 – 21 кв. м;

По акту выполненных работ № 5 от 01.10.2019 г.:

- позиция по договору 2.55 – 10 кв. м;

- позиция по договору 2.58 – 15 кв. м;

По акту выполненных работ № 6 от 31.12.2019 г.:

- позиция по договору 1.105 – 11,66 кв. м;

- позиция по договору 1.113 – 3 кв. м;

- позиция по договору 1.117 – 4,33 кв. м;

- позиция по договору 1.121 – 2,33 кв. м;

- позиция по договору 1.125 – 2,3 кв. м.

Итого общее количество выполненных работ с использованием сухой смеси Master Flow составляет 241,62 кв. м.

Согласно актам выполненных работ толщина заливки полов составила 30 мм. Принимая во внимание расход сухой смеси Master Flow на 1 куб. м согласно инструкции по использованию, прилагаемой к настоящему исковому заявлению, равной 2100 кг, и площадь залитых полов равной 241,62 кв. м, то общее количество затраченной смеси Master Flow по выполненным работам составляет 15,22 тн (241,62 кв. м х 30 мм х 2100).  

Отсюда следует, что ООО «Технология» получило в работу давальческий материал в количестве 65,5707 тн, израсходовало 15,22 тн, оставшуюся часть материала в количестве 50,3507 тн ООО «Технология» не возвратило ООО «МПГС», а также не представило отчета об израсходовании материала.

В соответствии с п. 6.8. Договора Субсубподрядчик обязуется обеспечить сохранность всех материальных ценностей, результатов выполненных Работ, поставленных и переданных Субсубподрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, и Актам о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15, до даты подписания (без замечаний) Акта приемки законченного строительством отдельного этапа работ, Риск случайной гибели, порчи или утраты поставленных Субподрядчиком материалов и оборудования ложится на Субсубподрядчика с момента подписания Субподрядчиком и Субсубподрядчиком накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, или Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж.

По пункту 11.1. Договора с даты подписания накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж, акта приема-передачи Строительной площадки в натуре и до подписания Акта приёмки законченного строительством отдельного этапа работ Субподрядчиком без замечаний, Субсубподрядчик несет полную ответственность за сохранность работ, оборудования, материалов, Строительной техники, а также вверенного ему имущества Субодрядчика.

В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая кражи любого вида, или порчи Объекта, или любой его части, или Временных зданий и сооружений, а также вверенного ему имущества Субподрядчика, Подрядчика или Заказчика в период ведения Работ (за исключением Работ в Гарантийный срок), Субсубподрядчик обязан за свой счет восполнить утраченное имущество, исправить и устранить ущерб и повреждения с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям Договора.

Согласно п 3.7. Договора Субсубподрядчик обязуется компенсировать Субодрядчику затраты, связанные с предоставлением техники и механизмов для выполнения строительно- монтажных работ, а также дизельного топлива и других расходных материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ (далее - «СМР»), не включенных в стокмсвть СМР, проживание сотрудников Субсубподрядчика во временных зданиях (вахтовом поселке), оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, ия весь период проведения работ в соответствии с (Приложением № 13) к Договору.

В силу п. 15.3. Договора Субсубподрядчик возмещает любой другой ущерб, нанесенный Субподрядчику, по вине Субсубподрядчика в суммах равных фактическим издержкам и затратам Субподрядчика, в связи с этим ущербом, путем перечисления указанных сумм на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выставления Субподрядчиком счета. В случае нарушения Субсубподрядчиком срока уплаты сумм причиненного ущерба, его взыскание производится Субподрядчиком в порядке, установленном п. 15.13. Договора.

Стоимость неиспользованного и невозвращенного ООО «Технология» давальческого материала по договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г. составила 3526542 руб. 75 коп. из расчета стоимости 1 кг смеси Master Flow равной 69,98 руб, с НДС.

01 февраля 2022 г. ООО «МПГС» направило в адрес ООО «Технология» досудебную претензию о возмещении затрат по устранению дефектов в работе ООО «Технология» на общую сумму в размере 967612,80 руб., в т.ч. НДС 20% и уплате неустойки за просрочку выполнения работ по договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г. в размере 1784888,13 руб., что подтверждается письмом исх. № 062. Однако, в установленный договором срок по урегулированию в досудебном порядке претензий Субподрядчика к Субсубподрядчику (п. 15.18. Договора субсубподряда) ООО «Технология» не удовлетворила требования ОСЮ «МПГС», в связи с чем ООО «МПГС» обратилось с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд за защитой своих прав и законных интересов.

Истец до принятия решения уточнил исковые требования, определив к взысканию убытки в размере 1 291 575 руб. 72 коп.

Судом уточнение исковых требований принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования рассмотрены с учётом уточнения.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащим удовлетворению на основании следующего.

В силу ст. ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со ст. 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу ст. ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Исследовав характер спорных правоотношений, исходя из содержания прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г.,, суд квалифицирует правоотношения по договорам строительного подряда, подпадающие под действие специальных норм ст. 740 - 757 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также непротиворечащих им общих норм о подряде, содержащихся в главе 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (статья 714 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, между ООО «МПГС» - Субподрядчиком и ООО «Технология» - Субсубподрядчиком заключен договор субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г., в соответствии с которым Субсубподрядчик обязуется выполнить работы по внутренней отделке здания на Объекте. «Пожарное депо в районе НПС внешнего транспорта нефти Ярудейского месторождения», в объеме, предусмотренном условиями настоящего Договора и приложений к нему, на основании утвержденной проектно-сметной / технической документации и сдать результаты выполненных Работ Субподрядчику по Акту о приемке выполненных работ по форме КС*2, а также оказать содействие Субподрядчику в сдаче законченного строительством Объекта Подрядчику и Заказчику и иным членам приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11, выполнить другие Работы, перечисленные в Договоре, и Работы, которые возникнут в период Гарантийного срока, а Субподрядчик обязуется создать Субсубподрядчику необходимые условия для выполнения Работ по Договору, принять их результат и оплатить стоимость выполненных Работ.

В соответствии с п. 3.2.1. Договора, материалы и оборудование, предоставляемые Субподрядчиком, передаются Субсубподрядчику по накладным по форме М-15 и актам о приеме-передаче оборудования в монтаж и по мере вовлечения их в производство работ, отражаются в актах КС-2, с предоставлением отчёта к актам выполненных работ (КС-2) о вовлечённых в производство работ материалах (Приложение 5.2. к Договору «Отчёт о вовлечении материалов»), а также отчета о расходе основных материалов в строительство по форме М-29 (Приложение № 8 к Договору).

В соответствии с п. 6.8. Договора Субсубподрядчик обязуется обеспечить сохранность всех материальных ценностей, результатов выполненных Работ, поставленных и переданных Субсубподрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, и Актам о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15, до даты подписания (без замечаний) Акта приемки законченного строительством отдельного этапа работ, Риск случайной гибели, порчи или утраты поставленных Субподрядчиком материалов и оборудования ложится на Субсубподрядчика с момента подписания Субподрядчиком и Субсубподрядчиком накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, или Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж.

По пункту 11.1. Договора с даты подписания накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж, акта приема-передачи Строительной площадки в натуре и до подписания Акта приёмки законченного строительством отдельного этапа работ Субподрядчиком без замечаний, Субсубподрядчик несет полную ответственность за сохранность работ, оборудования, материалов, Строительной техники, а также вверенного ему имущества Субодрядчика.

В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая кражи любого вида, или порчи Объекта, или любой его части, или Временных зданий и сооружений, а также вверенного ему имущества Субподрядчика, Подрядчика или Заказчика в период ведения Работ (за исключением Работ в Гарантийный срок), Субсубподрядчик обязан за свой счет восполнить утраченное имущество, исправить и устранить ущерб и повреждения с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям Договора.

Согласно п 3.7. Договора Субсубподрядчик обязуется компенсировать Субодрядчику затраты, связанные с предоставлением техники и механизмов для выполнения строительно- монтажных работ, а также дизельного топлива и других расходных материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ (далее - «СМР»), не включенных в стокмсвть СМР, проживание сотрудников Субсубподрядчика во временных зданиях (вахтовом поселке), оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, ия весь период проведения работ в соответствии с (Приложением № 13) к Договору.

В силу п. 15.3. Договора Субсубподрядчик возмещает любой другой ущерб, нанесенный Субподрядчику, по вине Субсубподрядчика в суммах равных фактическим издержкам и затратам Субподрядчика, в связи с этим ущербом, путем перечисления указанных сумм на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выставления Субподрядчиком счета. В случае нарушения Субсубподрядчиком срока уплаты сумм причиненного ущерба, его взыскание производится Субподрядчиком в порядке, установленном п. 15.13. Договора.

Стоимость неиспользованного и невозвращенного ООО «Технология» давальческого материала по договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г. составила 3526542 руб. 75 коп. из расчета стоимости 1 кг смеси Master Flow равной 69,98 руб, с НДС.

В соответствии с положениями Федерального закона N ЗОЗ-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах" с 01.01.2019 размер действующей ставки НДС составляет 20%.

Однако, Подрядчик, в лице ООО «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» потребовало компенсировать ООО «МПГС» не израсходованный материал – сухую смесь Master Flow, при выполнении работ, только в объеме 18455,3 кг, по стоимости в размере 1291575 руб. 72 коп., что подтверждается копией дополнительного соглашения № 3 от 21.01.2020 г. к договору субподряда № 44-18 от 14.06.2018 г., счет-фактурой № 7 от 28.01.2020 г.

Отсюда следует, что за невозвращенный материал ООО «Технология» ООО «МПГС» оплатило ООО «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» сумму в размере 1 291 575 руб. 72 коп.

Таким образом, Субсубподрядчиком получен, но не использован в работах по Договору давальческий материал на сумму 1 291 575 руб. 72 коп.

Суд считает, что обязанности по целевому использованию и соответствующему учету полученного от заказчика давальческого материала, а также по возврату неиспользованного давальческого материала законом возложены на субсубподрядчика (ответчика).

Ответчик в нарушение п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4.1 договора обязанность по предоставлению истцу отчетов об использовании давальческих материалов надлежащим образом не исполнил.

Согласно с. 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств использования полученного от истца давальческого материала в полном объеме при выполнении работ по спорному договору субсубподряда либо возврата неиспользованного давальческого материала, ответчик не представил, о назначении по делу экспертизы не ходатайствовал.

Отчет об использовании материалов заказчика на спорную сумму в материалах дела отсутствует.

Учитывая изложенное, стоимость давальческого материала по договору субсубподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 г., в размере 1 291 575 руб. 72 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Технология" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МеталПромГражданСтрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) стоимость неиспользованного и невозвращенного давальческого материала в размере 1 291 575 руб. 72 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 25 916 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МеталПромГражданСтрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину  в размере 14 717 руб., излишне уплаченную по платежному поручению №360 от 04.04.2022г.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                        Э.Р. Шамсутдинов