АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А03-20254/2023

г. Барнаул

09 апреля 2024 г.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Плотниковой Н.И., при  ведении протокола секретарем Растилиной Е.Ю., при ведении аудиозаписи, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску  

 государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края  «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, г. Бийск, Алтайский край,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Подряд», ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, г. Бийск, Алтайский край,  

об обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по договору  субподряда № Ф.2017.282958/суб.7 от 07.08.2017 г. по благоустройству дворовых  территорий в г. Бийске в срок до 01 мая 2024 года, путем выполнения работ,  соответствующих строительным нормам и правилам, выполнив следующие виды работ:  ул. Иртышская, 63, г.Бийск, Алтайский край:  

- замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  цементно-песчаным раствором - 28 шт.;  

- заполнение швов между бортовыми камнями цементно-песчаным  раствором - 178 шт.;  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель ФИО1, по доверенности № 27/2023 от 24.05.23, путем  использовании системы веб-конференции,  

от ответчика - представитель ФИО2, по доверенности от 21.12.2023, путем  использования системы веб-конференции;  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Подряд», ОГРН  

<

***>, безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по договору  субподряда № Ф.2017.282958/суб.7 от 07.08.2017 по благоустройству дворовых  территорий в г.Бийске, в срок не позднее 15 дней с момента вступления решения суда в  законную силу, путем выполнения работ, соответствующих строительным нормам и  правилам, выполнив следующие виды работ:  

 ул.Иртышская, 63, г.Бийск, Алтайский край: 

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  цементно-песчаным раствором - 28 шт.;  

- Заполнение швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором - 178  шт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Подряд», ОГРН  

<

***>, в пользу государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», ОГРН:  

<

***>, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Плотникова Н.И.