75_6827431 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-84879/16

07 февраля 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Г.А.Гарькушовой , 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Аладовым  рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению АО "МОСОБЛЭНЕРГО" к ООО "ТРЦ Одинцово" о взыскании денежных средств и понуждению к совершению действий при участии в судебном заседании представителей - согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

ООО «ТРЦ Одинцово» выполнить мероприятия по технологическому  присоединению, предусмотренные договором об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям от 21.03.2014 № ТП- 05-14-103-102-34 и техническими условиями 18.02.2014 № ТУ-05-14-103 в  течение 2 (двух) месяцев с даты вступления решения в законную силу:  

- выделить в здании торгово-складского комплекса помещение под  размещение трансформаторной подстанции в соответствии с ПУЭ и  санитарными нормами;  

- укомплектовать РУ-0,4 кВ в проектируемой трансформаторной  подстанции;  

- выполнить проект внешнего электроснабжения торгово-складского  комплекса и однолинейную схему вводных распределительных устройств и  согласовать в установленном порядке;  

- построить сети 0,4 кВ от РУ0,4 кВ проектируемой ТП до вводных  распределительных устройств торгово-складского комплекса;  

- установить вводные распределительные устройства. Работы по  монтажу энергопринимающих устройств выполнить с требованиями ПУЭ и НТД;  

- граница балансовой принадлежности - низковольтные шпильки  силовых трансформаторов в проектируемой ТП;  

- после монтажа электрооборудования провести наладочные работы и  профилактические испытания оборудования и защиты;  

- получить разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию в  Центральном управлении Ростехнадзора в установленном порядке;  

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению  в пределах границ своего участка, предусмотренных ТУ, уведомить АО  «Мособлэнерго» о выполнении ТУ;  

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых  энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального  государственного энергетического надзора;  

- после осуществления сетевой организацией фактического  присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим  сетям, фактического приема-передачи напряжения и мощности подписать акт  разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной  ответственности сторон, акт об осуществлении технологического  присоединения;  

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые  организации при технологическом присоединении энергопринимающих  устройств, в отношении которых применяется категория надежности  электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников  электроснабжения.  

Взыскать с ООО «ТРЦ Одинцово» в пользу АО «Мособлэнерго»  неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период  с 05.04.2016 г. по 17.11.2016 г. в размере 8.399.405 (восемь миллионов триста  девяносто девять тысяч четыреста пять) рублей 26 коп. и расходы по уплате  государственной пошлины в размере 70.977 (семьдесят тысяч девятьсот