37/2019-47597(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А28-18269/2018

г. Киров

15 апреля 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Погудина С.А. 

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств  аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Федерального казенного учреждения «Управление капитального строительства  Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610007, Россия,  

<

...>)  

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительно- монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения наказаний» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 431160, Республика  Мордовия, Зубово-Полянский р-н, р.

<

...>)  

об исполнении обязательств в натуре, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО2, по доверенности от 02.07.2018, ФИО3, по  доверенности от 28.12.2018,  

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительно- монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения наказаний» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 431160, Республика  Мордовия, Зубово-Полянский р-н, р.

<

...>) в срок до  01.07.2019 выполнить работы по устройству подъездных путей к накопительной  емкости канализации для вывоза сточных вод, произвести озеленение территории,  а также устранить неисправность накопительной емкости канализации в  

соответствии с условиями государственного контракта на выполнение  строительных работ для нужд уголовно-исполнительной системы № 18 от  09.03.2016.  

В случае неисполнения указанных обязательств в срок до 01.07.2019  взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Строительно-монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения  наказаний» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 431160,  Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, р.

<

...>) в  пользу Федерального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Кировской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения:  610007, Россия, 

<

...>) судебную  неустойку в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый  факт нарушения срока исполнения вышеуказанных обязательств.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Строительно-монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения  наказаний» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 431160,  Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, р.

<

...>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 000  (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья С.А. Погудин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 01.03.2018 15:29:16Кому выдана Погудин Сергей Александрович