1.9/2020-33789(4) 

Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, 

<

...> http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А52-1688/2020

город Псков

25 мая 2021 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсистема», в  рамках гарантийных обязательств по договору генерального подряда № Б4/2/2016  на строительство многоквартирного жилого дома от 30.08.2016, в течение 10  (десяти) календарных дней с даты принятия настоящего решения, устранить  недостатки выполненных работ в квартире № 83, расположенной в  многоквартирном доме по адресу: 

<

...> д. Борисовичи  Псковского района Псковской области путем проведения за счет собственных  средств следующих работ:  

- устранить дефекты, возникшие в стяжки пола в помещениях жилых  комнатах, кухни, коридоре путем демонтажа существующей стяжки и устройства  новой стяжки.  

- устранить дефекты, возникшие в стяжки пола в ванной комнате путем  демонтажа существующей стяжки, разборки гидроизоляции. Устройства  гидроизоляции. Устройства стяжки толщиной 15 мм.  

- устранить дефект, выявленный в отношении створки на балконе путем  смены оконных приборов: ручки; смены оконных приборов: петли; смены оконных  приборов: фрамужные приборы; регулировка оконной фурнитуры.  

- устранить дефекты, обнаруженные в комнате в отношении подоконной  доски, части откосов, наружного слива, путем снятия подоконной доски, установки  подоконной доски, ремонта штукатурки откосов, ремонта и восстановления  герметизации горизонтальных и вертикальных монтажных швов окон; ремонта и  восстановления уплотнения стыков в оконных блоках прокладками  

паропроницаемым и насухо; устройства обделок на фасадах (наружные  подоконники).  

- произвести окраску трубопровода в большой комнате (окраска масляными  составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раза);  

- устранить дефекты, выявленные на Объекте, в перегородках из гипсокартона  путем установки разделительной ленты между ГКЛО и потолком, герметизацией  зазоров между ГКЛО и полом, ГКЛО и потолком, шпаклевки по ГКЛ перегородок;  

- устранение вмятины на входной металлической двери посредством  демонтажа металлического дверного блока и установки нового металлического  дверного блока.  

- выполнить работы по внутренней отделке, шпатлевке потолков, шпатлевке  поверхности ГКЛ перегородок, предусмотренные проектом путем шпатлевки по  штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску,  шпатлевки по ГКЛ перегородок;  

- установить противопожарный экран на нижнюю глухую створку окна в  эркерной части комнаты-гостинной согласно проекту.  

В удовлетворении требования о замене в эркерной части комнаты-гостиной  установленных радиаторов МС-140М-300 на радиаторыа «Rifar Р1ех200» отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсистема» в  пользу акционерного общества специализированный застройщик  «ПсковЖилСтрой» 6000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной  пошлины.  

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Псковской области со  счета средств, поступивших во временное распоряжение Арбитражного суда  Псковской области, возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Стройсистема» денежные средства в размере 10000 руб. 00 коп., перечисленные  по платежному поручению № 820 от 26.06.2020 (частично).  

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Псковской области со  счета средств, поступивших во временное распоряжение Арбитражного суда  Псковской области, перечислить обществу с ограниченной ответственностью  «Бюро Оценки» денежные средства в сумме 20000 руб. по реквизитам, указанным в  счете, перечисленные обществом с ограниченной ответственностью  «Стройсистема» по платежному поручению № 820 от 26.06.2020 (частично).  

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Псковской области со  счета средств, поступивших во временное распоряжение Арбитражного суда  Псковской области, возвратить денежные средства в сумме 20000 руб.,  

перечисленные им по квитанции от 26.10.2020 № 103 Сербину Арсению  Валерьевичу по его письменному заявлению.  

На решение в течение одного месяца после его принятия может быть подана  апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Псковской области.  

Судья О.В. Никульникова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 

Дата 06.11.2020 11:10:52

 Кому выдана Никульникова Ольга Викторовна