АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-11480/2019

г. Новосибирск

25 июня 2019 года

резолютивная часть решения объявлена 25.06.2019 года,

решение в полном объёме изготовлено 25.06.2019 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А.,

рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Электрощит"

к акционерному обществу "Энергия Холдинг"

о взыскании задолженности за выполненные работы в сумме в сумме 421 212 рублей 35 копеек и неустойки в сумме 50 966 рублей 70 копеек

при участии в судебном заседании представителей  

от истца: ФИО1 по доверенности от 20.03.2019, паспорт;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом,

у с т а н о в и л:

Иск предъявлен о взыскании стоимости выполненных истцом, но не оплаченных ответчиком работ в сумме 421 212 рублей 35 копеек и неустойки в сумме 50 966 рублей 70 копеек по договору подряда от 26.08.2016 № З-74-ЦРВ.

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по оплате выполненных работ.

Ответчик в отзыве указал, что работы по пуско-наладке не подлежат оплате, поскольку акт о пуско-наладке не подписан.

Исследовав в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, заслушав объяснения представителя истца, суд пришел к следующему.

Материалами дела установлено, что между ООО «Электрощит» (Истец) и АО «Энергия Холдинг» (Ответчик) заключен  Договор подряда № З-74-ЦРВ от 26 августа 2016 (далее – «Договор подряда»), Дополнительное   соглашение  № 1 от 01 ноября 2017 к Договору подряда (далее – «Дополнительное соглашение № 1). 

          Согласно п. 2.1. Договора подряда Заказчик (Ответчик) поручил, а Подрядчик (Истец) принял на себя обязательство собственными или привлеченными силами в интересах Заказчика выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами РФ полный комплекс строительно-монтажных работ, работ по устройству инженерных сетей на Объекте, указанном в п. 1.19. Договора, на основании согласованной Заказчиком Проектной документации стадии «Рабочая документация» в рамках перечня работ, указанных в Техническом задании, включая:

- выполнение электромонтажных работ на Объекте;

- иные неразрывно связанные Работы с Работами предусмотренными данным Договором;- устранение дефектов Работ, предусмотренными данным Договором;

- сдачу результата Работ по Объекту Заказчику по Акту, указанному в п. 1.2. Договора;- выполнение обязательств в течение Гарантийного срока.

Согласно п. 2.2. Договора подряда, Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить за них обусловленную цену,  при условии качественного и своевременного  выполнения в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

  Согласно п. 3.1. Договора подряда и с учетом условий, изложенных в  Дополнительном соглашении № 1,   стоимость Договора подряда составляет 11 181 592,83 рублей. 

В соответствии со статьей 4 Договора подряда оплата за Работы производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика следующими этапами:

-  Авансовый платеж в размере 25 % от стоимости договора в течении 10 календарных дней с даты заключения настоящего договора на основании счета.

- Платеж за выполненные монтажные Работы в размере 70% от стоимости ежемесячно выполненных монтажных работ производится Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления следующих документов: подписанного Акта о приемке выполненных монтажных работ (форма КС-2), подписанной справки о стоимости выполненных монтажных работ в отчетном месяце (форма КС-3), журнала КС-6а, оригинала счета, оригинала счет-фактуры.

- Отложенный платеж в размере 5%, от стоимости монтажных Работ производится заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления подписанного акта проведения монтажных Работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ в отчетном месяце (форма КС-3), оригинала счета на оплату, оригинала счет-фактуры. 

- Платеж за выполненные пуско-наладочные Работы в размере 70% от стоимости ежемесячно выполненных пуско-наладочных  работ производится Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления следующих документов: подписанного Акта о приемке выполненных пуско-наладочных работ (форма КС-2), подписанной справки о стоимости выполненных пуско-наладочных работ в отчетном месяце (форма КС-3), оригинала счета, оригинала счет-фактуры.

- Отложенный платеж в размере 5%, от стоимости пуско-наладочных Работ производится заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления подписанного акта ввода оборудования в эксплуатацию, оригинала счета на оплату. 

При рассмотрении спора, суд исходит из того, что в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно двусторонним Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Истец выполнил работы по Договору подряда на денежную сумму в размере 10 536 342 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч триста сорок два) рубля  43 коп. 

По состоянию на дату составления искового заявления выполненные Истцом  работы оплачены Ответчиком частично, задолженность Ответчика перед Истцом за выполненные работы, согласно подписанным КС-2, КС-3, составила 421 212  рублей 35 копеек.

Указанная сумма включает в себя отложенный платеж в размере 5% от стоимости пуско-наладочных Работ, предусмотренный п. 4.5 договора который составляет 90 124,60 рублей.

По условиям договора данная сумма подлежит оплате после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Ответчик ссылается на то, что указанный акт подписан не был. Истцом обратного не доказано, подписанный акт в материалы дела не представлен.

При указанных обстоятельствах сумма долга подлежит уменьшению на 90 124,60 рублей.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Учитывая, что сумма долга в размере 331 087 рублей 75 копеек на момент рассмотрения спора ответчиком не оплачена, долг в размере 331 087 рублей 75 копеек подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании статей 309, 314, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Часть 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет сторонам возможность обеспечить исполнение обязательств, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пенёй) признаётся определённая законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 25.2.1 Договора подряда в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, на срок свыше 30 календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательство по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% процентов от стоимости Работ. 

Последний КС-2 № 14 подписан 15.10.2018г. + 10 дней на оплату (ст. 4 Договора подряда) + 30 дней (п. 25.2.1. Договора подряда) по 25.03.2019 г. включительно, что составило 121 день просрочки.   

Таким образом, по состоянию на 25.03.2019 размер пени составил 40 061 рубля 62 копейки.

Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с акционерного общества "Энергия Холдинг" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Электрощит" (ИНН 

<

***>) 331 087 рублей 75 копеек долга, 40 061 рубль 62 копейки неустойки, 183 рубля 04 копейки почтовых расходов и 9 781 рубль судебных расходов в виде уплаченной госпошлины.

В остальной части иска - отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                              Ю.А. Печурина