Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-60978/2024

20 января 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  20 января 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шулаевой В. А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» (адрес: 188340, Ленинградская область, Гатчинский р-н, гп. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2, помещ. 3, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  «ЦДР Строй» (адрес: 191024, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 111.07.2024), 

- от ответчика: не явился (извещен), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «ЦДР Строй» о взыскании 2 556 255 руб. 09 коп. задолженности по Договору субподряда № КУБ76-ЭЛ/1 от 28.04.2023, 3 326 177 руб. 63 коп. задолженности по Договору субподряда № КУБ76-ОВВК/1 от 15.05.2023 (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). 

Ответчик отзыв на иск не представил, требования истца по существу не оспорил. 

Представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, поэтому дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 156 АПК РФ. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме с учетом уточнения. 

Исследовав материалы дела, заслушав позицию истца, суд установил следующие обстоятельства. 

Между обществом с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» (ООО «СК-95УНР» Субгенеральный подрядчик), ООО «Сэтл Строй» (Генеральный подрядчик) и ООО «ЦДР Строй» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № КУБ76-ЭЛ/1 от 28.04.2023 (далее – Договор 1).

Генеральный подрядчик поручил, а Субподрядчик принял на себя обязательства в установленный Договором срок выполнить полный комплекс строительных работ по устройству внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения, с устройством теплого пола в санузлах квартир, с учетом 1-го этапа устройства зарядных станций электромобилей, без учета трубных разводок в монолитных конструкциях, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, втроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 140 мести встроенно-пристроенной подземной автостоянкой», Корпус 1.1, ДОУ, расположенном по адресу: Кубинская улица, дом 76, на земельном участке с кадастровым номером 78:14:0007558:8107, (далее именуемый «Объект»), Субгенеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, а Генеральный подрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену; Субгенеральный подрядчик обязуется оказывать Субподрядчику услуги по общей организации и координации работ на Объекте, перечень которых указан в разделе 9 Договора, а Субподрядчик обязуются принять оказанные услуги и уплатить обусловленную Договором цену оказания услуг.

В силу п. 4.8. Договора 1 услуги Субгенерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1 - 9.18, 9.20 Договора 1, подлежат оплате Субподрядчиком с момента начала выполнения работ по настоящему Договору до даты фактического окончания выполнения Субподрядчиком работ по Договору в следующем порядке:

- 4.8.1. Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги Субгенерального подрядчика в размере 0,5 % от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по Договору, указанной в подписанных Справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц (без учета стоимости дорогостоящего оборудования: ГРЩ, трансформаторов трансформаторных подстанций). Во избежание сомнений, стороны согласовали, что сумма услуг к оплате исчисляется от полной стоимости, указанной в справке по форме КС-3.

- 4.8.2. Субгенеральный подрядчик обязуется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Генеральчику и Субподрядчику Акт об оказанных услугах и счет-фактуру. Субподрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов подписать Акт об оказанных услугах, либо направить мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Субгенеральный подрядчик корректирует указанные в Акте об оказанных услугах сведения и направляет откорректированный Акт Субподрядчику для подписания. В случае не подписания Акта об оказанных услугах и не представления обоснованных возражений в указанный срок, Акт считается подписанным и подлежит оплате.

Согласно п. 4.5., 5.2 Договора расходы и услуги Субгенерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1-9.18, 9.20 Договора, оплачиваются Субподрядчиком ежемесячно на основании актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставляемых Генеральным подрядчиком, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Генеральными подрядчиком счета-фактуры и подписания Акта об оказанных услугах (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

В соответствии с п. 4.5.1. Договора 1 Субподрядчик обязался возмещать Субгенеральному подрядчику в порядке, установленном п. 4.7 Договора, расходы за потребленные Субподрядчиком электроэнергию от постоянных источников электроснабжения, водоснабжение и водоотведение - количество фактически потребленной электроэнергии и воды фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учета (электросчетчиков, водомеров), которые предоставляются и устанавливаются между источником электроэнергии и электроприемником, источником воды и потребителем Субподрядчиком за свой счет. Факт установки и начальные показания приборов учета, с которых начинается отсчет, фиксируются Сторонами в двухстороннем акте. Количество отведенной воды устанавливается равным количеству потребленной.

В случае не установки Субподрядчиком приборов учета, количество электрической энергии, стоимость которой подлежит возмещению Субгенеральному подрядчику, определяется Субгенеральным подрядчиком следующим расчетным путем: определение объема потребленной электрической энергии производится исходя из условий круглосуточного потребления максимальной установленной (присоединенной) мощности токоприемников.

Стоимость потребленной электроэнергии от постоянных источников электроснабжения определяется ежемесячно по тарифу, рассчитываемому на основании Акта об оказании услуг, счета- фактуры поставщика электроэнергии за соответствующий период, исходя из количества потребленной Субподрядчиком электроэнергии.

Согласно п. 4.6.1. Договора 1 Субгенеральный подрядчик оказывает Субподрядчику услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых Генеральным подрядчиком и предоставляемых Субгенеральному подрядчику ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость услуг оплачивается Субподрядчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной Субподрядчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН 

<

***>), ежемесячно публикуемым на официальном сайте www.pesc.ru (для расчета стоимости 1 кВт применяется среднемесячный размер ставки за электроэнергию для договоров энергоснабжения по третьей ценовой категории (раздел «Свободные цены») для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающего устройства от 150 до 670 кВт (уровень напряжения НН), ставка для потребителей, расположенных на территории Санкт- Петербурга или Ленинградской области, указывается в зависимости от местонахождения Объекта). К указанной в настоящем пункте стоимости услуг прибавляется величина налога на добавленную стоимость.

Количество фактически потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учета (электросчетчиков), а в случае их отсутствия - согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору.

Количество и мощность ДЭС согласовывается Сторонами перед началом работ до момента необходимости в ДЭС. При этом Субподрядчик обязан обеспечивать загрузку ДЭС более 50 % и ежемесячно предоставлять Субгенеральному подрядчику сменный рапорт, подписанный уполномоченными представителями Субподрядчика и Субгенерального подрядчика, по работе ДЭС в отчетном периоде (календарном месяце). В случае загрузки ДЭС менее 50 % Субподрядчик компенсирует Субгенеральному подрядчику убытки, связанные с увеличением тарифа, применяемого арендодателем ДЭС на основании договора, заключенного с Субгенеральным подрядчиком. Компенсация производится не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения счета арендодателя ДЭС и счета Субгенерального подрядчика. При загрузке ДЭС менее 50 % Субподрядчик обязан направить в адрес Субгенерального подрядчика уведомление о необходимости замены соответствующей ДЭС на ДЭС меньшей мощности.

В силу п. 4.7. Договора 1 расходы Субгенерального подрядчика, подлежащие возмещению согласно п. 4.5 Договора, а также услуги Субгенерального подрядчика, предусмотренные п. 4.6 Договора, оплачиваются Субподрядчиком с учетом следующего:

- оплата производится в период с даты начала выполнения работ по Договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно п. 6.3.7 Договора;

- оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, выставляемых Субгенеральным подрядчиком Акт об оказании услуг, представляемый Субгенеральным подрядчиком Субподрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта об оказании услуг Субподрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок, Акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится Субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг. Исполнение обязательства по оплате допускается любым способом, предусмотренным законодательством РФ.

В обоснование заявленных требований истец указал, что в период с июня 2023 года по апрель 2024 года истцом были оказаны, а ответчиком приняты услуги на общую сумму 2 645 789 (Два миллиона шестьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 89 копеек. Услуги Ответчиком были оплачены лишь частично, задолженность по оплате составляет 2 556 255 руб. 09 коп.

Указанные обстоятельства подтверждаются подписанными Сторонами УПД, первичными учетными документами, а также информацией с интернет-сайта https://setlcity.cynteka.ru/core (система электронного документооборота «Синтека. Комплектация»).

Кроме того, между ООО «СК-95УНР» (Субгенеральный подрядчик), ООО «Сэтл Строй» (Генеральный подрядчик) и ООО «ЦДР Строй» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда № КУБ76-ОВВК/1 от 15.05.2023 г. (далее – Договор 2). 

В соответствии с Договором 2 Генеральный подрядчик поручил, а Субподрядчик принял на себя обязательства в установленный Договором срок выполнить полный комплекс строительных работ полный комплекс строительных работ по устройству внутренних систем отопления и вентиляции, водопровода и канализации с устройством станций глубокой очистки воды, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, втроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 140 мести встроенно-пристроенной подземной автостоянкой», Корпус 1.1, ДОУ, Паркинг 1, расположенном по адресу: Кубинская улица, дом 76, на земельном участке с кадастровым номером 78:14:0007558:8107, (далее именуемый «Объект»), Субгенеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, а Генеральный подрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену; Субгенеральный подрядчик обязуется оказывать Субподрядчику услуги по общей организации и координации работ на Объекте, перечень которых указан в разделе 9 Договора, а Субподрядчик обязуются принять оказанные услуги и уплатить обусловленную Договором цену оказания услуг.

В силу п. 4.8. Договора 2 услуги Субгенерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1 - 9.18, 9.20 Договора 1, подлежат оплате Субподрядчиком с момента начала выполнения работ по настоящему Договору до даты фактического окончания выполнения Субподрядчиком работ по Договору в следующем порядке:

- 4.8.1. Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги Субгенерального подрядчика в размере 0,5 % от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по Договору, указанной в подписанных Справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц. Во избежание сомнений, стороны согласовали, что сумма услуг к оплате исчисляется от полной стоимости, указанной в справке по форме КС-3.

- 4.8.2. Субгенеральный подрядчик обязуется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Генеральчику и Субподрядчику Акт об оказанных услугах и счет-фактуру. Субподрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов подписать Акт об оказанных услугах, либо направить мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Субгенеральный подрядчик корректирует указанные в Акте об оказанных услугах сведения и направляет откорректированный Акт Субподрядчику для подписания. В случае не подписания Акта об оказанных услугах и не представления обоснованных возражений в указанный срок, Акт считается подписанным и подлежит оплате.

Согласно п. 4.5., 5.2 Договора 2 расходы и услуги Субгенерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1-9.18, 9.20 Договора, оплачиваются Субподрядчиком ежемесячно на основании актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставляемых Генеральным подрядчиком, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Генеральными подрядчиком счета-фактуры и подписания Акта об оказанных услугах (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

В соответствии с п. 4.5.1. Договора 2 Субподрядчик обязался возмещать Субгенеральному подрядчику в порядке, установленном п. 4.7 Договора 2, расходы за потребленные Субподрядчиком электроэнергию от постоянных источников электроснабжения, водоснабжение и водоотведение - количество фактически потребленной электроэнергии и воды фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учета (электросчетчиков, водомеров), которые предоставляются и устанавливаются между источником электроэнергии и электроприемником, источником воды и потребителем Субподрядчиком за свой счет. Факт установки и начальные показания приборов учета, с которых начинается отсчет, фиксируются Сторонами в двухстороннем акте. Количество отведенной воды устанавливается равным количеству потребленной.

В случае не установки Субподрядчиком приборов учета, количество электрической энергии, стоимость которой подлежит возмещению Субгенеральному подрядчику, определяется Субгенеральным подрядчиком следующим расчетным путем: определение объема потребленной электрической энергии производится исходя из условий круглосуточного потребления максимальной установленной (присоединенной) мощности токоприемников.

Стоимость потребленной электроэнергии от постоянных источников электроснабжения определяется ежемесячно по тарифу, рассчитываемому на основании Акта об оказании услуг, счета- фактуры поставщика электроэнергии за соответствующий период, исходя из количества потребленной Субподрядчиком электроэнергии.

Согласно п. 4.6.1. Договора 2 Субгенеральный подрядчик оказывает Субподрядчику услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых Генеральным подрядчиком и предоставляемых Субгенеральному подрядчику ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость услуг оплачивается Субподрядчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной Субподрядчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН 

<

***>), ежемесячно публикуемым на официальном сайте www.pesc.ru (для расчета стоимости 1 кВт применяется среднемесячный размер ставки за электроэнергию для договоров энергоснабжения по третьей ценовой категории (раздел «Свободные цены») для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающего устройства от 150 до 670 кВт (уровень напряжения НН), ставка для потребителей, расположенных на территории Санкт- Петербурга или Ленинградской области, указывается в зависимости от местонахождения Объекта). К указанной в настоящем пункте стоимости услуг прибавляется величина налога на добавленную стоимость.

Количество фактически потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учета (электросчетчиков), а в случае их отсутствия - согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору.

Количество и мощность ДЭС согласовывается Сторонами перед началом работ до момента необходимости в ДЭС. При этом Субподрядчик обязан обеспечивать загрузку ДЭС более 50 % и ежемесячно предоставлять Субгенеральному подрядчику сменный рапорт, подписанный уполномоченными представителями Субподрядчика и Субгенерального подрядчика, по работе ДЭС в отчетном периоде (календарном месяце). В случае загрузки ДЭС менее 50 % Субподрядчик компенсирует Субгенеральному подрядчику убытки, связанные с увеличением тарифа, применяемого арендодателем ДЭС на основании договора, заключенного с Субгенеральным подрядчиком. Компенсация производится не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения счета арендодателя ДЭС и счета Субгенерального подрядчика. При загрузке ДЭС менее 25 % Субподрядчик обязан направить в адрес Субгенерального подрядчика уведомление о необходимости замены соответствующей ДЭС на ДЭС меньшей мощности.

В силу п. 4.7. Договора 2 расходы Субгенерального подрядчика, подлежащие возмещению согласно п. 4.5 Договора 2, а также услуги Субгенерального подрядчика, предусмотренные п. 4.6 Договора, оплачиваются Субподрядчиком с учетом следующего:

- оплата производится в период с даты начала выполнения работ по Договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно п. 6.3.7 Договора;

- оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, выставляемых Субгенеральным подрядчиком Акт об оказании услуг, представляемый Субгенеральным подрядчиком Субподрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта об оказании услуг Субподрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок, Акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится Субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг. Исполнение обязательства по оплате допускается любым способом, предусмотренным законодательством РФ.

В обоснование иска истец указал, что в период с августа 2023 года по июль 2024 года истцом были оказаны, а ответчиком приняты услуги на общую сумму 3 326 177 руб. 63 коп. Услуги ответчиком не оплачены, задолженность составляет 3 326 177 руб. 63 коп.

Указанные обстоятельства подтверждаются подписанными Сторонами УПД, первичными учетными документами, а также информацией с интернет-сайта https://setlcity.cynteka.ru/core (система электронного документооборота «Синтека. Комплектация»).

Истец 01 марта 2024 года направил в адрес ответчика претензию с требованием об уплате задолженности по Договорам. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 ГК РФ). 

Факт оказания истцом ответчику услуг по Договорам подтверждается представленными в материалы дела УПД, подписанным сторонами Актом сверки взаимных расчетов за период: 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью  «ЦДР Строй» факт оказания услуг мотивированно не опровергло, возражений по объему, срокам и качеству услуг не заявило. 

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенного, иск общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» подлежит удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Государственная пошлина в части увеличения исковых требований подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ЦДР Строй» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-95 Управление Начальника Работ» 2 556 255 руб. 09 коп. задолженности по договору субподряда № КУБ76-ЭЛ/1 от 28.04.2023, 3 326 177 руб. 63 коп. задолженности по договору субподряда № КУБ76-ОВВК/1 от 15.05.2023, 51 922 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ЦДР Строй» в доход федерального бюджета 490 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Сергеева О.Н.