22/2020-18626(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А24-1422/2020

г. Петропавловск-Камчатский

20 мая 2020 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Алферовой О.С., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

 по иску акционерного общества «Северо-Восточный  

ремонтный центр» (ИНН 

<

***>, 

ОГРН 

<

***>) 

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью  

«Наутилус» (ИНН 

<

***>, 

ОГРН 

<

***>) 

о признании контракта от 20.06.2019 № 1820187304431442209003149/51-5/19  расторгнутым с 29.11.2019, взыскании неосновательного обогащения в виде  неотработанного аванса в размере 2 858 979 рублей 46 копеек, неустойки за  просрочку выполнения работ за период с 31.07.2019 по 28.11.2019 в размере  207 217 рублей 10 копеек, процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 29.11.2019 по 07.02.2020 в размере 35 040 рублей  

21 копейка, 

при участии: от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 09.12.2019 (сроком по 31.12.2020), диплом КТ № 74688 (рег. номер 3492/10 от 16.08.2013), от ответчика: не явились. 

Руководствуясь статьями 49, 167–171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

принять уменьшение размера исковых требований в части неустойки до  суммы 182 351 рубль 05 копеек.  

Иск удовлетворить. 

Признать контракт от 20.06.2019 № 1820187304431442209003149/51-5/19,  заключенный между акционерным обществом «Северо-Восточный ремонтный  центр» и обществом с ограниченной ответственностью «Наутилус» расторгнутым с  29.11.2019.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Наутилус» в пользу  акционерного общества «Северо-Восточный ремонтный центр» неосновательное  обогащение в размере 2 858 979 рублей 46 копеек, неустойку за просрочку  выполнения работ за период с 31.07.2019 по 28.11.2019 в размере 182 351 рубль  

05 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с  29.11.2019 по 07.02.2020 в размере 35 040 рублей 21 копейка, а также расходы по  оплате государственной пошлины по иску в размере 44 382 рубля, всего 3 120 752  рубля 72 копейки.  

Возвратить акционерному обществу «Северо-Восточный ремонтный центр»  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 124 рубля.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья О.С. Алферова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 7:15:12Кому выдана Алферова Ольга Сергеевна