АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Барнаул                                                                                               Дело № А03–15755/2023                 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2023 года  

 

Решение в полном объеме изготовлено 20 декабря 2023 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул, к обществу с ограниченной ответственностью «Прома НСК», г. Барнаул,

о взыскании 6 445 225 руб. 41 коп. неотработанного аванса, 

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца: ФИО2, по доверенности № 37 от 20.10.2023, диплом № 225 от 27.06.2003, паспорт,

от ответчика: не явился, извещён,  

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Прома НСК» (далее – ответчик) о взыскании 6 445 225 руб. 41 коп. неотработанного аванса.

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом.

Представитель истца на иске настаивала, привела пояснения.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, проверив расчет, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом  и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые  хотя и не предусмотрены   законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие причинения вреда другому лицу. 

Между сторонами возникли вытекающие из договора подряда обязательственные правоотношения, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача их результата заказчику (ст. 711, 746 ГК РФ).

Сдача результата работ и их приемка оформляются актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Согласно статье 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

 

 

Между ООО «ПРОМА НСК» (далее - Исполнитель) и ООО «Жилищная инициатива» (далее - Заказчик) заключен договор №S 17 от 17.03.2021г. (далее - Договор), по которому Исполнитель обязался осуществить установку окопных и балконных блоков из ПВХ, в количестве и в соответствии с Приложением № 1, №2,№3,№4,№5.№6 и Альбомами технических решений по монтажу светопрозрачных конструкций, а Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы на объекте «Комплексное освоение в целях жилищного строительства участка площадью 44,83 га в МО Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Многоквартирный дом № 17» (далее - Объект) (п. 1.1. Договора).

Заказчик перечислил по договору Исполнителю аванс в сумме - 29 747 505 руб.63 коп.  по платежным поручениям №500 от 01.07.2021 на сумму 3 965 188 руб. 00 коп., №501 от 01.07.2021 на сумму 132 317 руб. 63 коп., №4956 от 12.07.2021 на сумму 1 500 000 руб.  00 коп., №5110 от 20.07.2021 на сумму 1 500 000 руб. 00 коп., №5518 от 29.07.2021 на сумму 1 500 000 руб. 00 коп., №5519 от 30.07.2021 на сумму 1 500 000 руб. 00 коп., №5835 от 11.08.2021 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., №6303 от 27.08.2021 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., №6342 от 30.08.2021 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., №6343 от 31.08.2021 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., № 6344 от 06.09.2021 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., №8596 от 12.11.2021 на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., №8817 от 18.11.2021 на сумму 1 600 000 руб. 00 коп., №78 от 10.01.2022 на сумму 1 500 000 руб. 00 коп., №366 от 18.01.2022 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., №476 от 19.01.2022 на сумму 300 000 руб. 00 коп., №959 от 10.02.2022 на сумму 1 500 000 руб. 00 коп., №1239 от 22.02.2022 на сумму 750 000 руб. 00 коп., №1363 от 01.03.2022 на сумму 2 000 000 руб. 00 коп.

Работы выполнены Исполнителем по Договору лишь в части на сумму 23 302 280 руб. 22 коп. и приняты по актам выполненных работ №1 от 17.02.2022, №2 от 01.03.2022, № 3 от 04.05.2022, № 4 от 06.07.2022, №5 от 07.09.2022, № 6 от 01.07.2022.

Согласно пункту 3.2 договора расчет между сторонами производится в рублях в следующем порядке:

- заказчик до начала выполнения работ оплачивает авансовый платеж в размере 30% от стоимости договора, в сумме 3 965 178 руб. 96 коп.;

- оставшиеся денежные средства - согласно фактическому выполнению работ, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании счета-фактуры и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

Срок начала работ – 01.08.2021, срок окончания работ – 29.12.2021 (пункт 3.4 договора).

24.07.2023 истец направил ответчику претензию с требованием возвратить неотработанный аванс.

В связи с неисполнением требований претензий в добровольном порядке истец обратился с настоящим иском в суд.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с  частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчик не представил доказательства выполнения работ по спорному договору.

Истец заявил об одностороннем отказе от исполнения договора, о чем надлежащим образом уведомил исполнителя.

Ответчик возражений по иску и доказательств возврата денежных средств, в суд не представил.

Ответчиком не представлены доказательства правомерности удержания им денежных средств истца, в связи с чем, требования о взыскании неотработанного аванса в сумме 6 445 225 руб. 41 коп. предъявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прома НСК», г. Барнаул (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 6 445 225 руб. 41 коп. неотработанного аванса, 55 226 руб. 00 коп.  расходов по уплате государственной пошлины, 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья                                                                                                           С.В. Янушкевич