ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600, http://www.16aas.arbitr.ru, 

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. (87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Ессентуки Дело № А18-1684/2020  06.12.2023  

Резолютивная часть постановления объявлена 29.11.2023.  Постановление изготовлено в полном объеме 06.12.2023.  

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего Семенова М.У., судей Жукова Е.В., Луговой Ю.Б., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, в отсутствие в судебном  заседании истца - общества с ограниченной ответственностью «Ингстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), ответчика - Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), подателя апелляционной жалобы прокурора Республики Ингушетия,  надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе  путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу прокурора Республики Ингушетия на дополнительное  решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 28.06.2021 по делу  

 № А18-1684/2020, 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд обратилось с исковым заявлением общество с ограниченной  ответственностью «Ингстрой» к Министерству строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства о продлении сроков государственного контракта   № 0114200000119000362_309089 от 13.05.2019.  

Определением от 26.10.2020 суд принял исковое заявление к производству, возбудил  производство по делу № А18-1684/2020.  

Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 30.10.2020 исковые  требования, ООО «Ингстрой» удовлетворены.  

Дополнительным решением от 28.06.2021 суд продлить срок государственного  контракта № 0110200000118000819_309089 от 10 июля 2018 года до 31 декабря 2021 года  заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства  и ООО «ИНГСТРОЙ».  

Не согласившись с дополнительным решением Арбитражного суда Республики  Ингушетия от 28.06.2021 прокурор Республики Ингушетия обратился в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить дополнительное  решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт. Одновременно заявлено  ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи  апелляционной жалобы. Заявитель указывает, что прокуратура к участию в деле не  привлекалась, о принятом судебном акте стало известно в ходе проведения надзорных  мероприятий.  

Истец в отзыве возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, указывает  на законность и обоснованность судебного решения. Считает, что отсутствуют правовые  основания для восстановления срока на обжалование дополнительного решения суда  первой инстанции. В тексте отзыва заявил ходатайство об истребовании из Прокуратуры  Республики Ингушетия материалов проверки в отношении общества, проведенной в 2021,  20222 и 2023.  

Согласно части 3 статьи 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (в редакции  от 29.12.2022) «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор в соответствии с  процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с  заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав  граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, т.е. в защиту  публичных интересов. При этом полномочия прокурора, участвующего в судебном  рассмотрении дел, определяются процессуальным законодательством Российской  Федерации (часть 4 статьи 35).  

Действующее процессуальное законодательство отдельно выделяет прокурора среди  лиц, участвующих в деле, наделяя его специальными полномочиями (абзац 4 части 5 статьи  4, статья 52, часть 2 статьи 198, части 1 и 9 статьи 201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 40 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лицами, участвующим в деле являются, в том числе, прокурор, государственные  органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации, граждане,  обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации. Интерес данной категории лиц,  

участвующих в деле, сводится к тому, чтобы было вынесено законное решение,  защищающее ту сторону, права которой нарушены.  

По делам, указанным в части 1 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, прокурор вправе обратиться с заявлением (иском), а также вступить  в дело, рассматриваемое судом, на любой стадии арбитражного процесса с  процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях  обеспечения законности (часть 5 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).  

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь разъяснениями, приведенными в  постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012   № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» (далее –  постановление № 15), положениями части 5 статьи 52 Кодекса, приходит к выводу к выводу  о том, что спор о продлении сроков государственных контрактов относится к категории дел,  указанных в части 1 статьи 52 Кодекса, по которым прокурор вправе вступить в дело на  любой стадии арбитражного процесса.  

Кроме того, коллегия учитывает, что предметом рассмотрения апелляционной  жалобы является незаконность продления срока государственного контракта по  строительству школы, заключенного между ООО «Ингстрой» и Министерством  строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Республике Ингушетия, в связи с  чем прокурор Республики Ингушетия обратился в арбитражный суд с апелляционной  инстанции в пределах полномочий, установленных процессуальным законодательством.  

Рассмотрев ходатайство апеллянта о восстановлении срока на обжалование  дополнительного решения, апелляционный суд приходит к следующим выводам.  

Апелляционный суд установил, что обжалуемое дополнительное решение суда  изготовлено в полном объеме 28.06.2021, в связи с чем днем окончания срока на  апелляционное обжалование решения приходится на 28.07.2021. Апелляционная жалоба  подана нарочно 10.10.2023, то есть с пропуском срока.  

В ходатайстве о восстановлении пропущенного срока на апелляционное  обжалование прокурор сослался на то, что о наличии судебного акта стало известно в ходе  проведения надзорных мероприятий.  

Учитывая право прокурора по делам, указанным в части 1 статьи 52 АПК РФ,  вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного  процесса, в целях обеспечения законности, апелляционный суд полагает возможным  восстановить апеллянту пропущенный процессуальный срок на апелляционное  обжалование.  

При этом суд отклоняет ходатайство общества об истребовании доказательств.  

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить  необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в  арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве  должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение  для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины,  препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении  ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно  находится.  

При рассмотрении ходатайства об истребовании доказательств суд учитывает, какие  обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим  доказательствам, и вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства.  

Основанием для истребования доказательств является отсутствие возможности у  участвующего в деле лица получить необходимые доказательства от лица, у которого оно  находится.  

С учетом предмета спора, имеющихся в деле документов, принимая во внимание  отсутствие доказательств, свидетельствующих о невозможности общества самостоятельно  получить необходимые документы или об отказе в их представлении соответствующими  лицами, ходатайство общества об истребовании доказательств подлежит отклонению.  

В обоснование жалобы, апеллянт ссылается на то, что при вынесении обжалуемого  решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права и не  полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.  

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте  судебного заседания, не явились, явку представителей не обеспечили.  

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом  размещена на сайте http://kad.arbitr.ru/ в соответствии положениями статьи 121  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) при неявке в судебное заседание арбитражного  суда лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного  разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.  

Правильность дополнительного решения Арбитражного суда Республики  Ингушетия от 28.06.2021 по делу № А18-1684/2020 проверена в апелляционном порядке в  соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, 13.05.2019 между истцом (подрядчик) и  ответчиком (заказчик) в соответствии с протоколом подведения итогов открытого  аукциона в электронной форме № 0114200000119000362 от 19.04.2019 заключен  Государственный контракт (далее Контракт) № 0114200000119000362_309089 от  13.05.2019 согласно которому Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству  объекта капитального строительства « Строительство школы на 320 мест в г. Карабулак»,  а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и  оплатить их.  

В соответствии с п.2.1 контракта, цена контракта составляет: 168 750 000 рублей  Пунктом 3.1 контракта, все работы должны быть выполнены:  

Начало выполнения работ: с момента заключения государственного контракта, т.е  13 мая 2019 года.  

Срок окончания работ 20 декабря 2019. 

В пункте 1 контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству  объекта капитального строительства « Строительство школы на 320 мест в г. Карабулак»  и сдать его в эксплуатацию, а также помимо строительно-монтажных работ, в предмет  Контракта включены:- исполнение гарантийных обязательств в течении Гарантийного  срока; - получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае  если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о  соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства  требованиям технических регламентов и проектной документации; - иные работы,  определенные в контракте, проектной и рабочей документации.  

Судом установлено, что обязательства по контракту не исполнялись по  независящим от воли сторон обстоятельствам.  

В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в проектно-сметную  документацию, срок выполнения работ по контракту был продлен до 13 апреля 2020 года  путем заключения дополнительного соглашения № 21 от 23 декабря 2019 года о внесении  изменений года в государственный контракт № 0114200000119000362_309089.  

26.10.2020 общество «Ингстрой» обратилось в суд с настоящим иском к  Министерству о продлении сроков государственного контракта   № 0114200000119000362_309089 от 13.05.2019.  

Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 30.10.2020 суд продлил  срок государственного контракта № 0114200000119000362_309089 от 13.05.2019 до 31  декабря 2020 года.  

Данное решение вступило в законную силу. 

Дополнительным решением от 28.06.2021 суд продлил срок государственного  контракта № 0114200000119000362_309089 от 13.05.2019г. до 31 декабря 2021 года.  

Между тем, принимая обжалуемое дополнительное решение судом первой  инстанции не было учтено следующее.  

В соответствии со ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, до  вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица,  участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если: по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили  доказательства, судом не было принято решение; суд, разрешив вопрос о праве, не указал  в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или  не указал действия, которые обязан совершить ответчик; судом не разрешен вопрос о  судебных расходах.  

В нарушение данной нормы дополнительное решение принято арбитражным судом  спустя год после вынесения решения по делу, то есть после вступления в законную силу  судебного акта.  

Арбитражный суд Республики Ингушетия 28.06.2021 фактически вынес новое  решение, которым во второй раз продлил срок государственного контракта   № 0114200000119000362 309089 от 13.05.2019 на строительство школы на 320 мест в г.  Карабулак на новый срок.  

Необоснованное продление срока государственного контракта нарушает  публичные интересы, интересы Республики Ингушетия, которая в лице Министерства  строительства республики заключила контракт на строительство социально значимого  объекта в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации. Продление  сроков государственного контракта влечет затягивание выполнения работ и  невозможность применения санкций за несвоевременное исполнение, возмещения  ущерба, причиненного государству.  

Кроме того, пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса установлено, что  государственный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости  подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке  финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.  

С учетом указанной нормы, а также статей 432 и 708 Гражданского кодекса срок  выполнения работ является существенным условием договора подряда.  

Пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса установлено, что государственный  контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению  

работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ,  способах обеспечения исполнения обязательств сторон.  

С учетом указанной нормы, а также статей 432 и 708 Гражданского кодекса срок  выполнения работ является существенным условием договора подряда.  

Согласно пункту 2 статьи 767 Гражданского кодекса изменения условий  государственного или муниципального контракта, не связанные с уменьшением размера  бюджетного финансирования, в одностороннем порядке или по соглашению сторон  допускаются в случаях, предусмотренных законом.  

В силу пункта 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта  изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данной  статьей и статьей 95 Закона N 44-ФЗ.  

В соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий  контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по  соглашению сторон в случаях, указанных в данной норме.  

Пункт 2 статьи 450 и статья 451 Гражданского кодекса предусматривают, что  договор может быть изменен по требованию одной из сторон в судебном порядке, в том  числе при существенном нарушении договора другой стороной, в случаях,  предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами или договором, а также в  связи с существенным изменением обстоятельств.  

При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они  изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор  вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся  условиях.  

Пунктом 2 статьи 451 Гражданского кодекса установлено, что если стороны не  достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно  изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть  расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 данной статьи, изменен судом  по требованию заинтересованной стороны.  

Применение положений данной нормы возможно только при наличии  совокупности фактов, свидетельствующих об исключительности, непредвидимости и  существенности возникших обстоятельств.  

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств  допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора  противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно  

превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом  условиях (пункт 4 статьи 451 Гражданского кодекса).  

При решении вопроса о расторжении или изменении договора в связи с  существенным изменением обстоятельств суду надлежит установить наличие каждого из  обязательных условий, указанных в пункте 2 статьи 451 Гражданского кодекса,  подтверждающих приоритет защиты стабильности исполнения договорных обязательств:  

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения  обстоятельств не произойдет;  

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная  сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;  

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы  соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы  для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы  того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;  

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения  обстоятельств несет заинтересованная сторона.  

Все указанные в данной норме условия должны соблюдаться одновременно. Бремя  доказывания их соблюдения лежит на лице, требующем изменения договора.  

Таким образом, доктрина существенного изменения обстоятельств (статья 451  Гражданского кодекса) подлежит применению в исключительных случаях, и может быть  применена к контрактным правоотношениям.  

Правовая позиция о возможности применения положений данной нормы к  государственным (муниципальным) контрактам изложена в определении Верховного  Суда Российской Федерации от 24.02.2022 N 308-ЭС21-20570.  

Оценивая основания наличия права на изменения сроков выполнения работ по  контракту, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.  

Согласно части 65 статьи 112 Закона N 44-ФЗ в 2020 году по соглашению сторон  допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены  единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22  настоящего Федерального закона), и (или) размера аванса (если контрактом  предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCoV, а также в иных случаях,  установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон  контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное  

настоящей частью изменение осуществляется при наличии в письменной форме  обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской  Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта  Российской Федерации, местной администрации (за исключением случая изменения  размера аванса в соответствии с настоящей частью) при осуществлении закупки для  федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд  соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в  соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта,  если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение новых  обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее  предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения  исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 настоящего  Федерального закона при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Изменение условий контракта, при наличии случаев, указанных в части 65 статьи  112 Федерального закона N 44-ФЗ допускается при наличии соответствующего  соглашения сторон.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом  или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее  обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет  ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным  вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных  условиях обстоятельств.  

Статья 401 ГК РФ устанавливает критерии, при которых то или иное  обстоятельство может быть признано обстоятельством непреодолимой силы. Верховным  Судом Российской Федерации в постановлении Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" дано  толкование содержащемуся в Гражданском кодексе Российской Федерации понятию  обстоятельств непреодолимой силы.  

Так, в пункте 8 названного постановления разъяснено, что в силу пункта 3 статьи  401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно  носило чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях и внешний по отношению  к деятельности должника характер. Требование чрезвычайности подразумевает  исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является  обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство  

признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота,  осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать  наступления этого обстоятельства или его последствий, т.е. одной из характеристик  обстоятельств непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью)  является ее относительный характер.  

В Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением  законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской  Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденном  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020 (вопрос 7), разъяснено,  что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством  непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников,  независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в  котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой  силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе  срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и  добросовестности действий должника и т.д.).  

Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой  распространения новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами  государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее  распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при  введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на  передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц,  приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых  мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., могут быть признаны  обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие  названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими  обстоятельствами и неисполнением обязательства.  

Обстоятельства непреодолимой силы нельзя установить абстрактно, без привязки к  конкретной ситуации и к конкретному должнику.  

Между тем, в рамках настоящего дела ссылка истца на распространение новой  коронавирусной инфекции носит декларативный характер и не подтверждена  доказательствами, безусловно свидетельствующими о том, что исключительно  распространение новой коронавирусной инфекции препятствовало истцу выполнить работ  в срок, установленный контрактом.  

Более того, следует отметить, что контракт заключен 13.05.2019. 

Срок выполнения работ до 20.12.2019, т.е. до введения ограничительных мер,  ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).  

В связи с чем условия контракта о сроках выполнения работ на основании пункт 65  статьи 112 Закона N 44-ФЗ также не подлежат изменению.  

Кроме того, из позиции истца следует, что фактически требование об изменении  условий контракта в части сроков выполнения работ им заявлено ввиду отсутствия  достижения результата работ.  

Истец неоднократно отмечал, что в рабочей, проектной и технической  документации им выявлялись ошибки, что не позволило приступить в установленный  срок к выполнению работ.  

Вместе с тем, указанные доводы в обоснование увеличения сроков выполнения  работ (относительно документации и др.) могут быть заявлены при применении к  подрядчику мер гражданско-правовой ответственности за просрочку исполнения  обязательства по контракту, но в рамках настоящего дела основанием к изменению срока  исполнения контракта не являются, поскольку временная невозможность исполнения  обязательств исполнителем не предусмотрена пунктом 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ в числе  случаев, в которых возможно изменение существенных условий контракта.  

Сохранение условий государственного контракта в том виде, в котором они были  изложены в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в  документации об аукционе, и исполнение контракта на этих условиях направлены на  обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной  конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного использования средств бюджетов  и внебюджетных источников, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в  сфере размещения заказов с тем, чтобы исключить случаи обхода закона - искусственного  ограничения конкуренции при проведении аукциона и последующего создания для его  победителя более выгодных условий исполнения контракта.  

Временная невозможность исполнения обязательств исполнителем не  предусмотрена пунктом 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ в числе случаев, в которых возможно  изменение существенных условий контракта (абзац 8 пункта 9 Обзора судебной практики  применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017).  

Поскольку по указанным истцом основаниям ни Законом N 44-ФЗ, ни  заключенным сторонами контрактом не предусмотрена возможность изменения  существенного условия контракта о конечном сроке выполнения работ, коллегия  

приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований общества о внесении  изменений в контракт.  

Таким образом, дополнительное решение суда первой инстанции, подлежит отмене  на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в связи с неправильным применением норм материального права.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 266 - 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство прокурора Республики Ингушетия о восстановлении пропущенного  процессуального срока подачи апелляционной жалобы удовлетворить, восстановить  пропущенный процессуальный срок подачи апелляционной жалобы.  

Дополнительное решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 28.06.2021  по делу № А18-1684/2020 отменить, отказать в принятии дополнительного решения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через  арбитражный суд первой инстанции.  

Председательствующий М.У. Семенов  

Судьи Е.В. Жуков  

 Ю.Б. Луговая