АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-13811/2024 «03» декабря 2024 года. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Д. Ширяевой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК" (ОГ ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 660099, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, Д. 22/Д, ПОМЕЩ. 77)  

к ЗИМИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665390, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.5),  

третьи лица: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665390, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.5), МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664022, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ИРКУТСК, УЛ.КРАСНЫХ МАДЬЯР, СТР. 41), ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 115088, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, УЛ. ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ, Д. 5),  

о внесении изменений в муниципальные контракты, 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297022000007 от 19 сентября 2022 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>, заключенный между ЗИМИНСКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА- ЗАСТРОЙЩИКА" и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК", изложив пункт 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:  

«2.1 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет:  

323 437 725 (триста двадцать три миллиона четыреста тридцать семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов - 53 906 287 руб. 50 коп.  

Цена первого этапа составляет 9 055 270 (девять миллионов пятьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей, в том числе НДС 20% 1 509 211 (один миллион пятьсот девять тысяч двести одиннадцать) рублей 67 копеек;  

Цена второго этапа составляет 314 382 455 (триста четырнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20% 52 397 075 (пятьдесят два миллиона триста девяносто семь тысяч семьдесят пять) рублей 83 копейки.  

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта, сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.  

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет: Не установлено.  

2.1.1 Цена настоящего Контракта включает в себя: 

2.1.1.1 Стоимость работ ПИР, что составляет: 9 055 270 (девять миллионов пятьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей, в том числе НДС 20% 1 509 211 (один миллион пятьсот девять тысяч двести одиннадцать) рублей 67 копеек.  

2.1.1.2 Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет: 314 382 455 рублей (триста четырнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20%».  

Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297022000008 от 04.10.2022 г. на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>», заключенный между ЗИМИНСКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК", изложив пункт 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:  

«2.1 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет: 456 389 037 (четыреста пятьдесят шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч тридцать семь) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 76 064 839 (семьдесят шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 50 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается:  

Цена первого этапа составляет 12 199 703 (двенадцать миллионов сто девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20 (двадцать) % 2 033 283 (два миллиона тридцать три тысячи двести восемьдесят три) рубля 95 копеек.  

Цена второго этапа составляет 444 189 333 (четыреста сорок четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 28 копеек, в том числе НДС 20  

(двадцать) % 74 031 555 (семьдесят четыре миллиона тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 55 копеек.  

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта, сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.  

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет: Не установлено.  

2.1.1. Цена настоящего Контракта включает в себя: 

2.1.1.1 Стоимость работ ПИР, что составляет: 12 199 703 (Двенадцать миллионов сто девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 72 копейки, в том числе НДС по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 2 033 283 (два миллиона тридцать три тысячи двести восемьдесят три) рубля 95 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то НДС не облагается.  

2.1.1.2 Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет: 444 189 333 (четыреста сорок четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 28 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 74 031 555 (семьдесят четыре миллиона тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 55 копеек, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то НДС не облагается.  

Внести изменения в Муниципальный контракт № 3381401297023000009 от 29.05.2023 г. на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>», заключенный между ЗИМИНСКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК", изложив пункт 2.1. муниципального контракта в следующей редакции:  

«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет 428 737 929 (четыреста двадцать восемь миллионов семьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 86 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, в сумме 71 456 321 (семьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать один) рубль 64 копейки.  

Цена первого этапа составляет 12 165 302 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста два) рубля 09 копеек, в том числе НДС 20 % (2 027 550 рублей 35 копеек);  

Цена второго этапа составляет 416 572 627 (четыреста шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 77 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 69 428 771 рубль 29 копеек.  

Цена Контракта подлежит изменению, в случае если по результатам прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства изменилась стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость прохождения государственной экспертизы. При изменении цены Контракта Сторонами заключается дополнительное соглашение. Увеличение стоимости данных работ возможно только при условии наличия у Заказчика дополнительных лимитов бюджетных обязательств.  

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта - не установлено.  

2.1.1. Цена настоящего Контракта включает в себя: 

2.1.1.1. Стоимость работ ПИР, что составляет 12 165 302 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста два) рубля 09 копеек, в том числе НДС по налоговой ставке 20 процентов.  

2.1.1.2. Стоимость работ по строительству Объекта, что составляет 416 572 627 (четыреста шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 77 копеек, в том числе НДС 20 процентов».  

Взыскать с ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665390, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.5) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОЙЦЕНТР-ИРКУТСК" (ОГ ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 660099, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, Д. 22/Д, ПОМЕЩ. 77) 18 000 рублей – расходов на оплату государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.  

Судья С. Н. Швидко