АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-14002/21

4 августа 2021 года

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   03 августа 2021 года

Полный текст решения изготовлен            4 августа 2021 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцевой Ю. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 315619600074242, ИНН 

<

***>)

о взыскании основной задолженности в сумме 1 801 336 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца - представитель не явился, извещен.

от ответчика - представитель ФИО3 по доверенности, 

установил, что ООО «Распределенная генерация» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ИП ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 801 336 руб., полученного ответчиком за счет истца в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования котельных, а также договоров подряда.

Представители в судебное заседание не явился. Поскольку, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неявка в судебное заседание представителя истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте разбирательства дела, не является препятствием для рассмотрения дела по имеющимся материалам, суд считает возможным рассмотреть исковое заявление по существу в отсутствие представителя истца.

От истца поступили дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление, просил в иске отказать.

Изучив материалы дела, суд установил следующе.

Между ООО «Распределенная генерация» (заказчик) и ИП ФИО2 (исполнитель) 04.02.2019 был заключен договор № 040219 на техническое обслуживание н текущий ремонт оборудования котельных г. Белая Калитва по следующим объектам:

- котельная по адресу: 

<

...>;

- котельная по адресу: 

<

...>;

- котельная по адресу: 

<

...> (сквер Заводской).

- котельная по адресу: 

<

...>.

Согласно п. 1.5. договора на техническое обслуживание принимаются котельные находящиеся в исправном (работоспособном) состоянии.

Согласно п. 2.1. договора техническое обслуживание начинается с 04.02.2019.

Согласно п. 3.2.1. договора исполнитель обязуется обеспечить проведение эксплуатации, технического обслуживания, текущего ремонта, дополнительных услуг, работ надлежащего качества на условиях и в порядке, которые предусмотрены договором и дополнительными соглашениями к договору.

Согласно п. 4.1. договора общая цена работ по техническому обслуживанию составляет 13 500 ООО руб.

28.02.2019 стороны ООО «Распределенная генерация» и ИП ФИО2 составили и подписали акт об оказании услуг согласно договору № 040219 от 04.02.2019 на сумму 1 488 036 руб.

31.03.2019, 30.11.2019. 31.12.2019, 31.01.2020 стороны ООО «Распределенная генерация» и ИП ФИО2 составили и подписали акты об оказании услуг согласно договору № 040219 от 04.02.2019 за март, ноябрь, декабрь 2019г., январь 2020г. соответственно на сумму 1 666 600 руб. каждый

31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019 стороны ООО «Распределенная генерация» и ИП ФИО2 составили и подписали акты об оказании услуг согласно договору № 040219 от 04.02.2019 за май, июнь, июль, август, сентябрь 2019г. соответственно на сумму 583 400 руб. каждый.

30.04.2019, 31.10.2019 стороны ООО «Распределенная генерация» и ИП ФИО2 составили и подписали акт об оказании услуг согласно договору № 040219 от 04.02.2019 за апрель, октябрь 2019г. соответственно на сумму 1 125 000 руб. каждый.

03.02.2020 стороны ООО «Распределенная генерация» и ИП ФИО2 составили и подписали акт об оказании услуг согласно договору № 040219 от 04.02.2019 за февраль 2020 г. на сумму 178 564 руб.

29.02.2020 стороны ООО «Распределенная генерация» и ИП ФИО2 составили и подписали акт об оказании услуг согласно договору № 040219 от 04.02.2019 за февраль 2020 г. на сумму 1 484 200 руб.

31.03.2020 стороны ООО «Распределенная генерация» и ИП ФИО2 составили и подписали акт об оказании услуг согласно договору №040219 от 04.02.2019 за март 2020 г. на сумму 806 420 руб.

Итого ИП Колесников оказал услуги ООО «Распределенная генерации» за период с февраля 2019г. по март 2020г. на общую сумму 15 800 620 руб.

22.03.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 220319 (далее - Договор № 220319).

Предметом настоящего договора является ремонт котельного оборудования (обслуживание котельной) по адресу: г. Белая Калитва. ул. Ветеранов 36, ул. К&тинина, д. 2а, ул. Космонавтов, д. 186.

29.03.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за март 2019 г. на сумму 677,00 руб. (

<

...>).

29.03.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за март 2019 г. на сумму 677,00 руб. (

<

...>)

29.03.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за март 2019г. на сумму 18 919 руб.(

<

...>).

22.04.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 220419 (далее - Договор № 220419).

Предметом настоящего договора является ревизия клапанов тепловых сетей котельной по адресу: 

<

...> а.

30.04.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за апрель 2019 г. на сумму 75 695 руб. (

<

...>)

24.04.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 240419 (далее - Договор № 240419).

Предметом настоящего договора является ремонт котельного оборудования (ревизия клапанов № 3 и 4) по адресу: 

<

...> а.

30.04.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за апрель 2019 г. на сумму 75 695 руб. (

<

...>)

28.04.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 280419 (далее - Договор № 280419).

Предметом настоящего договора является ремонт котельного оборудования (ревизия клапанов) по адресу: 

<

...> а.

30.04.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за апрель 2019 г. на сумму 37 859 руб. (

<

...>)

29.04.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 290419 (далее - Договор № 290419).

Предметом настоящего договора является ремонт котельного оборудования по адресу: 

<

...> д. Зв.

30.04.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за апрель 2019 г. на сумму 437 руб. (

<

...> Зв)

30.04.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИИ ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 300419 (далее - Договор № 300419).

Предметом настоящего договора является ремонт котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

30.04.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за апрель 

2019 г. на сумму 967 руб. (

<

...>)

21.05.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 210519 (далее - Договор № 210519).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

31.05.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за май 2019 г. на сумму 33 874 руб. (

<

...>).

14.05.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 140519 (далее-Договор № 140519).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв.

31.05.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за май 2019 г. на сумму 33 544 руб. (

<

...> д. Зв).

28.05.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 280519 (далее - Договор № 280519).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

31.05.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за май 2019 г. на сумму 35 775 руб. (

<

...>).

24.05.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 240519 (далее - Договор № 240519).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

31.05.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за май 2019 г. на сумму 247 руб. (

<

...>).

11.06.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 110619 (далее - Договор № 110619).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

28.06.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июнь 2019 г. на сумму 75 362 руб. (

<

...>).

13.06.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 130619 (далее - Договор № 130619).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>

28.06.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июнь 2019 г. на сумму 75 362 руб. (

<

...>).

14.06.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 140619 (далее - Договор № 140619). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 28.06.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июнь 2019 г. на сумму 46 422 руб. (

<

...>).

17.06.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 170619 (далее - Договор № 170619).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

28.06.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июнь 2019 г. на сумму 75 362 руб. (

<

...>).

18.06.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 180619-1 (далее-Договоре 180619-1). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 28.06.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июнь 2019 г. на сумму 49 086 руб. (

<

...> Зв).

20.06.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 200619-2 (далее - Договор № 200619-2). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 28.06.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июнь 2019 г. на сумму 81 321 руб. (

<

...> Зв).

01.07.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 010719 (далее - Договор № 010719). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 31.07.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июль 2019 г. на сумму 4 159 руб. (

<

...> Зв).

10.07.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 100719 (далее - Договор № 100719).Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.31.07.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июль 2019 г. на сумму 15 192 руб. (

<

...>).

05.08.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 050819 (далее - Договор № 050819). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 31.08.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за август 2019 г. на сумму 38 608 руб. (

<

...> Зв).

06.08.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 060819 (далее - Договор № 060819). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 31.08.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за август 2019 г. на сумму 66 440 руб. (

<

...> Зв).

14.08.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 140819 (далее - Договор № 140819). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 31.08.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за август 2019 г. на сумму 1 795 руб. (

<

...>).

02.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 020919-4 (далее - Договор № 020919-4). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО4 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 32977 руб. (

<

...>).

04.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 040919-2 (далее - Договор № 040919-2). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 39 053 руб. (

<

...>).

05.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 050919-1 (далее - Договор № 050919-1). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 72 182 руб. (

<

...>).

05.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 050919-2 (далее - Договор № 050919-2).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 72 182 руб. (

<

...>).

06.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 060919-1 (далее - Договор № 060919-1).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> д. Зв.

30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 78 104 руб. (

<

...> д. Зв).

06.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 060919-2 (далее - Договор № 060919-2). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> д. Зв. 30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 78 104 руб. (

<

...> д. Зв).

06.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 060919-2 (далее - Договор № 060919-2). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> д. Зв. 30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 78 104 руб. (

<

...> д. Зв).

09.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 090919 (далее - Договор № 090919). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> д. Зв. 30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 35 869 руб. (

<

...> д. Зв).

10.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 100919-1 (далее - Договор № 100919-1). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 78 104 руб. (

<

...>).

10.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 100919-2 (далее - Договор № 100919-2).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 78 104 руб. (

<

...>).

11.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 110919 (далее-Договоре 100919).

Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>.

30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 42375 руб. (

<

...>).

12.09.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 120919 (далее-Договор № 120919). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 30.09.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г. на сумму 31 090 руб. (

<

...>).

11.10.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 111019 (далее - Договор № 111019). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 31.10.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. на сумму 48 038 руб. (

<

...>).

21.10.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 211019 (далее - Договор № 211019). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 31.10.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. на сумму 8 402 руб. (

<

...> Зв).

28.10.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 281019 (далее - Договор № 281019). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 31.10.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. на сумму 8 402 руб. (

<

...>).

06.11.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 061119 (далее - Договор № 061119). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 30.11.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г. на сумму 4501 руб. (

<

...> Зв).

13.11.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 131119 (далее - Договор № 131119). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 30.11.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г. на сумму 6 767 руб. (

<

...>).

22.11.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 221119 (далее - Договор № 221119). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 31.10.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г. на сумму 3 792 руб. (

<

...>).

06.12.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 061219 (далее - Договор № 061219). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 31.12.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г. на сумму 19 204 руб. (

<

...>).

11.12.2019 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № И1219 (далее - Договор № 061219). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 31.12.2019 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г. на сумму 5 419 руб. (

<

...> Зв).

20.01.2020 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 200120 (далее - Договор № 200120). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 31.01.2020 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за январь 2020 г. на сумму 3 507 руб. (

<

...>.

21.01.2020 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 210120 (далее - Договор № 200120). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 31.01.2020 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за январь 2020 г. на сумму 7890 руб. (

<

...>).

29.01.2020 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 290120 (далее - Договор № 290120). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 31.01.2020 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за январь 2020 г. на сумму 1 104 руб. (

<

...> Зв).

08.02.2020 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 080220 (далее - Договор № 080220). Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...>. 29.02.2020 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за февраль 2020 г. на сумму 41769 руб. (

<

...>).

10.02.2020 между ООО «Распределенная генерация» (Заказчик), и ИП ФИО2 (Исполнитель) был заключен договор подряда № 100220 (далее - Договор № 080220).

            Предметом настоящего договора является ремонт теплоэнергетического котельного оборудования по адресу: 

<

...> Зв. 29.02.2020 ООО «Распределенная генерация» приняло от ИП ФИО2 выполненные работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ за февраль 2020 г. на сумму 76 427 руб. (

<

...> Зв).

Как следует из искового заявления, в феврале 2019 - марте 2020 года потребовался ремонт котельных, в частности, ремонт теплоэнергетического оборудования котельных, поэтому как полагает истец в связи с чем, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и текущий ремонт, включая комплекс подготовительных мероприятий были оказаны ответчиком некачественное не в полном объеме.

Ссылаясь на данные обстоятельства, ООО «распределенная генерация» направило ИП ФИО2 претензию от 22.03.2021, с требованием возвратить излишне уплаченную сумму в размере 1 801 336 руб., однако ответчик оставил данную претензию без ответа, что и послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд, рассмотрев исковое заявление, выслушав пояснения представителя ответчика, считает, что требование истца о взыскании неосновательного обогащения подлежит отклонению по следующим основаниям: так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации. По смыслу указанной нормы, для возникновения кондикционного обязательства необходимо наличие на стороне приобретателя увеличение стоимости собственного имущества, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества. Институт обязательств из неосновательного обогащения призван предоставить судебную защиту потерпевшим, чье имущество уменьшилось или не увеличилось с выгодой для приобретателя. Для констатации факта неосновательного обогащения необходимо отсутствие у лица оснований (юридических фактов), дающих ему право на получение имущества. Такими основаниями могут быть договоры, сделки и иные предусмотренные статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

В обоснование заявленного требования истец ссылается на то обстоятельство, что в феврале 2019 года - марте 2020 года потребовался ремонт котельных, поскольку ответчиком работы выполнены не в полном объеме и ненадлежащего качества. 

Судом установлено, что правоотношения сторон вытекают из договора подряда и регулируются положениями главы 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Пунктами 1 и 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работы цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работа в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Истец указывает, что в связи с тем, что услуги были оказаны ненадлежащим образом и не в полном объеме, а недостатки оказания услуг устранялись за счет заказчика ООО «Распределенная генерация».

Однако доказательств того, что недостатки устранены за счет истца, а также, что истец, реализовал право, предусмотренное статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, в материалы дела не  представлено.

Более того, ООО «Распределенная генерация» не конкретизированы недостатки, выполненных подрядчиком работ, не представлены доказательства, что спорные работы выполнены с отступлением от договора подряда, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования.

Также как следует из условий спорных договоров, работы по ремонту теплоэнергетического оборудования котельных не включают в себя эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и текущий ремонт, а также комплекс подготовительных мероприятий.

В соответствии с правилами, установленными статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. А статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику; акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости работ подписаны заказчиком без замечаний и возражений по качеству, объемам и стоимости выполненных работ, что свидетельствует о потребительской ценности для него результата работ.

Согласно пункту 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Истец не представил в материалы дела достаточных доказательств того, что ответчик выполнил принятую истцом работу не в согласованном сторонами размере, с недостатками, которые являются одновременно существенными и неустранимыми, и которые исключают возможность использовать результат выполненных работ, а также того, что выполненные подрядчиком работы не имеют для заказчика потребительской ценности.

В связи с данными обстоятельствами, требование истца о взыскании с ответчика денежных средств в сумме 1 801 336 руб. является необоснованным.

При таких обстоятельствах суд считает, что иск ООО «Распределенная генерация» к ИП ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения удовлетворению не подлежит.

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы относятся судом на истца, поскольку требования истца признаны судом необоснованными. 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

СудьяУкраинцева Ю. В.