РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-53053/21-126-363

03 июня 2021 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена          19 мая 2021 года

Полный текст решения изготовлен                    03 июня 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел секретарь Остроушко В.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО "ГОРОДСТРОЙИНВЕСТ" (143404, 

<

...>, Э/КАБ/П/ОФ 3/6/ 14/8 /1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2019, ИНН: 

<

***>) 

к ООО "СТРОЙТРЕСТСИТИ" (140185, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ ГОРОД, МЯСИЩЕВА 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.07.2016, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании денежных средств. 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО1 Ген. директор. 

от ответчика: ФИО2,, доверенность от 11.01.2021

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ГОРОДСТРОЙИНВЕСТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО "СТРОЙТРЕСТСИТИ" о взыскании 4 228 531 руб. 23 коп. из которых: 2 556 183 руб. 61 коп. задолженность по Договору подряда № 15-5-ОТД8 от 15 апреля 2019 года, неустойка в сумме 388 539 руб. 91 коп., гарантийное удержание в размере 776 594 руб. 31 коп.; задолженность по Договору подряда № 5-4-ОТД4 от 05 апреля 2019 года в размере 61 265 руб. 45 коп.; неустойка в размере 9 312 руб. 35 коп., гарантийное удержание в размере 224 466 руб. 48 коп.; задолженность по Договору подряда № 25-3-КК8 от 25 марта 2019 года в размере 47 161 руб. 10 коп., неустойка в сумме 7 168 руб. 49 коп., гарантийное удержание в размере 113 916 руб. 53 коп. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик представил отзыв, согласно которому против удовлетворения исковых требований не возражает.

Выслушав представителя истца и ответчика, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Как усматривается из материалов дела, 15 мая 2019 года между ООО «СтройТрестСити» (Заказчик), и ООО «ГородСтройИнвест» (Подрядчик) был заключен Договор подряда № 15-5-ОТД8, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, собственными силами и/или с привлечением третьих лиц, комплекс работ по внутренней отделке (дом №8) в объеме предусмотренном Локальной сметой на объекте: Многофункциональный комплекс №7,8 с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

<

...>, Дмитровский район, Северный административный округ города Москвы, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

Общая стоимость Договора, согласно пункта 2.1. Договора, составляет 2 563 485 руб. 14 коп.

Срок выполнения работ согласно пункту 3.1. Договора с 15 мая 2019 года по 31 июля 2019 года.

25 июня 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которому, стоимость Договора составила 3 462 661 руб. 48 коп.

25 июля 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №2, согласно которому, стоимость Договора составила 7 011 621 руб. 67 коп. Дата окончания работ 31 августа 2019 года.

23 августа 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №3, согласно которому, стоимость Договора составила 9 491 148 руб. 75 коп. Дата окончания работ 30 ноября 2019 года.

25 октября 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №4, согласно которому, стоимость Договора составила 13 350 522 руб. 53 коп. Дата окончания работ 30 ноября 2019 года.

В период времени с 15 мая 2019 года по 28 февраля 2020 года, со стороны Истца, были выполнены и приняты Ответчиком работы на сумму 15 531 886 руб., из них сумма в размере 776 594 руб. 31 коп. является гарантийным удержанием и были удержаны со стороны Ответчика, согласно условиям Договора, что подтверждается КС-2, КС-3 №1 от 31 мая 2019 на сумму 1 440 694,40 руб.; №2 от 28 июня 2019 на сумму 361 600,40 руб.; №3 от 31 июля 2019 на сумму 1 006 892,85 руб.; №4 от 30 августа 2019 на сумму 564 949,82 руб.; №5 от 30 сентября 2019 на сумму 2 159 859,46 руб.; №6 от 31 октября 2019 на сумму 2 849 679,95 руб.; №7 от 29 ноября 2019 на сумму 2 029 012,36 руб.; №8 от 31 декабря 2019 на сумму 1 564 060,71 руб.; №9 от 31 января 2020 на сумму 2 195 870,12 руб.; №10.1 от 21 февраля 2020 на сумму 915 240,00 руб.; №10.2 от 28 февраля 2020 на сумму 484 025,97 руб.

В период времени с 01 марта 2020 года по 01 июля 2020 года, стороной Истца по вышеуказанному Договору были выполнены работы на сумму 2 556 183 руб. 61 коп., что подтверждается КС-2, КС-3 №11 от 01.07.2020.

05 апреля 2019 года между ООО «СтройТрестСити» (Заказчик) и ООО «ГородСтройИнвест» (Подрядчик) был заключен Договор подряда № 5-4-ОТД4, согласно которого Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, собственными силами и/или с привлечением третьих лиц, комплекс работ по внутренней отделке (дом №4) в объеме предусмотренном Локальной сметой на объекте: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

<

...>, Дмитровский район, Северный административный округ города Москвы, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора..

Общая стоимость Договора, согласно пункта 2.1. Договора, составляет 1 626 806 руб. 77 коп.

Срок выполнения работ согласно пункту 3.1. Договора с 05 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года.

24 мая 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которому, стоимость Договора составила 3 747 533 руб. 50 коп.

25 июня 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №2, согласно которому, стоимость Договора составила 4 160 018 руб. 77 коп. Дата окончания работ 31 июля 2019 года.

25 июля 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №3, согласно которому, стоимость Договора составила 4 135 939 руб. 45 коп. Дата окончания работ 31 августа 2019 года.

23 августа 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №4, согласно которому, стоимость Договора составила 4 565 254 руб. 46 коп. Дата окончания работ 30 сентября 2019 года.

29 сентября 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №5, согласно которому, стоимость Договора составила 5 180 115 руб. 30 коп. Дата окончания работ 30 ноября 2019 года.

25 октября 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №6, согласно которому, стоимость Договора составила 5 191 828 руб. 22 коп. Дата окончания работ 30 ноября 2019 года.

25 октября 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №7, согласно которому, стоимость Договора составила 5 202 580 руб. 22 коп. Дата окончания работ 30 ноября 2019 года.

В период времени с 05 апреля 2019 года по 30 ноября 2019 года, со стороны Истца, были выполнены и приняты Ответчиком работы на сумму 4 489 329 руб. 81 коп., из них сумма в размере 224 466 руб. 48 коп. является гарантийным удержанием и были удержаны со стороны Ответчика, согласно условиям Договора, что подтверждается КС-2, КС-3 №1 от 30 апреля 2019 на сумму 640 850,09 руб.; №2 от 31 мая 2019 на сумму 1 332 446,47 руб.; №3 от 28 июня 2019 на сумму 592 661,50 руб.; №4 от 31 июля 2019 на сумму 65 385,54 руб.; №5 от 30 августа 2019 на сумму 812 505,08 руб.; №6 от 30 сентября 2019 на сумму 864 856,89 руб.; №7 от 31 октября 2019 на сумму 105 459,41 руб.; №8 от 29 ноября 2019 на сумму 75 164,83 руб.

В период времени с 01 декабря 2019 года по 01 июля 2020 года, стороной Истца по вышеуказанному Договору были выполнены работы на сумму 61 265 руб. 45 коп., что подтверждается КС-2, КС-3 №9 от 01.07.2020.

25 марта 2019 года между ООО «СтройТрестСити» (Заказчик) и ООО «ГородСтройИнвест» (Подрядчик) был заключен Договор подряда № 25-3-КК8, согласно которого Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, собственными силами и/или с привлечением третьих лиц, комплекс работ по устройству каменной кладки (дом №8) в объеме предусмотренном Локальной сметой на объекте: Многофункциональный комплекс №7,8 с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

<

...>, Дмитровский район, Северный административный округ города Москвы, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

Общая стоимость Договора, согласно пункта 2.1. Договора, составляет 1 251 128 руб. 35 коп.

Срок выполнения работ согласно пункту 3.1. Договора с 25 марта 2019 года по 31 июля 2019 года.

24 мая 2019 года, между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которому, стоимость Договора составила 3 002 598 руб. 30 коп. Дата окончания работ 30 сентября 2019 года.

В период времени с 25 марта 2019 года по 31 октября 2019 года, со стороны Истца, были выполнены и приняты Ответчиком работы на сумму 2 278 330 руб. 37 коп., из них сумма в размере 113 916 руб. 53 коп. является гарантийным удержанием и были удержаны Ответчиком, согласно условиям Договора, что подтверждается КС-2, КС-3 №1 от 30 апреля 2019 на сумму 405 612,41 руб.; №2 от 31 мая 2019 на сумму 906 590,36 руб.; №3 от 28 июня 2019 на сумму 263 304,76 руб.; №4 от 31 июля 2019 на сумму 287 854,16 руб.; №5 от 30 августа 2019 на сумму 204 087,76 руб.; №6 от 30 сентября 2019 на сумму 11 596,75 руб.; №7 от 31 октября 2019 на сумму 199 284,17 руб.

В период времени с 01 ноября 2019 года по 01 июля 2020 года, стороной Подрядчика по вышеуказанному Договору были выполнены работы на сумму 47 161 (сорок семь тысяч сто шестьдесят один) рубль 10 копеек, что подтверждается КС-2, КС-3, (№8 от 01.07.2020) и другой исполнительной документацией.

Согласно пункта 6.1.6. Договоров, Заказчик обязан принимать Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставляемых Подрядчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления акта по форме КС-2 или дать мотивированный отказ.

Ответчик мотивированного отказа от принятия работ не представил, в связи с чем работы считаются принятыми и подлежат оплате в полном объеме.

Истец направил в адрес ответчика претензии с уведомлениями о расторжении оговоров в одностороннем порядке.

Ответчиком обязательства по оплате в полном объеме не исполнены, в связи с чем у ответчика перед истцом образовалась задолженность по Договору подряда № 15-5-ОТД8 от 15 апреля 2019 года в сумме 2 556 183 руб. 61 коп., гарантийное удержание в размере 776 594 руб. 31 коп.; задолженность по Договору подряда № 5-4-ОТД4 от 05 апреля 2019 года в размере 61 265 руб. 45 коп., гарантийное удержание в размере 224 466 руб. 48 коп.; задолженность по Договору подряда № 25-3-КК8 от 25 марта 2019 года в размере 47 161 руб. 10 коп., гарантийное удержание в размере 113 916 руб. 53 коп., которые истец просит взыскать с ответчика в судебном порядке. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи искового заявления в Арбитражный суд г.Москвы.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьями 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ – обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком не представлены суду доказательства своевременной оплаты задолженности и гарантийных удержаний, в связи с чем, требование истца о взыскании задолженности по Договору подряда № 15-5-ОТД8 от 15 апреля 2019 года в сумме 2 556 183 руб. 61 коп., гарантийного удержания в размере 776 594 руб. 31 коп.; задолженности по Договору подряда № 5-4-ОТД4 от 05 апреля 2019 года в размере 61 265 руб. 45 коп., гарантийного удержания в размере 224 466 руб. 48 коп.; задолженности по Договору подряда № 25-3-КК8 от 25 марта 2019 года в размере 47 161 руб. 10 коп., гарантийного удержания в размере 113 916 руб. 53 коп., признано судом подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно пункта 10.3.1. договоров, в случае несвоевременной оплаты выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0.1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены работ.

Истец начислил неустойку по Договору подряда № 15-5-ОТД8 от 15 апреля 2019 года в размере 388 539 руб. 91 коп., неустойку по Договору подряда № 5-4-ОТД4 от 05 апреля 2019 года в размере 9 312 руб. 35 коп., неустойку по Договору подряда № 25-3-КК8 от 25 марта 2019 года в размере 7 168 руб. 49 коп., представил расчет, который судом проверен, признан верным, в связи с чем требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ.

На основании ст.ст. 2, 307, 309, 310, 330, 711, 746 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176 АПК РФ,  арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО "СТРОЙТРЕСТСИТИ" (140185, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ ГОРОД, МЯСИЩЕВА 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.07.2016, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "ГОРОДСТРОЙИНВЕСТ" (143404, 

<

...>, Э/КАБ/П/ОФ 3/6/ 14/8 /1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2019, ИНН: 

<

***>) 2 556 183 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят три) руб. 61 коп. задолженности, 776 594 (семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) руб. 31 коп. суммы гарантийного удержания, 388 539 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 91 коп. неустойки по договору от 15.04.2019 №15-5- ОТД8, 61 265 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят пять) руб. 45 коп. задолженности, 224 466 (двести двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 48 коп. суммы гарантийного удержания, 9 312 (девять тысяч триста двенадцать) руб. 35 коп. неустойки по договору от 05.04.2019 № 5-4-ОТД4, 47 161 (сорок семь тысяч сто шестьдесят один) руб. 10 коп. задолженности, 113 916 (сто тринадцать тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 53 коп. суммы гарантийного удержания, 7 168 (семь тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 49 коп. неустойки по договору от 25.03.2019 №25-3-КК8, а также 43 923 (сорок три тысячи девятьсот двадцать три) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков