Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-3406/2023

г. Рязань

23 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 октября 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 23 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Афанасьевой И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Инком" (ОГРН 

<

***>, г. Рязань) 

к акционерному обществу "Окское" (ОГРН 

<

***>; Рязанская область) 

о взыскании неустойки за период с 21.12.2021 по 26.12.2022 в сумме 246 059 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: в заседании 10.10.2023г. -  ФИО2, представитель по доверенности от 15.03.2021, (в заседании 17.10.2023г. - не явился, извещён);

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности №22/12/2022-160 от 22.12.2022;

в судебном заседании 10.10.2023 объявлялся перерыв до 17.10.2023, о чем размещено объявление на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в сети Интернет, после перерыва заседание продолжено, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инком" обратилось в арбитражный суд Рязанской области с иском к акционерному обществу "Окское" о взыскании неустойки за период с 21.12.2021 по 26.12.2022 в сумме 246 059 руб. 

Представитель истца в судебном заседании 10.10.2023г. поддержал исковые требования в полном объёме. 

Представитель ответчика исковые требования не признаёт, ссылаясь на отсутствие просрочки в оплате подрядных работ.

Рассмотрев материалы дела, оценив и исследовав представленные в дело доказательства, арбитражный суд пришёл к выводу о частичном  удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Из материалов дела следует: между ООО "Инком" (подрядчик) и АО "Окское" (заказчик) были заключены договоры подряда  № ДУ-58 от 02.12.2021 года,  № ДУ-06 от 10.02.2022 года,  № ДУ-54 от 24.11.2021 года,  № ДУ-60 от 31.08.2021 года,  № ДУ-44 от 02.09.2021 года, № ДУ-12 от 02.032.2022 года,  № ДУ-05 от 08.02.2022 года, № ДУ-11 от 02.03.2022 года по выполнению работ в соответствие с условиями договоров по целому ряду объектов. 

Предметом  договоров является обязанность ООО "Инком" выполнить комплекс электромонтажных работ, а АО "Окское" оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных договорами подряда.

Из пунктов 2.3 договоров № ДУ-58 от 02.12.2021 года,  № ДУ-06 от 10.02.2022 года следует, что заказчик обязуется произвести оплату стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания отдельного акта приемки выполненной работы, включая срок устранения дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В пункте 2.4 договоров № ДУ-58 от 02.12.2021 года,  № ДУ-06 от 10.02.2022 года  указано, что расчеты по договорам осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями на основании счетов, выставленных подрядчиком. В счете обязательно должны быть указаны номер и дата договора.

Из пунктов 2.3 договоров  № ДУ-54 от 24.11.2021 года,  № ДУ-60 от 31.08.2021 года,  № ДУ-44 от 02.09.2021 года, № ДУ-12 от 02.032.2022 года,  № ДУ-05 от 08.02.2022 года, № ДУ-11 от 02.03.2022 года   следует, что  заказчик обязуется уплатить аванс в размере 100 % стоимости материалов и оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора. Остальная часть цены работы оплачивается заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания отдельного акта приемки выполненной работы, включая срок устранения дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

Пунктом 2.4 договоров  № ДУ-54 от 24.11.2021 года,  № ДУ-60 от 31.08.2021 года,  № ДУ-12 от 02.032.2022 года,  № ДУ-05 от 08.02.2022 года, № ДУ-11 от 02.03.2022 года предусмотрено, что проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате подрядчиком. Подрядчик не имеет права на получение с заказчика процентов, предусмотренных п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты. 

В пункте 2.5 договоров  № ДУ-54 от 24.11.2021 года,  № ДУ-60 от 31.08.2021 года,   № ДУ-12 от 02.032.2022 года,  № ДУ-05 от 08.02.2022 года, № ДУ-11 от 02.03.2022 года указано, что заказчик обязуется произвести оплату стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания отдельного акта приемки выполненной работы, включая срок устранения дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

Согласно пункту 4.2 договоров заказчик обязуется осуществить с участием подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 рабочих дней со дня уведомления подрядчика об их выполнении.

Пунктом 4.10 договоров установлено, что при отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сдачи/приёмки выполненных работ. Если заказчик не подписывает акты о приемке выполненных работ и при этом не предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания, то по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления указанных документов подрядчиком заказчику, в том числе по средствам электронной связи, работы считаются принятыми заказчиком и подлежат оплате.

Договорами (пункт 9.5) предусмотрена ответственность за нарушение заказчиком исполнения обязательств (пунктов 2.4 и 4.9), согласно которых подрядчик вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10%.

Между сторонами были подписаны акты сдачи-приёмки № 127 от 13.12.2021г, № 8 от 11.02.2022, № 43 от 31.08.2022, № 44 от 31.08.2022, № 45 от 02.09.2022, № 48 от 16.09.2022, № 52 от 18.10.2022, № 47 от 16.09.2022 (л.д. 77-84).

Выполненные истцом работы оплачены ответчиком платежными поручениями: № 55 от 10.01.2022, № 1377 от 28.02.2022, № 7966 от 22.09.2022, № 8010 от 23.09.2022, № 8056 от 26.09.2022, № 8219 от 30.09.2022, № 9127 от 25.10.2022, № 11421 от 27.12.2022, № 8292 от 03.10.2022 (л.д. 85-93).

По расчету истца ответчик произвёл оплату выполненных истцом работ с нарушением сроков оплаты, установленных договорами.

Истец на основании пункта 9.5 договоров за период с 21.12.2021 по 26.12.2022 начислил неустойку в сумме 246 059 руб. направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить неустойку (л.д. 66-67).

Претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд.

Частично удовлетворяя  исковые требования, арбитражный суд исходит из следующего.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как – то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В рассматриваемом случае обязательства сторон возникли из договоров № ДУ-58 от 02.12.2021 года,  № ДУ-06 от 10.02.2022 года,  № ДУ-54 от 24.11.2021 года,  № ДУ-60 от 31.08.2021 года,  № ДУ-44 от 02.09.2021 года, № ДУ-12 от 02.032.2022 года,  № ДУ-05 от 08.02.2022 года, № ДУ-11 от 02.03.2022 года, которые по своей правовой природе являются договорами подряда и регулируется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со  статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со статьями 309, 310  Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается  факт выполнения истцом работ по договорам № ДУ-58 от 02.12.2021 года,  № ДУ-06 от 10.02.2022 года,  № ДУ-54 от 24.11.2021 года,  № ДУ-60 от 31.08.2021 года,  № ДУ-44 от 02.09.2021 года, № ДУ-12 от 02.032.2022 года,  № ДУ-05 от 08.02.2022 года, № ДУ-11 от 02.03.2022 года  и их принятия ответчиком материалами дела подтверждены.

По условиям договоров (пункт 4.10) при отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сдачи/приёмки выполненных работ. Если заказчик не подписывает акты о приемке выполненных работ и при этом не предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания, то по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления указанных документов подрядчиком заказчику, в том числе по средствам электронной связи, работы считаются принятыми заказчиком и подлежат оплате.

Согласно порядку оплаты, установленного договорами, заказчик обязуется произвести оплату стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания отдельного акта приемки выполненной работы, включая срок устранения дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

Из представленных в материалы дела актов сдачи-приёмки и платежных поручений судом установлено следующее.

Акт № 127 от 13.12.2021г. направлен истцом ответчику - 13.12.2021, подписан ответчиком 27.12.2021, замечания по акту отсутствуют (л.д. 77).

По условиям договора акт должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней, соответственно, если акт подписан истцом  13.12.2021, следовательно, ответчик должен был  подписать акт - 20.12.2021, а оплатить  в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта, то есть - 27.12.2021.

Ответчик оплатил работы по данному акту 10.01.2022,  что подтверждается платежным поручением № 55 от 10.01.2022г (л.д. 85).

По данному акту просрочка в оплате составляет 13 дней  с 28.12.2021 по 09.01.2022.

Акт  № 8 от 11.02.2022г. направлен истцом ответчику - 11.02.2022, подписан ответчиком - 04.03.2022, замечания по акту отсутствуют (л.д. 78).

По условиям договора акт должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней, соответственно, если акт подписан истцом  11.02.2022, следовательно, ответчик должен был  подписать акт - 18.02.2022, а оплатить  в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта, то есть - 28.02.2022.

Ответчик оплатил работы по данному акту 28.02.2022,  что подтверждается платежным поручением № 1377 от 28.02.2022г (л.д. 86).

Следовательно, просрочка в оплате по данному акту отсутствует.

Акт № 43 от 31.08.2022 направлен истцом ответчику - 15.09.2022, подписан ответчиком - 22.09.2022, замечания по акту отсутствуют (л.д. 79).

Данный акт подписан в установленные договором сроки. Оплата по акту произведена ответчиком в день подписания - 22.09.2022г., что подтверждается платежным поручением № 7966 от 22.09.2022г (л.д. 87), следовательно, просрочка в оплате по данному акту отсутствует.

Акт № 44 от 31.08.2022 направлен истцом ответчику - 15.09.2022, подписан ответчиком - 22.09.2022, замечания по акту отсутствуют (л.д. 80).

Данный акт подписан в установленные договором сроки. Оплата по акту произведена ответчиком - 23.09.2022г., что подтверждается платежным поручением № 8010 от 23.09.2022г (л.д. 88), следовательно, просрочка в оплате по данному акту отсутствует.

Акт № 45 от 02.09.2022 направлен истцом ответчику - 21.09.2022г., подписан ответчиком - 26.09.2022, замечания по акту отсутствуют (л.д. 81).

Данный акт подписан в установленные договором сроки. Оплата по акту произведена ответчиком в день подписания - 26.09.2022г., что подтверждается платежным поручением № 8056 от 26.09.2022г. (л.д. 89), следовательно, просрочка в оплате по данному акту отсутствует.

 Акт № 48 от 16.09.2022 направлен истцом ответчику - 21.09.2022, подписан ответчиком - 02.10.2022, замечания по акту отсутствуют (л.д. 82).

По условиям договора акт должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней, соответственно, если акт подписан истцом  21.09.2022, следовательно, ответчик должен был  подписать акт - 28.09.2022, а оплатить  в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта, то есть - 05.10.2022.

 

Ответчик оплатил работы по данному акту 30.09.2022,  что подтверждается платежным поручением № 8219 от 30.09.2022г (л.д. 90).

Следовательно, просрочка в оплате по данному акту отсутствует.

Акт № 52 от 18.10.2022 направлен истцом ответчику - 21.11.2022, ответчиком подписан - 22.12.2022, замечания по акту отсутствуют (л.д. 83).

По условиям договора акт должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней, соответственно, если акт подписан истцом  21.11.2022, следовательно, ответчик должен был  подписать акт - 28.11.2022, а оплатить  в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта, то есть - 05.12.2022.

Ответчик оплатил работы по данному акту 25.10.2022 (платежное поручение № 9127 от 25.10.2022 - л.д. 53) и 27.12.2022 (платежное поручение № 11421 от 27.12.2022 - л.д. 55).

Следовательно, просрочку в оплате по данному акту следует считать  с 06.12.2022 по 26.12.2022 от суммы оплаченной - 27.12.2022 по платежному поручению № 11421 от 27.12.2022. 

Акт № 47 от 16.09.2022 направлен истцом ответчику - 21.09.2022, подписан ответчиком - 02.10.2022, замечания по акту отсутствуют (л.д. 84).

По условиям договора акт должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней, соответственно, если акт подписан истцом  21.09.2022, следовательно, ответчик должен был  подписать акт - 28.09.2022, а оплатить  в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта, то есть - 05.10.2022.

Ответчик оплатил работы по данному акту 03.10.2022,  что подтверждается платежным поручением № 8292 от 03.10.2022г (л.д. 93).

Следовательно, просрочка в оплате по данному акту отсутствует.

Таким образом, судом установлено нарушение со стороны ответчика сроков оплаты выполненных истцом работ только в отношении двух актов:   № 127 от 13.12.2021г. в отношении суммы 127 172 руб. 52 коп. и  № 52 от 18.10.2022г. в отношении суммы 2 968 350 руб.

Истец просит суд взыскать с ответчика неустойку за период с 21.12.2021 по 26.12.2022 в сумме 246 059 руб. 

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 9.5 договора предусмотрена ответственность ответчика  за нарушение исполнения обязательств (пунктов 2.4 и 4.9) в виде  неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10%.

Возражения ответчика в части того, что данным пунктом не предусмотрено взыскание неустойки за нарушение обязательств ответчиком по оплате выполненных истцом работ, судом отклоняются, поскольку в пункте 2  имеются подпункты 2.1 - 2.7 и в том числе подпункт 2.4 договора, из которых следует установленный сторонами порядок оплаты.

Соответственно, у истца имеется право на взыскание с ответчика неустойки за нарушение сроков оплаты подрядных работ. 

Судом установлена просрочка в оплате актов № 127 от 13.12.2021г. и  № 52 от 18.10.2022г., следовательно, неустойку следует начислять в следующем порядке:

- по акту № 127 от 13.12.2021г. (127 172 руб. 52 коп. х 13 дней (с 28.12.2021 по 09.01.2022) х 0,1% = 1 653 руб. 24 коп.;

 

- по акту  № 52 от 18.10.2022г. в части суммы 2 968 350 руб. (2 968 350 руб. х 21 день (с 06.12.2022 по 26.12.2022) х 0,1% = 62 335 руб. 35 коп.

Общая сумма неустойки составляет 63 988 руб. 59 коп.

Таким образом, правомерно заявленной неустойкой является сумма  63 988 руб. 59 коп., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, во взыскании остальной неустойки следует отказать.

Расходы по госпошлине относятся на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с акционерного общества "Окское" (ОГРН 

<

***>; Рязанская область) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Инком" (ОГРН 

<

***>, г. Рязань)  неустойку в сумме 63 988 руб. 59 коп., судебные расходы по госпошлине в сумме 2 060 руб.

В остальной части иска отказать.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

 

 

Судья                                                                        И.В. Афанасьева