100214_2558177  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  (Резолютивная часть)

Дело № А74-326/2023

26 апреля 2023 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи М.А. Лукиной, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению федерального  государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная  сеть» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к публичному акционерному обществу  «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании в течение тридцати  календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия  договоров № 20.1900.371.22 от 16.02.2022, № 20.1900.367.22 от 18.02.2022, № 20.1900.369.22  от 16.02.2022, № 20.1900.370.22 от 18.02.2022 об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям,  

о взыскании судебной неустойки (астрент) в размере 5000 руб. по каждому договору  за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении 30 календарных дней  со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 2 месяцев со  дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договоров   № 20.1900.371.22 от 16.02.2022, № 20.1900.367.22 от 18.02.2022, № 20.1900.369.22 от  16.02.2022, № 20.1900.370.22 от 18.02.2022 об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям и предоставить возможность действиями заявителя  осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и  фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления  энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии в соответствии с  законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих  продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми  заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;  

 - выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; 

- построить новую ЛЭП-0,4 кВ, расположенную не далее 15 метров во внешнюю  сторону от границы участка заявителя (п.7 технических условий);  

- выполнить необходимые мероприятия для обеспечения второй категории  надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.  

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и  

радиовещательная сеть» 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

3. В случае неисполнения настоящего судебного акта взыскать с публичного  акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» судебную  неустойку в размере 5000 руб. по каждому договору за каждый календарный день  неисполнения решения суда по истечении 2 месяцев со дня вступления решения суда в  законную силу по день его фактического исполнения.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья М.А. Лукина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.11.2022 4:30:00Кому выдана Лукина Марина Анатольевна