АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-233876/22-5-1750

г. Москва

23 мая 2023 года

Резолютивная часть решения суда объявлена 22 марта 2023 года Решение суда в полном объеме изготовлено 23 мая 2023 года Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселёвой Е.Н., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт  экономики, информатики и систем управления» (123104, 

<

...>, стр1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2014, ИНН:  

<

***>)  

к ответчику: Акционерное общество «Научно-производственный центр «Вигстар»  (117545, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 01.12.2011, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 960 000 руб. в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания 

УСТАНОВИЛ:

АО «ЦНИИ ЭИСУ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы  с иском о взыскании с АО «НПЦ «Вигстар» (далее – ответчик) долга за выполненные  работы в размере 960 000 рублей.  

Заявление мотивировано тем, что ответчик не выполняет обязательства по оплате  выполненных работ. Представитель истца требования поддержал в полном объеме.  

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам,  изложенным в отзыве.  

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в  совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя  подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

Согласно материалам дела, между АО «НПЦ «Вигстар» (Заказчик) и АО «ЦНИИ  ЭИСУ» (Исполнитель) заключен договор от 01.07.2013 №  1120187311701010128000310/101/37-13 на выполнение СЧ ОКР «Сфера-СП ЦНИИ  ЭИСУ» (далее - СЧ ОКР).  

Срок окончания выполнения работ по договору в соответствии с дополнительным  соглашением № 4 от 27.05.2019 - 01.07.2023 (по этапу 2 срок окончания работ20.01.2020).  

Этап 1 СЧ ОКР завершен, расчет Исполнителем получен. 

По этапу 2 «Отработка и корректировка системных протоколов, определенных  «Перечнем системных протоколов» в части касающейся, на этапе изготовления опытных  образцов и НЭО составных частей КС 14К044» (в ред. дополнительного соглашения № 4  от 27.05.2019) Исполнителем были выполнены следующие работы:  

- проведен анализ разработанных на этапе 1 системных протоколов сопряжения  спутниковых каналов с IP сетями ОАЦСС.  

- проведена их корректировка по результатам замечаний и согласование с  заинтересованными организациями;  

- разработана Программа и методики предварительных испытаний Протоколов на  этапе разработки и НЭО составных частей КС 14К044.  

Материалы надлежащим образом оформлены и высланы в адрес Заказчика, в т.ч.:  - доработанные Протоколы (н/исх. № 5306 дсп от 07.10.2015);  

- доработанные проекты протоколов сопряжения спутниковых каналов с  аппаратурой IP сетей (н/исх. № 2470 дсп от 07.07.2017);  

- титульные листы системных протоколов; - утвержденные системные Протоколы КС14К044 в части альбома № 10; 

- программа и методики предварительных испытаний системных протоколов  сопряжения спутниковых каналов с IP сетями ОАЦСС на этапе разработки и НЭО  составных частей КС 14К044 (н/исх. № 1752 от 14.09.2020).  

Вместе с тем, наземная экспериментальная отработка (НЭО) производимая  головным Исполнителем, не проведена, Протоколы не оформлены, ввиду отсутствия  результатов НЭО.  

В связи с чем, корректировка Протоколов по результатам НЭО составных частей  КС 14К044 истцом не проводилась.  

В соответствии с обращением Заказчика (исх. № 03/576 от 01.03.2021)  Исполнителем подготовлены и высланы адрес АО «НПЦ «Вигстар» предложения по  организации дальнейших работ по СЧ ОКР (н/исх. № 411 от 15.03.2021), а также учтенные  копии системных протоколов, разработанных в рамках СЧ ОКР «Сфера-СП ЦНИИ  ЭИСУ» (н/исх № 675дсп от 16.04.2021).  

Однако на выданные предложения ответ не получен. Совместное письмо АО  «ЦНИИ ЭИСУ» и 504 ВП МО РФ н/исх. № 901 от 26.05.2021 также осталось без ответа.  

Учитывая, что разработка опытных образцов в рамках СЧ ОКР не предусмотрена,  Исполнителем предложено участие в НЭО изготовителей БРТК и ЗС. В адрес Заказчика  высланы предложения по отработке системных протоколов на этапе разработки и НЭО  составных частей КС 14К044 (н/исх. № 776дсп от 29.04.2021).  

Однако ответа получено не было, информация о проведении НЭО в адрес АО  «ЦНИИ ЭИСУ» не поступила.  

Таким образом, работы по этапу 2, в указанной части, были выполнены в 2019 году  (н/исх. № 3219дсп от 01.10.2018 и н/исх. № 2558дсп от 26.09.2019), а окончательно  завершить работы по результатам НЭО не удалось по причинам, не зависящим от  Исполнителя (АО «ЦНИИ ЭИСУ»).  

Исх. от 08.06.2022 № 471 АО «ЦНИИ ЭИСУ» и 504 ВП МО РФ (Исполнителя)  уведомили (совместно) Заказчика и ВП Заказчика, что решением Арбитражного суда  города Москвы от 21.01.2022 по делу № А40-231010/18-103-210Б АО «ЦНИИ ЭИСУ»  признано несостоятельным (банкротом) и обратились с просьбой определить порядок  прекращения СЧ ОКР. На указанное обращение ответ также не получен.  

В соответствии с п. 22 договора № 1120187311701010128000310/101 /37-13 от  01.07.2013 истцом в адрес ответчика выслан комплект расчетно-калькуляционных  

материалов по обоснованию фактических затрат, понесенных Исполнителем в ходе  выполнения работ по этапу 2 СЧ ОКР (н/исх. от 05.08.2022 № 616).  

Между тем, ответ либо протокол согласования фактических затрат в редакции  Заказчика в адрес Исполнителя не поступал.  

Таким образом, по мнению истца, ответчик необоснованно уклоняется от  согласования фактических затрат истца по этапу 2 СЧ ОКР и их оплаты.  

Протоколом согласования договорной цены от 27.03.2017, ранее согласованным  Заказчиком, была установлена цена этапа 2 в размере 1 600 000,00 руб. Заказчиком  выплачен аванс по этапу 2 в размере 640 000 руб. (п/п № 581 от 19.03.2014).  

Таким образом, остаток задолженности по 2 этапу исходя из ранее согласованной  цены оставляет 960 000 руб. (1 600 000 - 640 000).  

Исх. № 729 от 21.09.2022 года на основании ст. 719 ГК РФ в адрес ответчика было  направлено уведомление об отказе от исполнения договора с требованием об оплате  задолженности в размере 960 000 рублей.  

Поскольку требование не было исполнено ответчиком, истец обратился в суд с  требованием о взыскании задолженности.  

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации,  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда  указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между  сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных  этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными  правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за  нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения  работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.  

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик  обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.  

Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами.  

При этом, согласно требованиям ст. 720 Гражданского кодекса Российской  Федерации, заказчик обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу, а при обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

В соответствии с нормой ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации  качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора  подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно  предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом,  иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в  момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или  определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока  быть пригодным для установленного договором использования, а если такое  использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата  работы такого рода, при этом, п. 2 названной статьи предусмотрено, что если законом,  иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены  обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик,  действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти  обязательные требования.  

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не  подтверждены документально и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.  

Истец со своей стороны указал, что в соответствии с редакцией Перечня и  содержания работ по этапам, указанного в приложении № 1 к Дополнительному  соглашению № 4 от 27.05.2019, существо этапа 1 заключалось разработке системных  протоколов. Каких-либо согласований системных протоколов с заинтересованными  лицами, их утверждение этапом 1 не предусматривалось. В связи с чем, акт приемки этапа  1 был подписан сторонами еще 29.11.2013 с предоставлением проектов протоколов (на  CD-диске).  

Вместе с тем, для выполнения НЭО и корректировки протоколов по результатам  НЭО необходимо было провести анализ разработанных на этапе 1 системных протоколов  сопряжения спутниковых каналов с IP сетями ОАЦСС, провести их корректировку по  результатам замечаний от заинтересованных лиц и провести дальнейшее согласование со  всеми заинтересованными организациями, разработать Программу и методику  предварительных испытаний Протоколов на этапе разработки и НЭО составных частей  КС 14К044.  

Все эти действия выполнены истцом за рамками приемки 1 этапа и выполнялись  как составная часть работ этапа 2.  

Сторонами не оспаривается, что все материалы надлежащим образом оформлены и  высланы в адрес Заказчика после окончания этапа 1, который выполнен в 2013 году.  

При этом протоколы сопряжения спутниковых каналов (представлены в материалы  дела) согласовывались в 2018 - 2019 г.г. с заинтересованными лицами ФГБУ «16 ЦНИИ»  Минобороны России, АО «НПП Радиосвязь», а также с АО «НПЦ «Вигстар» и головным  заказчиком - АО «ИСС» (утверждены Главным конструктором ОКР «Сфера»).  

Письмом от 10.08.2020 года № 1632/03 АО «НПЦ «Вигстар» само просило АО  «ЦНИИ ЭИСУ» разработать программы и методики системных протоколов и в срок до  19.09.2020 выслать вышеуказанные программы и методики для отработки системных  протоколов на этапе изготовления и НЭО (предварительных испытаний) составных  частей, разработанных АО «ЦНИИ ЭИСУ».  

14.09.2020 года исх. № 1752 АО «ЦНИИ ЭИСУ» направило в адрес АО «НПЦ  «Вигстар» на согласование проект указанной программы и методик, после чего ответчик  письмом от 01.03.2021 № 03/576 направил АО «ЦНИИ ЭИСУ» согласованную АО «НПЦ  «Вигстар» Программу и методики отработки системных протоколов, разработанных в  рамках СЧ ОКР «Сфера-СП-ЦНИИ ЭИСУ».  

Согласно ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую  работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по  договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической  документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению  договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих  о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный  срок (статья 328).  

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии  обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения  договора и потребовать возмещения убытков.  

Порядок продолжения работ или прекращения СЧ ОКР ответчиком не определен. 

При этом, как указано выше, решением Арбитражного суда города Москвы от  21.01.2022 по делу № А40-231010/18-103-210Б АО «ЦНИИ ЭИСУ» признано  несостоятельным (банкротом).  

С учетом фактических обстоятельств, истцом в адрес ответчика было направлено  уведомление № 729 от 21.09.2022 года. об отказе от исполнения договора.  

В соответствии с п. 22 договора № 1120187311701010128000310/101/37-13 от  01.07.2013 Исполнителем в адрес Заказчика выслан комплект расчетно-калькуляционных  

материалов по обоснованию фактических затрат, понесенных Исполнителем в ходе  выполнения работ по этапу 2 СЧ ОКР (н/исх. от 05.08.2022 № 616).  

Затраты истца на выполнение работ (услуг) после приемки 1-го этапа составили  согласно представленной в материалы дела отчетной калькуляцией затрат за 2014-2022гг.  2 502 455,02 руб., однако ответчик, в нарушение принятых на себя обязательств  необоснованно уклонился от рассмотрения материалов истца.  

Поскольку Заказчик необоснованно уклоняется от согласования фактических  затрат по этапу 2 СЧ ОКР, истец заявил требование об оплате задолженности в размере  960 000 руб. исходя из того, что Протоколом согласования договорной цены от 27.03.2017,  согласованным Заказчиком, установлена цена этапа 2 в размере 1 600 000,00 руб.  Заказчиком выплачен аванс по этапу 2 в размере 640 000 руб. (п/п № 581 от 19.03.2014).  Таким образом, остаток задолженности составляет 960 000 руб.  

Ссылка ответчика на письмо истца от 15.03.2021 № 411, в данном случае правового  значения не имеет, поскольку, в данном письме истец предлагал ответчику завершить не  только этап 2, но и все работы в целом во втором квартале 2021 г., исключив из договора  этапы 3 и 4, однако не указывал того, что работы по 2 этапу не ведутся либо не  завершены.  

Доводы о том, что обязанность ответчика предоставлять истцу результаты НЭО ни  договором, ни техническим заданием не предусмотрена, являются необоснованными,  поскольку в данном случае речь идет не о результатах НЭО, а о том, что истец должен  быть извещен ответчиком о дате их проведения и принять участие в НЭО.  Самостоятельное выполнение данных работ условиями контракта не предусмотрено и не  представляется возможным.  

Также необоснованными являются доводы ответчика о том, что истцом не сделано  предложений по догоночному графику, поскольку истец не обладает информацией о  выполнении работ другими исполнителями для проведения НЭО по изделию в целом,  соответственно и сроки проведения отработки системных протоколов на этапе  изготовления и НЭО изделий не могли быть указаны истцом.  

Ответчиком не опровергнут довод истца о том, что на дату рассмотрения спора  комиссия по НЭО не создана. Сведений о проведении НЭО, которое по своей сути  представляет определенные испытания основного изделия, готовность которого  материалами дела не подтверждена, не имеется.  

В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2001, на который ссылается  ответчик Исполнитель составной части ОКР выполняет следующие функции: участвует в  государственных испытаниях, проводимых заказчиком (при «необходимости») и в  межведомственных испытаниях проводимых головным исполнителем ОКР (п. 4.1.3 ГОСТ  РВ 15.203-2001).  

Порядок выполнения работ на этапе проведения государственных  (межведомственных) испытаний, их организация, содержание и последовательность,  включая подготовку к проведению испытаний, права и обязанности государственной  комиссии (межведомственной комиссии) по испытаниям, порядок их материально- технического обеспечения установлены в ГОСТ РВ 15.210 (п. 5.6.2 ГОСТ РВ 15.203-2001).  

О готовности опытного образца изделия к государственным испытаниям головной  исполнитель по согласованию с ВП, закрепленным за ним, уведомляет заказчика (п. 6.2.6  ГОСТ РВ 0015.210-2020).  

Заказчик по получении уведомления принимает решение о возможности  проведения государственных испытаний, которое доводит до головного исполнителя  (исполнителя СЧ ОКР) в форме заключения (решения), а также сообщает о принятом  решении организации, проводящей испытание (п. 6.2.7 ГОСТ РВ 0015.210-2020).  

Государственные испытания проводят государственные комиссии или  специализированные институты, испытательные полигоны и центры заказчика (п. 6.2.8  ГОСТ РВ 0015.210-2020).  

Из смысла п. 6.2.10 ГОСТ РВ 0015.210-2020 следует, что одним из документов,  являющихся основанием для начала проведения государственных испытаний, является  уведомление о готовности опытного образца изделия к государственным испытаниям.  

Такое уведомление Минобороны РФ предоставляет головному исполнителю ОКР,  заключившему госконтракт с Минобороны России (АО «ИИС») и далее головной  исполнитель уведомляет своего субисполнителя (АО «НПЦ «Вигстар»), которое в свою  очередь уведомляет АО «ЦНИИ ЭИСУ».  

Следовательно, АО «ЦНИИ ЭИСУ», должно было участвовать в НЭО, проводимых  заказчиком, на основании уведомления АО «НПЦ «Вигстар», без него АО «ЦНИИ ЭИСУ»  не имело возможности окончательно сдать 2-й этап.  

При этом, ответчик письмом от 25.10.2019 № 1983/03 приостанавливал выполнение  работ по договору, заключенному между сторонами, после чего письмом от 27.11.2019 №  2294/6/03 просил возобновить работы.  

Однако вопреки доводам ответчика уведомление о готовности головного изделия и  возможности проведения НЭО протоколов сопряжения в адрес истца не поступило.  

Таким образом, истец документально подтвердил невозможность окончания работ  при отсутствии его вины.  

С учетом фактических обстоятельств дела и признания истца несостоятельным  (банкротом), суд считает отказ истца от исполнения договора и требование об оплате  стоимости работ правомерным.  

В соответствии с п. 11 б) договора, заказчик обязан возместить исполнителю  фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в  договорной цене СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в случае досрочного прекращения работ по  договору.  

При этом, суд также принимает во внимание, что фактические затраты  существенно превышают согласованную стоимость работ по этапу 2.  

С учетом изложенного, требования истца о взыскании задолженности за  выполненные работы в сумме 960 000 рублей подлежат удовлетворению.  

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 395, 401 Гражданского  кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Научно-производственный центр «Вигстар»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества  «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем  управления» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) долг 960 000 (девятьсот  шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. расходов по  оплате госпошлины.  

Взыскать с Акционерного общества «Научно-производственный центр «Вигстар»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской  Федерации 16 200 (шестнадцать тысяч двести) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева