Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-6216/2020

«17»

сентября

2020 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«14»

сентября

2020 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«17»

сентября

2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО РСУ «ОРЕНТЕКС» к  АО «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» о взыскании долга в 2 425 607,94 рублей и процентов на день оплаты долга

при участии в судебном заседании:

от истца: н/я

от ответчика:  ФИО2 по доверенности

установил.

Общество с ограниченной ответственностью РСУ «ОРЕНТЕКС»  обратилось в суд с иском (уточненным в заседании 14.09.2020 года) к акционерному обществу «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ»  о взыскании основного долга в сумме 1 425 607,94 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2020 года по 14.09.2020 года в сумме 42 442,19 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами на  дату оплаты долга.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен договор подряда от 03.03.2020 года № 809183.

По условиям договора ООО РСУ «ОРЕНТЕКС» (подрядчик) обязался выполнить подводно-технические работы по удалению со дня акватории посторонних конструкций находящихся в грунте согласно техническому заданию.

В соответствии с пунктом 4.1 договора стоимость работ согласована 4 325 808,86 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 договора оплата выполненных работ производится в течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

В материалы дела представлены подписанные сторонами акты о выполнении работ от 26.03.2020 года № 1 на сумму 1 810 200,92 рублей, от 14.04.2020 года № 2 на сумму 2 425 607,94 рублей, всего на сумму 4 235 808,86 рублей.

В связи с тем, что работы в полном объеме не оплачены, истец обратился в суд с настоящим иском.

Доказательств оплаты работ в сумме 1 425 607,94 рублей на дату рассмотрения дела в  суде ответчиком не представлено.

Требования истца в части основного долга в сумме 1 425 607,94 рублей подлежат удовлетворению на основании положений статей 309,  310 ГК РФ положений договора.

Согласно уточненному расчету за период с 21.04.2020 года по 14.09.2020 года подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 42 442,19 рублей.

Положениями договора ответственность заказчика в виде неустойки за нарушение сроков оплаты работ не предусмотрена.

С учетом срока оплаты работ, согласованного в  пункте 5.1 проценты подлежат начислению за период с 12.05.2020 года по 14.09.2020 года и составят 34 588,79 рублей.

Требования истца  в части процентов подлежат удовлетворению на основании положений статьи 395 ГК РФ.

Оснований для снижения размера процентов судом не установлено.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью РСУ «ОРЕНТЕКС» (ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме 1 425 607,94 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.05.2020 года по 14.09.2020 года в сумме 34 588,79 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начислению на сумму долга с 15.09.2020 года по дату погашения задолженности с применением при расчете ключевой ставки ЦБ России, действующей в соответствующие периоды, расходы по госпошлине  в сумме 27 432 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  РСУ «ОРЕНТЕКС»  из Федерального бюджета госпошлину в сумме 7626 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н.Шкутко