Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-21221/2023

г. Хабаровск

14 января 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С. Овчинниковой,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску некоммерческой организации «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680030, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ДальPемCтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680033, 

<

...>)  

об обязании устранения недостатков выполненных работ, 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать обществj с ограниченной ответственностью «ДальPемCтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 01.06.2025 года безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по договору подряда № 202250000011900206 от 09.09.2019 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:  

- устранить имеющиеся отклонения слоя штукатурки из плоскости по горизонтали и вертикали;  

- устранить отслоение штукатурного слоя цоколя от основания на участках со стороны дворового фасада, в средней и верхней части цоколя со стороны уличного фасада и со стороны фасада, обращенного к переулку Облачному;  

- устранить имеющиеся на межпанельных швах раскрытые трещины наружного слоя, следы увлажнения, не связанные с расположением трубопроводов дренажных систем кондиционеров. Устранить трещины на отделочном покрытии цоколя, совпадающие с расположением межпанельных швов;  

- выполнить работы по устройству гидрофобизации покрытия цоколя; 

- выполнить работы по устранению повреждений плиты козырька подъезда № 3, а именно: устранить разрушения плиты с выпадением отдельных фрагментов, оголения арматуры в местах опирания плиты на колонну, трещины плиты в месте расположения арматурных стержней, а также устранить коррозию арматурных стержней и разрушения отделочных покрытий.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы на оплату государственной пошлины в размере 6000 рублей, расходы на оплату экспертизы в размере 110 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья А.Ю. Милосердова