Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-19235/2021

г. Хабаровск

24 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.03.2022 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:

судьи  Дюковой С.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Востокстройпуть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 6800006, 

<

...>)

к Акционерному обществу «Ванинский морской торговый порт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682860, 

<

...>)

о взыскании 4 659 627 руб. 20 коп.

при участии в судебном заседании: 

от истца - ФИО2 - директор, 

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Востокстройпуть» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к Акционерному обществу «Ванинский морской торговый порт» о взыскании долга в размере 4 659 627 руб. 20 коп.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился, отзыв на иск не представил, возражений не заявил.

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено по существу в отсутствие ответчика. 

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 28.06.2021 г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № ОЗ-319-2021, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работу, предусмотренную настоящим договором, а заказчик обязуется принять ее результат и оплатить в соответствии с условиями договора.

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли здания Управления порта (работы).

Перечень и состав работ, требования к результату указаны в Приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.

Согласно пункту 4.1 договора, общая стоимость работ по настоящему договору составляет 6 034 014 руб. 72 коп., кроме того НДС (20 %) в размере 1 206 802 руб. 94 коп.

В соответствии с пунктом 4.2 договора, оплата по договору осуществляется на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ КС-2, справки КС-3 по фактически выполненных объемам и счета подрядчика в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта КС-2, получения заказчиком счета.

В соответствии с актами о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2021 г., № 2 от 29.10.2021 г., подписанными сторонами без замечаний и возражений, истцом работы выполнены, а ответчиком приняты на сумму 7 159 627 руб. 20 коп.

Оплата выполненных работ ответчиком не произведена, в результате чего сложилась задолженность в размере 4 659 627 руб. 20 коп.

Истец неоднократно обращался к ответчику с требованиями об уплате долга № 101 от 07.09.2021 г., № 147 от 06.12.2021 г.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд признал иск подлежащим удовлетворению частично в силу следующего.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является передача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке (статьи 711 и 746 Кодекса).

Материалами дела подтверждается выполнение истцом и принятие ответчиком работ на общую сумму 7 159 627 руб. 20 коп.

Возражения ответчика с указанием на несоблюдение истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора судом отклонены как несоответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Доказательств исполнения обязательства по оплате выполненных истцом работ в полном объеме ответчик не представил.

Кроме того, актом сверки взаимных расчетов за период 2021 г., подписанным обеими сторонами подтверждена задолженность ответчика в сумме 4 659 627 руб. 20 коп.

На основании изложенного требование о взыскании долга в размере 4 659 627 руб. 20 коп. подлежит удовлетворению.

Расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями  167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Востокстройпуть» долг в сумме 4 659 627 руб. 20 коп., а также расходы по  госпошлине в  сумме 46 298 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

     Судья            С.И. Дюкова