Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-28069/2020  « 18 » января 2021 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску управления капитального строительства  администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Эльмонт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность от 12.01.2021 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эльмонт» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  

муниципальному контракту № 1094881 от 06.12.2018г. за счет собственных средств в  

течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  

настоящему делу устранить недостатки, выявленные на объекте дошкольное  

образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская  

область, 

<

...>, а именно: 1. По благоустройству территории: - соблюсти расстояние между низом заборного ограждения и отметкой земли; 

- установить МАФы и спортивное оборудование на площадках согласно  

паспортов и в соответствии с СанПиН - 12 шт.; 

- окрасить стойки и прогоны козырьков центрального входа, площадью 8,0 кв.м.;  

- перед входом на центральное крыльцо установить тактильное напольное  

покрытие, площадью 4,0 кв.м. 2. по подвальному помещению: 

- устранить места протечек по техническим помещениям на площади 1000 кв.м.  3. по помещению кухни:  

- заменить сгоревший крышной вентилятор на вентиляционной системе В5;  

- подключить к электроснабжению овощерезки, согласно рабочих мест, в  

количестве 3 шт. 

- по коридору заменить потолочную плитку «Амстронг» в местах протечек,  

площадью 0,5 кв.м.; 

- облицевать внутренние откосы подъемников № 1, 2, 3 по 2 и 3 этажам,  

площадью 7,2 кв.м. 4. по лестничным пролетам: - на поручнях перил лестничных маршей удалить излишки монтажной пены. 5. по групповым помещениям 1-го этажа здания: В группе № 14: - заменить двери в буфетной и в спальне, в количестве 2 шт.; 

- в туалетной комнате устранить шероховатую поверхность перегородок между  

кабинками, площадью 0,4 кв.м.; В группе № 15: - закрепить плинтус в районе туалетной комнаты; 

- установить дверь (расслоилась) в буфетной, в количестве 1 шт.;  

- в туалетной комнате устранить шероховатую поверхность перегородок между  

кабинками, площадью 0,4 кв.м.; 6. по групповым помещениям 2-го этажа здания: В группе № 18: 

- в туалетной комнате устранить шероховатую поверхность перегородок между  

кабинками, площадью 0,4 кв.м. 7. по групповым помещениям 3-го этажа здания: В группе № 22: 

- в методическом кабинете восстановить потолочное покрытие, окрасив места  

протечек на площади 1,8 кв.м. В группе № 23: 

- заменить в помещении спальни на оконном проеме лопнувшее стекло  

стеклопакета, площадью 1,4 кв.м. 

В противопожарной двери на лестнице Лм-1 заменить сломанные ручки, в  

количестве 2 шт. По коридору заменить потолочную плитку «Амстронг» в местах  

протечек, площадью 1,5 кв.м. Установить дверь в кабинете делопроизводителя, в количестве 1 шт. 8. по кровле здания: 

- устранить места протечек кровли (в районе шахты лифта, методического  

кабинета и кухни), площадью 1,5 кв.м. 9. по зданию в целом: 

- восстановить крышки на распределительных коробках внутренней системы  

электроснабжения подвальных помещений (водомерный узел), 1 этаж и кровле (на  

системе вентиляции - кровельных вентиляторах); 

- укомплектовать, собрать и установить учебные доски в групповых  

помещениях, в количестве 13 шт. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эльмонт» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину 6 000  

руб. 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  

месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  

Арбитражный суд Волгоградской области. 

Судья Стрельникова Н.В.